COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
46
Data
20-02-17	Oggetto:	PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 (PAR-FSC) - LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DI ROCCAPORENA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - ATTO DI SOTTOMISSIONE	

N. 160 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciassette,il giorno  venti del mese di febbraio ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.
PREMESSO:
CHE la Regione dell’Umbria, viste le delibere CIPE n. 41/2012 e n. 14/2013 (Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013), visto il PAI (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Tevere aggiornato ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, visto l’Accordo di Programma sottoscritto in data 03/11/2010 con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, modificato con apposito atto integrativo sottoscritto in data 14/07/2011, e successivo atto integrativo del 20/12/2013, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria e considerata la copertura finanziaria dell’Accordo di programma in argomento garantita da risorse provenienti dal bilancio regionale e dal Ministero (MATTM), con Deliberazione di G.R. n. 298 del 17/03/2014, ha individuato ulteriori soggetti attuatori degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ricompresi nell’accordo di programma nel cui territorio ricadono interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico ed assegnato agli stessi Enti i relativi finanziamenti.
CHE, tra gli Enti attuatori ricompresi nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2007-2013 (PAR-FSC) è inserito anche il Comune di Cascia per il seguente intervento:

Ente attuatore	Denominazione intervento	Località	Importo	
Comune di Cascia	Completamento della messa in sicurezza del costone	Roccaporena	1.133.433,71	

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 386 del 11/09/2014, è stato approvato il Verbale della Commissione di gara del giorno 24/06/2014 relativa alla Procedura negoziata indetta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo dell’intervento di che trattasi.
CHE, con Deliberazione di G.M. n. 7 del 02/02/2015, è stato approvato il Progetto esecutivo redatto dall'Ing. D’Ottavio Natale nell’importo complessivo di Euro 1.133.433,71 di cui Euro 806.650,70 per lavori così di seguito suddivisi:

IMPORTO DEI LAVORI a misura soggetto a ribasso 	479.871,94	
COSTI DELLA MANO D’OPERA LAVORAZIONI non soggetto a ribasso	282.178,32	
ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso	17.564,44	
COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso (da computo)	27.036,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI   (A)	806.650,70	

RILEVATO:
CHE, con Determinazione n. 117 del 20/03/2015, è stata indetta la gara di appalto dei lavori di che trattasi mediante Procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), prima fattispecie, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m. e verifica di congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86 comma 1 del medesimo Decreto.
CHE, con il medesimo atto, è stato approvato l’Avviso di Pre-informazione per “Manifestazione di interesse” predisposto dal Responsabile del procedimento.
CHE, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n° 161 del 23/04/2015, è stato approvato il Verbale predisposto in data 17/04/2015 dal Responsabile del procedimento a seguito del sorteggio pubblico effettuato tra i n. 109 operatori economici che hanno aderito alla manifestazione di interesse e con il quale sono state individuate n° 15 (Quindici) imprese a cui spedire l’invito di partecipazione alla procedura negoziata.
CHE, con Determinazione n. 314 del 01/09/2015, è stato approvato il Verbale della Commissione di gara del 18/05/2015 nonché affidati in via definitiva i lavori di che trattasi alla ditta PMP Costruzioni Srl, con sede legale in Via Duchessa Iolanda n. 26 -13100 Vercelli (VC) la quale è risultata aggiudicataria, in base al metodo di gara adottato, con il ribasso d'asta del 36,535%.
CHE, a seguito della cessazione del servizio in data 05/09/2015 del Responsabile unico del procedimento Geom. Gerometta Ennio, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 373 del 14/10/2015 si è proceduta alla nomina, quale nuovo Responsabile unico del Procedimento, del Geom. Nardi Marcello dell’Ufficio tecnico LL.PP.;
CHE, a seguito del contratto di appalto Rep. n. 3265 del 14/10/2015, in data 27/10/2015 si è provveduto alla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice PMP Costruzioni Srl.
CHE, con Determinazione n. 173 del 02/05/2016, è stata liquidata all’Impresa PMP Costruzioni Srl l’Anticipazione del 20% sull’importo contrattuale per un importo di Euro 126.265,90 oltre all’I.V.A. in misura del 22% in deroga all’art. 140 del DPR 207/2010 così come disposto dalla L. 98/2013, nella misura estesa dal 10 al 20%  di cui alla proroga fino al 31/07/2016 prevista dall’art. 7, comma 1 del D.L. n. 210 del 30/12/2015.
CHE, con Determinazione n. 238 del 17/06/2016, è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 nonché liquidato il Certificato di pagamento n. 1 dell’importo di Euro 154.337,22 al netto delle ritenute di legge, oltre all'I.V.A.
CHE, con Determinazione n. 351 del 05/10/2016, è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 nonché liquidato il Certificato di pagamento n. 2 dell’importo di Euro 265.970,80 al netto delle ritenute di legge, oltre all'I.V.A.
DATO ATTO:
CHE la D.L. ha chiesto l’autorizzazione per la redazione di una perizia di variante suppletiva ai lavori approvati, da redigersi ai sensi dell’art. 132 c. 1 lett. b) e c)  del D.Lgs. n. 163/06 e s.m., finalizzata alla funzionalità dell’opera nonché per motivi imprevisti ed imprevedibili quali i ripetuti eventi sismici del 24 Agosto, 26 e 30 Ottobre 2016 che hanno interessato il territorio del comune di Cascia e quindi anche l’area oggetto dell’intervento.
CHE la Regione dell’Umbria, con nota pec assunta al prot. n. 1.836 del 13/02/2017, ha comunicato il nulla osta all’utilizzo delle economie di gara per per la copertura finanziaria dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante proposta.

VISTA la Perizia di Variante suppletiva di variante (nota di trasmissione assunta al Prot. n° 2.034 del 17/02/2017) redatta dalla D.L. Ing. D’Ottavio Natale per i lavori di “Completamento della messa in sicurezza del costone di Roccaporena” nell'importo complessivo di Euro 1.069.013,14 così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO di PERIZIA	Euro	
IMPORTO DEI LAVORI a misura soggetto a ribasso 	570.800,81	
A detrarre il ribasso d’asta del 36,535	-208.542,08	
IMPORTO NETTO LAVORI	362.258,73	
COSTI DELLA MANO D’OPERA LAVORAZIONI non soggetto a ribasso	335.563,38	
ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso	20.862,60	
COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso (da computo)	32.336,00	
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI  (A)	751.020,71	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
Spese tecniche Progetto, Coordinamento della Sicurezza, Contabilità, Direzione lavori e Collaudo	84.114,32	
Cassa Previdenza 4%	3.364,57	
Relazione Geologica idrogeologica compresa Cassa geologi	5.362,46	
Collaudo Statico compresa Cassa 4%	2.077,73	
I.V.A. 22% Spese tecniche progetto, Coordinamento della Sicurezza, D.L., Geologia e Collaudo statico	20.882,20	
Accantonamento  Incentivo art. 92 D.Lgs. n. 163/2006	4.318,11	
Imprevisti e Somme a disposizione per prove < 5%	17.616,89	
I.V.A. 22% sui Lavori	165.224,56	
Spese di gara (ANAC) e pubblicitarie 	405,00	
Fondo Accordi Bonari = 2% lavori	12.626,59	
Espropri e Servitù	0,00	
Indagini, prove materiali e prove in sito	2.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   (B)	317.992,43	
TOTALE GENERALE ( A + B )	1.069.013,14	
		
ECONOMIE	64.420,57	
SOMMANO	1.133.433,71	

VISTO lo Schema dell'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 16/02/2017 con cui la ditta appaltatrice PMP Costruzioni Srl si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, entro lo stesso tempo previsto per i lavori principali, aumentato di giorni 90 (novanta), per un maggiore importo di Euro 119.691,22 al netto del ribasso d'asta del 36,535%, oltre all'I.V.A. in misura del 22%.

VISTO che nulla osta all'approvazione della perizia di variante suppletiva in quanto la stessa risulta conforme a quanto disposto dall'art. 132 (Varianti in corso d’opera) comma 1 lett. b) e c) del Decreto Lgs. n° 163/06 e s.m.) e che l’aumento dell’importo dei lavori  trova la copertura di spesa con il riutilizzo delle economie di gara.

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la Perizia di variante suppletiva e lo schema dell'Atto di sottomissione  sottoscritto dalla Ditta appaltatrice PMP Costruzioni Srl nell’importo complessivo di Euro 1.069.013,14. 
RITENUTO di dover procedere all'imputazione della spesa di Euro 119.691,22, oltre ad Euro 26.332,07 per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 146.023,29 pari ai maggiori lavori assunti dalla ditta PMP Costruzioni Srl con lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla Perizia suppletiva.
RITENUTO di dover procedere all'imputazione della spesa di Euro 16.472,69 (comprensive di cassa prev. 4% ed I.V.A. al 22%) per le maggiori spese tecniche spettanti al D.L. e coord della sicurezza Ing. D’Ottavio Natale.

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/06);

PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l’assunzione e la liquidazione di detta spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposita determinazione.

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la Perizia di Variante suppletiva di variante (nota di trasmissione assunta al Prot. n° 2.034 del 17/02/2017), redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) del Decreto Lgs. n° 163/06 e s.m., dal D.L. Ing. D’Ottavio Natale per i lavori di “Completamento della messa in sicurezza del costone di Roccaporena” nell'importo complessivo di Euro 1.069.013,14 così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO di PERIZIA	Euro	
IMPORTO DEI LAVORI a misura soggetto a ribasso 	570.800,81	
A detrarre il ribasso d’asta del 36,535	-208.542,08	
IMPORTO NETTO LAVORI	362.258,73	
COSTI DELLA MANO D’OPERA LAVORAZIONI non soggetto a ribasso	335.563,38	
ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso	20.862,60	
COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso (da computo)	32.336,00	
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI  (A)	751.020,71	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
Spese tecniche Progetto, Coordinamento della Sicurezza, Contabilità, Direzione lavori e Collaudo	84.114,32	
Cassa Previdenza 4%	3.364,57	
Relazione Geologica idrogeologica compresa Cassa geologi	5.362,46	
Collaudo Statico compresa Cassa 4%	2.077,73	
I.V.A. 22% Spese tecniche progetto, Coordinamento della Sicurezza, D.L., Geologia e Collaudo statico	20.882,20	
Accantonamento  Incentivo art. 92 D.Lgs. n. 163/2006	4.318,11	
Imprevisti e Somme a disposizione per prove < 5%	17.616,89	
I.V.A. 22% sui Lavori	165.224,56	
Spese di gara (ANAC) e pubblicitarie 	405,00	
Fondo Accordi Bonari = 2% lavori	12.626,59	
Espropri e Servitù	0,00	
Indagini, prove materiali e prove in sito	2.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   (B)	317.992,43	
TOTALE GENERALE ( A + B )	1.069.013,14	
		
ECONOMIE	64.420,57	
SOMMANO	1.133.433,71	

2) DI APPROVARE lo Schema dell'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 16/02/2017 con cui la ditta appaltatrice PMP Costruzioni Srl si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, entro lo stesso tempo previsto per i lavori principali, aumentato di giorni 90 (novanta), per un maggiore importo di Euro 119.691,22 al netto del ribasso d'asta del 36,535%, oltre all'I.V.A. in misura del 22%.

3) DI IMPUTARE la spesa relativa ai maggiori lavori assunti dalla ditta PMP Costruzioni Srl con lo schema dell’atto di sottomissione, pari ad Euro 119.691,22 oltre ad Euro 26.332,07 per I.V.A. al 22% per un totale di Euro 146.023,29 al bilancio del corrente esercizio finanziario - Cap. 2606 art. 18 - Codice bilancio 09.01-2.02.01.09.014 (“LAVORI MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE L'ABITATO DI ROCCAPORENA FINANZ. CONTR.REG.LE - CORR. E 534/18).

•	Codice CUP: C46B14000000002  -  Codice C.I.G. Lavori: 6122273381

4) DI IMPUTARE la spesa di Euro 16.472,69 (omnicomprensivi di Contr. Int. 4% ed I.V.A. 22%)  pari  alle  spese  tecniche  dovute  al D.L. Ing. D’Ottavio Natale per la redazione della Perizia di Variante suppletiva, contabilità,  Direzione Lavori e coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione al bilancio del corrente esercizio finanziario - Cap. 2606 art. 18 - Codice bilancio 09.01-2.02.01.09.014 (“LAVORI MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE L'ABITATO DI ROCCAPORENA FINANZ. CONTR.REG.LE - CORR. E 534/18).

•	Codice CUP: C46B14000000002  -  Codice C.I.G. Spese Tecniche Perizia: Z5C1D86A2A

5) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

6) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Il rup: Nardi Marcello

Il Responsabile Area Tecnica LL.PP.: Emili Gino
46

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    GINO EMILI

======================================================================

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-05-17 al 18-05-17 Registro Albo pretorio n. 996

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
RESPONSABILE A.AMMINISTRATIVA
Li, 03-05-17                       F.to GINO EMILI 

======================================================================

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
GINO EMILI 
Li,