COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
102
Data
22-02-19	Oggetto:	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI IN LOC PIE' LA SELVA - NEL COMUNE DI CASCIA - SISMA 2016	

N. 223 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciannove,il giorno  ventidue del mese di febbraio ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.
PREMESSO:
CHE, con Deliberazione di Giunta Municipale N. 158 del 11/10/2018, è stato approvato il Progetto Esecutivo per i lavori di Messa in sicurezza immobili in loc. Piè La Selva – nel Comune di Cascia – Sisma 2016 redatto dal Dott. Ing. Sergio Salvatori con studio in via Cortonese n. 76/F, 06127 Perugia (Pg); P.I. 01428400541, iscritto presso l'albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia, al n. A788, per un importo lavori di Euro 34.053,54;

CHE con determina a contrarre ed affido lavori n. 441 del 23/11/2018, i lavori di MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI IN LOC. PIE’ LA SELVA – NEL COMUNE DI CASCIA – SISMA 2016, alla Ditta Romani Massimiliano con sede in loc. Avendita, 06043 Cascia (PG), C.F. RMNMSM71T23I291S, per Euro 16.949,22, oltre ad EURO 1.694,92 per I.V.A. 10%, per un totale di EURO 18.644,14, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a;

CHE in data 05/12/2018 è stata inviata con prot n. 91778 la pec alla Ditta Romani Massimiliano, con la scrittura privata tra le parti, per l’affido dei lavori di cui trattasi;

DATO ATTO:
CHE, a seguito di circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto,  la D.L. ha chiesto l’autorizzazione per la redazione di una perizia di variante ai lavori approvati, redatta ai sensi dell’art. 149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 poichè, durante l’esecuzione dei lavori, in seguito ad indagini specifiche che si sono potute effettuare solo in corso d’opera, sono emerse circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto che richiedono migliorie al progetto esecutivo, consistenti in:
•	Ricostruzione di parte delle murature crollate al piano primo;
•	Realizzazione di intonaco armato su di una sola faccia dove precedentemente era previsto l’intonaco civile;
•	P.O. di una copertura leggera in acciaio e lamiera sopra i vani dove è previsto il consolidamento della volta;

VISTA la Perizia suppletiva di Variante, assunta al prot 14309 del 31/12/2018, redatta dall' Ing. Sergio Salvatori per i lavori di Messa in sicurezza immobili in loc. Piè La Selva – nel Comune di Cascia – Sisma 2016, nell'importo complessivo di Euro € 34.053,54  così suddiviso nel Quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA	
MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI IN LOC. PIÈ LA SELVA – NEL COMUNE DI CASCIA – SISMA 2016 	
A  Lavori soggetti a ribasso 	€ 29.497,29   	
B  Costi della sicurezza 	€ 1.211,18     	
C   IMPORTO DEI LAVORI (A+B) 	€ 30.708,47  	
D   Ribasso d’asta 35,49%	€ 10.467,45	
E   IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA	€ 20.241,02	
F     I.V.A. 10% sull’importo lavori 	€      2.024,10 	
G    Incentivo Art. 113 Dlgs 20/2016 s.m.i. (2% imp. lavori)	€      614,17	
H     Spese tecniche: progettazione, direz. lavori, coord.sicurezza	€   5.251,16	
 I     Contributi integrativi previdenziali su spese tecniche (4%)	€ 210,05       	
L    I.V.A 22% su spese tecniche 	€ 1.201,47    	
M    Economie di gara	€  4.511,57	
N    TOTALE SPESE GENERALI	€  13.812,52	
TOTALE PROGETTO (C+N)	€ 34.053,54 	

VISTO che nulla osta all'approvazione della perizia di variante suppletiva in quanto la stessa risulta conforme a quanto disposto dall'art. 149 (Varianti in corso d’opera), comma 2 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.) e che l’aumento dell’importo dei lavori  trova la copertura di spesa con il parziale utilizzo delle economie di gara.

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la Perizia di variante suppletiva, sottoscritta dalla Ditta ROMANI MASSIMILIANO;

RITENUTO di dover procedere all'imputazione della spesa di Euro 3.291,80  oltre ad Euro 329,18 per I.V.A. al 10%, per un totale di Euro 3.628,98 pari ai maggiori lavori assunti dalla ditta ROMANI MASSIMILIANO con la Perizia suppletiva per lavori di Messa in sicurezza immobili in loc. Piè La Selva – nel Comune di Cascia – Sisma 2016, al corrente esercizio finanziario Codice di Bilancio 11.02-2.02.03.06.999  - Capitolo 2851/11 EMERGENZA SISMICA 2016- LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI NELLE FRAZIONE MALTIGNANO LOC.PIE' LA SELVA FIN.CONTRIBUTO REG.LE CORR.E 581 ART.11  e che al progetto è stato attribuito il seguente 
•	codice CUP: C45J18000060002
•	Codice CIG: Z5125EE266

5) RITENUTO DI DOVER SPOSTARE la spesa omnicomprensiva  di Euro 5.692,13 (omnicomprensivo di oneri prev. Ed IVA) quali spese tecniche per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo per lavori di Messa in sicurezza immobili in loc. Piè La Selva – nel Comune di Cascia – Sisma 2016 redatto dall’Ing. Sergio Salvatori con studio in via Cortonese n. 76/F, 06127 Perugia (Pg); P.I. 01428400541, iscritto presso l'albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia, al n. A789, già imputata  al Capitolo 2850 / art. 18 - CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURA IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI CORR.E 580/15  - imp. 558 01/10/2018 - con DG n. 344 del 01/10/2018 e di imputare la stessa, Euro 5.692,13 (omnicomprensivo di oneri prev. Ed IVA), oltre all’importo omnicomprensivo di Euro 970,55 quale maggiori lavori assunti con la perizia di variante, per un totale di Euro 6.662,68 al corrente esercizio finanziario Codice di Bilancio 11.02-2.02.03.06.999 - Capitolo 2851/11 EMERGENZA SISMICA 2016- LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI NELLE FRAZIONE MALTIGNANO LOC.PIE' LA SELVA FIN.CONTRIBUTO REG.LE CORR.E 581 ART.11;
Cig spese tecniche: Z7225EE46E

VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento dei contratti pubblici) per la parte ancora in vigore;

PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la l’imputazione e la liquidazione di dette spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposite determinazioni.

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la Perizia suppletiva di Variante per i lavori di Messa in sicurezza immobili in loc. Piè La Selva – nel Comune di Cascia – Sisma 2016 redatto dall’Ing. Sergio Salvatori nell'importo complessivo di Euro 34.053,54   così suddiviso nel Quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA	
MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI IN LOC. PIÈ LA SELVA – NEL COMUNE DI CASCIA – SISMA 2016 	
A  Lavori soggetti a ribasso 	€ 29.497,29   	
B  Costi della sicurezza 	€ 1.211,18     	
C   IMPORTO DEI LAVORI (A+B) 	€ 30.708,47  	
D   Ribasso d’asta 35,49%	€ 10.467,45	
E   IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA	€ 20.241,02	
F     I.V.A. 10% sull’importo lavori 	€      2.024,10 	
G    Incentivo Art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i.	€      614,17	
H     Spese tecniche: progettazione, direz. lavori, coord.sicurezza	€   5.251,16	
 I     Contributi integrativi previdenziali su spese tecniche (4%)	€ 210,05       	
L    I.V.A 22% su spese tecniche 	€ 1.201,47    	
M    Economie di gara	€  4.511,57	
N    TOTALE SPESE GENERALI	€  13.812,52	
TOTALE PROGETTO (C+N)	€ 34.053,54 	

2) DI DARE ATTO che la perizia di variante suppletiva risulta conforme a quanto disposto dall'art. 149 (Varianti in corso d’opera) comma 2 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.i e che l’aumento dell’importo dei lavori (entro il quinto d’obbligo) trova copertura con il parziale utilizzo delle economie di gara.

3) DI IMPUTARE la spesa relativa ai maggiori lavori assunti dalla ditta ROMANI MASSIMILIANO con l’approvazione della Perizia Supplettiva di Variante, pari ad Euro 3.291,80  oltre ad Euro 329,18 per I.V.A. al 10%, per un totale di Euro 3.628,98 al corrente esercizio finanziario Codice di Bilancio 11.02-2.02.03.06.999  - Capitolo 2851/11 EMERGENZA SISMICA 2016- LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI NELLE FRAZIONE MALTIGNANO LOC.PIE' LA SELVA FIN.CONTRIBUTO REG.LE CORR.E 581 ART.11  e che al progetto è stato attribuito il seguente 
•	codice CUP: C45J18000060002
•	Codice CIG: Z5125EE266

4) DI SPOSTARE la spesa omnicomprensiva  di Euro 5.692,13 (omnicomprensivo di oneri prev. Ed IVA) quali spese tecniche per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo per lavori di Messa in sicurezza immobili in loc. Piè La Selva – nel Comune di Cascia – Sisma 2016 redatto dall’Ing. Sergio Salvatori con studio in via Cortonese n. 76/F, 06127 Perugia (Pg); P.I. 01428400541, iscritto presso l'albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia, al n. A789, già imputata  al Capitolo 2850 / art. 18 - CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURA IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI CORR.E 580/15  - imp. 558 01/10/2018 - con DG n. 344 del 01/10/2018 e di imputare la stessa, Euro 5.692,13 (omnicomprensivo di oneri prev. Ed IVA), oltre all’importo omnicomprensivo di Euro 970,55, quale maggiori lavori assunti con la perizia di variante, per un totale di Euro 6.662,68 al corrente esercizio finanziario Codice di Bilancio 11.02-2.02.03.06.999 - Capitolo 2851/11 EMERGENZA SISMICA 2016- LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI NELLE FRAZIONE MALTIGNANO LOC.PIE' LA SELVA FIN.CONTRIBUTO REG.LE CORR.E 581 ART.11;
Cig spese tecniche: Z7225EE46E

5) DI DARE ATTO CHE le spese assunte con il presente atto rientrano tra quelle eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 e trova, quindi, copertura negli stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio dei Ministri con le delibere del 25/08/2016, 27/10/2016 e 31/10/2016 e comunque riferite alle attività di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell’O.D.P.C. n. 388/2016;

6) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del DecretoLgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

7) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

102

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    MARCACCIOLI LUCIA

======================================================================

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-05-19 al 29-05-19 Registro Albo pretorio n. 694

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 14-05-19                       F.to VULPIANI SIMONA 

======================================================================

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA 
Li,