COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
65
Data
06-03-17	Oggetto:	FORNITURA URGENTE DI MATERIALE A PIE' DOPERA PER LA REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI AREE DESTINATE ALLINSTALLAZIONE DEI MODULI ABITATIVI NELLE FRAZIONI DI AVENDITA E DI CASCIA CAPOLUOGO APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI	

N. 198 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciassette,il giorno  sei del mese di marzo ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.
PREMESSO: 
CHE in data 24 agosto 2016 si è verificato un eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo, compreso il  territorio di questo Comune;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al  centottantesimo giorno  dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTA l'O.c.d.p.c. n. 400 del 31 ottobre 2016 avente per oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" con cui all'art. Art. 5 "Deroghe" al comma 3 prevede che per  l'espletamento delle attività previste dall’ordinanza i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli  63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;
VISTA inoltre la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con al quale viene disposta l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30/10/2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

CONSIDERATO che tali fenomeni hanno causato numerosi e notevoli danni a diverse unità abitative con relativa dichiarazione di inagibilità, per cui si è reso necessario prevedere l’installazione di container collettivi per il ricovero della popolazione di un’area individuata nei pressi del centro abitato di Avendita e in una ulteriore area individuata nei pressi della frazione di Cascia capoluogo;

VISTO l’accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 e dell’art. 6 della Legge 225/1992, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Umbria e il Comune di Cascia, a termine del quale il Comune di Cascia si assume l’onere di realizzare le opere di urbanizzazione nelle aree indicate per l’alloggiamento dei moduli abitativi con le modalità indicate nelle linee guida tecniche, per mezzo delle squadre operative dell’esercito;
CHE con Determinazione del Responsabile Area LL.PP. n° 430 del 06/12/2016 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori e coord. Sicurezza per l'intervento: OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LA POSA DI CONTAINER IN CASCIA CAPOLUOGO E NELLA LOCALITA’ DI AVENDITA, all’Ing. Castellucci Tito, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A770 e con studio in Via A. Morini  n.  6 – 06043 Cascia (Pg) - (C.F.: CSTTTI57H18B948Y -  P.IVA: 00716230545).
CHE, con nota assunta al prot. n. 11807 del 06/12/2016, il progettista incaricato Ing. Tito Castellucci ha trasmesso la documentazione relativa al progetto esecutivo di che trattasi.
CHE, con Deliberazione di Giunta Municipale del 06/12/2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dall’Ing. Castellucci Tito che relativamente alla parte di sola fornitura materiali prevedeva l’importo complessivo di Euro 74.148,35 così di seguito suddiviso:

Quadro Economico Progetto ESECUTIVO relativo alle FORNITURE	Euro	
IMPORTO FORNITURE soggette a ribasso d’asta (A)	67.407,59	
SOMME A DISPOSIZIONE:		
Per I.V.A. al 10% sulle forniture	  6.740,76	
TOTALE SOMME A DIPOSIZIONE (B)	  6.740,76	
TOTALE GENERALE (A) + (B)	74.148,35	

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 431 del 06/12/2016, è stato adottato formale provvedimento a contrarre ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lvo 267/00 e dall'art. 60 del D.lgs 18 Aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE).
CHE, con il medesimo atto, trattandosi di una fornitura e in relazione all’importo complessivo, si è proceduto all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 attraverso il portale dedicato al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sul importo posto a base di gara;
CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 434 del 09/12/2016, si è preso atto dell’esito infruttuoso della Procedura negoziata indetta con la precedente Determinazione n. 431 del 06/12/2016 ed adottato formale provvedimento a contrarre ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lvo 267/00 e dall'art. 60 del D.lgs 18 Aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) con indizione del II° esperimento di gara, mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, tra n. 7 (sette) operatori economici operanti nel settore per la “FORNITURA URGENTE DI MATERIALE A PIE’ D’OPERA PER LA REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI AREE DESTINATE ALL’INSTALLAZIONE DEI MODULI ABITATIVI NELLE FRAZIONI DI AVENDITA E DI CASCIA CAPOLUOGO” di cui al Sisma del 30/10/2016.
CHE, con Determinazione del Responsabile Area tecnica LL.PP. n. 448 del 13/12/2016 è stato approvato il Verbale di gara nonché provveduto all’aggiudicazione definitiva Fornitura dei materiali alla ditta FELC Sr,l con sede in Trevi loc. Borgo Trevi - Via Faustana n. 22 06049 (Pg), per l’importo di Euro 62.014,98 al netto del ribasso offerto dell’8,00%.
CHE in data 07/02/2017 è stato stipulato il contratto con la ditta Felc Srl, Rep. 3284.
DATO ATTO:
CHE, con apposita Relazione, il Progettista e Direttore della Fornitura Ing. Castellucci Tito , nelle more della definizione con certezza della contabilità finale dell’approvvigionamento dei materili forniti dall’Impresa Felc srl per le Urbanizzazioni delle Aree destinate ai Container collettivi di Cascia ed Avendita ha richiesto l’approvazione di n. 10 (dieci) Nuovi prezzi non previsti in progetto, di cui n. 8 desunti dal Prezziario Dei del Genio civile e n. 2 (np01 e np 02) ricavati da indagine di mercato da assoggettarsi al ribasso contrattuale offerto in sede di gara dell’8,00%.

VISTO il Verbale di Concordamento n. 10 (dieci) Nuovi Prezzi redatto e sottoscritto in data 01/03/2017 in contraddittorio con la ditta Felc Srl su cui andrà applicato il medesimo ribasso contrattuale pari all’8,00% (otto per cento).

RITENUTO di procedere all’approvazione del Verbale di Concordamento n. 10 Nuovi Prezzi relativi alla “Fornitura urgente di materiale a piè d’opera per la realizzazione delle Urbanizzazioni Aree destinate all’installazione dei Moduli abitativi nella Frazione Avendita e Cascia Capoluogo”.
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture)

VISTO il D.Lvo (T.u.e.l.) n° 267/2000;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE il Verbale di Concordamento n. 10 Nuovi Prezzi redatto e sottoscritto in data 01/03/2017 in contraddittorio con la ditta FELC Srl di Trevi, appaltatrice della “Fornitura urgente di materiale a piè d’opera per la realizzazione delle Urbanizzazioni Aree destinate all’installazione dei Moduli abitativi nella Frazione Avendita e in Cascia Capoluogo” dando atto che i suddetti prezzi sono assoggettati al ribasso d’asta contrattuale pari all’8,00%.

•	Codice CIG:   6902345B46   -   Codice CUP:  C41B16000380003

2) DI DARE ATTO che l’adozione dei nuovi prezzi non comporta l’aumento dell’importo netto della fornitura a piè d’opera di materiali di cui al contratto Rep. 3284 del 07/02/2017.

3) DI DARE ATTO che per la presente Determinazione non occorre acquisire ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Leg.vo n° 267/2000 il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario.

4)  DI  DARE  ATTO  che  la  presente  Determinazione, anche  agli  effetti  della  trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il Rup: Arch. Antonio Cucci
Il Resp. Area Tecnica LL.PP.: Emili Gino
65

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    GINO EMILI

======================================================================

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-05-17 al 08-06-17 Registro Albo pretorio n. 1193

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
RESPONSABILE A.AMMINISTRATIVA
Li, 24-05-17                       F.to GINO EMILI 

======================================================================

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
GINO EMILI 
Li,