COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
243
Data
11-07-17	Oggetto:	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL POLO DI S. MARGHERITA IN CASCIA CAPOLUOGO"  PAR FSC 2007-2013 - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA - VERBALE CONCORDAMENTO N.P.	

N. 665 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciassette,il giorno  undici del mese di luglio ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.
PREMESSO:
CHE la Regione dell’Umbria, in attuazione delle azioni dell’Asse III, Attività b2 “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale” del POR FESR 2007-2013, con Deliberazione di G.R. n. 4786 del 19/06/2012 e successiva D.G.R. n 6020 del 27/07/2012, ha approvato l’”Avviso pubblico per il completamento degli attrattori di rilevante interesse finalizzato al perfezionamento delle reti e dei sistemi regionali culturali ed ambientali”.
CHE questa Amministrazione ha inteso inoltrare istanza alla Regione dell'Umbria,  ai sensi del sopra citato Bando POR FESR 2007-2013 Asse III Attività B2, per il finanziamento dell’intervento di “Completamento del Polo di S. Margherita di Cascia”.
CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 344 del 04/09/2012 è stato conferito l’incarico professionale per la progettazione e la redazione dei documenti di partecipazione  al bando all’Ing. Sandra Liviabella, con studio in Foligno (Pg).
CHE, con Deliberazione di G.M. n. 55 del 14/09/2012, è stato approvato il Progetto preliminare all’uopo predisposto dall’Ing. Sandra Liviabella per il “Completamento del Polo di S. Margherita di Cascia” ai fini della richiesta dei benefici previsti dal bando POR FESR 2007/2013 Asse III - Attività B2 per la “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale” dell’importo complessivo di Euro 361.814,14.
CHE la Regione dell’Umbria con D.D. del 03/04/2013, pubblicata nel BUR del 17/04/2013, n. 19,  ha approvato le graduatorie di cui all’Avviso pubblico sopra richiamato concedendo al Comune di Cascia il finanziamento di €. 200.000,00 per la realizzazione dell’intervento indicato.
CHE, conseguentemente, il Comune di Cascia doveva procedere all’attuazione del progetto secondo le procedure previste nella Direttiva approvata con D.D. del 05/10/2012, n. 7815, pubblicata nel S.O. n. 3 al BUR del 14/11/2012, n. 49 Serie Generale.
CHE, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 219 del 27/05/2014, è stato conferito, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Decreto Lgs. n. 163/06 e s.m., all’Ing. Sandra Liviabella, dello studio OE Office Engineering, Consulenza e Progettazione, sito in Via Piermarini n. 28 – 06034 Foligno (Pg), iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Perugia al n. A2833 - C.F: LVBSDR76P58D653R - l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “Completamento del Polo di S. Margherita di Cascia” di cui al Bando POR FESR 2007/2013 Asse III - Attività B2 per la “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale”.
CHE, con D.G.R. n. 1.023 del 04/08/2014, pubblicata sul B.U.R. n. 42 del 03/09/2014, la Regione dell’Umbria ha approvato la ridefinizione finanziaria dei Programmi regionali di cui alle D.G.R. 1452/2013 e n. 1578/2013, nonché approvato il Programma 2014 dell’Azione 3.5.2° del PAR FSC.
CHE, nell’ambito di tale definizione è stata confermata l’attribuzione al Comune di Cascia del finanziamento di €. 200.000 a valere su risorse PAR FSC per la realizzazione dell’intervento “Polo museale S. Margherita – Completamento”, assegnato nell’ambito delle graduatorie dell’Avviso pubblico approvato con D.D. del 03/04/2013 n. 2.015.
CHE, con Deliberazione di G.M. n. 63 del 12/10/2015, è stato approvato il Progetto esecutivo all’uopo predisposto dall’Ing. Sandra Liviabella per il “Completamento del Polo museale di S. Margherita di Cascia” dell’importo complessivo di Euro 250.000,00 di cui Euro 148.080,30 per lavori da affidare in appalto.
CHE, con Deliberazione di C.C. n. 40 del 06/10/2015, l’Amministrazione del Comune di Cascia ha aderito  alla Stazione Unica appaltante della Provincia di Perugia con l’approvazione della relativa convenzione da stipulare per il conferimento della funzione di “Centrale Unica di Committenza” di cui all’ex art. 33 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., così come disposto dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (con entrata in vigore alla data del 1 novembre 2015).
CHE, con Determinazione a contrarre del Resp. Area LL.PP. n. 418 del 04/11/2015 è stata indetta, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n. 267/2000, la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori a misura, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dall'ar. 57, comma 6 e dell'art. 122, comma 7 del D.lgs n° 163/06,  e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante il ribasso sull'importo dei lavori  posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. b) del D.lgs 163/06 e s.m.i. e con le modalità di cui all'art. 118 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;
CHE, con successiva Determinazione n. 426 del 12/11/2015, è stato approvato l’elenco delle n. 20 (venti) ditte da invitare alla procedura negoziata, previo sorteggio tra gli operatori economici in possesso dei requisiti necessari (cat. OG3 classe 1), presenti nell’elenco ditte adottato ed aggiornato con la Determinazione n. 119 del 20/03/2014. non affidatari di altri lavori assimilabili alla medesima categoria negli ultimi 18 mesi e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
CHE, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 479 del 10/12/2015, si è preso atto del Verbale di gara della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia (SUA) del giorno 01/12/2015, nonché dichiarato aggiudicatario provvisorio dei lavori di “Completamento del Polo di S. Margherita di Cascia” – PAR FSC 2007-2013 il concorrente FERRI  SIMONE Srl con sede legale in Strada di Passo Corese snc - 02040 Vacone (RI), il quale ha offerto un ribasso del 29,728 %.
CHE, a seguito della comunicazione del 26/01/2016, assunta al prot. n. 577 DEL 27/01/2015, con la quale la Provincia di Perugia, nell’ambito delle funzioni di S.U.A. (Stazione Unica Appaltante), l’avvenuto espletamento delle verifiche dei requisiti di ordine generale (art. 38 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.) in capo alla ditta Ferri Simone Srl, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 45 del 02/02/2016 i lavori di “Completamento del Polo di S. Margherita di Cascia” – PAR FSC 2007-2013 sono stati affidati in maniera definitiva alla ditta FERRI SIMONE Srl, con sede legale in Vacone (RI) Strada di Passo Corese snc - Partita IVA: 00921650578, per l’importo netto contrattuale di Euro 111.469,42 di cui Euro 86.541,97 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 29,728%, Euro 3.437,90  per costi della sicurezza, 5.092,09  per Oneri della sicurezza ed Euro 16.397,46 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre ad Euro 24.523,27 per I.V.A. al 22%.
CHE, a seguito del contratto di appalto Rep. n. 3277 del 11/03/2016, in data 11/05/2016 si è provveduto alla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice Ferri Simone Srl.
CHE, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 309 del 16/09/2016, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata liquidata all’Impresa Ferri Simone Srl l’Anticipazione del 20% sull’importo contrattuale per un importo di Euro 22.293,88 oltre ad Euro 4.904,65 per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 27.198,53.
CHE, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 422 del 01/12/2016, è stato approvato lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 nonché liquidato il Certificato di Pagamento n. 1, dell’importo di Euro 40.400,00 al netto delle ritenute di legge, oltre all'I.V.A. in misura del 22%

DATO ATTO che in corso d’opera si è riscontrata l’opportunità di ridurre la quantità di rete scaldante stradale, anche al fine di ridurre i costi di allaccio alla rete elettrica nonché i relativi costi fissi (canone contatore ecc.) disponendo alla D.L. la redazione di una perizia di variata distribuzione di spesa prevedendo ulteriori migliorie all’opera e ampliare la superfici oggetto nuova pavimentazione senza aumento di spesa rispetto all’importo di contratto.

VISTA la perizia di variata distribuzione di spesa redatta dal D.L. Ing. Liviabella Sandra (nota di trasmissione assunta al Prot. n° 8.643 del 11/07/2017) per i lavori di “Completamento del Polo di S. Margherita in Cascia Capoluogo” nell'importo complessivo di Euro 205.334,26 (economie escluse) così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA	Euro	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA	123.153,72	
A detrarre il ribasso d’asta del  29,728 %	- 36.611,14	
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso	86.542,58	
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.436,92	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	5.092,08	
Importo manodopera non soggetto a ribasso	16.397,46	
IMPORTO netto contrattuale dei LAVORI  (A)	111.469,04	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
INSERITE NEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI:		
Spese Tecniche per rilievi, progettazione, D.L., coord. Sicurezza e collaudo	17.563,12	
Contributo previdenziale 4%	702,52	
I.V.A. Spese Tecniche 22%	4.018,45	
Fondo Incentivo	1.512,72	
I.V.A. sui Lavori al 22%	24.523,19	
Spese per allacci. Spostamento e/o adeguamento servizi e forniture	10.000,00	
Spese per pubblicità	1.500,00	
Imprevisti, arrotondamenti ed accantonamento L.R. 3/10	9.645,22	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	69.465,22	
		
QUADRO ECONOMICO FORNITURE		
Importo Forniture	19.400,00	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	600,00	
IMPORTO TOTALE FORNITURE	20.000,00	
I.V.A. al 22% sulle forniture	4.400,00	
TOTALE FORNITURE (compresa IVA) (C)	24.400,00	
TOTALE GENERALE ( A ) + ( B) + ( C )	205.334,26	
	
ECONOMIE DI GARA   	44.665,74	

VISTO lo Schema dell’Atto di sottomissione e l’allegato Verbale di Concordamento n. 7 nuovi prezzi redatto e sottoscritto in contraddittorio con la ditta appaltatrice Ferri Simone Srl ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m. con cui viene aumentato di 10 (giorni) il tempo utile per l’esecuzione dei lavori;

VISTO l’art. 132 del D.Lgs n. 163/2016 e s.m.;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere da parte del Responsabile dell’Area finanziaria in quanto il presente atto non comporta nuove spese;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la perizia di Variata distribuzione di spesa redatta dal D.L. Ing. Liviabella Sandra (nota di trasmissione assunta al Prot. n° 8.643 del 11/07/2017) per i lavori di “COMPLETAMENTO DEL POLO DI S. MARGHERITA IN CASCIA CAPOLUOGO - Programma 2014 Azione 3.5.2. del PAR FSC” nell'importo complessivo di Euro 205.334,26 (economie escluse) così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA	Euro	
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA	123.153,72	
A detrarre il ribasso d’asta del  29,728 %	- 36.611,14	
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso	86.542,58	
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.436,92	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	5.092,08	
Importo manodopera non soggetto a ribasso	16.397,46	
IMPORTO netto contrattuale dei LAVORI  (A)	111.469,04	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
INSERITE NEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI:		
Spese Tecniche per rilievi, progettazione, D.L., coord. Sicurezza e collaudo	17.563,12	
Contributo previdenziale 4%	702,52	
I.V.A. Spese Tecniche 22%	4.018,45	
Fondo Incentivo	1.512,72	
I.V.A. sui Lavori al 22%	24.523,19	
Spese per allacci. Spostamento e/o adeguamento servizi e forniture	10.000,00	
Spese per pubblicità	1.500,00	
Imprevisti, arrotondamenti ed accantonamento L.R. 3/10	9.645,22	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	69.465,22	
		
QUADRO ECONOMICO FORNITURE		
Importo Forniture	19.400,00	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	600,00	
IMPORTO TOTALE FORNITURE	20.000,00	
I.V.A. al 22% sulle forniture	4.400,00	
TOTALE FORNITURE (compresa IVA) (C)	24.400,00	
TOTALE GENERALE ( A ) + ( B) + ( C )	205.334,26	
	
ECONOMIE DI GARA   	44.665,74	

2) DI APPROVARE lo Schema dell’Atto di sottomissione e l’allegato Verbale di Concordamento n. 7 nuovi prezzi redatto e sottoscritto in contraddittorio con la ditta appaltatrice Ferri Simone Srl ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m. con cui viene aumentato di 10 (giorni) il tempo utile per l’esecuzione dei lavori;

3) DI DARE ATTO che la Perizia, ai sensi dell’art. 132 comma 3 del D.Lgs non è da considerarsi variante ai sensi del comma 1 del medesimo art. 132 in quanto gli interventi disposti dal D.L.  non comportano modifiche sostanziali al progetto e inoltre non comporta aumento dell’importo di contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

•	CODICE CUP: C42C12000130001  -  Codice CIG: 6463113990 

4) DI DARE ATTO che per la presente Determinazione non occorre acquisire ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Leg.vo n° 267/2000 il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario in quanto la sua adozione non comporta alcun aumento di spesa.

5) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Il Rup: Nardi Marcello

Il Responsabile Area Tecnica LL.PP.: De Carolis Mario
243

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    MARIO DE CAROLIS

======================================================================

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21-07-17 al 05-08-17 Registro Albo pretorio n. 1449

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
RESPONSABILE A.AMMINISTRATIVA
Li, 21-07-17                       F.to MARIO DE CAROLIS 

======================================================================

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARIO DE CAROLIS 
Li,