COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
138
Data
02-05-17	Oggetto:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA IN LOCALITA' SERVIGLIO - EVENTO SISMICO DEL 30/10/2016 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - IMPUTAZIONE MAGGIORI LAVORI E SPESE TECNIHE	

N. 420 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciassette,il giorno  due del mese di maggio ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.
PREMESSO:
- CHE la successione degli eventi sismici che hanno interessato il territorio comunale, in particolare modo l’evento del giorno 30/10/2016, ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative private e pubbliche nonché a numerosi edifici di culto tra cui la Chiesa S. Maria della Misericordia in loc. Serviglio;
- CHE, per quanto sopra esposto, è stata adottata apposita Ordinanza sindacale n. 284 del 26/11/2017 di transennamento e chiusura al traffico sia veicolare che pedonale ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità;
- CHE, con Determinazione del Responsabile Area LL.PP. n° 5 del 09/01/2017, ai sensi dall’art. 36, comma 2,  lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, comma 8 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50, è stato affidato all’Ing. Gentili Ivan,  iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A3159 (C.F. GNTVNI80D17B948Y - P.IVA: 03108390547) l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori/contabilità e coord. sicurezza per l'intervento di “MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA IN LOC. SERVIGLIO”.
- CHE il progettista incaricato Ing. Gentili Ivan ha trasmesso la documentazione relativa al progetto esecutivo di che trattasi (assunta al prot. n. 2.272 del 23/02/2017);

DATO ATTO:
CHE, con Deliberazione di Giunta Municipale del 06/03/2017, è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dall’Ing. Gentili Ivan per un importo lavori di Euro 31.337,84 così di seguito suddiviso:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	Euro	
 IMPORTO DEI  LAVORI al lordo degli oneri, costi della sicurezza e manodopera (a)	26.649,59	
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) (b)	1.709,34	
Importo della manodopera (non soggetto a ribasso) (c)	9.401,35	
Costi per la sicurezza (da computo – non soggetti a ribasso) (e)	4.688,25	
Importo lavori al netto degli oneri e della manodopera (Importo a base d’asta) (d) = (a-b-c)	15.538,90	
IMPORTO TOTALE LAVORI (A) = (b+c+d+e)	31.337,84	

CHE, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 90 del 24/03/2017 sono stati approvati i Verbali di gara del 21/03/2017 e 24/03/2017 con cui si sono aggiudicati i lavori in via definitiva alla ditta Carlini Olindo S.r.l., con sede in Loc. Colle Risana, 5 - 06049 Spoleto (PG), C.F. e P.I. 02908970540 – per l’importo di EURO 6.060,18 al netto del ribasso offerto del 61,00%, oltre ad EURO 1.709,34 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 4.688,25 per Costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed EURO 9.401,35 per Costo della Manodopera non soggetto a ribasso, per un Totale netto di EURO 21.859,12, oltre I.V.A. 10%; 

CHE in data 10/04/2017 è stato stipulato con la ditta CARLINI OLINDO S.R.L. il Contratto di Appalto, assunto al Rep. n. 3292.
CHE in data 26/04/2017 è stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori alla ditta CARLINI OLINDO S.R.L.;

CHE la D.L. ha chiesto l’autorizzazione per la redazione di una perizia di variante suppletiva ai lavori approvati, redatta ai sensi dell’art. 149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. poiché, in corso d’opera, è STATO riscontrato il peggioramento del quadro fessurativo della volta interna e si è rende pertanto necessario modificare il ponteggio interno a sostegno della volta stessa, andando così ad aumentare la rigidezza e la superficie di appoggio.

VISTA la Perizia di Variante suppletiva (assunta al Prot. n° 4920 del 26/04/2017) redatta dall’Ing. Gentili Ivan,  per “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA OPERE PROVVISIONALI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA” in loc. Serviglio, nel Comune di Cascia (Pg)“ nell'importo complessivo di Euro 34.710,25 così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE SUPPLETTIVA	Euro	
A) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	19.940,58	
    A DETRARRE RIBASSO DEL 61,00%	-12.163,75	
B) IMPORTO LAVORI A-B	7.776,83	
C) Importo degli oneri della sicurezza	2.081,31	
D) Importo Manodopera	11.447,20	
E) Importo dei costi della sicurezza 	4.688,25	
G) TOTALE IMPORTO NETTO CONTRATTUALE B+C+D+E 	25.993,59	
H) Spese Tecniche Progettazione, Direzione lavori, contabilità e coord. sicurezza 10%	3.815,73	
I) C.n.p.a.i.a. 4%	152,63	
L) Imprevisti e somme a disposizione < DEL 5%	1.566,90	
M) I.V.A. 10% dell’importo dei lavori=10%	2.599,36	
N) I.V.A. Spese Tecniche (non dovuta)	----	
O) Incentivo ex Art. 92	282,04	
P) Spese di Gara 	300,00	
Q) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE H+I+L+M+N+O+P	8.716,66	
    TOTALE GENERALE G+Q	34.710,25	

VISTO lo Schema dell'Atto di Sottomissione redatto e sottoscritto in data 26/04/2017,con cui la ditta appaltatrice CARLINI OLINDO S.R.L. si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella perizia suppletiva di variante, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, per un maggiore importo di Euro 4.134,47.                            
VISTO che nulla osta all'approvazione della perizia di variante suppletiva in quanto la stessa risulta conforme a quanto disposto dall'art. 149 (Varianti in corso d’opera), comma 2 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.) e che l’aumento dell’importo dei lavori  trova la copertura di spesa con il parziale utilizzo delle economie di gara.
RITENUTO, pertanto, di dover approvare la Perizia di variante suppletiva e lo schema dell'Atto di sottomissione sottoscritto dalla Ditta Carlini Olindo S.r.l.;
RITENUTO di dover procedere all'imputazione della spesa di Euro 4.134.,47  oltre ad Euro 413,45 per IVA 10%, pari ai maggiori lavori assunti dalla ditta Carlini Olindo S.r.l. con lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla Perizia suppletiva.
RITENUTO di dover procedere all'imputazione della spesa di Euro 968,359 per spese tecniche dovute all’Ing. Gentili Ivan.
PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la l’imputazione la liquidazione di dette spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposite determinazioni.

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la Perizia suppletiva di Variante redatta dal D.L. Ing. Gentili Ivan per i lavori di “MESSA IN SICUREZZA OPERE PROVVISIONALI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA, SITO IN LOCALITA’ SERVIGLIO” in loc. Serviglio nel Comune di Cascia (Pg) - nell'importo complessivo di Euro 34.710,25  così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE SUPPLETTIVA	Euro	
A) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	19.940,58	
    A DETRARRE RIBASSO DEL 61,00%	-12.163,75	
B) IMPORTO LAVORI A-B	7.776,83	
C) Importo degli oneri della sicurezza	2.081,31	
D) Importo Manodopera	11.447,20	
E) Importo dei costi della sicurezza 	4.688,25	
G) TOTALE IMPORTO NETTO CONTRATTUALE B+C+D+E 	25.993,59	
H) Spese Tecniche Progettazione, Direzione lavori, contabilità e coord. sicurezza 10%	3.815,73	
I) C.n.p.a.i.a. 4%	152,63	
L) Imprevisti e somme a disposizione < DEL 5%	1.566,90	
M) I.V.A. 10% dell’importo dei lavori=10%	2.599,36	
N) I.V.A. Spese Tecniche (non dovuta)	----	
O) Incentivo ex Art. 92	282,04	
P) Spese di Gara 	300,00	
Q) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE H+I+L+M+N+O+P	8.716,66	
    TOTALE GENERALE G+Q	34.710,25	

2) DI DARE ATTO che la Perizia suppletiva risulta conforme a quanto disposto dall'art. 149 (Varianti in corso d’opera) comma 2 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.i e che l’aumento dell’importo dei lavori (entro il quinto d’obbligo) trova copertura con il parziale utilizzo delle economie di gara.

3) DI APPROVARE lo Schema dell'Atto di Sottomissione redatto e sottoscritto in data 26/04/2017 (in contraddittorio con la ditta ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con cui la ditta appaltatrice Carlini Olindo S.R.L. si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale per un maggiore importo di Euro 4.134,47;

4) DI IMPUTARE la spesa di Euro 4.134,47 oltre ad Euro 413,45 per IVA al 10%, per un totale di Euro 4.547,92 per maggiori lavori assunti dalla Ditta Carlini Olindo Srl (C.F. e P.I. 02908970540), al Codice Bilancio 11.02-2.02.03.06.999 – Capitolo 2850 art. 18 – (CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016, LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURA IMMOBILI DI PROPRIETA’ DI TERZI CORR.E 580/15).

Cod. CUP C46J17000070002 – CIG Z0A1D8B135

5) DI IMPUTARE la spesa di Euro 968,36 per le spese tecniche di redazione variante, DL e coord. Sicurezza dell’Ing. Gentili Ivan (C.F. GNTVNI80D17B948Y - P.IVA: 03108390547), al Codice Bilancio 11.02-2.02.03.06.999 – Capitolo 2850 art. 18 – (CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016, LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURA IMMOBILI DI PROPRIETA’ DI TERZI CORR.E 580/15).

Cod. CUP C46J17000070002 – CIG ZD21CD9DAC

6) DI DARE ATTO CHE le spese assunte con il presente atto rientrano tra quelle eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 e trova, quindi, copertura negli stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio dei Ministri con le delibere del 25/08/2016, 27/10/2016 e 31/10/2016 e comunque riferite alle attività di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell’O.D.P.C. n. 388/2016;

7) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del DecretoLgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

8) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Il rup: Arch. Cucci Antonio
138

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    GINO EMILI

======================================================================

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-05-17 al 30-05-17 Registro Albo pretorio n. 1075

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
RESPONSABILE A.AMMINISTRATIVA
Li, 15-05-17                       F.to GINO EMILI 

======================================================================

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
GINO EMILI 
Li,