COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
301
Data
23-07-19	Oggetto:	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 287 DEL 09/07/2019 - LAVORI DI RIPRISTINO STRADALI LOC. AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - COMUNE DI CASCIA - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI	

N. 748 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciannove,il giorno  ventitre del mese di luglio ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.
PREMESSO:
CHE si rende necessario provvedere con urgenza alla sistemazione delle strade comunali nelle località Avendita, Logna, Palmaiolo e in Via T. Graziani in quanto, allo stato attuale, il notevole dissesto della sede stradale caratterizzato dalla presenza di buche ed avvallamenti dovute all’azione degli agenti atmosferici ed alla vetustà della pavimentazione esistente non permette più il regolare transito veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza.

CHE l'Amministrazione ha interessato l’Ufficio tecnico – COC Cascia, per la redazione del progetto per interventi di ripristino pavimentazioni stradali delle strade comunali sopra menzionate.
 
CHE, con deliberazione della Giunta Comunale n° 163 del 25.10.2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per “INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI”, redatto dal’Ufficio tecnico, nell’importo complessivo di Euro 125.424,90.

CHE l'Amministrazione ha interessato l’Ufficio tecnico – COC Cascia, per la redazione del progetto per interventi di ripristino pavimentazioni stradali delle strade comunali sopra menzionate. 

CHE, con Deliberazione di G.M. n. 163 del 25/10/2018, è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori per “INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI”, redatto dall’ufficio tecnico, non allegato alla presente deliberazione e depositato agli atti presso l'Ufficio tecnico, dell'importo complessivo di Euro  122.891,83;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 19/02/2019 sono stati affidati i lavori di cui trattasi alla ditta Veneri SRL per un importo contrattuale pari ad Euro 80.209,01, al netto dell’IVA, così suddiviso:
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI
AVENDITA,  LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI	
A)  Lavori soggetti a ribasso 	€ 77.985,30   	
A.1)   ribasso d’asta  -17,450 %  	-€ 13.608,43   	
A.2)   Costi per la sicurezza  (non soggetti a ribasso)	€ 2.567,44     	
A.3)   Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.065,05     	
A.4)   Costo della manodopera (L.R. 3/2010) (non soggetti a ribasso)	€ 10.199,66     	
B   IMPORTO DEI LAVORI (A+A.1+A.2+A.3+A.4) 	€ 80.209,01   	
C     I.V.A. 22% sui lavori 	€      17.645,98 	
D     incentivo progett. Artt.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€     1.876,35	
E     imprevisti (3.90%)	€     3.658,88	
F     Spese tecniche Sicurezza (compresa iva e cassa) 	€     2.091,32	
G     campionamenti e analisi	€         376,10	
H   accantonamento accordi bonari 3% 	€ 2.814,52       	
I    spese gara 	€ 150,44     	
L  TOTALE SPESE GENERALI (C+D+E+F+G+H)	€  28.613,59	
TOTALE PROGETTO (B+L)	€ 108.822,60 	
ECONOMIE DI GARA	€ 16.602,30	

CHE in data 09/05/2019 è stato stipulato il contratto per i lavori in oggetto con la Ditta Veneri Srl avente n. REP 3337;
CHE con Determina Dirigenziale n. 287 del 09/07/2019 è stata approvata la Perizia di Variante redatta dall’Ufficio Tecnico dell’Ente per gli INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI, nell'importo complessivo di Euro € 125.003,47 così suddiviso nel Quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE	
INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI
AVENDITA,  LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI	
A)  Lavori soggetti a ribasso 	€ 109.071,27   	
A.1)   ribasso d’asta  -17,450 %  	- € 16.718,14   	
A.2)   Costi per la sicurezza  (non soggetti a ribasso)	€ 1.118,89     	
A.3)   Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.065,05     	
A.4)   Costo della manodopera (L.R. 3/2010) (non soggetti a ribasso)	€ 10.199,66     	
B   IMPORTO DEI LAVORI (A+A.1+A.2+A.3+A.4) 	€ 93.472,02   	
C     I.V.A. 22% sui lavori 	€      20.563,84 	
D     incentivo progett. Artt.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€     1.876,35	
E     imprevisti (3.90%)	€     3.658,88	
F     Spese tecniche Sicurezza (compresa iva e cassa) 	€     2.091,32	
G     campionamenti e analisi	€         376,10	
H   accantonamento accordi bonari 3% 	€ 2.814,52       	
I    spese gara 	€ 150,44     	
L  TOTALE SPESE GENERALI (C+D+E+F+G+H)	€  31.531,45	
TOTALE PROGETTO (B+L)	€ 125.003,47 	

RITENUTO di dover integrare la Determinazione Dirigenziale n. 287 del 09/07/2019 in quanto, per puro errore materiale non è stato approvato l’ATTO DI SOTTOMISSIONE E DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;

VISTO lo schema dell’ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI redatto e sottoscritto in data 20/06/2019, con cui la Ditta VENERI S.r.l. si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella Perizia di Variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale entro il medesimo tempo previsto dallo stesso per un maggiore importo di € 13.263,11 al netto delle imposte vigenti, oltre a concordare n.1 nuovo prezzo, di seguito descritto a cui verrà applicato lo stesso ribasso previsto dall’offerta economica pari al 17,450%;

Tariffa	Descrizione	Unità
Misura	
Prezzo
	
19.04.0030.001	Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con……………………. H=3cm	
mqxcm	
2,21	

RITENUTO  di dover approvare l’ATTO DI SOTTOMISSIONE E DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI, redatto in data 20/06/2019 e sottoscritto dall’Impresa VENERI S.r.l., dal D.L. Geom. Isabella Claudiani e dal RUP Geom. Roberto Carbonari, per il prezzo di seguito descritto a cui verrà applicato lo stesso ribasso previsto dall’offerta economica pari al 17,450%:

Tariffa	Descrizione	Unità
Misura	
Prezzo
	
19.04.0030.001	Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con……………………. H=3cm	
mqxcm	
2,21	

CHE al progetto è stato attribuito il seguente 
•	codice CUP: C47H18001300004 
•	Codice CIG: 7698710877

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento dei contratti pubblici) per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) DI RICHIAMARE quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI INTEGRARE la Determina Dirigenziale n. 287 del 09/07/2019;

3) DI APPROVARE l’ATTO DI SOTTOMISSIONE E DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI, redatto in data 20/06/2019 e sottoscritto dall’Impresa VENERI S.r.l., dal D.L. Geom. Isabella Claudiani e dal RUP Geom. Roberto Carbonari, per il prezzo di seguito descritto a cui verrà applicato lo stesso ribasso previsto dall’offerta economica pari al 17,450%:

Tariffa	Descrizione	Unità
Misura	
Prezzo
	
19.04.0030.001	Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con……………………. H=3cm	
mqxcm	
2,21	

3) DI DARE ATTO che per la presente Determinazione non occorre acquisire ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Leg.vo n° 267/2000 il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario.

4) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

301

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    MARCACCIOLI LUCIA

======================================================================

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-09-19 al 24-09-19 Registro Albo pretorio n. 1248

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 09-09-19                       F.to VULPIANI SIMONA 

======================================================================

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA 
Li,