COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
287
Data
09-07-19	Oggetto:	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DI RIPRISTINO STRADALI IN LOCALITA' AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI - COMUNE DI CASCIA	

N. 707 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciannove,il giorno  nove del mese di luglio ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

PREMESSO:
CHE si rende necessario provvedere con urgenza alla sistemazione delle strade comunali nelle località Avendita, Logna, Palmaiolo e in Via T. Graziani in quanto, allo stato attuale, il notevole dissesto della sede stradale caratterizzato dalla presenza di buche ed avvallamenti dovute all’azione degli agenti atmosferici ed alla vetustà della pavimentazione esistente non permette più il regolare transito veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza.

CHE l'Amministrazione ha interessato l’Ufficio tecnico – COC Cascia, per la redazione del progetto per interventi di ripristino pavimentazioni stradali delle strade comunali sopra menzionate. 
CHE, con deliberazione della Giunta Comunale n° 163 del 25.10.2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per “INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI”, redatto dal’Ufficio tecnico, nell’importo complessivo di Euro 125.424,90.
Che l'Amministrazione ha interessato l’Ufficio tecnico – COC Cascia, per la redazione del progetto per interventi di ripristino pavimentazioni stradali delle strade comunali sopra menzionate. 
CHE, con Deliberazione di G.M. n. 163 del 25/10/2018, è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori per “INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI”, redatto dall’ufficio tecnico, non allegato alla presente deliberazione e depositato agli atti presso l'Ufficio tecnico, dell'importo complessivo di Euro  122.891,83;
CHE, con propria Determinazione n. 430 del 16/11/2018, è stata indetta la gara di appalto mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. con le modalità di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. b, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett.a) del D.lgs.50/2016, da determinarsi mediante ribasso percentuale unico sull’Elenco Prezzi posto a base di gara, disponendo l’invito alla Procedura negoziata n. 20 (venti) imprese, selezionate con apposito sorteggio del 17/12/2018, tra tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse.
VISTO il Verbale n.01  redatto in data 28/01/2019 dal seggio  di gara monocratico, da cui si evince che sono pervenute n. 14 offerte economiche, che dalla verifica della documentazione amministrativa diverse imprese risultano deficitarie di documentazione.

VISTO il Verbale n.02  redatto in data 07/02/2019 dal seggio  di gara monocratico, da cui si evince che tutta la documentazione integrativa presentata risulta regolare, che  in base al metodo di gara adottato, è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta VENERI S.R.L. con sede in Via Della  Doga n. 49/r – Narni Scalo 05036 Narni (Tr), il quale ha offerto un ribasso d'asta del 17,450%.
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 19/02/2019 sono stati affidati i lavori di cui trattasi alla ditta Veneri SRL per un importo contrattuale pari ad Euro 80.209,01, al netto dell’IVA, così suddiviso:
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI
AVENDITA,  LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI	
A)  Lavori soggetti a ribasso 	€ 77.985,30   	
A.1)   ribasso d’asta  -17,450 %  	-€ 13.608,43   	
A.2)   Costi per la sicurezza  (non soggetti a ribasso)	€ 2.567,44     	
A.3)   Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.065,05     	
A.4)   Costo della manodopera (L.R. 3/2010) (non soggetti a ribasso)	€ 10.199,66     	
B   IMPORTO DEI LAVORI (A+A.1+A.2+A.3+A.4) 	€ 80.209,01   	
C     I.V.A. 22% sui lavori 	€      17.645,98 	
D     incentivo progett. Artt.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€     1.876,35	
E     imprevisti (3.90%)	€     3.658,88	
F     Spese tecniche Sicurezza (compresa iva e cassa) 	€     2.091,32	
G     campionamenti e analisi	€         376,10	
H   accantonamento accordi bonari 3% 	€ 2.814,52       	
I    spese gara 	€ 150,44     	
L  TOTALE SPESE GENERALI (C+D+E+F+G+H)	€  28.613,59	
TOTALE PROGETTO (B+L)	€ 108.822,60 	
ECONOMIE DI GARA	€ 16.602,30	

CHE in data 09/05/2019 è stato stipulato il contratto per i lavori in oggetto con la Ditta Veneri Srl avente n. REP 3337;
DATO ATTO:
CHE, a seguito di circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto,  la D.L. ha ritenuto necessario redigere una perizia di variante ai lavori approvati, redatta ai sensi dell’art. 149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 poichè, durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche al progetto esecutivo;

VISTA la Perizia di Variante redatta dall’Ufficio Tecnico dell’Ente per gli INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI, nell'importo complessivo di Euro € 125.003,47 così suddiviso nel Quadro economico di spesa: 
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE	
INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI
AVENDITA,  LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI	
A)  Lavori soggetti a ribasso 	€ 109.071,27   	
A.1)   ribasso d’asta  -17,450 %  	- € 16.718,14   	
A.2)   Costi per la sicurezza  (non soggetti a ribasso)	€ 1.118,89     	
A.3)   Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.065,05     	
A.4)   Costo della manodopera (L.R. 3/2010) (non soggetti a ribasso)	€ 10.199,66     	
B   IMPORTO DEI LAVORI (A+A.1+A.2+A.3+A.4) 	€ 93.472,02   	
C     I.V.A. 22% sui lavori 	€      20.563,84 	
D     incentivo progett. Artt.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€     1.876,35	
E     imprevisti (3.90%)	€     3.658,88	
F     Spese tecniche Sicurezza (compresa iva e cassa) 	€     2.091,32	
G     campionamenti e analisi	€         376,10	
H   accantonamento accordi bonari 3% 	€ 2.814,52       	
I    spese gara 	€ 150,44     	
L  TOTALE SPESE GENERALI (C+D+E+F+G+H)	€  31.531,45	
TOTALE PROGETTO (B+L)	€ 125.003,47 	

VISTO che nulla osta all'approvazione della perizia di variante suppletiva in quanto la stessa risulta conforme a quanto disposto dall'art. 149 (Varianti in corso d’opera), comma 2 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.) e che l’aumento dell’importo dei lavori  trova la copertura di spesa con il parziale utilizzo delle economie di gara.

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la Perizia di variante, sottoscritta dalla Ditta VENERI S.R.L.;

RITENUTO di dover procedere all'imputazione della spesa di Euro 13.263,11  oltre ad Euro 2.917,86 per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 16.180,97 pari ai maggiori lavori assunti dalla ditta VENERI SRL con la Perizia di Variante per lavori di RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI, AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI, al corrente esercizio finanziario Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 così suddivisi:

- Capitolo 2840/14 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA FRAZ. AVENDITA CAPOLUOGO Finanz.Avanzo INVEST.2017 CONC.CIMIT. per € 7.157,54;- (imp. fin. FPV n.00974-2018);
- Capitolo 2840/16 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA FRAZ. LOGNA Finanz.Avanzo VINC.2017 LEGGI ECC.MONET.STAND.URBANIST.per € 1.845,50; - (imp. fin. FPV n.00975-2018);
- Capitolo 2840/17 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA DELLA FRAZIONE PALMIOLO Finanz.Avanzo VINC.2017 MUTUI per € 7.177,93; - (imp. fin. FPV n.00976-2018);
 e che al progetto è stato attribuito il seguente 
•	codice CUP: C47H18001300004 
•	Codice CIG: 7698710877

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento dei contratti pubblici) per la parte ancora in vigore;
PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la l’imputazione e la liquidazione di dette spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposite determinazioni.

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la Perizia suppletiva di Variante per i lavori  di RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI, AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI redatta dall’Ufficio Tecnico del Comune di Cascia nell'importo complessivo di Euro 125.003,47 così suddiviso nel Quadro economico di spesa: 
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE	
INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI
AVENDITA,  LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI	
A)  Lavori soggetti a ribasso 	€ 109.071,27   	
A.1)   ribasso d’asta  -17,450 %  	- € 16.718,14   	
A.2)   Costi per la sicurezza  (non soggetti a ribasso)	€ 1.118,89     	
A.3)   Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.065,05     	
A.4)   Costo della manodopera (L.R. 3/2010) (non soggetti a ribasso)	€ 10.199,66     	
B   IMPORTO DEI LAVORI (A+A.1+A.2+A.3+A.4) 	€ 93.472,02   	
C     I.V.A. 22% sui lavori 	€      20.563,84 	
D     incentivo progett. Artt.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€     1.876,35	
E     imprevisti (3.90%)	€     3.658,88	
F     Spese tecniche Sicurezza (compresa iva e cassa) 	€     2.091,32	
G     campionamenti e analisi	€         376,10	
H   accantonamento accordi bonari 3% 	€ 2.814,52       	
I    spese gara 	€ 150,44     	
L  TOTALE SPESE GENERALI (C+D+E+F+G+H)	€  31.531,45	
TOTALE PROGETTO (B+L)	€ 125.003,47 	

2) DI DARE ATTO che la perizia di variante suppletiva risulta conforme a quanto disposto dall'art. 149 (Varianti in corso d’opera) comma 2 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.i e che l’aumento dell’importo dei lavori (entro il quinto d’obbligo) trova copertura con il parziale utilizzo delle economie di gara.

3) DI IMPUTARE la spesa di Euro Euro 13.263,11  oltre ad Euro 2.917,86 per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 16.180,97 pari ai maggiori lavori assunti dalla ditta VENERI SRL con la Perizia di Variante per lavori di RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI, AVENDITA, LOGNA, PALMAIOLO, VIA T. GRAZIANI, al corrente esercizio finanziario Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 così suddivisi:

- Capitolo 2840/14 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA FRAZ. AVENDITA CAPOLUOGO Finanz.Avanzo INVEST.2017 CONC.CIMIT. per € 7.157,54;- (imp. fin. FPV n.00974-2018);
- Capitolo 2840/16 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA FRAZ. LOGNA Finanz.Avanzo VINC.2017 LEGGI ECC.MONET.STAND.URBANIST.per € 1.845,50; - (imp. fin. FPV n.00975-2018);
- Capitolo 2840/17 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADA DELLA FRAZIONE PALMIOLO Finanz.Avanzo VINC.2017 MUTUI per € 7.177,93; - (imp. fin. FPV n.00976-2018);
che al progetto è stato attribuito il seguente 
•	codice CUP: C47H18001300004 
•	Codice CIG: 7698710877

4) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

5) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

287

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    MARCACCIOLI LUCIA

======================================================================

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-08-19 al 23-08-19 Registro Albo pretorio n. 1119

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 08-08-19                       F.to VULPIANI SIMONA 

======================================================================

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA 
Li,