COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
133
Data
27-04-17	Oggetto:	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA PER I LAVORI DI PREDISPOSIZIONE AREA PER ALLOGGIAMENTO PREFABBRICATO DA ADIBIRE A SCUOLA IN LOCALITA' STELLA - EVENTO SISMICO DEL 30/10/2016	

N. 410 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciassette,il giorno  ventisette del mese di aprile ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.
PREMESSO:
CHE, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 42 del 10/02/2017 è stato approvato il Verbale di gara del 09/02/2017 ed aggiudicati i lavori in via definitiva alla ditta Giovannoli Alberto per l’importo di Euro 15.859,22 al netto del ribasso offerto del 23,95% oltre ad Euro 3.782,72 per importo della manodopera non soggetto a ribasso, Euro 928,65 per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 790,30 per Costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un Totale netto di Euro 21.360,89oltre all’IVA in misura del 10%.
CHE in data 27/02/2017 è stato stipulato con la ditta Giovannoli Alberto il Contratto di Appalto, assunto al Rep. n. 3290.
CHE in data 03/04/2017 (Prot. n. 4.054) è stato redatto il 1° S.A.L., in corso di approvazione.
DATO ATTO:
CHE la D.L. ha chiesto l’autorizzazione per la redazione di una perizia di variante suppletiva ai lavori approvati, redatta ai sensi dell’art. 149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 poichè, in corso d’opera, è emersa la necessità di smaltire e trasportare il materiale di risulta proveniente dal deposito preesistente nell’area interessata dai lavori, materiale che non è stato possibile reimpiegare, nell’area di cantiere, in quanto costituito essenzialmente da residui di muratura e non da terreno vegetale.

VISTA la Perizia di Variante suppletiva (assunta al Prot. n° 4613 del 14/04/2017) redatta dal Geom. Domenico Marini per i “LAVORI DI PREDISPOSIZIONE AREA PER ALLOGGIAMENTO PREFABBRICATO DA ADIBIRE A SCUOLA” in loc. Stella, nel comune di Cascia (Pg)“ nell'importo complessivo di Euro 33.938,78 così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO Perizia	Euro	
Totale Lavori a misura 	31.228,72	
Importo minimo manodopera lavori	4.444,65	
Importo degli oneri della sicurezza	1.105,67	
Importo dei costi della sicurezza (al lordo costi manodopera sicurezza)	790,30	
IMPORTO TOTALE Oneri non soggetto a ribasso (1)	6.340,62	
Importo LAVORI soggetto a ribasso	24.888,10	
A detrarre il ribasso d’asta del 23,95%	5.960,70	
IMPORTO NETTO LAVORI (2)	18.927,40	
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI  (A = 1 + 2)	25.268,02	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 10% sui Lavori	2.526,80	
Spese tecniche 10% per Progettazione e Direzione lavori	2.635,53	
Cassa Geometri 4%	105,42	
I.V.A. 22% SU Spese Tecniche	603,01	
Prestazione Professionale per pratica Antincendio VV.FF	1.500,00	
Relazione Geologica CNPAIA ed I.V.A.	1.000,00	
Incentivo per R.U.P.	300,00	
Collaudo Statico	761,28	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   (B)	8.670,76	
TOTALE   GENERALE( A + B)	33.938,78	

VISTO lo Schema dell'Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento n. 2 Nuovi Prezzi redatto e sottoscritto in data 11/04/2017,con cui la ditta appaltatrice Giovannoli Alberto si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, aumentando di gg 7 il tempo previsto per i lavori principali per un maggiore importo di Euro 3.907,13 al netto del ribasso d'asta del 23,95%,oltre all'I.V.A. in misura del 10%.

VISTO che nulla osta all'approvazione della perizia di variante suppletiva in quanto la stessa risulta conforme a quanto disposto dall'art. 149 (Varianti in corso d’opera), comma 2 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.) e che l’aumento dell’importo dei lavori  trova la copertura di spesa con il parziale utilizzo delle economie di gara.

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la Perizia di variante suppletiva, lo schema dell'Atto di sottomissione e l’allegato Verbale di concordamento n. 2 Nuovi Prezzi sottoscritti dalla Ditta Giovannoli Alberto.
RITENUTO di dover procedere all'imputazione della spesa di Euro 3.907,13  oltre ad Euro 390,71 per I.V.A. al 10%, per un totale di Euro 4.297,84 pari ai maggiori lavori assunti dalla ditta Giovannoli Alberto con lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla Perizia suppletiva.
RITENUTO di dover affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a del D.lgs n. 50/2016, il Collaudo Statico per il lavoro di “PREDISPOSIZIONE AREA PER ALLOGGIAMENTO PREFABBRICATO DA ADIBIRE A SCUOLA” in loc. Stella nel Comune di Cascia (Pg), all’Ing. Rivolini Santino iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A1984 (C.F.RVL STN 72A17 B948F) per l’importo (comprensivo di oneri prev. ed IVA) di Euro 761,28, non previsto e di IMPUTARE tale somma al bilancio del corrente esercizio finanziario: Codice Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 - Cap. 2850/21 art. 24 –“EMERGENZA SISMA AGOSTO-OTTOBRE 2016, PREDISPOSIZIONE AREA PER POSIZIONAMENTO CONTAINERS AD USO SCOLASTICO E SOCIALE-CONTRIBUTO EMERGENZA SISMICA TRAMITE REGIONE UMBRIA CORR. E 580/21”; Codice Smart CIG Collaudo Lavori: Z341E5FCF3

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento dei contratti pubblici) per la parte ancora in vigore;

PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la l’imputazione e la liquidazione di dette spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposite determinazioni.

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la Perizia suppletiva di Variante redatta dal D.L. Geom. Domenico Marini per i lavori di “PREDISPOSIZIONE AREA PER ALLOGGIAMENTO PREFABBRICATO DA ADIBIRE A SCUOLA, SITO IN LOCALITA’ STELLA” in loc. Stella nel Comune di Cascia (Pg) - nell'importo complessivo di Euro 33.938,78  così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO Perizia	Euro	
Totale Lavori a misura 	31.228,72	
Importo minimo manodopera lavori	4.444,65	
Importo degli oneri della sicurezza	1.105,67	
Importo dei costi della sicurezza (al lordo costi manodopera sicurezza)	790,30	
IMPORTO TOTALE Oneri non soggetto a ribasso (1)	6.340,62	
Importo LAVORI soggetto a ribasso	24.888,10	
A detrarre il ribasso d’asta del 23,95%	5.960,70	
IMPORTO NETTO LAVORI (2)	18.927,40	
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI  (A = 1 + 2)	25.268,02	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 10% sui Lavori	2.526,80	
Spese tecniche 10% per Progettazione e Direzione lavori	2.635,53	
Cassa Geometri 4%	105,42	
I.V.A. 22% SU Spese Tecniche	603,01	
Prestazione Professionale per pratica Antincendio VV.FF	1.500,00	
Relazione Geologica CNPAIA ed I.V.A.	1.000,00	
Incentivo per R.U.P.	300,00	
Collaudo Statico	761,28	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   (B)	8.670,76	
TOTALE   GENERALE( A + B)	33.938,78	

2) DI DARE ATTO che la perizia di variante suppletiva risulta conforme a quanto disposto dall'art. 149 (Varianti in corso d’opera) comma 2 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.i e che l’aumento dell’importo dei lavori (entro il quinto d’obbligo) trova copertura con il parziale utilizzo delle economie di gara.

3) DI APPROVARE lo Schema dell'Atto di Sottomissione ed il Verbale di concordamento n. 2 Nuovi Prezzi redatto e sottoscritto in data 11/04/2017 (in contraddittorio con la ditta ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con cui la ditta appaltatrice GIOVANNOLI ALBERTO si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, aumentando di gg 7 il tempo previsto per i lavori principali per un maggiore importo di Euro 3.907,13 al netto del ribasso d'asta del 23,95%, oltre all'I.V.A. in misura del 10%.

4) DI IMPUTARE la spesa relativa ai maggiori lavori assunti dalla ditta GIOVANNOLI ALBERTO con lo schema dell’atto di sottomissione, pari ad Euro 3.907,13 oltre ad Euro 390,71 per I.V.A. al 10% per un totale di Euro 4.297,84, al bilancio del corrente esercizio finanziario: Codice Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 - Cap. 2850/21 –“EMERGENZA SISMA AGOSTO-OTTOBRE 2016, PREDISPOSIZIONE AREA PER POSIZIONAMENTO CONTAINERS AD USO SCOLASTICO E SOCIALE-CONTRIBUTO EMERGENZA SISMICA TRAMITE REGIONE UMBRIA CORR. E 580/21”.

•	Codice C.U.P:C47B17000030002  -Codice Smart CIG Lavori:ZCB1D00A62

5) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. A del D.lgs n. 50/2016, il Collaudo Statico per il lavoro di “PREDISPOSIZIONE AREA PER ALLOGGIAMENTO PREFABBRICATO DA ADIBIRE A SCUOLA” in loc. Stella nel Comune di Cascia (Pg), all’Ing. RIVOLINI SANTINO iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A1984 (C.F.RVL STN 72A17 B948F) per l’importo di Euro 761,28 (comprensivo di oneri prev. ed IVA), DI IMPUTARE la spesa relativa al COLLAUDO STATICO, pari ad Euro 761,28 (comprensivo di oneri prev. ed IVA) , al bilancio del corrente esercizio finanziario: Codice Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 - Cap. 2850/21 – “EMERGENZA SISMA AGOSTO-OTTOBRE 2016, PREDISPOSIZIONE AREA PER POSIZIONAMENTO CONTAINERS AD USO SCOLASTICO E SOCIALE-CONTRIBUTO EMERGENZA SISMICA TRAMITE REGIONE UMBRIA CORR. E 580/21”.

•	Codice C.U.P:C47B17000030002  -Codice Smart CIG Collaudo Lavori: Z341E5FCF3

6) DI DARE ATTO CHE le spese assunte con il presente atto rientrano tra quelle eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 e trova, quindi, copertura negli stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio dei Ministri con le delibere del 25/08/2016, 27/10/2016 e 31/10/2016 e comunque riferite alle attività di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell’O.D.P.C. n. 388/2016;

7) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del DecretoLgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

8) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Il Rup: Arch. Cucci Antonio

133

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    GINO EMILI

======================================================================

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-05-17 al 25-05-17 Registro Albo pretorio n. 1063

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
RESPONSABILE A.AMMINISTRATIVA
Li, 10-05-17                       F.to GINO EMILI 

======================================================================

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
GINO EMILI 
Li,