COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
332
Data
21-08-19	Oggetto:	LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO TERMICO PALAZZO FRENFANELLI - SEDE COMUNALE "APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA,  SCHEMA DI SOTTOMISSIONE, VERBALE N.P.  IMPUTAZIONE MAGGIORI LAVORI.	

N. 830 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciannove,il giorno  ventuno del mese di agosto ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

PREMESSO che con Decreto Ministeriale del 10.01.2019 sono stati assegnati dei contributi a favore dei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti di cui al comma 107 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018) e che, nello specifico, le risorse assegnate al Comune di Cascia sono pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00);
CONSIDERATO che il contributo oggetto del Decreto Ministeriale del 10.01.2019 può essere utilizzato per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
VISTA l'esigenza di mettere in sicurezza l'attuale impianto termico di Palazzo Frenfanelli, adibito a sede comunale, da realizzare mediante adeguamento dell'attuale impianto e sostituzione del generatore di calore con uno a condensazione alimentato a gas metano;
DATO ATTO che con Determinazione n. 183 del 29.04.2019, del Responsabile del Servizio interessato, è stato affidato l'incarico ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell'impianto termico della sede comunale  allo Studio Tecnico PIRES di Per. Ind. PICCIONI Gianfrancesco, con sede in Spoleto (PG), Viale Trento e Trieste n. 18 (C.F.: PCCGFR52S20I921D -  P.IVA: 00532930542) Codice Cig spese tecniche Progetto: Z022829D78;
VISTO il progetto esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 06.05.2019, “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO TERMICO PALAZZO FRENFANELLI - SEDE COMUNALE”, redatto dal Per. Ind. PICCIONI Gianfrancesco, pervenuto con PEC prot. 4835/2019, depositato agli atti presso l'Ufficio tecnico, dell'importo complessivo di Euro  50.000,00 così di seguito suddiviso:
	
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	39.572,00	
IVA SUI LAVORI (10%)	€	  3.957,20	
COMPETENZE INAIL	€	700,00	
COMPETENZE VVF	€	165,00	
SPESE TECNICHE	€	5.124,00	
SOMME A DISPOSIZIONE 	€	481,80	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	50.000,00	

DATO ATTO che e che al progetto di cui sopra è stato attribuito il seguente codice CUP: C46E19000020001;

VISTO
- che per l'esecuzione di tali opere è stato affidato l'incarico, con determinazione n. 203 del 13.05.2019, alla ditta Tosoni Sistemi Energetici di Tosoni Emanuele con sede in Via Benito Graziani s.n.c., S. Rufina di Cittaducale (RI) P.Iva 01052120571, per l’importo complessivo di € 34.905,96 (oltre ad IVA 10% pari ad € 3.490,60) per la messa in sicurezza dell'impianto termico di Palazzo Frenfanelli, adibito a sede comunale, cod. cig 78925523F3;

- che in data 14.05.2019, considerata l'inderogabile esigenza di dover iniziare i lavori di cui sopra entro il termine perentorio del 15.05.2019 così come previsto dall'art. 1 comma 2 del D.M. 10.01.2019 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 comma 8 e 13 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,  si è proceduto con la consegna dei lavori in via d'urgenza che sono pertanto iniziati nel medesimo giorno;

- che in data 09.08.2019 si è proceduto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., alla firma digitale del contratto presente agli atti di questo Ente, n. repertorio 3248;

PRESO ATTO che, con Nostro protocollo n. 8223 del 06.08.2019, è pervenuta una perizia di variante da parte del Direttore dei Lavori Per. Ind. PICCIONI Gianfrancesco redatta ai sensi dell'art. 149 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  per "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI CENTRALE TERMICA SEDE COMUNALE PER LA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE CON ALTRO DEL TIPO A CONDENSAZIONE E TRASFORMAZIONE ALIMENTAZIONE DA GASOLIO A GAS METANO"  dell'importo complessivo di Euro 50.000,00 così suddiviso nel Quadro economico di spesa:
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA	
EURO	
IMPORTO TOTALE LAVORI PERIZIA	46.172,00	
A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 11,79%	                 -  5.443,68	
IMPORTO NETTO LAVORI DI PERIZIA (a)	40.728,32	
SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA SUI LAVORI (10%)	4.072,83	
SPESE TECNICHE (compreso cassa prev. e IVA)	5.124,00	
A DISPOSIZIONE	74,85	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b)	9.271,68	
TOTALE GENERALE (a) + (b)	50.000,00	

VISTO lo Schema dell'Atto di Sottomissione ed il Verbale di concordamento n. 6 Nuovi Prezzi con cui la ditta Tosoni Sistemi Energetici di Tosoni Emanuele si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, entro lo stesso tempo previsto per i lavori principali  aumentato di giorni 30 (TRENTA) per un maggiore importo di Euro 5.822,36 oltre IVA di legge;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la Perizia di variante presentata dal Direttore dei Lavori  Per. Ind. PICCIONI Gianfrancesco e lo schema dell'Atto di sottomissione Verbale di concordamento Nuovi prezzi sottoscritto dalla Ditta Tosoni Sistemi Energetici di Tosoni Emanuele;

RITENUTO di dover procedere all'imputazione della la spesa di Euro 5.822,360 oltre ad Euro 582,24  per IVA al 10%, per un totale di Euro 6.404,60, pari ai maggiori lavori assunti dalla ditta Tosoni Sistemi Energetici di Tosoni Emanuele con lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla Perizia suppletiva. Codice Cig ZA02987582;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture) ;

PRESO ATTO che ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l’assunzione e la liquidazione di detta spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposita determinazione.

D E T E R M I N A

1) DI RICHIAMARE quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI APPROVARE la Perizia di variante suppletiva redatta ai sensi dell’art. comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i dal D.L. Per. Ind. PICCIONI Gianfrancesco.  per "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI CENTRALE TERMICA SEDE COMUNALE PER LA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE CON ALTRO DEL TIPO A CONDENSAZIONE E TRASFORMAZIONE ALIMENTAZIONE DA GASOLIO A GAS METANO"  dell'importo complessivo di Euro 50.000,00 così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA	
EURO	
IMPORTO TOTALE LAVORI PERIZIA	46.172,00	
A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 11,79%	                 -  5.443,68	
IMPORTO NETTO LAVORI DI PERIZIA (a)	40.728,32	
SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA SUI LAVORI (10%)	4.072,83	
SPESE TECNICHE (compreso cassa prev. e IVA)	5.124,00	
A DISPOSIZIONE	74,85	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b)	9.271,68	
TOTALE GENERALE (a) + (b)	50.000,00	

3) DI APPROVARE lo Schema dell'Atto di Sottomissione ed il Verbale di concordamento n. 6 Nuovi Prezzi con cui la ditta appaltatrice Tosoni Sistemi Energetici di Tosoni Emanuele si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, entro lo stesso tempo previsto per i lavori principali  aumentato di giorni 30 (trenta) per un maggiore importo di Euro 5.822,36 oltre IVA di legge;

4) DI IMPUTARE la spesa di Euro 5.822,36 oltre ad Euro 582,24  per IVA al 10%, per un totale di Euro 6.404,60 per maggiori lavori assunti di cui alla Perizia suppletiva dalla Ditta Tosoni Sistemi Energetici di Tosoni Emanuele con sede in Via Benito Graziani s.n.c., S. Rufina di Cittaducale (RI) P.Iva 01052120571al Codice Bilancio 01.06-2.02.01.09.019 (Cap. 2511 art. 5 LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIA SEDE COMUNALE FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ART.1, c.107 Legge 30 dicembre 2018, n.145 PER SOSTITUZIONE CALDAIA SEDE COMUNALE CORR. E 500 ART.5 . Codice Cig ZA02987582;

•	Codice CIG:   78925523F3 ;
•	Codice Cig Maggiori lavori: ZA02987582;
•	Codice CUP:  C46E19000020001;

5) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

6) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, nonché sul profilo internet del Comune di Cascia - link “Amministrazione trasparente”.

332

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    MARCACCIOLI LUCIA

======================================================================

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-09-19 al 21-09-19 Registro Albo pretorio n. 1217

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 06-09-19                       F.to VULPIANI SIMONA 

======================================================================

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA 
Li,