COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
351
Data
09-09-19	Oggetto:	APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI IN LOC FUSTAGNA, CASTEL SAN GIOVANNI, VALDONICA - DITTA NANNI & FIGLI SNC	

N. 877 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciannove,il giorno  nove del mese di settembre ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

PREMESSO:
Che si rende necessario provvedere con urgenza alla sistemazione delle strade comunali nelle località Castel S. Giovanni, Fustagna e Valdonica in quanto, allo stato attuale, il notevole dissesto della sede stradale caratterizzato dalla presenza di buche ed avvallamenti dovute all’azione degli agenti atmosferici ed alla vetustà della pavimentazione esistente non permette più il regolare transito veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza.

Che l'Amministrazione ha interessato l’Ufficio tecnico – COC Cascia, per la redazione del progetto per interventi di ripristino pavimentazioni stradali delle strade comunali sopra menzionate. 

VISTO il Verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto in data 25/10/2018 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici par lavori, servizi e forniture).

CHE, con deliberazione della Giunta Comunale n° 162 del 25.10.2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per “INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA”, nell'importo complessivo di Euro  108.811,21 così di seguito suddiviso:

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO	
INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI
FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA	
A)  Lavori soggetti a ribasso 	€ 81.041,46   	
A.1)   Costi per la sicurezza  	€ 997,23     	
B   IMPORTO DEI LAVORI (A+A.1) 	€ 82.038,69	
C     I.V.A. 22% sui lavori 	€      18.048,51 	
D     incentivo progett. Artt.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€     1.640,77	
E     imprevisti (2.80%)	€     2.297,08	
F     Spese tecniche Sicurezza (compresa iva e cassa) 	€     1.857,36	
G     campionamenti e analisi	€         334,02	
H   accantonamento accordi bonari 3% 	€ 2.461,16       	
I    spese gara 	€ 133,61     	
L  TOTALE SPESE GENERALI (C+D+E+F+G+H)	€  26.772,52	
TOTALE PROGETTO (B+L)	€ 108.811,21 	

CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 429 del 16/11/2018, è stato adottato formale provvedimento a contrarre ai sensi e per gli effetti del combinato  disposto dell'art.192 de lT.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lvo 267/00 e dall'art.  63 del D.lgs 18 Aprile 2016, n.50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UEe2014/25/UE);

CHE, con il medesimo atto, si è proceduto all’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 con il criterio del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara,  per i lavori di “RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA”;

CHE, in esecuzione al suddetto atto sono stati individuati mediante sorteggio pubblico n° 20 (venti) dittetra tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura negoziata a cui è stata inoltrata tramite pecla lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata;

VISTOil Verbale di gara n.03 redatto in data 22/02/2019 dal seggio di gara monocratico, da cui si evince che il migliore offerente è risultato essere la ditta NANNI E FIGLI SNC, con sede in Via Colle del Marchese n.72 - 06044Castel Ritaldi (PG) - la quale ha offerto un ribasso d'asta del 25,227%;

VISTA la Determinazione Area tecnica LLP n. 152 del 29/03/2019 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di cui trattasi alla ditta NANNI E FIGLI SNC C.F. e P.I.01306970540, con sede in Via Colle del Marchese n.72 - 06044 Castel Ritaldi (PG), per l’importo, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara del 25,227% di Euro 51.841,44 oltre ad Euro 9.029,46 per Costo della manodopera (non soggetta a ribasso), Euro 2.680,23 per Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed Euro 997,23 per Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un Totale netto di Euro 64.548,36 (Sessantaquattrocinquecentoquarantotto/36) oltre all’I.V.A.;

CHE in data 16/05/2019 è stato stipulato il contratto per i lavori in oggetto con la Ditta NANNI E FIGLI SNC avente n. REP 3339;

DATO ATTO:
CHE in data 09/07/2019, come da Verbale in pari data, si è provveduto alla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice.

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 14/07/2019, con il quale, stante la necessità di redigere una perizia di variante, si sospendono i lavori a far data dal 15/07/2019;

PRESO ATTO:

CHE i lavori sono stati sospesi in data 15/07/2019 come da Verbale di sospensione lavori;

VISTO lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 redatto dal D.L. Geom. Isabella Claudiani, dipendente del Comune di Cascia, da cui risulta che la ditta NANNI E FIGLI SNC, alla data del 16/07/2019 ha eseguito i lavori di “RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA”, per un importo, al netto del ribasso d'asta di Euro 56.500,54, comprensivo di Euro 3.267,01 per oneri e costi della sicurezza ed Euro 8.043,76 per incidenza manodopera non soggetti a ribasso, oltre all’IVA 22%.

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1, emesso in data 16/07/2019 dal D.L. Geom. Isabella Claudiani, con cui certifica che a termine del Capitolato speciale d'appalto si può pagare alla ditta NANNI E FIGLI SNC, per i lavori di che trattasi, la somma di Euro 56.500,54,oltre all'I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 12.430,12, per un totale di Euro 68.930,66, giusta Fattura elettronica n. 19 del 13/08/2019 (Prot. n. 8453 del 14/08/2019).

VISTO il Durc Online da cui risulta che la Ditta NANNI E FIGLI SNC è in regola nei confronti di Inps ed Inail (Prot. Inail_17398593 con validità fino al 10/11/2019;

VISTA la Fattura n. 19 del 13/08/2019 (assunta al prot. n. 8453 del 14/08/2019) presentata dalla Ditta NANNI E FIGLI SNC nell’importo complessivo di Euro 68.930,66 quale 1° SAL dei lavori di “RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA”, di cui Euro 56.500,54, comprensivo di Euro 3.267,01 per oneri e costi della sicurezza ed Euro 8.043,76 per incidenza manodopera non soggetti a ribasso  ed Euro 12.430,12 per IVA 22%, per un totale di EURO 68.930,66.

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 183 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare le apposite determinazioni.

VISTI il Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 redatto dal D.L. Geom. Isabella Claudiani, dipendente del Comune di Cascia, da cui risulta che la ditta NANNI E FIGLI SNC, alla data del 16/07/2019 ha eseguito i lavori di “DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI: FUSTAGNA, CASTEL S. GIOVANNI, VALDONICA per un importo, al netto del ribasso d'asta del 25,277%, di Euro 56.500,54, oltre ad Euro 12.430,12 per I.V.A. 22%, per un importo totale pari ad Euro 68.930,66.

2) DI LIQUIDARE la Fattura n. 19 del 13/08/2019 (assunta al prot. n. 8453 del 14/08/2019). dell’importo di Euro 56.500,54 oltre ad Euro 12.430,12 per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 68.930,66 emessa dalla Ditta appaltatrice NANNI E FIGLI SNC  C.F. e P.I.01306970540, con sede in Colle del Marchese n. 72 – 06044 Castel Ritaldi (PG); 

3) DI IMPUTARE la spesa di Euro 56.500,54 oltre ad Euro 12.430,12 per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 68.930,66 al Codice di Bilancio10.05-2.02.01.09.012al - Capitolo 2840/15 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE DELLE FRAZIONI DI FUSTAGNA-C.S.GIOVANNI-VALDONICA Finanz.Avanzo INVEST.2017 ECONOMIE SU INVEST.FINANZ.CON ENTRATE CORRENTI  – (imp. fin. FPV n. 00973-2018 – sub 00001 del 01/04/2019); 

che al progetto è stato attribuito il seguente
•	codice CUP: C47H1001310004
•	Codice CIG: 7697730FBC

4) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

5) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

351

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    MARCACCIOLI LUCIA

======================================================================

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25-10-19 al 09-11-19 Registro Albo pretorio n. 1453

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 25-10-19                       F.to VULPIANI SIMONA 

======================================================================

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA 
Li,