COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

N°  115
Del  05-07-2019	OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza fabbricato in Frazione Ruscio, Fg 29 Part. 110-111, ricompreso tra Via Monteleone e Piazza Nazionale - Ditta PF Costruzioni Srl Ruscio -  CIG: Z53271EAE3 - CUP: E17C18000200002.  Variante progettuale. 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-	gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi hanno danneggiato alcuni immobili nel territorio comunale, tra cui l’edificio sito in Ruscio, distinto in catasto al foglio n. 29 part. 110_111, comportando anche la chiusura completa al transito di veicoli e pedoni di Via Monteleone, tra le più importanti per l’accesso alla Frazione;
si rende necessario provvedere alla riapertura di Via Monteleone per motivi di interesse pubblico, effettuando i necessari interventi di messa in sicurezza ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità;     
-	con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 229 del 06/09/2018 si provvedeva all’affidamento della progettazione dell’intervento di messa in sicurezza di cui all’oggetto, al Professionista Ing. Angelini Alessandro C.F. NGLLSN86B10B948I, per un importo complessivo del progetto di Euro 49.514,06;
-	con Deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 07/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal professionista sopra indicato, avente il seguente oggetto: “Sisma 2016 – messa in sicurezza dell'immobile sito in Via Monteleone angolo Piazza Nazionale in frazione Ruscio, Fg 29 part. 110-111”, per un importo complessivo di Euro 49.514,06, come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	
A	IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA- SOGGETTO A RIBASSO	€ 30.309,07	
B	COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 	€ 7.870,30	
C	IMPORTO LAVORI A+B	€ 38.179,37	
	SOMME A DISPOSIZIONE		
D	SPESE TECNICHE E PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA	€ 3.817,94	
E	ONERI SULLE SPESE TECNICHE (INARCASSA 4%) = D*4%	€ 152,72	
F	I.V.A. SULLE SPESE TECNICHE (D+E*22%)	€ 873,54	
G	I.V.A. DELL’IMPORTO DEI LAVORI = 10%*C	€ 3.817,94	
H	INCENTIVO 2% (ART. 113 D.LGS 50/2016)	€ 763,59	
I	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI (5%)	€ 1.908,97	
L	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE = D+E+F+G+H+I	€ 11.334,69	
M	IMPORTO TOTALE PROGETTO C+M	€ 49.514,06	
-	con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 30 del 13.02.2019, veniva stabilito di procedere all’appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo a base d’asta di €. 38.179,37 (di cui € 7.870,30 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre a I.V.A. al 10%;
-	l’individuazione delle Imprese da invitare è avvenuta mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse e successiva estrazione pubblica di cinque concorrenti da invitare alla gara d’appalto;
-	la gara d’appalto è stata espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 37 del D.Lgs n. 56/2017) sulla piattaforma Net4Market, da parte dell’incaricata Centrale Unica di Committenza del Comune di Spoleto (PG);
-	con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 32 del 27/05/2019 l’intervento è stato aggiudicato in via definitiva, all’Impresa PF Costruzioni Srl di Rieti; che il quadro economico dell’intervento, a seguito dell’aggiudicazione, è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO	
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	
A	IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA- SOGGETTO A RIBASSO	€ 30.309,07	
B	COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 7.870,30	
C	IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA A+B	€ 38.179,37	
D	RIBASSO D’ASTA 18,00%	-	€ 5.455,63	
E	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 32.723,74	
	SOMME A DISPOSIZIONE		
F	SPESE TECNICHE E PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA	€ 3.730,14	
G	ONERI SULLE SPESE TECNICHE (INARCASSA 4%) 	€ 149,19	
H	I.V.A. SULLE SPESE TECNICHE 22%	€ 381,73	
I	I.V.A. DELL’IMPORTO DEI LAVORI = 10%	€ 3.272,37	
M	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI 	€ 1.908,97	
N	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.442,40	
O	IMPORTO TOTALE PROGETTO E+N	€ 42.166,14	

-	il Contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 01/07/2019 rep. 1039 ed i relativi lavori sono stati consegnati in pari data;  
-	con atto di Giunta Comunale n.47 del 03/07/2019 l’esecutivo richiedeva all’Ufficio Tecnico Comunale una rivalutazione progettuale dell’intervento di messa in sicurezza dell’immobile Fg 29 part. 110 e 111 di cui all’oggetto, al fine di una occupazione meno ingombrante dell’area interessata, evitando limitazioni sulla fruibilità della viabilità interessata relativa a Via Monteleone e Piazza Nazionale, anche in considerazione del fatto che a breve verranno appaltati i lavori sulla viabilità (intervento PSR 7.2.1 “La Miniera”) che interesseranno la Strada Comunale della Frazione di Ruscio, con inizio da Via Della Grande Italia fino alla Loc. “La Miniera”, ricomprendendo anche Piazza Nazionale, oggetto dell’intervento in argomento;
 
-	a seguito di ciò si è richiesto al Direttore dei Lavori Ing. Lanfranco Castellucci di Cascia, di valutare e predisporre una variante al progetto originale, che permetta di limitare l’occupazione della viabilità pubblica, in considerazione del fatto che le puntellature da porre in opera rimarranno in loco per un periodo non breve a discapito della circolazione dei veicoli e dei pedoni nell’area interessata, evitando di porre delle limitazioni anche sulle altezze dei veicoli che potranno di nuovo transitare su Via Monteleone ai fini di accedere alla Frazione di Ruscio provenienti dalla S.S. n.471 (Cascia-Leonessa), tali variazioni garantiscono, la necessaria sicurezza degli spazi pubblici da proteggere, al fine di consentite la riapertura degli stessi alla pubblica fruizione, sia pedonale che veicolare;                 

Vista la Variante al progetto datata 05/07/2019, predisposta dall’Ing. Castellucci Lanfranco Direttore dei lavori dell’intervento in oggetto, che tiene conto delle richieste formulate dall’Amministrazione Comunale che prevede la diminuzione delle superficie delle aree occupate e l’eliminazione delle limitazioni in altezza per il transito dei veicoli su Via Monteleone, composta dai seguenti elaborati:

-	 Relazione Tecnica Illustrativa;
-	 Quadro Economico Generale;
-	 Elaborato Grafico – Stato di Progetto;
-	 Elenco Prezzi;
-	 Computo Metrico Estimativo;
-	 Analisi Prezzi;
-	 Elenco Elaborati di Variante;
-	Atto sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

avente il seguente quadro economico: 
	QUADRO ECONOMICO	
		
DESCRIZIONE	IMPORTI PROGETTO 	IMPORTI PROGETTO AGGIUDICATO Det. LL.PP. 96/2019	IMPORTI DI VARIANTE	
A	IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA- Soggetto a Ribasso	€ 30.309,07	€ 30.309,07	€ 31.576,64	
B	COSTI SICUREZZA - Non Soggetti a Ribasso	€ 7.870,30	€ 7.870,30	€ 8.353,28	
C	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA A+B	 	€ 38.179,37	€ 39.929,92	
D	RIBASSO D'ASTA 18,00%	 	€ 5.455,63	€ 5.683,80	
E	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 38.179,37	€ 32.723,74	€ 34.246,12	
 	SOMME A DISPOSIZIONE	 	 	 	
F	SPESE TECNICHE di cui:	€ 3.817,94	€ 3.730,14	€ 4.530,14	
	F1	         PROGETTAZIONE	 	€ 2.061,69	€ 2.061,69	
	F2	         DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	 	€ 1.668,45	€ 1.668,45	
	F3	         REDAZIONE VARIANTE	 	 	€ 800,00	
G	CNPAIA 4% (su F1+F2+F3)	€ 152,72	€ 149,19	€ 181,21	
H	I.V.A. 22%  S. T. (solo su  F2 e F3+Cassa)	€ 873,54	€ 381,73	€ 564,78	
I	I.V.A. SU IMPORTO DEI LAVORI 10%	€ 3.817,94	€ 3.272,37	€ 3.424,61	
L	INCENTIVO 2%	€ 763,59	 	 	
M	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 1.908,97	€ 1.908,97	€ 353,14	
N	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.334,69	€ 9.442,40	€ 9.053,88	
O	IMPORTO TOTALE PROGETTO E+M	€ 49.514,06	€ 42.166,14	€ 43.300,00	

Visto lo schema dell’atto di sottomissione e concorda mento nuovi prezzi, firmato dall’Impresa esecutrice dei lavori, per un nuovo importo contrattuale di Euro 34.246,12 oltre IVA al 10%, come per legge;

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione della Variante al progetto, al fine di procedere quanto prima alla riapertura della viabilità in oggetto, chiusa a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 e successivi; 

Dato atto che:
- ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di impegno di spesa, il presente atto necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
- la presente Determinazione è stata compilata dal Responsabile del Procedimento ed è trasmessa al Responsabile del Servizio Tecnico, al fine delle relative determinazioni di competenza;
- il Responsabile del Servizio Tecnico ha espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sul presente atto;

Ritenuto che il presente atto sia di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
Acquisiti i prescritti parere espressi ai sensi dell’art. 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
-	parere di regolarità tecnico-amministrativa;
-	parere di regolarità contabile;
-	attestazione di copertura finanziaria;

Richiamati:
-	il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
-	il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato; 

1.	Di approvare la variante al progetto di messa in sicurezza dell’immobile di cui all’oggetto, approvata con precedente atto di G.C. n. 72 del 07/12/2018, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Castellucci Lanfranco in data 05/07/2019 per un importo complessivo di Euro 43.300,00 come da seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO	
		
DESCRIZIONE	IMPORTI PROGETTO 	IMPORTI PROGETTO AGGIUDICATO Det. LL.PP. 96/2019	IMPORTI DI VARIANTE	
A	IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA- Soggetto a Ribasso	€ 30.309,07	€ 30.309,07	€ 31.576,64	
B	COSTI SICUREZZA - Non Soggetti a Ribasso	€ 7.870,30	€ 7.870,30	€ 8.353,28	
C	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA A+B	 	€ 38.179,37	€ 39.929,92	
D	RIBASSO D'ASTA 18,00%	 	€ 5.455,63	€ 5.683,80	
E	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 38.179,37	€ 32.723,74	€ 34.246,12	
 	SOMME A DISPOSIZIONE	 	 	 	
F	SPESE TECNICHE di cui:	€ 3.817,94	€ 3.730,14	€ 4.530,14	
	F1	         PROGETTAZIONE	 	€ 2.061,69	€ 2.061,69	
	F2	         DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA	 	€ 1.668,45	€ 1.668,45	
	F3	         REDAZIONE VARIANTE	 	 	€ 800,00	
G	CNPAIA 4% (su F1+F2+F3)	€ 152,72	€ 149,19	€ 181,21	
H	I.V.A. 22%  S. T. (solo su  F2 e F3+Cassa)	€ 873,54	€ 381,73	€ 564,78	
I	I.V.A. SU IMPORTO DEI LAVORI 10%	€ 3.817,94	€ 3.272,37	€ 3.424,61	
L	INCENTIVO 2%	€ 763,59	 	 	
M	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 1.908,97	€ 1.908,97	€ 353,14	
N	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.334,69	€ 9.442,40	€ 9.053,88	
O	IMPORTO TOTALE PROGETTO E+M	€ 49.514,06	€ 42.166,14	€ 43.300,00	

2.	Di approvare l’atto di sottomissione, firmato dalla Ditta esecutrice dei lavori PF Costruzioni Srl CF/P.IVA n.01125820579 con Sede in via S. Agnese, 13/e di 02100 Rieti, che prevede un nuovo importo dei lavori pari ad Euro 34.246,12 oltre IVA al 10% come per legge, che allegato al presente atto né forma parte integrante e sostanziale. 

3.	Di dare atto che la variante è composta dalla documentazione in premessa specificata.

4.	Di dare atto che l’intervento per un complessivo di Euro 43.300,00, trova la copertura finanziaria, impegnando la somma di € 1.133,86 all’intervento del B.P. 2019 come segue:

Capitolo/ articolo	
Codice di Bilancio
	CP/FPV/RP	Imp.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’	
				2019
Euro	2020
Euro	2021
Euro	
2860/19	11.01-1.10.99.99.999	CP	 55	€ 1.133,86

                Impegno assunto con Determinazione n. 96 del 27/05/2019:

Capitolo/ articolo	
Codice di Bilancio
	CP/FPV/RP	Imp.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’	
				2019
Euro	2020
Euro	2021
Euro	
2860/13	11.01-1.10.99.99.999	CP	  45	€ 37.321,94
			
                  Impegno assunto con Determina n.229 del 06/09/2018:

Capitolo/ articolo	
Codice di Bilancio
	CP/FPV/RP	Imp.	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’	
				2018
Euro	2019
Euro	2020
Euro	
2860/13	11.01-1.10.99.99.999	CP	65		€ 4.844,20		

5. Di dare atto che l’opera è finanziata integralmente dalla Regione dell’Umbria, ai sensi e per gli effetti delle Determinazioni Dirigenziali n.1839 del 27.02.2017, n.12265 del 21.11.2017 e n.271 del 15.01.2018.

6. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, co. 8, del vigente TUEL, il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

7. Di precisare, a norma dell’art. 183, co. 9 bis del vigente Tuel, che trattasi di spesa non ricorrente (punto 5 dell’allegato n. 7 al D.Lgs. 118/2011).

8. Di dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del Servizio, che adotta l'atto.

9. Il presente atto, ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo pretorio online per 15 giorni e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito istituzionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
10. Di dare atto che il Responsabile Unico del presente procedimento è il Geom. Salvatore Paoletti, dipendente dell’Ente.

11. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

SP

	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	
	 Grasso Angelo Vincenzo	
	Ex art.49 comma 2^Dlgs 267/00	

---------------------------------------------------------------------------
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Esprime parere Favorevole di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
		
	Favorevole con le seguenti annotazioni:

                                                 Il Responsabile del Area Tecnica Lavori Pubblici
                                                                                  Ad interim
                                                                              F.to  Grasso Angelo Vincenzo
Monteleone di Spoleto, li 05-07-2019
	
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
	
Esprime parere Favorevole di regolarità contabile;

Favorevole con le seguenti annotazioni:	
	
                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                           Ad interim
                                                                                        F.to  Grasso Angelo Vincenzo	
Monteleone di Spoleto, li 05-07-2019	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	
Ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria del presente atto.	
	
                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                             Ad interim                               
                                                                      F.to   Grasso Angelo Vincenzo	
Monteleone di Spoleto, 05-07-2019	

Comune di  Monteleone di Spoleto	
Provincia di Perugia	
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE	
	
Pubblicazione n. 207
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’ente per quindici giorni consecutivi dal 24-07-2019	
	
Monteleone di Spoleto, 24-07-2019	
	
                                                         Il  Resp.le della Pubblicazione	
                                                    F.to   Grasso Angelo Vincenzo

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Monteleone di Spoleto, lì 24-07-2019
						
Il Responsabile del Area Tecnica Lavori Pubblici
							   Ad Interim
						F.to   Grasso Angelo Vincenzo