COMUNE DI ROTELLA
Prov.ASCOLI PICENO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
UFFICIO TECNICO

----------------------------------------------------------------------
N.40  | OGGETTO: EMERGENZA  SISMA  - MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO
|          MUNICIPALE IN VIA UMBERTO I°, COSTITUENTE PERICOLO
15-05-19 |          PER  LA PUBBLICA INCOLUMITÀ  APPROVAZIONE VERIANTE
|          DI PROGETTO
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quindici del mese di maggio.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVA ai sensi dell'art.6 comma 11 Legge n.127/97;
li................

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

Viste il D. L.gvo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:
•	questo Comune è stato fortemente interessato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi che hanno causato danni significativi su tutto il territorio comunale;
•	in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
•	si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici che privati;
•	esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato per giorni 180 dalla data del predetto provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24/08/2016 e successivi che ha interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e l'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016;
RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;
VISTO il Verbale di Somma Urgenza del 07.02.2018 Prot. N.542 “Messa in sicurezza del Palazzo Municipale costituente pericolo per la pubblica incolumità su pubblica via” con il quale si dichiara lo stato di emergenza e la necessità del ripristino dello stato di sicurezza mediante l'esecuzione di opportune opere e veniva incaricato l’Ing. Vincenzo Troiani di provvedere con la massima celerità alla redazione di un progetto per la messa in sicurezza del fabbricato sito in via Umberto I, censito al catasto fabbricati al foglio 13 con la particella 134 di proprietà del Comune di Rotella, P.IVA 00358230449, indicandone le modalità esecutive e quantificandone la spesa e che si contattino n.8 imprese disponibili all’effettuazione immediata dei lavori, sulla base del progetto e del computo metrico redatto dall’Ing. Vincenzo Troiani, affidando i lavori all’impresa che presenterà la migliore offerta economica dopo aver effettuato un sopralluogo obbligatorio; 
VISTO che l’Ing. Vincenzo Troiani, nato ad Ascoli Piceno (AP) il 15.09.1977 C.F. TRNVCN77P15A462V, incaricato con il richiamato verbale di redigere un progetto di messa in sicurezza del fabbricato ai fini della tutela della pubblica incolumità, in data 08.02.2018 Prot. n.545 ha consegnato il relativo progetto composto dai seguenti elaborati:
1.	Relazione tecnica
2.	Relazione geotecnica fondazioni
3.	Relazione materiali impiegati
4.	Piano di manutenzione
5.	Relazione di calcolo
6.	Computo metrico
7.	Quadro economico
8.	Planimetria
Con il seguente quadro economico:
Lavori da computo metrico	116.890,02 € 	
Oneri per la sicurezza	4.675,60 € 	
Importo soggetto a ribasso	112.214,42 € 	
	
Somme a disposizione:	
IVA sui lavori	22%	27.001,59 € 	
Spese tecniche	5%	6.136,73 € 	
Cassa previdenziale su spese tecniche	4%	245,47 € 	
IVA su spese tecniche	22%	1.404,08 €	
Incentivo RUP	2%	2.454,69	
Imprevisti	5%	5.844,50 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	43.087,06 €  	
TOTALE PROGETTO	159.977,08 € 	
VISTA la nota della Regione Marche giunta al protocollo il 16.02.2018 n.649, con la quale comunica il rilascio del nulla osta agli interventi progettuali condizionatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito specificate:
-	Nuovo C.M.E. sostituendo il cod. A05034 della voce n°2, con il cod. A06001;
-	Quadro tecnico economico aggiornato in funzione delle modifiche sopra richieste e con computazione delle spese tecniche al 5% rispetto all’importo dei lavori più IVA e versamenti previdenziali;
VISTA l’integrazione consegnata in data 28.03.2018 prot. n.1353, dall’Ing. Troiani Vincenzo, composta dal C.M.E. revisionato, come segue:
Lavori da computo metrico	114.502,83 € 	
Oneri per la sicurezza	4.580,11 € 	
Importo soggetto a ribasso	109.922,72 € 	
	
Somme a disposizione:	
IVA sui lavori	22%	26.450,15 € 	
Spese tecniche	5%	6.011,40 € 	
Cassa previdenziale su spese tecniche	4%	240,46 € 	
IVA su spese tecniche	22%	1.375,41 €	
Incentivo RUP	2%	2.404,56 €	
Imprevisti	5%	5.725,14 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	42.207,12 €  	
TOTALE PROGETTO	156.709,95 € 	
VISTA la nota della Regione Marche giunta al protocollo il 04.04.2018 n.1418, con la quale comunica il rilascio del nulla osta agli interventi progettuali condizionatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito specificate:
-	Sostituire nel CME per la voce n°2 il cod. A05034 con il cod. A06001 per i soli profilati UPN120;
-	Le spese tecniche riportate nel quadro economico non dovranno eccedere l’importo ammissibile del 5% dei lavori, escluso iva ed oneri previdenziali;
VISTA l’integrazione consegnata in data 11.04.2018 prot. n.1512, dall’Ing. Troiani Vincenzo, composta dal C.M.E. revisionato, come segue:
Lavori da computo metrico	72.991,41 € 	
Oneri per la sicurezza	2.919,66 € 	
Importo soggetto a ribasso	70.071,75 € 	
	
Somme a disposizione:	
IVA sui lavori	22%	16.058,11 € 	
Spese tecniche	5%	3.649,57 € 	
Cassa previdenziale su spese tecniche	4%	145,98 € 	
IVA su spese tecniche	22%	835,02 €	
Incentivo RUP	2%	1.459,83 €	
Imprevisti	5%	3.649,57 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	25.798,08 €  	
TOTALE PROGETTO	98.789,49 € 	
VISTA la Perizia Giustificativa delle Spese Tecniche “VERBALI DI SOMMA URGENZA PROT. N.540 DEL 07.02.2018, PROT. N.541 DEL 07.02.2018, PROT. N.542 DEL 07.02.2018, PROT. N.548 DEL 08.02.2018 E PROT. N.552 DEL 08.02.2018 E PROGETTI DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.”, redatta il 18.04.2018 dal Responsabile del Servizio Dott. Giovanni Borraccini.
VISTO l’Atto n.24 del 20.04.2018 con il quale la Giunta Comunale ha approvato il Verbale di Somma Urgenza, la relativa Perizia Giustificativa delle Spese Tecniche ed il relativo progetto redatto e presentato dal suindicato professionista Ing. Vincenzo Troiani;
CONSIDERATO:
•	che la situazione come sopra rappresentata costituisce un grave pericolo per la pubblica incolumità per il rischio di crolli sulla viabilità pubblica per cui si rende necessario intervenire con la massima tempestività;
•	preso atto che si è già provveduto al transennamento dell’area ed allo sgombero dei fabbricati limitrofi;
•	che il presente affidamento soggiace alla disciplina di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, recante disciplina dei lavori di somma urgenza, nonché a quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 come sopra specificato;
•	ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
1.	il fine che con il contratto si intende perseguire;
2.	l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3.	le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
•	ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO il Verbale di Somma Urgenza del 07.02.2018 Prot. N.542 con il quale veniva incaricato il Dott. Ing. Troiani Vincenzo di provvedere con la massima celerità alla redazione di un progetto per la messa in sicurezza del fabbricato;
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.48 del 01.06.2018 con la quale si può avviare la procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario [CUP:C79B18000050002];
VISTE le note Prot. N.2177 del 06.06.2018 con le quali sono state invitate le seguenti ditte a presentare l’offerta-economica:
1	Ditta:	ARTIGIANA EDILE SRL Via della Repubblica n.5 63071 Rotella (AP)
PEC: artigianaedile1975@pec.it P.IVA: 00230110447	
2	Ditta:	SIQUINI COSTRUZIONI SRL Via Borgo Garibaldi n. 154/1 63072 Castignano (AP)
PEC: siquini.costruzioni.srl@arubapec.it P.IVA: 01338300443	
3	Ditta:	ACCIARRI COSTRUZIONI SRL Via Valle Falciana n.3/A 63068 Montalto delle Marche (AP)
PEC: acciarricostruzioni@pec.it P.IVA: 01384970446	
4	Ditta:	VIOLONI SRL Largo Adriatico n.19 63824 Altidona (FM)
PEC: violoni.srl@pec.it P.IVA: 01713390449	
5	Ditta:	CICCHI COSTRUZIONI SRL C.da Case Sparse n.4 63079 Colli del Tronto (AP)
PEC: costruzioni_cicchi@legalmail.it P.IVA: 00373850445	
6	Ditta:	IACOPONI & C. SRL Via Fusinato n.89 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
PEC: iacoponisrl@postacertificata.pro P.IVA: 01576300444 C.F.: 04900521008	
7	Ditta:	FELICI SRL Via G. Caldora SN 67100 L'Aquila (AQ)
PEC: impresafelici@pcert.it P.IVA: 02271580447	
8	Ditta:	DUEEMME S.N.C. DI MARIANO MARIANI & C. Via del Commercio n.70 63100 Ascoli Piceno (AP)
PEC: dueemme_snc@pec.it P.IVA: 01166040442	
DATO ATTO che, come indicato nel Verbale di Apertura Buste Prot. N.2440 del 20.06.2018, le ditte hanno presentato le seguenti offerte:
	Data	Protocollo N°	Ditta	Ribasso %	Importo Offerto Compreso O.S. e Ribasso	
1	19.06.2018	2392	ACCIARRI COSTRUZIONI SRL
P.IVA: 01384970446	9,75 %	€ 66.159,41	
2	20.06.2018	2417	VIOLONI SRL
P.IVA: 01713390449	4,00 %	€ 70.188,54	
3	20.06.2018	2421	SIQUINI COSTRUZIONI SRL
P.IVA: 01338300443	5,555 %	€ 69.098,92	
4	20.06.2018	2422	IACOPONI & C. SRL
P.IVA: 01576300444
C.F.: 04900521008	12,57 %	€ 64.183,02	
5	20.06.2018	2423	ARTIGIANA EDILE SRL
P.IVA: 00230110447	5,00 %	€ 69.487,82	
6	20.06.2018	2424	CICCHI COSTRUZIONI SRL
P.IVA: 00373850445	7,75 %	€ 67.560,85	
Prosegue quindi ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all’individuazione della percentuale costituente la soglia di anomalia, secondo il metodo estratto, come sopra indicato, addivenendo al seguente risultato:
•	SOGLIA DI ANOMALIA = 8,1812 %
DITTA	RIBASSO %	
IACOPONI & C. SRL	12,5700 %	
ACCIARRI COSTRUZIONI SRL	9,7500 %	
CICCHI COSTRUZIONI SRL	7,7500 %	
SIQUINI COSTRUZIONI SRL	5,5550 %	
ARTIGIANA EDILE SRL	5,0000 %	
VIOLONI SRL	4,0000 %	
Al termine, dato che la percentuale di ribasso offerta dalla prima graduata, pari al 12,57%, è superiore alla soglia di anomalia. Il Presidente dispone di procedere alla richiesta di giustificazione nei confronti della relativa ditta offerente, ossia IACOPONI & C. SRL con sede a San Benedetto del Tronto (AP), rimettendo gli atti al Ufficio Sisma affinché proceda alle comunicazioni di legge;
VISTA la nota Prot. N.2514 del 27.06.2018 con la quale questo ufficio procedere alla richiesta di giustificazione nei confronti della relativa ditta offerente, ossia IACOPONI & C. SRL con sede a San Benedetto del Tronto (AP);
VISTA la giustificazione relativa al ribasso offerto su elenco prezzi presentata dalla ditta IACOPONI & C. SRL con sede a San Benedetto del Tronto (AP) in Via Fusinato n.89 P.IVA: 01576300444 C.F.: 04900521008, presso questo Ente con nota Prot. N.2697 del 12.07.2018;
RITENUTO che la giustificazione relativa al ribasso offerto su elenco prezzi presentata dalla ditta IACOPONI & C. SRL con sede a San Benedetto del Tronto (AP) in Via Fusinato n.89 P.IVA: 01576300444 C.F.: 04900521008 è giudicata esauriente;
QUINDI l’offerta migliore è quella presentata dalla ditta IACOPONI & C. SRL con sede a San Benedetto del Tronto (AP) in Via Fusinato n.89 P.IVA: 01576300444 C.F.: 04900521008, con un ribasso del 12,57% a cui corrisponde un importo dei lavori di € 64.183,39 oltre IVA come per legge;
ATTESO CHE il quadro economico dei lavori, al netto del ribasso proposto dalla ditta risultata aggiudicataria è il seguente:
Lavori da computo metrico	 	72.991,41 € 	
Oneri per la sicurezza	 	2.919,66 € 	
LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO:	 	70.071,75 € 	
A detrarre il ribasso del	12,57%	8.808,02 € 	
IMPORTO NETTO LAVORI:	61.263,73 € 	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO COMPRENSIVO DI ONERI:	64.183,39 € 	
Somme a disposizione:	
IVA sui lavori	22%	14.120,35 € 	
Imprevisti (IVA Compresa)	5%	3.649,57 € 	
Spese tecniche	5%	3.649,57 € 	
Cassa previdenziale su spese tecniche	4%	145,98 € 	
IVA su spese tecniche	22%	835,02 € 	
Incentivo RUP	2%	1.459,83 € 	
Economie del ribasso d'asta	 	10.745,78 € 	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	34.606,10 € 	
TOTALE PROGETTO 	98.789,49 € 	
RICHIAMATA INTEGRALMENTE la Determinazione del Responsabile del Servizio – Ufficio Tecnico n.86 del 21.09.2018 “EMERGENZA SISMA - MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO MUNICIPALE IN VIA UMBERTO I°, COSTITUENTE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - AFFIDAMENTO LAVORI” con la quale con la quale si affidavano i lavori alla ditta IACOPONI & C. SRL con sede a San Benedetto del Tronto (AP) in Via Fusinato n.89 P.IVA: 01576300444 C.F.: 04900521008 [CUP C79B18000050002 – CIG 7631128E07];
VISTO il Verbale di Somma Urgenza Prot.N.4394 del 14.11.2018 “AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO MUNICIPALE IN VIA UMBERTO I°, COSTITUENTE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ”;
VISTO il verbale di congegna lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Vincenzo Troiani Prot.N.4450 del 19.11.2018;
VISTO il verbale di sospensione dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Vincenzo Troiani Prot.N.4539 del 23.11.2018;
VISTO il verbale di ripresa dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Vincenzo Troiani Prot.N.999 del 15.03.2019;
VISTA la perizia di variante presentata dal Direttore del Lavori Ing. Vincenzo Troiani Prot. N.1846 del 11.05.2019 composta dai seguenti elaborati:
1.	Relazione tecnica variante;
2.	Computo metrico variante e quadro di raffronto;
3.	Quadro economico di raffronto;
nella quale si evidenzia una modifica di alcune quantità di progetto, e l’utilizzo di una piattaforma elevatrice per il posizionamento di alcuni profili in acciaio, visto il computo metrico ed il quadro economico allegato, di seguito riportato:
Lavori da computo metrico di variante	 	79.223,92 € 	
Oneri per la sicurezza	 	3.168,96 € 	
LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO:	 	76.054,96 € 	
A detrarre il ribasso del	12,57%	9.560,11 € 	
IMPORTO NETTO LAVORI:	66.494,85 € 	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO COMPRENSIVO DI ONERI:	69.663,81 € 	
Somme a disposizione:	
IVA sui lavori	22%	15.326,04 € 	
Imprevisti (IVA Compresa)	5%	3.649,57 € 	
Spese tecniche	5%	3.649,57 € 	
Cassa previdenziale su spese tecniche	4%	145,98 € 	
IVA su spese tecniche	22%	835,02 € 	
Incentivo RUP	2%	1.459,83 € 	
Economie del ribasso d'asta	 	4.059,67 € 	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	 	29.125,68 € 	
TOTALE PROGETTO	 	98.789,49 € 	
DATO ATTO che il suddetto progetto di variante:
•	non comportano modifiche sostanziali al progetto originario;
•	non prevede un maggior importo rispetto al contratto principale;
•	non comporta un aumento di spesa;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione dei lavori aggiuntivi, redatta ai sensi del D.Lgs 50/2016;
VISTO che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da DURC ON-LINE emesso in data 12.06.2019, Numero Protocollo INPS_14158057 con scadenza 12.06.2019;
VISTO il Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 nella parte ancora in vigore;
VISTO il Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
ASSUNTA la propria competenza, a norma del citato regolamento;
DETERMINA
1.	LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;
2.	DI APPROVARE la perizia di variante presentata dal Direttore del Lavori Ing. Vincenzo Troiani Prot. N.1846 del 11.05.2019 composta dai seguenti elaborati:
1.	Relazione tecnica variante;
2.	Computo metrico variante e quadro di raffronto;
3.	Quadro economico di raffronto;
nella quale si evidenzia una modifica di alcune quantità di progetto, e l’utilizzo di una piattaforma elevatrice per il posizionamento di alcuni profili in acciaio, visto il computo metrico ed il quadro economico allegato, di seguito riportato:
Lavori da computo metrico di variante	 	79.223,92 € 	
Oneri per la sicurezza	 	3.168,96 € 	
LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO:	 	76.054,96 € 	
A detrarre il ribasso del	12,57%	9.560,11 € 	
IMPORTO NETTO LAVORI:	66.494,85 € 	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO COMPRENSIVO DI ONERI:	69.663,81 € 	
Somme a disposizione:	
IVA sui lavori	22%	15.326,04 € 	
Imprevisti (IVA Compresa)	5%	3.649,57 € 	
Spese tecniche	5%	3.649,57 € 	
Cassa previdenziale su spese tecniche	4%	145,98 € 	
IVA su spese tecniche	22%	835,02 € 	
Incentivo RUP	2%	1.459,83 € 	
Economie del ribasso d'asta	 	4.059,67 € 	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	 	29.125,68 € 	
TOTALE PROGETTO	 	98.789,49 € 	
3.	DI DARE ATTO che i suddetti lavori aggiuntivi:
•	non comportano modifiche sostanziali al progetto originario;
•	non prevede un maggior importo rispetto al contratto principale;
•	non comporta un aumento di spesa;
4.	DI DARE ATTO che gli elaborati progettuali sono stati depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale;
5.	DI AFFIDARE col presento provvedimento, l'esecuzione dei lavori alla ditta IACOPONI & C. SRL con sede a San Benedetto del Tronto (AP) in Via Fusinato n.89 P.IVA: 01576300444 C.F.: 04900521008, per la somma di € 69.663,81 [CIG: 7631128E07] comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al netto del ribasso d’asta del 12,57%, dando atto che tutte le opere da eseguire verranno contabilizzate e pagate a misura, facendo presente che i pagamenti potranno essere effettuati solo dopo l’erogazione delle somme da parte della Regione Marche o altro Ente competente;
6.	IMPEGNARE la somma di € 98.789,49 impegno nel bilancio 2019:
CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/F
PV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	
				2019	2020	2021 e succ.	
2871	11.02-03.2	11.02-2.02.03.06	CP	€ 98.789,49			
Nei confronti del creditore:
CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO	
IACOPONI & C. SRL	2019	04900521008	01576300444	€ 6.686,11 €	
7.	DI PROVVEDERE alla liquidazione e al pagamento delle spese di cui al presente provvedimento su presentazione di regolare fattura da parte della ditta solo dopo l’erogazione delle somme da parte della Regione Marche o altro Ente competente;
8.	DI ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;
9.	CHE sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell’adozione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.  Lgs. 18 agosto 200, n.267; Sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti dal presente impegno risultano compatibili con le regole di finanza pubblica.
10.	DI DARE ATTO CHE si procederà con gli atti opportuni ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, nel caso in cui i funzionari della Regione Marche non riconoscano le spese come ammissibili ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26 agosto 2016, n. 388 dopo l'istruttoria della rendicontazione della spesa.
11.	DI DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà, ai sensi dell'articolo 184 del D.L.gs 267/2000 e del Vigente Regolamento di contabilità;
12.	DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
13.	DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
-	all'Ufficio Segreteria pe l’inserimento nella raccolta generale;
-	all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
-	all’Ufficio addetto per l’inserimento che provvederà, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
	Il Responsabile del Servizio
Dott. Agr. Giovanni Borraccini	

..........................

======================================================================

Copia della presente determinazione, esecutiva a norma di legge, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 24-05-19 e vi rimarrà fino al 08-06-19

Rotella, li 24-05-19
IL MESSO COMUNALE 
Fazzini Ramona

======================================================================

A norma dell'articolo 8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio proponente.

======================================================================
La presente determinazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rotella li, 24-05-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

......................