COMUNE DI ROTELLA

DELIBERAZIONE  ORIGINALE
DELLA
GIUNTA COMUNALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  47 DEL  08-08-18

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

EMERGENZA SISMA - APPROVAZIONE PROGETTI DEI LAVORI
  DI  SOMMA  URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI 
FABBRICATI LESIONATI DAL SISMA DEL 24.08.16 E SUC=
CESSIVI - ZONA ROSSA, C.DA OSTERIA E C.DA SAN PIE=
TRO

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciotto il giorno  otto del mese
di agosto alle ore 13:40, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

======================================================================

BORRACCINI GIOVANNI	SINDACO	P	
SCARAMUCCI LEONARDO	ASSESSORE	A	
TIRABASSI MARCO	ASSESSORE	P	

======================================================================

Assegnati n.  3 In carica n. 3 Presenti n.   2  Assenti n.   1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. DOTT. ANTUONO EDOARDO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BORRACCINI GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

                                                                              LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•	questo Comune è stato fortemente interessato dagli eventi sismici in atto dal 24.08.2016 in poi che hanno causato danni significativi su tutto il territorio comunale;
•	in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
•	si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati: 
•	esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

Rilevato altresì che in data 18.01.2017 si sono verificate ulteriori frequenze sismiche che rischiano di far crollare il patrimonio edilizio sopravvissuto alle scosse precedenti il tutto aggravato dalle abbondanti nevicate nello stesso periodo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato per giorni 180 dalla data del presente predetto provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi degli eccezionali eventi sismici che ha interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato di 180 giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, e successive modificazioni;
Viste le ordinanze del Dipartimento Protezione civile;
Viste le Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione;
Visto il DL 189/2016 convertito in legge 229/2016 come successivamente modificato;
Ricordato che in varie parti del territorio, sia a causa del sisma che delle forti nevicate, si sono verificati danni e disagi diffusi mettendo in serio pericolo la pubblica e privata incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati, e che sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi, essendosi determinata una situazione di potenziale pericolo per la popolazione residente per la presenza di lesioni e danneggiamenti alle strutture degli edifici situati nell’ambito di questo territorio Comunale, con conseguente rischio di distacco e/o crolli delle parti lesionate ovvero cedimenti anche per rischio esterno ad essi, su aree pubbliche e private, nonché danni alla viabilità;
Rilevato che i pericoli sugli edifici riscontrati dalle schede coinvolgono vie pubbliche, patrimonio pubblico e quindi la pubblica incolumità e che è necessario ed urgente provvedere all’esecuzione degli interventi avanti citati, 
Richiamati i Verbali di Somma Urgenza sotto riportati:

Intervento	Prot. n.	Data:	Oggetto:	
1	665	16.02.2018	Messa in sicurezza mediante lo smontaggio controllato e/o demolizione del fabbricato in c.da San Pietro.	
2	551	08.02.2018	Messa in sicurezza mediante lo smontaggio controllato e/o demolizione del fabbricato in c.da Osteria.	
3	550	08.02.2018	Messa in sicurezza del centro storico del Comune di Rotella – via del Piazzale, via Leopardi, via Marconi e Piazza Municipio – Riduzione Zona Rossa	

con i quali in via d’urgenza si provvedeva all’affidamento della relativa Progettazione, Direzione dei Lavori e la Coordinazione della Sicurezza sui Cantieri Edili (D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.), Contabilità”, ai seguenti tecnici liberi professionisti sotto indicati:

Intervento	Progettista:	
1	Geom. Tirabassi Luca, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 08.09.1985, C.F. TRBLCU85P08H769I, P.Iva 02055790444, iscritto al Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno al numero 1202 – pec: luca.tirabassi@geopec.it 	
2	Geom. Corradetti Giorgio, nato a Rotella (AP) il 27.11.1964. C.F. CRR GRG 64S27 H588R, P.Iva 01452620444, iscritto Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno al numero 898 – pec: giorgio.corradetti@geopec.it – email: giorgiocorradetti@gmail.com	
3	Dott. Ing. SIQUINI QUINTILIO, nato a Ascoli Piceno (AP) il 30.10.1963, C.F. SQNQTL63R30A462J, P.Iva 01359720446, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno al numero 869  	

dando mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere all’affidamento in urgenza della realizzazione delle opere richieste a ditte specializzate nel settore ed idonee seguendo procedure che garantiscano trasparenza e tempestività;
Visti i progetti presentati dai rispettivi tecnici all’uopo incaricati come di seguito specificato:

INTERVENTO 1	Prot. 665 del 16.02.2018	

Oggetto: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza mediante lo smontaggio controllato e/o demolizione del fabbricato in c.da San Pietro”.
Interessante le seguenti proprietà:

Riferimenti Castali	Proprietà	Nato/a a:	Data di nascita	Codice Fiscale
P.IVA	
Comune di Rotella
Fg.18, P.lla 117	IDSC Ascoli Piceno	-------------------------	------------------	---------------------------------	

Progettista: Geom. Tirabassi Luca, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 08.09.1985, C.F. TRBLCU85P08H769I, P.Iva 02055790444, iscritto al Collegio dei Geometri al numero 1202 – pec: luca.tirabassi@geopec.it ;
Elenco elaborati del progetto esecutivo presentati:
1.	Computo metrico estimativo con quadro economico;
2.	Elenco Prezzi
3.	Relazione architettonica
4.	Tavola 01 – Inquadramento
5.	Tavola 02 – Stato attuale
6.	Tavola 03 – Particolari

Con il seguente quadro economico:
Lavori da computo metrico	29.272,51 € 	
Oneri per la sicurezza	6.915,56 € 	
Importo soggetto a ribasso	22.356,95 € 	
	
Somme a disposizione:	
IVA sui lavori	22%	6.439,95 € 	
Spese tecniche	5%	1.463,63 € 	
Cassa previdenziale su spese tecniche	4%	73,18 € 	
Incentivo RUP	2%	585,45 €	
Imprevisti	 	1.665,28 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.227,49 €  	
INTERVENTO 1 - TOTALE PROGETTO	39.500,00 € 	

INTERVENTO 2	Prot. N. 551 del 08.02.2018	

Oggetto: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza mediante lo smontaggio controllato e/o demolizione del fabbricato in c.da Osteria:

Riferimenti Castali	Proprietà	Nato/a a:	Data di nascita	Codice Fiscale
P.IVA	
Fg.19, P.lla 82	AMATUCCI TIZIANO	ROTELLA (AP)	02.12.1962	MTC TZN 62T02 H588Y	
	MASSARI LUCIA	ROTELLA (AP)	01.06.1944	MSS LCU 44H41 H588J	
	AMATUCCI RINO	ROTELLA (AP)	28.11.1953	MTC RNI 53S28 H588B	
	MASSARI GIANNI	S. BENEDETTO DELTRONTO (AP)	10.07.1976	MSS GNN 76L10 H769L	
	CATALDI GIORGIO	ANCONA (AN)	11.11.1952	CTL GRG 50S11 A271I	
	MASSARI EMIDA	ROTELLA (AP)	18.11.1935	MSS MDE 35S58 H588K	
	MASSARI FREDDA ANN	POTTSVILLE (PA-USA)	12.04.1950	MSS FDD 50D52 Z404G	
Fg.19, P.lla 83	CORRADETTI GIORGIO	ROTELLA (AP)	27.11.1964	CRR GRG 64S27 H588R	

Progettista: Geom. Corradetti Giorgio, nato a Rotella (AP) il 27.11.1964. C.F. CRR GRG 64S27 H588R, P.Iva 01452620444, iscritto Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno al numero 898 ;

Elenco elaborati del progetto esecutivo presentati:
1.	Allegato 1 – Relazione tecnica;
2.	Allegato 2 – Elenco prezzi;
3.	Allegato 3 – Computo metrico;
4.	Allegato 4 – Quadro economico
5.	Planimetria
6.	Estratto del foglio della mappa catastale

Con il seguente quadro economico:

Lavori da computo metrico	24.895,62 € 	
Oneri per la sicurezza	1.355,80 € 	
Importo soggetto a ribasso	23.539,82 € 	
 	
Somme a disposizione:	
IVA sui lavori	22%	5.477,04 € 	
Spese tecniche	5%	1.244,78 € 	
Cassa previdenziale su spese tecniche	4%	62,24 € 	
IVA su spese tecniche	22%	287,54 € 	
Incentivo RUP	2%	497,91 € 	
Imprevisti ed arrotondamenti	6,8%	1.204,16 € 	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.773,67 € 	
INTERVENTO 2- TOTALE PROGETTO	33.669,29 € 	

INTERVENTO 3	Prot. N.550 del 08.02.2018	

Oggetto: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del centro storico del Comune di Rotella – via del Piazzale, via Leopardi, via Marconi e Piazza Municipio – Riduzione Zona Rossa.
Interessante le seguenti proprietà:

Riferimenti Castali	Proprietà	Nato/a a:	Data di nascita	Codice Fiscale
P.IVA	
Fg.13, P.lla 93, Sub 1 e 2	Menchise Castoressa	Genzano di Lucania (PZ)	11.02.1946	MNCCTR46B51D971Q	
	Pacioni Rinaldo	Rotella (AP)	20.06.1943	PCNRLD43H20H588Y	
Fg.13, P.lla 95	Capponi Emma	Ascoli Piceno (AP)	22.02.1904	CPPMME04B62A462P	
	Carosi Fabio	Castignano (AP)	26.11.1962	CRSFBA62S26C321S	
	Carosi Maria Rosella	Castignano (AP)	08.07.1959	CRSMRS59L48C321C	
	De Cesaris Domenico	Castignano (AP)	20.03.1940	DCSDNC40C20C321W	
	De Cesaris Federico				
	De Cesaris Giuseppe				
	Pizzini Luisiana	Ascoli Piceno (AP)	29.06.1970	PZZLSN70H69A462M	
	Pizzini Paolo	Castignano (AP)	15.04.1973	PZZPLA73D15C321S	
	Santoni Maria Paola	San Benedetto del Tronto (AP)	07.11.1930	SNTMPL30S47H769A	
	Santoni Orvilio	Monteprandone (AP)	14.05.1896	SNTRVL96E14F591U	
	Travaglini Giuseppina				
Fg.13, P.lla 96	Manni Andrea	Milano (MI)	23.09.1962	MNNNDR62P23F205K	
	Manni Giovanni	Milano (MI)	15.09.1960	MNNGNN60P15F205P	
Fg.13, P.lla 97, Sub 1	Grossetti Emma				
	Paccioni Dionisio	Rotella (AP)	30.06.1935		
	Spina Nicola	San Benedetto del Tronto (AP)	08.08.1926	SPNNCL26M08H769T	
Fg.13, P.lla 97, Sub 2	Grossetti Emma				
	Spina Nicola	San Benedetto del Tronto (AP)	08.08.1926	SPNNCL26M08H769T	
Fg.13, P.lla 98, Sub 1	Pellei Ines	Offida (AP)	26.04.1925	PLLNSI25D66G005F	
Fg.13, P.lla 98, Sub 2	Corradetti Giorgio	Rotella (AP)	27.11.1964	CRRGRG64S27H588R	
Fg.13, P.lla 99, Sub 1	Grossetti Rosina				
Fg.13, P.lla 99, Sub 2	Mori Emma	Rotella (AP)	02.02.1950	MROMME50B42H588T	
Fg.13, P.lla 101, Sub 1	Egidi Caterina				
	Egidi Egidio				
	Egidi Ermanno Maria	San Benedetto del Tronto (AP)	22.11.1972	GDERNN72S22H769K	
	Egidi Rosina				
Fg.13, P.lla 101, Sub 2	Egidi Ermanno Maria	San Benedetto del Tronto (AP)	22.11.1972	GDERNN72S22H769K	
Fg.13, P.lla 101, Sub 3	Egidi Ermanno Maria	San Benedetto del Tronto (AP)	22.11.1972	GDERNN72S22H769K	
Fg.13, P.lla 102, Sub 1	Ubaldi Vittorio	Rotella (AP)	27.08.1939	BLDVTR39M27H588O	
Fg.13, P.lla 103	Ubaldi Natalina	Rotella (AP)	13.11.1936	BLDNLN36S53H588C	
	Ubaldi Vittorio	Rotella (AP)	27.08.1939	BLDVTR39M27H588O	
Fg.13, P.lla 104	Consumati Giuseppina	Montopoli di Sabina (RI)	19.03.1960	CNSGPP60C59F687P	
	Consumati Simonetta	Montopoli di Sabina (RI)	09.06.1962	CNSSNT62H49F687J	
	Sansone Giancarlo	Roma (RM)	22.07.1957	SNSGCR57L22H501M	
Fg.13, P.lla 105	Cicconi Tommaso	Rotella (AP)	21.12.1926	CCCTMS26T21H588L	
	Laurenzi Amelia	Rotella (AP)	27.12.1931	LRNMLA31T67H588T	
Fg.13, P.lla 107	Cocci Paolo	Rotella (AP)	19.12.1968	CCCPLA68T19H588H	
	Paoletti Ombretta	Roma (RM)	03.06.1973	PLTMRT73H43H501F	
Fg.13, P.lla 108, Sub 1-2	Frisina Antonino	Palermo (PA)	02.03.1951	FRSNNN51C02G273H	
	Frisina Carmela	Palermo (PA)	20.07.1948	FRSCML48L60G273W	
	Frisina Maria Cristina	Palermo (PA)	23.10.1960	FRSMCR60R63G273H	
	Frisina Riccardo	Palermo (PA)	21.11.1958	FRSRCR58S21G273L	
	Virgili Ernestina	Rotella (AP)	28.05.1937	VRGRST37E68H588D	
Fg.13, P.lla 109	De Santis Vinicio	Rotella (AP)	11.07.1950	DSNVNC50L11H588X	
	Pagot Luciana	Udine (UD)	26.05.1958	PGTLCN58E66L483I	
Fg.13, P.lla 110, Sub 3	De Santis Vinicio	Rotella (AP)	11.07.1950	DSNVNC50L11H588X	

Progettista: Dott. Ing. SIQUINI QUINTILIO, nato a Ascoli Piceno (AP) il 30.10.1963, C.F. SQNQTL63R30A462J, P.Iva 01359720446, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno al numero 869 ;
Elenco elaborati del progetto esecutivo presentati:
1.	Elenco Elaborati
2.	Relazione tecnica
3.	Documentazione fotografica
4.	Computo metrico estimativo
5.	Quadro economico
6.	Elenco prezzi
7.	Analisi nuovi prezzi
8.	Capitolato speciale d’appalto
9.	Tav.1 – Tirantature 
10.	Tav.2 – Interventi Piazza Municipio, via Leopardi e barriere
Con il seguente quadro economico:
Lavori da computo metrico	145.924,32 € 	
Oneri per la sicurezza	13.277,10 € 	
Importo soggetto a ribasso	132.647,22 € 	
	
Somme a disposizione:	
IVA sui lavori	22%	32.103,35 € 	
Spese tecniche	5%	7.296,22 € 	
Cassa previdenziale su spese tecniche	4%	291,85 € 	
IVA su spese tecniche	22%	1.669,37 €	
Imprevisti	8%	11.673,95 €	
Incentivo RUP 	2%	2.918,49 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	55.953,22 €  	
INTERVENTO 3 - TOTALE PROGETTO	201.877,54 € 	

Vista la nota della Regione Marche giunta al protocollo il 19.05.2018 n.2007, con la quale comunica il rilascio del nulla osta agli interventi progettuali condizionatamente al rispetto delle prescrizioni specificate nella richiesta di integrazione;

Vista l’integrazione consegnata in data 18.07.2018 prot. n.2801, dall’Ing. Siquini Quintilio, composta dal C.M.E. revisionato, come segue:

Lavori da computo metrico		  112.818,68 € 	
Oneri per la sicurezza		    30.286,18 € 	
Importo soggetto a ribasso		    82.532,50 € 	
			
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori	22%	    24.820,11 € 	
Spese tecniche	5%	      5.640,93 € 	
CNPAIA	4%	          225,64 € 	
IVA su spese tecniche	22%	      1.290,65 € 	
Imprevisti	5%	      5.640,93 € 	
Incentivo RUP	2%	      2.256,37 € 	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	   39.874,63 € 	
INTERVENTO 3 - TOTALE PROGETTO	  152.693,31 € 	

Vista la nota della Regione Marche giunta al protocollo il 27.07.2018 al n.2924, con la quale comunica il rilascio del nulla osta agli interventi progettuali.

Condivise le ragioni di estrema urgenza di:
•	eseguire immediatamente tutti gli interventi di somma urgenza descritti nella “perizia giustificativa di spesa”;
•	eccezionalità ed imprevedibilità dell’evento;
Rilevato che le circostanze di somma urgenza che hanno richiesto il tempestivo intervento di professionisti, rientrano nelle previsioni dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016;
Ritenuto, pertanto, in questa sede, che l’Amministrazione debba procedere ad approvare i verbali di somma urgenza e la perizia giustificativa di spesa, tutti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatte dal responsabile dell’Area Tecnica Dott. Giovanni Borraccini ed a disporre la relativa copertura finanziaria ai sensi dell’art. 163, comma 4 del D.Lgs 50/2016;
Richiamati, inoltre:
-	l’art.191 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., da ultimo modificato con L.213/2012; 
-	l’art.194 comma 1 lett.e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., 

Ritenuto quindi di procedere in via prioritaria all’approvazione dei seguenti verbali di somma urgenza:

Prot. n.	Data:	Oggetto:	
665	16.02.2018	Intervento di messa in sicurezza mediante lo smontaggio controllato e/o demolizione del fabbricato in c.da San Pietro	
551	08.02.2018	Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza mediante lo smontaggio controllato e/o demolizione del fabbricato in c.da Osteria	
550	08.02.2018	Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del centro storico del Comune di Rotella – via del Piazzale, via Leopardi, via Marconi e Piazza Municipio – Riduzione Zona Rossa	

relativi all’affidamento della progettazione di interventi di messa in sicurezza/demolizioni nonché della relativa perizia giustificativa delle spese tecniche;

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione dei progetti al fine di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale nonché salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area tecnica;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile dell'Area finanziaria;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA

•	la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
•	di approvare i verbali di somma urgenza sopra richiamati e la relativa perizia giustificativa precisando che le somme previste sono inserite nei quadri economici progettuali e che la liquidazione avverrà ad ultimazione dei lavori;
•	di approvare, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti, i progetti come di seguito indicati:
Intervento	Oggetto	Importi	
1	Intervento di messa in sicurezza mediante lo smontaggio controllato e/o demolizione del fabbricato in c.da San Pietro	€. 39.500,00	
2	Intervento si somma urgenza per la messa in sicurezza mediante lo smontaggio controllato e/o demolizione del fabbricato in c.da Osteria	€. 33.669,29	
3	Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del centro storico del Comune di Rotella – via del Piazzale, via Leopardi, via Marconi e Piazza Municipio – Riduzione Zona Rossa	€. 152.693,31	
IMPORTO TOTALE	€. 225.862,60	

e composti della documentazione richiamata in premessa per l’importo complessivo di Euro 225.862,60 (duecentoventicinquemilaottocentosessantadue/60);
•	di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica, individuato quale RUP l’adozione degli atti conseguenti compreso l’affidamento dei lavori, tenendo conto dell’urgenza di procedere;
•	di inviare copia della presente alla Regione Marche;
•	di dare che atto che la spesa suddetta trova copertura nel bilancio 2018 per un importo complessivo di € 240.933,69;
•	di dare atto che le spese inerenti la realizzazione dell’intervento di che trattasi saranno richieste alla Regione Marche a cui sarà trasmessa la contabilità definitiva secondo le modalità previste;
•	di dare atto che si procederà con gli atti opportuni ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, nel caso in cui i funzionari della Regione Marche non riconoscano le spese come ammissibili ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26 agosto 2016, n. 388 dopo l'istruttoria della rendicontazione della spesa.
•	di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge stante l’urgenza di provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile.

Parere REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Data: 08-08-2018
Il Responsabile del servizio BORRACCINI GIOVANNI

Parere REGOLARITA' TECNICA: Favorevole
Data: 08-08-2018
Il Responsabile del servizio BORRACCINI GIOVANNI

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
BORRACCINI GIOVANNI
IL SEGRETARIO                                                 
DOTT. ANTUONO EDOARDO                                   

----------------------------------------------------------------------
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15-09-18 

[] con contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTUONO EDOARDO
______________________________________________________________________
La presente deliberazione é divenuta esecutiva in data ......... ai sensi dell'art. 134, comma 3 o 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTUONO EDOARDO
______________________________________________________________________
Della suestesa deliberazione é stata spedita copia al competente Organo Regionale di Controllo il .......... prot. n.

[] ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 3, del T.U.E.l. 18.08.2000, n. 267.

[] ai sensi e per gli effetti dell'art. 126, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

[] a seguito della richiesta in data .......... di n. .... consiglieri comunali formulata ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.
SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTUONO EDOARDO
______________________________________________________________________
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno

[] per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

[] per l'esame favorevole del CO.RE.CO. in data  ...... , prot. n.

SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTUONO EDOARDO