COMUNE DI ROTELLA
Prov.ASCOLI PICENO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
UFFICIO TECNICO

----------------------------------------------------------------------
N.92  | OGGETTO: INTERVENTI  DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICU=
|          REZZA  DEL  CENTRO  STORICO DEL COMUNE DI ROTELLA
20-11-19 |          VIA  DEL  PIAZZALE,  VIA  LEOPARDI,  VIA MARCONI E
|          PIAZZA  MUNICIPIO. RIDUZIONE DELLA ZONA ROSSA [CUP
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di novembre.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVA ai sensi dell'art.6 comma 11 Legge n.127/97;
li................

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

Viste il D. L.gvo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:
•	con Verbale di Somma Urgenza del 08.02.2018 Prot. N.550 “Messa in sicurezza del centro storico del Comune di Rotella – via del Piazzale, via Leopardi, via Marconi e Piazza Municipio – riduzione Zona Rossa” si dichiarava lo stato di emergenza e la necessità del ripristino dello stato di sicurezza mediante l'esecuzione di opportune opere e veniva incaricato l’Ing. SIQUINI QUINTILIO, nato ad Ascoli Piceno (AP) il 30.10.1963 C.F.: SQN QTL 63R30 A462J con studio a Castignano (AP) in Via Galvoni n.41, di provvedere con la massima celerità alla redazione di un progetto per la messa in sicurezza del centro storico del Comune di Rotella Via del Piazzale, Via Leopardi, Via Marconi e Piazza Municipio – Riduzione Zona Rossa, costituente pericolo per la pubblica incolumità, indicandone le modalità esecutive e quantificandone la spesa e che si contattino n.3 imprese disponibili all’effettuazione immediata dei lavori, sulla base del progetto e del computo metrico redatto dall’Ing. Siquini Quintilio, affidando i lavori all’impresa che presenterà la migliore offerta economica;
•	con deliberazione delle G.C. n.47 del 08.08.2019 la Giunta ha approvato il Verbale di Somma Urgenza, la relativa Perizia Giustificativa delle Spese Tecniche ed il relativo progetto redatto e presentato dal professionista Ing. Siquini Quintilio, per un importo complessivo di € 152.693,31 di cui € 112.818,68 per lavori ed € 39.874,63 per somme a disposizione, come di seguito dettagliato:
Lavori da computo metrico	112.818,68 € 	
Oneri per la sicurezza	30.286,18 € 	
LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO:	82.532,50 € 	
 	
Somme a disposizione:	
IVA sui lavori	22%	24.820,11 € 	
Spese tecniche	5%	5.640,93 € 	
Cassa previdenziale su spese tecniche	4%	225,64 € 	
IVA su spese tecniche	22%	1.290,65 € 	
Imprevisti	5%	5.640,93 € 	
Incentivo RUP	2%	2.256,37 € 	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	39.874,63 € 	
TOTALE PROGETTO	152.693,31 € 	
•	con la Determinazione del Responsabile del Servizio – Ufficio Tecnico n.75 del 16.10.2019 si è:
-	avviata la procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, previa consultazione di n.3 operatori economici, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 200.000,00;
-	stabilito che si sarebbe proceduto mediante RdO sul MePa con invito da rivolgere a n.3 operatori economici e stabilendo quale criterio di affidamento quello del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del. D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO CHE:
•	in data 16.10.2019 è stata predisposta sul MePa la relativa RdO n.2418431con invito rivolto ai seguenti n.3 operatori economici e ponendo a base d'asta l'importo di € 82.532,50 oltre € 30.286,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 112.818,68:
Ragione Sociale	Partita IVA	
DESIDERI DI DESIDERI GIUSEPPE & C. SNC	01380620441	
IACOPONI & C. SRL	01576300444	
PIGNOLONI FRANCO	00508590445	
•	alla scadenza fissata nella RdO alle ore 17:00 del 22.10.2019 sono pervenute n.3 offerte riferite ai seguenti operatori:
Ragione Sociale	Partita IVA	
DESIDERI DI DESIDERI GIUSEPPE & C. SNC	01380620441	
IACOPONI & C. SRL	01576300444	
PIGNOLONI FRANCO	00508590445	
•	alle ore 16:00 del 23.10.2019 si è proceduto all'espletamento della gara così come risulta dal relativo verbale ed è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta IACOPONI & C. SRL con sede a San Benedetto del Tronto (AP) in Via Fusinato n.89 P.IVA: 01576300444 C.F.: 04900521008 con il ribasso offerto pari al 1,00% e per un importo contrattuale pari ad € 111.993,35 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 30.286,18 oltre IVA di € 24.638,54 per complessivi € 136.631,89;
DATO ATTO CHE:
•	ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, si è attivata la procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
•	le predette verifiche hanno dato esito positivo;
•	per quanto riguarda il possesso dei requisiti di ordine speciale gli stessi sono comprovati dal possesso dell’attestazione a SOA n. 26631/35/00 nella categoria e classe dei lavori di che trattasi, in corso di validità;
•	è stata verificata la regolarità contributiva tramite acquisizione online del DURC protocollo INPS_17557173 con validità fino al 09.02.2020;
RITENUTO, sulla base di gare precedentemente esperite per la stessa tipologia di opere, che l'offerta sia congrua e non appaia anormalmente bassa;
RISCONTRATI la legittimità delle operazioni di gara e ritenuto di dover provvedere all'approvazione del verbale di gara allegato al presente atto, e di dover disporre la definitiva aggiudicazione alla ditta IACOPONI & C. SRL con sede a San Benedetto del Tronto (AP) in Via Fusinato n.89 P.IVA: 01576300444 C.F.: 04900521008 per un importo contrattuale pari ad € 111.993,35 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 30.286,18 oltre IVA di € 24.638,54 per complessivi € 136.631,89 derivante dall'applicazione del ribasso offerto pari al 1,00%;
DI DARE ATTO che:
•	il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice il Dott. Agr. Giovanni Borraccini Responsabile della Aree Tecnica;
•	il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. C75E18000330002;
•	il C.I.G. assegnato è il seguente: 8068492A39;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;
RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
VISTI:
•	il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
•	il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
•	il DPR 207/2010 ess.mm.ii., per la parte ancora vigente,
ASSUNTA la propria competenza, a norma del citato regolamento;
DETERMINA
1.	LA PREMESSA formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;
2.	DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE i lavori alla ditta IACOPONI & C. SRL con sede a San Benedetto del Tronto (AP) in Via Fusinato n.89 P.IVA: 01576300444 C.F.: 04900521008 per un importo contrattuale pari ad € 111.993,35 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 30.286,18 oltre IVA di € 24.638,54 per complessivi € 136.631,89 dando atto che tutte le opere da eseguire verranno contabilizzate e pagate a misura, facendo presente che i pagamenti potranno essere effettuati SOLO DOPO l’erogazione delle somme da parte della Regione Marche o altro Ente competente e che la suddetta spesa farà parte del quadro economico del progetto di seguito riportato:
Lavori da computo metrico		112.818,68 € 	
Oneri per la sicurezza		30.286,18 € 	
LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO:		82.532,50 € 	
A detrarre il ribasso del	1,00%	825,33 € 	
IMPORTO NETTO LAVORI:		81.707,17 € 	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO COMPRENSICO DI ONERI:	111.993,35 € 	
Somme a disposizione:	
IVA sui lavori	22%	24.638,54 € 	
Spese tecniche	5%	5.640,93 € 	
Cassa previdenziale su spese tecniche	4%	225,64 € 	
IVA su spese tecniche	22%	1.290,65 € 	
Imprevisti	5%	5.640,93 € 	
Incentivo RUP	2%	2.256,37 € 	
Economie del ribasso d'asta	 	1.006,90 € 	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	40.699,96 € 	
TOTALE PROGETTO	152.693,31 € 	
3.	DI DARE ATTO che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi come da richiesto in data 12.10.2019 numero protocolla INPS_17557173 con scadenza 09.02.2020;
4.	DI DARE ATTO CHE il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. C75E18000330002;
5.	DARE ATTO CHE a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente:
Ditta	CIG	
IACOPONI & C. SRL
P.IVA: 01576300444 C.F.: 04900521008	8068492A39	
ING. SIQUINI QUINTILIO
C.F.: SQN QTL 63R30 A462J P.IVA: 01359720446	Z132AABA94	
6.	DI AUTORIZZARE la Direzione dei Lavori l’Ing. SIQUINI QUINTILIO alla consegna anticipata dei lavori ai sensi del comma 8 art, 32 del Dlgs n. 50/2016;
7.	DI IMPUTARE la somma di € 152.693,31 come segue:
CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/F
PV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'	
				2019	2020	2021 e succ.	
2871	11.02-03.2	11.02-02.02.03.06	CP	€ 152.693,31			
Nei confronti del creditore:
CREDITORE	ESIGIBILITÀ	COD. FISCALE	P.IVA	IMPORTO	
IACOPONI & C. SRL	2019	04900521008	01576300444	€ 136.631,89	
ING. SIQUINI QUINTILIO	2019	SQNQTL63R30A462J	01359720446	€ 7.157,22	
8.	DI ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;
9.	CHE sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell’adozione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.  Lgs. 18 agosto 200, n.267; Sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti dal presente impegno risultano compatibili con le regole di finanza pubblica.
10.	DI DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà, ai sensi dell'articolo 184 del D.L.gs 267/2000 e del Vigente Regolamento di contabilità;
11.	DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
12.	DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
-	all'Ufficio Segreteria pe l’inserimento nella raccolta generale;
-	all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
-	all’Ufficio addetto per l’inserimento che provvederà, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Agr. Giovanni Borraccini	

..........................

======================================================================

Copia della presente determinazione, esecutiva a norma di legge, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 22-11-19 e vi rimarrà fino al 07-12-19

Rotella, li 22-11-19
IL MESSO COMUNALE 
Fazzini Ramona

======================================================================

A norma dell'articolo 8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio proponente.

======================================================================
La presente determinazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rotella li, 22-11-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

......................