SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 142 DEL 19-09-2018

ORIGINALE

Oggetto: OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO AD ARQUATA CAPOLUOGO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR SCHEDA N.06 DEL 21.04.17 contrad. catast. F29 M.67, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 163 del D.lgs. n. 50/2016 CUP: J22D17000000002 - Approvazione della I° variante tecnico suppletiva	

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di settembre 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: Sisma 2016 - OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO AD ARQUATA CAPOLUOGO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR SCHEDA N.06 DEL 21.04.17 contrad. catast. F29 M.67, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 163 del D.lgs. n. 50/2016. CUP: J22D17000040002 - Approvazione della I° variante tecnico suppletiva”.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018 con la quale tra l’altro è stato approvato il bilancio di previsione dell’anno corrente;

VISTO il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 724 C_A437-SARCH-P del 21/01/2017, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono state attribuite al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente le funzioni definite dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo fino alla scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco;

VISTO il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata del Tronto n. 9 del 11/04/2014;

DATO ATTO che il Comune di Arquata del Tronto rientra nei territori per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 e successive Delibere D.P.C.M. Del 31/10/2016, 10/02/2017 e 22/02/2018 e con D.L. 55/2018 (conv. in L. 89/2018);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.131 del 04/10/2017 con la quale è stato disposto di affidare ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016 ,  l’incarico di Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di Regolare Esecuzione delle "OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO AD ARQUATA CAPOLUOGO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR SCHEDA N.06 DEL 21.04.17 contrad. catast. F29 M.67 allo Studio Tecnico Associato Alessandrini e Lupi, nella persona del Geom. Giuseppe Alessandrini, nato ad Amandola il 17.01.1979, residente in Amandola, Via Villa Rustici, 190, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Fermo al n. 871, in qualità tecnico libero professionista con studio in Amandola, via G. Treggiari n.3, codice fiscale LSSGPP79A17A252O, partita iva 01831230444;
 
VISTO il progetto trasmesso dal tecnico incaricato e acquisito al protocollo comunale al prot. 15357-15362 del 12/10/2017  con il seguente Quadro Economico:
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
A	LAVORI E PRESTAZIONI		
	importo per l’esecuzione dei lavori	€ 56.207,25	
a2	importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d’asta)	€ 30.594,88	
a3	LAVORI A BASE D’ASTA (a1+a2)	€ 86.802,13	
			
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese tecniche relative a: Progettazione e D.L. (5% importo lavori a3)	€ 4.340,11	
b2	IVA 22% e 5% cassa su spese tecniche	€ 1.219,57 	
b3	Imprevisti (iva inclusa)	€ 4.774,12	
b4	IVA 10% su lavori (a3)	€ 8.680,21	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B = (b1 ÷ b3) 	€ 19.014,01	
			
	IMPORTO DEL PROGETTO (A + B)	€ 105.816,14	

PRESO ATTO della nota prot. 1055858 del 20/10/2017 del CCR Marche ad oggetto: “opere provvisionali e messa in sicurezza dell’edificio sito nella Arquata Capoluogo contraddistinto al Foglio 29 particella 67” – NULLA OSTA con la quale si concede a questo Comune Nulla Osta alla messa in sicurezza dell’immobile in oggetto;
RICHIAMATA la determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 167 del 02/11/2017 nella quale si è disposto tra l’altro:
-di approvare il progetto relativo a OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO AD ARQUATA CAPOLUOGO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR SCHEDA N.06 DEL 21.04.17 contrad. catast. F29 M.67, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 163 del D.lgs. n. 50/2016, composto dai seguenti elaborati:
TAV- 1 – Scheda di valutazione GTS
TAV- 2 – Documentazione catastale
TAV- 3 – Relazione tecnica illustrativa
TAV- 4 – Documentazione Fotografica
TAV- 5.1 – Stato di fatto;
TAV- 5.2 – Messa in sicurezza;
TAV- 6 – Computo Metrico Estimativo – Quadro Economico
TAV- 7 – Cronoprogramma
TAV- 8 – Relazione Geotecnica – Relazione sui materiali – Relazione di calcolo–– Piano di uso e manutenzione
Calcolo Uomini Giorno
Quadro di Incidenza della Manodopera
Schema di contratto
Capitolato Speciale d’Appalto
Dichiarazione Piano di Sicurezza e Coordinamento
-di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato “OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO AD ARQUATA CAPOLUOGO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR SCHEDA N.06 DEL 21.04.17 contrad. catast. F29 M.67”;
-di procedere mediante la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione delle opere secondo il criterio del prezzo più basso;
-di attribuire alla SUA Provincia di Ascoli Piceno lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 16/06/2017; 
-di approvare il verbale di Sorteggio prot. 16175 Del 02/11/2017 espletato in data 30/10/2017 con le modalità previste dall’art. 2 del D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017, coordinato con la Legge di conversione n. 45 del 7 aprile 2017, per l’individuazione delle ditte a cui affidare i lavori di messa in sicurezza dell'immobile in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 225 del 19/12/2017 nella quale si è disposto tra l’altro:
-di approvare gli atti di gara come redatti e trasmessi dalla SUA presso la provincia di Ascoli Piceno, relativi alla PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 36, CO. 2, LETT. B) E 163 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SITO AD ARQUATA CAPOLUOGO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24/08/2016 GTS CCR SCHEDA N. 06 DEL 21/04/2017 CONTRAD. CATAST. F 29 M. 67. CUP J22d17000010002 – CIG 7276058900;
-di prendere atto della proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara del 24/11/2017;
-di aggiudicare conseguentemente e in via definitiva l’appalto di cui trattasi all’Impresa SIQUINI COSTRUZIONI SRL di Castignano (AP) – PI 01338300443, per l’importo contrattuale pari ad € 76.185,70 (di cui euro € 45.590,83 per lavori, derivante dall’applicazione del ribasso del 18,888% su  €   56.207,25 ed  € 30.594,88 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d’asta);

PRESO ATTO 
-Che in data 14/02/2018 è stato sottoscritto il contratto di Appalto, Rep. n. 7/2018 tra questo Comune e la ditta appaltatrice;
-Che in data 29/03/2018 sono iniziati i lavori in oggetto (giusto verbale di consegna e inizio lavori in via d’urgenza);

PRESO ATTO che in corso di realizzazione degli interventi si sono riscontrate delle problematiche sulla fattibilità delle lavorazioni previste in progetto a causa del generale e progressivo peggioramento delle condizioni generali del fabbricato, sia a causa del maltempo, sia a causa delle ulteriori scosse sismiche ripetutesi a partire dal 24/08/2016;e pertanto si è manifestata la necessità di redigere una variante tecnica e suppletiva;

VISTI 
la lettera c) del comma 1 dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016: 
1. “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” secondo il quale: “le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
(omissis)
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

CONSIDERATO
-che l’intervento riguarda la OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO AD ARQUATA CAPOLUOGO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR SCHEDA N.06 DEL 21.04.17 contrad. catast. F29 M.67 e riveste carattere di somma urgenza;
-Che il D.LL. e progettista dell’opera, geom. Giuseppe Alessandrini, sentita l’impresa e il responsabile del Servizio Territorio e Ambiente quale responsabile del procedimento, con nota prot. 7219 del 19/07/2018 ha proposto la redazione di una perizia di variante tecnico suppletiva, necessaria per terminare e migliorare l’opera a seguito di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e sopra riportate; 
-Che il responsabile del procedimento, vista la relazione del D.L. e le situazioni soprindicate, ha accertato la non imputabilità alla stazione appaltante e l’imprevedibilità degli eventi non riscontrabili al momento della progettazione, ed ha ravvisato la necessità della redazione di una variante tecnico suppletiva, autorizzando con nota prot. 7614 del 31/07/2018 la redazione della prima perizia di variante tecnico suppletiva;

DATO ATTO 
che per quanto sopra, e ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c) del D. Lgs 50/2016 il tecnico incaricato geom. Giuseppe Alessandrini ha trasmesso a questo Comune la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori in oggetto, assunta al prot. Com.  9029 del 17/09/2018 e prot. Com. 9124 del 18/09/2018 composta dai seguenti elaborati:
1.	Perizia di variante tecnica e suppletiva;
2.	Computo metrico estimativo di variante – Elenco prezzi – 
Quadro Economico di Variante – Quadro di Raffronto;
3.	Schema di atto di sottomissione;
4.	Denuncia dei lavori di variante;
5.	Relazione di calcolo.
con il seguente Q.E. di variante:
QUADRO ECONOMICO – Prima Variante Tecnica e Suppletiva	
A	LAVORI E PRESTAZIONI		
a1	importo per l’esecuzione dei lavori	€ 68.544,68	
	A detrarre ribasso d’asta offerto dall’impresa esecutrice (18,888%)	- € 12.946,72	
a2	importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d’asta)	€ 34.570,30	
a3	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO A SEGUITO DI VARIANTE	€ 90.168,26	
			
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese tecniche relative a: Progettazione e D.L. (5% importo lavori al lordo del ribasso)	€ 5.155,75	
b2	CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 206,23	
b3	IVA 22% per spese tecniche	€ 1.179,64	
b4	IVA 10% su lavori (a3)	€ 9.017,37	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B = (b1 ÷ b4) 	€ 15.558,99	
			
	ECONOMIA APPALTO ED ESECUZIONE	€ 88,88	
	TOTALE OPERA	€  105.727,25	
			
	TOTALE GENERALE	€ 105.816,14	

DATO ATTO -Che la I° variante tecnica e suppletiva della OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO AD ARQUATA CAPOLUOGO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR SCHEDA N.06 DEL 21.04.17 contrad. catast. F29 M.67, è stata redatta in applicazione dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs 50/2016 e s. m. e i., per le motivazioni soprindicate;
-Che l’importo dei nuovi lavori contrattuali di variante risulta essere di euro 90.168,26, da cui scaturisce un aumento netto contrattuale di euro 13.982,56 (da Euro 76.185,70 ad Euro 90.168,26) pari al 18,35%, inferiore al limite imposto del 50% dal c.7 dell’art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;
-Che l'impresa ha firmato, per accettazione, il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema dell’Atto di sottomissione, costituente la perizia di variante in parola, il quale è stato redatto applicando gli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;   
-Che l’importo iniziale del finanziamento complessivo dell’opera pari ad euro 105.816,14, è ridotto a seguito dell’accertamento dell’economie di appalto ed esecuzione ad euro 105.727,25.

DATO ATTO che il progetto di variante in oggetto è stato trasmesso al Centro di Coordinamento della Regione Marche Sisma 2016 Prot. 9194 del 19/09/2018.

DATO ATTO che questo comune provvederà alla denuncia dei lavori di variante all’USR per l’ottenimento dell’attestato di avvenuto deposito strutturale;

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
in data 26/08/2016 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388;
in data 28/08/2016 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389;
in data 01/09/2016 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 391;
in data 06/09/2016 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 392;
in data 13/09/2016 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393;
in data 19/09/2016 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394;
in data 23/09/2016 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 396;
in data 10/10/2016 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399;
in data 11/01/2017 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431;

VISTA la L.R. 20.02.2017 n.5;

VISTI in particolare:
- il c.3 dell’art.3 dell’Ordinanza del dipartimento della protezione civile n.408/2016; 
- il c.5 dell’art.3 dell’Ordinanza del dipartimento della protezione civile n.394/2016;
- l’art.3 dell’Ordinanza n. 389/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA la Circolare del Capo Dipartimento del 22 dicembre 2016: “procedure per la realizzazione delle opere provvisionali (puntellamenti e demolizioni)” che per quanto riguarda le opere provvisionali finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità che interessano i beni culturali e paesaggistici immobili in sintesi prevede che il Comune può procedere con puntellamenti o demolizioni solo se il bene non figura nell’elenco di quelli per cui l’Amministrazione dei Beni Culturali si è riservata l’intervento. In tutti gli altri casi, se si tratta di puntellamenti o similari, il Comune è tenuto a darne comunicazione al Segretariato Regionale del Mibact-Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Se invece l’intervento consiste in una demolizione, totale o parziale, il Comune richiede l’autorizzazione preventiva alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Per quanto riguarda gli oneri finanziari, la copertura di spesa è assicurata dai fondi stanziati per l’emergenza, con la possibilità per il Comune di procedere direttamente per importi inferiori ai 40 mila euro o di chiedere il nulla-osta alla Regione per importi superiori.

VISTI:
- il D. Lgs. 50 del 18-04-2016 inerente la “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
-  il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

D   E   T   E   R   M   I   N   A
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto

-di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale del seguente atto;

-di approvare ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c) del D. Lgs 50/2016 la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori in oggetto, redatta dal tecnico incaricato geom. Giuseppe Alessandrini, assunta al prot. 9029 del 17/09/2018 e prot. Com. 9124 del 18/09/2018 composta dai seguenti elaborati:
1.	Perizia di variante tecnica e suppletiva;
2.	Computo metrico estimativo di variante – Elenco prezzi – 
Quadro Economico di Variante – Quadro di Raffronto;
3.	Schema di atto di sottomissione;
4.	Denuncia dei lavori di variante;
5.	Relazione di calcolo.
con il seguente Q.E. di variante:
QUADRO ECONOMICO – Prima Variante Tecnica e Suppletiva	
A	LAVORI E PRESTAZIONI		
a1	importo per l’esecuzione dei lavori	€ 68.544,68	
	A detrarre ribasso d’asta offerto dall’impresa esecutrice (18,888%)	- € 12.946,72	
a2	importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d’asta)	€ 34.570,30	
a3	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO A SEGUITO DI VARIANTE	€ 90.168,26	
			
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese tecniche relative a: Progettazione e D.L. (5% importo lavori al lordo del ribasso)	€ 5.155,75	
b2	CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 206,23	
b3	IVA 22% per spese tecniche	€ 1.179,64	
b4	IVA 10% su lavori (a3)	€ 9.017,37	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B = (b1 ÷ b4) 	€ 15.558,99	
			
	ECONOMIA APPALTO ED ESECUZIONE	€ 88,88	
	TOTALE OPERA	€  105.727,25	
			
	TOTALE GENERALE	€ 105.816,14	
-di dare atto:
-che la I° variante tecnica e suppletiva della OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO AD ARQUATA CAPOLUOGO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR SCHEDA N.06 DEL 21.04.17 contrad. catast. F29 M.67 è stata redatta in applicazione dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., per le motivazioni soprindicate;
-Che l’importo dei nuovi lavori contrattuali di variante risulta essere di euro 90.168,26, da cui scaturisce un aumento netto contrattuale di euro 13.982,56 (da Euro 76.185,70 ad Euro 90.168,26) pari al 18,35%, inferiore al limite imposto del 50% dal c.7 dell’art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;
-Che l'impresa ha firmato, per accettazione, il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema dell’Atto di sottomissione, costituente la perizia di variante in parola, il quale è stato redatto applicando gli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;   
-Che l’importo iniziale del finanziamento complessivo dell’opera pari ad euro 105.816,14, è ridotto a seguito dell’accertamento dell’economie di appalto ed esecuzione ad euro 105.727,25.
-Che dall’approvazione della Prima Variante Tecnico Suppletiva, deriva un aumento delle spese tecniche di Progettazione, D.LL., coordinamento della Sicurezza, contabilità e fine lavori, pari ad € 981,94 (da € 5.559,68 ad € 6.541,62).

-di impegnare la somma di  € 981,94 con imputazione al capitolo 3305 c.i. 11.02-2.02.01.99.999 in conto competenza del corrente esercizio finanziario ad integrazione dell’impegno di spesa di di € 5.559,68 assunto con Determina del sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 131 del 04/10/2017, a favore dello Studio Tecnico Associato Alessandrini e Lupi, nella persona del Geom. Giuseppe Alessandrini, nato ad Amandola il 17.01.1979, residente in Amandola, Via Villa Rustici, 190, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Fermo al n. 871, in qualità tecnico libero professionista con studio in Amandola, via G. Treggiari n.3, codice fiscale LSSGPP79A17A252O, partita iva 01831230444, per un totale complessivo di impegnato pari a € 6.541,62;  

-di dare atto che il CIG attribuito:
•	All’appalto dei lavori è 7259562C11;
•	All’appalto del servizio di progettazione è Z7420299A2.

-di approvare lo schema di Atto di Sottomissione, impegnativo per l’appaltatore, e già sottoscritto dallo stesso per accettazione, sicché l’importo dell’appalto dei lavori in oggetto, assomma ora ad euro 90.168,26, a fronte dei 76.185,70 di importo contrattuale;

-di dare atto che il finanziamento dell'intervento di OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO AD ARQUATA CAPOLUOGO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR SCHEDA N.06 DEL 21.04.17 contrad. catast. F29 M.67 ammonta a complessivi Euro € 105.727,25 ed è assicurato con fondi assegnati a questo Comune dalla Regione ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d) e), del decreto legge n. 189 del 2016 del Commissario della Ricostruzione, con imputazione al c.i. 11.02-2.02.01.99.999 cap. 3305 del corrente esercizio finanziario;

-di dare infine atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto Geom. Mauro Fiori Responsabile del Settore Territorio e Ambiente;

-di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l’apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell’art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	“Territorio e Ambiente”
	Geom. Fiori Mauro

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell’esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.
	                                     IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
                                                      “ Finanziario e Tributi” 
                                             Dott. Giovanni Sassù

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al           
Arquata del Tronto           

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	(Geom. Fiori Mauro)	

___________________________________________________________________________

La suestesa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune dal               al           

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	(Geom. Fiori Mauro)