SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 94 DEL 22-06-2018

Oggetto: Sisma 2016 - OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE SPELONGA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR N.1737 SCHEDA N.5 DEL 05.04.17 CONTRAD. CATAST. F.30 M.1192-1188-1921, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 163 del D.lgs. n. 50/2016 CUP:J22D17000040002 - Approvazione della I° variante tecnico suppletiva"	

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventidue del mese di giugno 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: Sisma 2016 - OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE SPELONGA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR N.1737 SCHEDA N.5 DEL 05.04.17 CONTRAD. CATAST. F.30 M.1192-1188-1921, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 163 del D.lgs. n. 50/2016 CUP:J22D17000040002 - Approvazione della I° variante tecnico suppletiva”.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018 con la quale tra l’altro è stato approvato il bilancio di previsione dell’anno corrente;

VISTO il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 724 C_A437-SARCH-P del 21/01/2017, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono state attribuite al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente le funzioni definite dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo fino alla scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco;

VISTO il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata del Tronto n. 9 del 11/04/2014;

DATO ATTO che il Comune di Arquata del Tronto rientra nei territori per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 e successive Delibere D.P.C.M. Del 31/10/2016, 10/02/2017 e 22/02/2018;

RICHIAMATA la determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.33 del 31/05/2017, con la quale è stato disposto di affidare ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016,  l’incarico di Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di Regolare Esecuzione delle "OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE SPELONGA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR N.1737 SCHEDA N.5 DEL 05.04.17 CONTRAD. CATAST. F.30 M.1192-1188-1921 all’Ing. Rocco Maffei, nato a Roma il 13.02.1960, residente in Roma , Via del Forte Tiburtino n.98, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 14747, in qualità tecnico libero professionista con studio in Roma, Via del Forte Tiburtino n.98, codice fiscale MFFRCC60B13H501Z, partita iva 08606510587;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo relativo al suindicato intervento, acquisito al protocollo comunale al prot. 14815 del 28/09/2017, così come integrato a seguito del NULLA OSTA del CCR Marche e della richiesta di integrazione documentale prot. 13706 del 29/08/2017, con il seguente Quadro Economico:
QUADRO ECONOMICO - progetto esecutivo	
A	LAVORI E PRESTAZIONI		
a1	importo per l’esecuzione dei lavori	€ 60.284,55	
a2	importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d’asta)	€ 19.170,92	
a3	LAVORI A BASE D’ASTA (a1+a2)	€ 79.455,47	
			
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese tecniche relative a: Progettazione e D.L. (5% importo lavori a3)	€ 3.972,77	
b2	IVA 22% e 4% su spese tecniche	€ 1.067,88	
b3	IVA 10% su lavori (a3)	€ 7.945,55	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B = (b1 ÷ b3) 	€ 12.986,20	
			
	IMPORTO DEL PROGETTO (A + B)	€ 92.441,67	

VISTA la nota prot. 822718 del 28/08/2017 del Centro di Coordinamento della Regione Marche ad oggetto: “opere provvisionali e messa in sicurezza dell’edificio sito nella Fraz. Spelonga contraddistinto al Foglio 30 particelle 1192-1188-1921” – NULLA OSTA – PRESCRIZIONI con la quale si concede a questo Comune Nulla Osta alla messa in sicurezza dell’immobile in oggetto;
RICHIAMATA la determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.198 del 24/11/2017 nella quale si è disposto tra l’altro:
-di approvare il progetto relativo a OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE SPELONGA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR N.1737 SCHEDA N.5 DEL 05.04.17 CONTRAD. CATAST. F.30 M.1192-1188-1921, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 163 del D.lgs. n. 50/2016, adeguato alle prescrizioni contenute nel parere del CCR ed integrato a seguito di richiesta di integrazione da parte di questo Comune, composto dai seguenti elaborati:
QUADRO ECONOMICO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
COMPUTO ONERI SICUREZZA
ELENCO PREZZI
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
RELAZIONE DI CALCOLO
RELAZIONE SUI MATERIALI
RELAZIONE GEOTECNICA
PIANO DI USO E MANUTENZIONE
SCHEMA DI CONTRATTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
LAYOUT DI CANTIERE
QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
CALCOLO UOMINI GIORNO
TAV- 01 – TAVOLA DEGLI INTERVENTI;
TAV- 02 – TAVOLA DEGLI INTERVENTI;
TAV- 02 – TAVOLA DEGLI INTERVENTI.
-di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato “OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE SPELONGA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR N.1737 SCHEDA N.5 DEL 05.04.17 CONTRAD. CATAST. F.30 M.1192-1188-1921”;
-di procedere mediante la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione delle opere secondo il criterio del prezzo più basso;
-di attribuire alla SUA Provincia di Ascoli Piceno lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 16/06/2017; 
-di approvare il verbale di Sorteggio prot. 16950 Del 24/11/2017 espletato in data 21/11/2017 con le modalità previste dall’art. 2 del D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017, coordinato con la Legge di conversione n. 45 del 7 aprile 2017, per l’individuazione delle ditte a cui affidare i lavori di messa in sicurezza dell'immobile in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n.236 del 21/12/2017 nella quale si è disposto tra l’altro:
-di approvare gli atti di gara come redatti e trasmessi dalla SUA presso la provincia di Ascoli Piceno, relativi alla PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTT. 36, CO. 2, LETT. B) E 163  DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI OPERE PROVVISIONALI E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SITO IN FRAZ. SPELONGA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24/08/2017 – GTS CCR N. 1737 -  SCHEDA N. 05 DEL 05/04/2017 – F. 30 M. 1192 – 1188 - 1921. CUP J22D17000040002 – CIG 729053971A;
-di prendere atto della proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara del 12/12/2017;
-di aggiudicare conseguentemente e in via definitiva l’appalto di cui trattasi all’Impresa M. & P. COSTRUZIONI SNC di PARISSI LUCIO & C. di Ascoli Piceno – PI 00886370675, per l’importo contrattuale pari ad  € 66.663,09 (di cui euro € 47.492,17 per lavori, derivante dall’applicazione del ribasso del 21,22% su  €   60.284,55 ed  € 19.170,92 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d’asta);
PRESO ATTO 
-Che in data 01/02/2018 è stato sottoscritto il contratto di Appalto, Rep.n.5/2018 tra questo Comune e la ditta appaltatrice;
-Che in data 12/03/2018 sono iniziati i lavori in oggetto (giusto verbale di consegna e inizio lavori in via d’urgenza);

PRESO ATTO che in corso di realizzazione degli interventi è stato necessario prevedere delle variazioni alla configurazione di progetto dei puntellamenti tubo-giunto al fine di adeguare l’opera di messa in sicurezza, sia alle modificazioni sulle murature intervenute a seguito di ulteriori scosse sismiche e di danni per gli eventi atmosferici (neve, gelo), sia a seguito delle necessità di migliore agibilità viaria, e pertanto si è manifestata la necessità di redigere una variante tecnica e suppletiva;

VISTI la lettera c) del comma 1 e il comma 2 dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016: 
1. “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” secondo il quale: “le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
(omissis)
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 
a) le soglie fissate all'articolo 35; 
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

CONSIDERATO
-che l’intervento riguarda la OPERE PROVVISIONALI E DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE SPELONGA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR N.1737 SCHEDA N.5 DEL 05.04.17 CONTRADDISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 30 MAPPALI 1192-1188-1921 e riveste carattere di somma urgenza;
-Che il DD.LL. e progettista dell’opera, ing. Rocco Maffei, sentita l’impresa e il responsabile del Servizio Territorio e Ambiente quale responsabile del procedimento, ha proposto la redazione di una perizia di variante tecnico suppletiva, necessaria per terminare e migliorare l’opera a seguito di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e sopra riportate; 
-Che il responsabile del procedimento, vista la relazione del D.L. e le situazioni soprindicate, ha accertato la non imputabilità alla stazione appaltante e l’imprevedibilità degli eventi non riscontrabili al momento della progettazione, ed ha ravvisato la necessità della redazione di una variante tecnico suppletiva;

DATO ATTO che per quanto sopra, e ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c) e comma 2 del D. Lgs 50/2016 il tecnico incaricato ing. Rocco Maffei ha trasmesso a questo Comune la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori in oggetto, assunta al prot. 6169 del 22/06/2018 composta dai seguenti elaborati:
1.	Relazione Tecnica Illustrativa di Perizia di Variante in corso d’opera;
2.	Computo metrico estimativo di variante;
3.	Computo dei costi per la sicurezza;
4.	Elenco prezzi unitari; 
5.	Quadro comparativo di variante;
6.	Atto di sottomissione;
7.	Quadro economico; 
8.	TAV.1_V Rilievo dei danni – Interventi di demolizione e smontaggio;
9.	TAV.2_V Interventi provvisionali di messa in sicurezza;
10.	TAV.3_V Interventi provvisionali di messa in sicurezza;
PROGETTO STRUTTURALE PER DEPOSITO ALL’USR:
11.	Relazione illustrativa;
12.	Relazione materiali;
13.	Relazione di calcolo;
14.	Relazione Geotecnica;
15.	Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.
con il seguente Q.E. di variante:

QUADRO ECONOMICO – Prima Variante Tecnica e Suppletiva	
A	LAVORI E PRESTAZIONI		
a1	importo per l’esecuzione dei lavori	€ 72.060,33	
	A detrarre ribasso d’asta offerto dall’impresa esecutrice (21,22%)	- € 15.291,20	
a2	importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d’asta)	€ 9.893,88	
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO A SEGUITO DI VARIANTE	€ 66.663,01	
			
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese tecniche relative a: Progettazione e D.L. (5% importo lavori a3)	€ 3.972,77	
b2	CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 158,91	
B3	IVA 22% per spese tecniche	€ 908,96	
b3	IVA 10% su lavori (a3)	€ 6.666,30	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B = (b1 ÷ b4) 	€ 11.706,95	
			
	ECONOMIA APPALTO ED ESECUZIONE	€  14.071,71	
	TOTALE OPERA	€ 78.369,96	
			
	TOTALE GENERALE	€ 92.441,67	

DATO ATTO -Che la I° variante tecnica e suppletiva delle OPERE PROVVISIONALI E DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE SPELONGA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR N.1737 SCHEDA N.5 DEL 05.04.17 CONTRADDISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 30 MAPPALI 1192-1188-1921, è stata redatta in applicazione dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs 50/2016 e s. m. e i.  e del comma 2 del medesimo articolo, per le motivazioni soprindicate;
-Che l’importo dei nuovi lavori contrattuali di variante risulta essere di euro 66.663,01, da cui scaturisce una riduzione netta contrattuale di euro 0,08 (da Euro 66.663,09 ad Euro 66.663,01), inferiore al limite imposto del 15% dal C.2 dell’art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;
-Che l'impresa ha firmato, per accettazione, il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema dell’Atto di sottomissione, costituente la perizia di variante in parola, il quale è stato redatto applicando gli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;   
-Che l’importo iniziale del finanziamento complessivo dell’opera pari ad euro 92.441,67, è ridotto a seguito dell’accertamento dell’economie di appalto ed esecuzione ad euro in euro 78.369,96.

DATO ATTO che il progetto di variante in oggetto è stato trasmesso al Centro di Coordinamento della Regione Marche Sisma 2016 Prot. 6195 del 22/06/2018.

DATO ATTO che questo comune ha dato comunicazione della variante in oggetto, con invio degli elaborati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, in data 22/06/2018 prot. 6202;
DATO ATTO che questo comune provvederà alla denuncia dei lavori di variante all’USR per l’ottenimento dell’attestato di avvenuto deposito strutturale;

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
in data 26/08/2016 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388;
in data 28/08/2016 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389;
in data 01/09/2016 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 391;
in data 06/09/2016 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 392;
in data 13/09/2016 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393;
in data 19/09/2016 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394;
in data 23/09/2016 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 396;
in data 10/10/2016 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399;
in data 11/01/2017 è stata emanata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431;

VISTA la L.R. 20.02.2017 n.5;

VISTI in particolare:
- il c.3 dell’art.3 dell’Ordinanza del dipartimento della protezione civile n.408/2016; 
- il c.5 dell’art.3 dell’Ordinanza del dipartimento della protezione civile n.394/2016;
- l’art.3 dell’Ordinanza n. 389/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA la Circolare del Capo Dipartimento del 22 dicembre 2016: “procedure per la realizzazione delle opere provvisionali (puntellamenti e demolizioni)” che per quanto riguarda le opere provvisionali finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità che interessano i beni culturali e paesaggistici immobili in sintesi prevede che il Comune può procedere con puntellamenti o demolizioni solo se il bene non figura nell’elenco di quelli per cui l’Amministrazione dei Beni Culturali si è riservata l’intervento. In tutti gli altri casi, se si tratta di puntellamenti o similari, il Comune è tenuto a darne comunicazione al Segretariato Regionale del Mibact-Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Se invece l’intervento consiste in una demolizione, totale o parziale, il Comune richiede l’autorizzazione preventiva alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Per quanto riguarda gli oneri finanziari, la copertura di spesa è assicurata dai fondi stanziati per l’emergenza, con la possibilità per il Comune di procedere direttamente per importi inferiori ai 40 mila euro o di chiedere il nulla-osta alla Regione per importi superiori.

VISTI:
- il D. Lgs. 50 del 18-04-2016 inerente la “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
-  il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

D   E   T   E   R   M   I   N   A
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto

-di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale del seguente atto;

-di approvare ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c) e comma 2 del D. Lgs 50/2016 la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori in oggetto, redatta dal tecnico incaricato ing. Rocco Maffei e assunta al prot. comunale n. 6169 del 22/06/2018, composta dai seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:
1.	Relazione Tecnica Illustrativa di Perizia di Variante in corso d’opera;
2.	Computo metrico estimativo di variante;
3.	Computo dei costi per la sicurezza;
4.	Elenco prezzi unitari; 
5.	Quadro comparativo di variante;
6.	Atto di sottomissione;
7.	Quadro economico; 
8.	TAV.1_V Rilievo dei danni – Interventi di demolizione e smontaggio;
9.	TAV.2_V Interventi provvisionali di messa in sicurezza;
10.	TAV.3_V Interventi provvisionali di messa in sicurezza;
PROGETTO STRUTTURALE PER DEPOSITO ALL’USR:
11.	Relazione illustrativa;
12.	Relazione materiali;
13.	Relazione di calcolo;
14.	Relazione Geotecnica;
15.	Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.
con il seguente Q.E. di variante:

QUADRO ECONOMICO – Prima Variante Tecnica e Suppletiva	
A	LAVORI E PRESTAZIONI		
a1	importo per l’esecuzione dei lavori	€ 72.060,33	
	A detrarre ribasso d’asta offerto dall’impresa esecutrice (21,22%)	- € 15.291,20	
a2	importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d’asta)	€ 9.893,88	
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO A SEGUITO DI VARIANTE	€ 66.663,01	
			
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese tecniche relative a: Progettazione e D.L. (5% importo lavori a3)	€ 3.972,77	
b2	CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 158,91	
B3	IVA 22% per spese tecniche	€ 908,96	
b3	IVA 10% su lavori (a3)	€ 6.666,30	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B = (b1 ÷ b4) 	€ 11.706,95	
			
	ECONOMIA APPALTO ED ESECUZIONE	€  14.071,71	
	TOTALE OPERA	€ 78.369,96	
			
	TOTALE GENERALE	€ 92.441,67	

-di dare atto ATTO -Che la I° variante tecnica e suppletiva delle OPERE PROVVISIONALI E DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN FRAZIONE SPELONGA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24.08.16 GTS CCR N.1737 SCHEDA N.5 DEL 05.04.17 CONTRADDISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 30 MAPPALI 1192-1188-1921, è stata redatta in applicazione dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs 50/2016 e s. m. e i.  e del comma 2 del medesimo articolo, per le motivazioni soprindicate;
-Che l’importo dei nuovi lavori contrattuali di variante risulta essere di euro 66.663,01, da cui scaturisce una riduzione netta contrattuale di euro 0,08 (da Euro 66.663,09 ad Euro 66.663,01), inferiore al limite imposto del 15% dal C.2 dell’art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;
-Che l'impresa ha firmato, per accettazione, lo schema dell’Atto di sottomissione, costituente la perizia di variante in parola, il quale è stato redatto applicando gli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;   
-Che il costo attuale dell’opera a seguito dell’accertamento dell’economie di appalto ammonta ad euro 78.369,96.

-di approvare lo schema di Atto di Sottomissione, impegnativo per l’appaltatore, e già sottoscritto dallo stesso per accettazione, sicché l’importo dell’appalto dei lavori in oggetto, assomma ora ad euro 66.663,01, a fronte dei 66.663,09 di importo contrattuale.

-di dare atto che il finanziamento dell'intervento di messa in sicurezza dell’immobile in Fraz. Spelonga contraddistinto al Foglio 30 particelle 1192-1188-1921 ammonta a complessivi Euro € 92.560,85 ed è assicurato con fondi assegnati a questo Comune dalla Regione ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d) e), del decreto legge n. 189 del 2016 del Commissario della Ricostruzione, con imputazione al c.i. 11.02-2.02.01.99.999 cap.3305 del corrente esercizio finanziario;

-di dare infine atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice il sottoscritto Geom. Mauro Fiori Responsabile del Settore Ambiente e Territorio;

-di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l’apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell’art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	“Territorio e Ambiente”
	Geom. Fiori Mauro

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell’esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.
	                                     IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
                                                      “ Finanziario e Tributi” 
                                             Dott. Giovanni Sassù

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al           
Arquata del Tronto           

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	(Geom. Fiori Mauro)	

___________________________________________________________________________

La suestesa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune dal               al           

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	(Geom. Fiori Mauro)