COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  137   Del  10-07-18

NUM.REG.GEN.328

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: LAVORI  DI  RIPRISTINO  INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE 
DAL MALTEMPO 2015. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIAN=
TE NR. 1

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dieci del mese di luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso: 
-	che con decreto in data 30/09/2016 del Dipartimento per gli affari Interni Territoriali del Ministero dell’Interno, è stato concesso il contributo di € 90.000,00 per l’esecuzione delle opere di  “Ripristino Infrastrutture viarie danneggiate dal maltempo anno 2015”; 
-	che con D.D. n. 168 del 29/12/2016 è stato incaricato  l’Ing. Jun Ergasti Valentino per la progettazione e direzione dei lavori;
-	che con delibera di G.C. n. 92 del 05/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per l’importo di € 90.000,00  come appresso risultante: 
DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO	
Importo lavori a base d'asta	                        63.611,97 	
Somme a disposizione della Amministrazione:		
Lavori in economia	                          4.599,43 	
Imprevisti	                          3.180,60 	
I.V.A.  22% sui lavori - su voci 1)	                          5.355,67 	
I.V.A. 10% sui lavori - su voci 2)3)4)	                          3.926,80 	
spese tecniche	                          6.361,20 	
contributo spese tecniche	                             254,45 	
I.V.A. spese tecniche	                          1.455,44 	
compenso D.Lgs   50/2016	                             254,45 	
spese amministrative e costo discariche	                          1.000,00 	
Totale somme a disposizione	                        26.388,03 	
TOTALE PROGETTO	                        90.000,00 	

-	che con D.D. n. 53 del 27/03/2018 i lavori sono stati affidati alla Ditta VARIAN srl di Gualdo Cattaneo per l’importo di € 50.046,60 di cui € 6.611,60 per oneri sulla sicurezza e € 43.435,00 per lavori al netto del ribasso del 23,80%; 
-	che con la ditta  è stato stipulato il contratto re. 2076 del 25/05/2018;
VISTO: 
-	che il Direttore dei lavori  ha rappresentato la necessità di adeguare le previsioni  progettuali a causa dei danni causati dalle eccezionali  precipitazioni atmosferiche della scorsa primavera che hanno ulteriormente  danneggiato il piano viabile in località Macchia e in Via del Colle a Cerreto  nonché la copertina del muro di cinta presso San Paterniano; 
-	che pertanto lo stesso, su autorizzazione del responsabile del procedimento, ha prodotto la perizia di variante in corso d’opera nr. 1 che presenta il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO VARIANTE	Importi	
1) - Strada della Costa e via Cerretana	            22.624,36 	
2) - Cerreto - Via del Colle	            24.423,99 	
3) - Borgo - Sito di San Paterniano	               6.795,30 	
4) - Macchia - strada interna	            10.962,09 	
Importo totale dei lavori	        64.805,74 	
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	               2.079,40 	
5) costi per la sicurezza da computo	          4.722,00 	
Importo lavori a base d'asta	        69.527,74 	
ribasso del 23,80%	        14.928,87 	
Importo di contratto	        54.598,87 	
Somme a disposizione della Amministrazione:		
Lavori in economia	          5.027,10 	
Imprevisti	          1.390,50 	
I.V.A.  22% sui lavori - su voci 1)	          4.193,43 	
I.V.A. 10% sui lavori - su voci 2)3)4)	          3.553,78 	
spese tecniche	          6.952,77 	
contributo spese tecniche	             278,11 	
I.V.A. spese tecniche	          1.590,79 	
compenso art. 92 D.Lgs 163/06	             278,11 	
spese amministrative e costo discariche	          1.000,00 	
Totale somme a disposizione	        24.264,60 	
TOTALE PROGETTO	        78.863,47 	
somma disponibile	        11.136,53 	
TOTALE	        90.000,00 	

-	che rispetto all’importo contrattuale vi è un incremento del lavori di € 4.552,99 pari al 9%; 
-	che la perizia di variante di cui sopra presente i presupposti di legittimità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106,comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, dato atto che: 
1.	la necessità delle modifiche è determinata da cause impreviste e imprevedibili;
2.	le modifiche non alterano la natura generale del contratto;
RITENUTO: 
-	di approvare  la perizia di variante e dare corso ai lavori  che sono urgenti e indifferibili;
VISTO:
-	l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
D E T E R M I N A
1.	Di approvare la perizia di variante in corso d’opera dei lavori di “Ripristino infrastrutture  danneggiate dal maltempo 2015” redatta dal Direttore dei lavori Ing. Jun Ergasti Valentino con il seguente quadro economico: 
QUADRO ECONOMICO VARIANTE	Importi	
1) - Strada della Costa e via Cerretana	            22.624,36 	
2) - Cerreto - Via del Colle	            24.423,99 	
3) - Borgo - Sito di San Paterniano	               6.795,30 	
4) - Macchia - strada interna	            10.962,09 	
Importo totale dei lavori	        64.805,74 	
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	               2.079,40 	
5) costi per la sicurezza da computo	          4.722,00 	
Importo lavori a base d'asta	        69.527,74 	
ribasso del 23,80%	        14.928,87 	
Importo di contratto	        54.598,87 	
Somme a disposizione della Amministrazione:		
Lavori in economia	          5.027,10 	
Imprevisti	          1.390,50 	
I.V.A.  22% sui lavori - su voci 1)	          4.193,43 	
I.V.A. 10% sui lavori - su voci 2)3)4)	          3.553,78 	
spese tecniche	          6.952,77 	
contributo spese tecniche	             278,11 	
I.V.A. spese tecniche	          1.590,79 	
compenso art. 92 D.Lgs 163/06	             278,11 	
spese amministrative e costo discariche	          1.000,00 	
Totale somme a disposizione	        24.264,60 	
TOTALE PROGETTO	        78.863,47 	
somma disponibile	        11.136,53 	
TOTALE	        90.000,00 	

2.	Di dare atto che i maggiori e diversi lavori  sono eseguiti dalla ditta appaltatrice  VARIAN srl agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale  ed all’atto di sottomissione facente parte della perizia di variante  che con la presente si approva;
3.	Di dare atto che la spesa è imputata al Cap. 2504 Imp. 220/2016. 

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 11-07-18 e vi resterà fino al 26-07-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------