COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
Numero  !Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA AREA DEI
68     !         GIARDINI  PUBBLICI A BORGO CERRETO A SEGUITO DELLA
Data   !         TROMBA D'ARIA DEL 25/06/2016. - VARIANTE
23-05-18 !         
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventitre del mese di maggio alle ore 14:30, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, la Giunta municipale si é legalmente riunita con la presenza dei signori:

======================================================================

Campana Luciano	SINDACO	P	
ROSSI ROBERTA	VICE SINDACO	P	
PATRIZI GIANCARLO	ASSESSORE	A	

======================================================================

Partecipa il Segretario comunale  Canafoglia Valter
Il Presidente Signor Campana Luciano in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del responsabile dell'area tecnica che di seguito si riporta:

"PREMESSO: 
- che con delibera di G.C. n. 10 del 29/01/2018 è stato approvato il progetto dei lavori di "Ripristino dei giardini pubblici di Borgo Cerreto a seguito della tromba d'aria del 25/06/2016" redatto dall'ufficio tecnico comunale per l'importo di € 21.593,39 come appresso risultante:  

VOCE	A) Lavori di pronto intervento	B) Lavori di  messa in sicurezza e ripristino	Q.E. GENERALE	
Importo lavori soggetto a ribasso		            2.945,40 		          15.019,61 	             17.965,01 	
oneri e costi sicurezza 		                         -   	7%	            1.130,51 	                1.130,51 	
Importo lavori a base d'asta		             2.945,40 		           16.150,12 	             19.095,52 	
ribasso d'asta			20,03%			
Importo di Contratto						
Somme a disposizione:						
I.V.A. sui lavori	22%	                647,99 	10%	             1.615,01 	                2.263,00 	
imprevisti e arrotondamento				                234,87 	                   234,87 	
Sommano		                647,99 		             1.849,88 	                2.497,87 	
economia a seguito di ribasso						
TOTALE PROGETTO		             3.593,39 		           18.000,00 	             21.593,39 	

- che la spesa è finanziata come appresso:
•	quanto a € 18.000,00 con contributo concesso dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 1385 del 05/12/2016 imputato al Cap. 2517 (imp. 193/2017, acc. 58);
•	quanto a € 3.593,39 con fondi del bilancio comunale già liquidati in sede di pronto intervento imputati al Cap. 2607 G.R. 2016;

- che con Determina Dirigenziale dell'Area Tecnica nr. 45 del 01/03/2018, rettificata con la D.D. nr. 64 del 05/04/2018, i lavori di cui al punto B) del quadro economico (messa in sicurezza e ripristino), sono stati affidati alla ditta "Spada Avariste" per l'importo di Euro 13.141,69 di cui Euro 12.011,18 per lavori al netto del ribasso del 20,03% ed Euro 1.130,51 per oneri e costi per la sicurezza;

- che con la ditta appaltatrice è stato stipulato il Foglio di Patti e Condizioni in data 09/04/2018;
 
VISTO:
- che è emersa la necessità di apportare delle modifiche alle quantità progettuali per sopperire a situazioni impreviste ed imprevedibili e per consentire la migliore esecuzione dell'opera;

- che, pertanto, la direzione dei lavori, condotta dal Geom. Pietro Forti e dal Geom. Marco Donnini, dell'ufficio tecnico comunale, ha redatto la Perizia di Variante che si compone dei seguenti elaborati:
•	Relazione Illustrativa;
•	Elaborati Grafici;
•	Computo Metrico;
•	Quadro di Raffronto;
•	Atto di Sottomissione in data 02/05/2018;

- che la Perizia presenta il seguente Quadro Economico:
 
VOCE	A) Lavori di pronto intervento	B) Lavori di  messa in sicurezza e ripristino	Q.E. GENERALE	
Importo lavori soggetto a ribasso		            2.945,40 		          18.110,00 	             21.055,40 	
oneri e costi sicurezza 		                         -   		            499,20 	              499,20 	
Importo lavori a base d'asta		             2.945,40 		           18.609,20 	             21.554,60	
ribasso d'asta			20,03%	            3.627,43 	               3.627,43 	
Importo di Contratto		             2.945,40 		           14.981,77 	             17.927,17 	
Somme a disposizione:						
I.V.A. sui lavori	22%	                647,99 	10%	             1.860,92 	               2.508,91 	
revisione impianto di illuminazione				655,13	655,13	
smaltimento cls in discarica				130,00	130,00	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016				              372,18	                  372,18 	
Sommano		                647,99 		          3.018,23 	              3.666,22 	
economia a seguito di ribasso				            	               	
TOTALE PROGETTO		             3.593,39 	        -   	           18.000,00 	             21.593,39	

- che la Perizia rientra nella casistica di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO:
- di provvedere alla approvazione;

P R O P O N E

1) Di approvare la Perizia di Variante dei lavori di "Ripristino dei giardini pubblici di Borgo Cerreto a seguito della tromba d'aria del 25/06/2016", redatta dall'ufficio tecnico comunale per l'importo di Euro 21.593,39 come risulta dal seguente quadro economico:
VOCE	A) Lavori di pronto intervento	B) Lavori di  messa in sicurezza e ripristino	Q.E. GENERALE	
Importo lavori soggetto a ribasso		            2.945,40 		          18.110,00 	             21.055,40 	
oneri e costi sicurezza 		                         -   		            499,20 	              499,20 	
Importo lavori a base d'asta		             2.945,40 		           18.609,20 	             21.554,60	
ribasso d'asta			20,03%	            3.627,43 	               3.627,43 	
Importo di Contratto		             2.945,40 		           14.981,77 	             17.927,17 	
Somme a disposizione:						
I.V.A. sui lavori	22%	                647,99 	10%	             1.860,92 	               2.508,91 	
revisione impianto di illuminazione				655,13	655,13	
smaltimento cls in discarica				130,00	130,00	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016				              372,18	                  372,18 	
Sommano		                647,99 		          3.018,23 	              3.666,22 	
economia a seguito di ribasso				            	               	
TOTALE PROGETTO		             3.593,39 	        -   	           18.000,00 	             21.593,39	

2) Di dare atto che la presente Perizia è relativa alla parte d'opera di cui al punto B) del quadro economico "lavori di messa in sicurezza e ripristino area dei giardini pubblici".

3) Di dare atto che i diversi e maggiori lavori saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice "Spada Avariste" agli stessi patti e condizioni di cui al "Foglio di patti e condizioni" datato 09/04/2018 e dall'Atto di Sottomissione del 02/05/2018 che con la presente si approva.

4) Di dare atto che la spesa di Euro 21.593,39 è finanziata come segue:
•	quantoi ad Euro 18.000,00 con utilizzo del contributo concesso dalla Regione Umbria con D.G.R. nr. 1385/2016 (cap.2517 - Imp. 193/2017, Acc. 58);
•	quanto ad Euro 3.593,39 con fondi del Bilancio comunale (Cap. 2607 G.R. 2016).

5) Di dare atto che il presente appalto ha le seguenti coordinate:
•	CUP:D74H16000290006;
•	CIG:Z3A1A6EF26.
(san)

F.to Il Responsabile del Servizio
         Forti Pietro;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimita' di voti legalmente espressi;

D E L I B E R A

1) Di approvare la Perizia di Variante dei lavori di "Ripristino dei giardini pubblici di Borgo Cerreto a seguito della tromba d'aria del 25/06/2016", redatta dall'ufficio tecnico comunale per l'importo di Euro 21.593,39 come risulta dal seguente quadro economico:
VOCE	A) Lavori di pronto intervento	B) Lavori di  messa in sicurezza e ripristino	Q.E. GENERALE	
Importo lavori soggetto a ribasso		            2.945,40 		          18.110,00 	             21.055,40 	
oneri e costi sicurezza 		                         -   		            499,20 	              499,20 	
Importo lavori a base d'asta		             2.945,40 		           18.609,20 	             21.554,60	
ribasso d'asta			20,03%	            3.627,43 	               3.627,43 	
Importo di Contratto		             2.945,40 		           14.981,77 	             17.927,17 	
Somme a disposizione:						
I.V.A. sui lavori	22%	                647,99 	10%	             1.860,92 	               2.508,91 	
revisione impianto di illuminazione				655,13	655,13	
smaltimento cls in discarica				130,00	130,00	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016				              372,18	                  372,18 	
Sommano		                647,99 		          3.018,23 	              3.666,22 	
economia a seguito di ribasso				            	               	
TOTALE PROGETTO		             3.593,39 	        -   	           18.000,00 	             21.593,39	

2) Di dare atto che la presente Perizia è relativa alla parte d'opera di cui al punto B) del quadro economico "lavori di messa in sicurezza e ripristino area dei giardini pubblici".

3) Di dare atto che i diversi e maggiori lavori saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice "Spada Avariste" agli stessi patti e condizioni di cui al "Foglio di patti e condizioni" datato 09/04/2018 e dall'Atto di Sottomissione del 02/05/2018 che con la presente si approva.

4) Di dare atto che la spesa di Euro 21.593,39 è finanziata come segue:
•	quantoi ad Euro 18.000,00 con utilizzo del contributo concesso dalla Regione Umbria con D.G.R. nr. 1385/2016 (cap.2517 - Imp. 193/2017, Acc. 58);
•	quanto ad Euro 3.593,39 con fondi del Bilancio comunale (Cap. 2607 G.R. 2016).

5) Di dare atto che il presente appalto ha le seguenti coordinate:
•	CUP:D74H16000290006;
•	CIG:Z3A1A6EF26.

E ad unanimita' di voti legalmente espressi;

6) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

                                      **********

Responsabile area tecnica
parere FAVOREVOLE REGOLARITA' TECNICA______________

Responsabile area finanziaria
parere FAVOREVOLE  REGOLARITA' CONTABILE____________

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE 
F.to Campana Luciano    

IL SEGRETARIO
F.to Canafoglia Valter 

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

-  che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di
questo  Comune  a  partire dal 25-05-18 e vi resterà per 15 giorni
consecutivi 

() che la suddetta é stata comunicata con lettera n. 2694 in data
25-05-18 ai signori Capigruppo; 

Cerreto di Spoleto, lì             Il Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter 

======================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cerreto di Spoleto, lì               IL SEGRETARIO COMUNALE
Canafoglia Valter

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA   

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, é divenuta esecutiva il giorno :
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2);

CeCerreto di Spoleto, lì                  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Canafoglia Valter