COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  243   Del  20-11-18

NUM.REG.GEN.579

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: O.PC.M.  3609/2007. MALTEMPO 2005 - "LAVORI DI RI= 
PRISTINO  STRADA PUBBLICA E VERSANTE  DI PONTE DEL
PIANO. PERIZIA DI VARIANTE. APPROVAZIONE.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese di novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
-	che con delibera di G.C. n. 103 del 11/10/2017 è stato approvato il progetto dei lavori di "Ripristino della strada e versante di Ponte del Piano" per l'importo complessivo di € 150.000,00 con il seguente quadro economico:

Q.E. DI PROGETTO	 	IMPORTI	
Importo lavori soggetto a ribasso	 	          75.080,86 	
importo mano d'opera soggetto a ribasso	25%	          26.640,79 	
oneri per la sicurezza	3,30%	            3.467,50 	
importo lavori da computo	 	         105.189,15 	
costi per la sicurezza	 	             5.404,00 	
importo a base d'asta	 	         110.593,15 	
Somme a disposizione:	 	 	
I.V.A. 22% sui lavori	22,00%	           24.330,49 	
spese tecniche	9,80%	           10.838,13 	
contributo spese tecniche	5,00%	                541,91 	
I.V.A. 22% su spese tecniche	22,00%	             2.503,61 	
compenso art. 113 D.LGS. 50/2016	0,60%	                663,56 	
imprevisti e arrotondamento	 	                529,16 	
Totale somme a disposizione	 	          39.406,85 	
TOTALE PROGETTO	 	         150.000,00 	

-	che l'opera, conseguente alle eccezionali avversità atmosferiche del 2005, è finanziata dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 1341 del 21/11/2016 ai sensi della O.P.C.M. n. 3609/2007;
-	che con D.D. n. 241 del 25/11/2017 (determina a contrarre) è stato assunto l'impegno di spesa per € 150.000,00 al Cap. 2501 (Imp.262/2017) e con la medesima determinazione è stato disposto l'accertamento del contributo regionale al Cap. 620 (Acc.112/2017);
-	che con D.D. n. 58 del 10/04/2018 i lavori sono stati affidati alla Ditta Fontana Costruzioni di Casal di Principe (CE) per l'importo di € 78.824,36 di cui € 8.871,50 per lavori al netto dell'offerto ribasso del 31,2311%;
-	che con la Ditta appaltatrice è stato stipulato il contratto Rep. 2075 del 15/05/2018;
VISTO: 
-	che durante il corso dei lavori si è dovuto apportare alcune modifiche alle previsioni progettuali per fare fronte a circostanze impreviste e per garantire la migliore esecuzione dell'opera;
-	che, pertanto, il direttore dei lavori, geom. Diego Lazzari, ha prodotto la perizia di variante in data 15/11/2018 che presenta il seguente quadro economico:

Q.E. DI VARIANTE	 	IMPORTI	
Importo lavori soggetto a ribasso	 	          87.161,47 	
importo mano d'opera soggetto a ribasso	25%	          30.927,33 	
oneri per la sicurezza	3,30%	            4.025,43 	
importo lavori da computo	 	         122.114,22 	
costi per la sicurezza	 	             5.404,00 	
importo a base d'asta	 	         127.518,22 	
ribasso d'asta 	31,2311%	          36.880,43 	
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	 	           90.637,79 	
Somme a disposizione:	 	 	
I.V.A. 22% sui lavori	22,00%	           19.940,31 	
spese tecniche	9,80%	           12.496,79 	
contributo spese tecniche	5,00%	                624,84 	
I.V.A. 22% su spese tecniche	22,00%	             2.886,76 	
compenso art. 113 D.LGS. 50/2016	0,60%	                765,11 	
Totale somme a disposizione	 	          36.713,81 	
TOTALE PROGETTO	 	         127.351,60 	
economia a seguito ribasso	 	          22.648,41 	
TOTALE GENERALE	 	         150.000,00 	

-	che la perizia di variante comporta un incremento dell'importo di contratto di € 11.813,43 pari al 14,99%;
-	che la perizia di variante presenta i presupposti di legittimità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016; 
RITENUTO: 
-	di provvedere alla approvazione; 
VISTO:  
-	il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 D E T E R M I N A 
1)	Di approvare la perizia di variante dei lavori di "Ripristino della strada e versante di Ponte del Piano a seguito del maltempo del 2005" redatta dal direttore dei lavori geom. Diego Lazzari con il seguente quadro economico:

Q.E. DI VARIANTE	 	IMPORTI	
Importo lavori soggetto a ribasso	 	          87.161,47 	
importo mano d'opera soggetto a ribasso	25%	          30.927,33 	
oneri per la sicurezza	3,30%	            4.025,43 	
importo lavori da computo	 	         122.114,22 	
costi per la sicurezza	 	             5.404,00 	
importo a base d'asta	 	         127.518,22 	
ribasso d'asta 	31,2311%	          36.880,43 	
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	 	           90.637,79 	
Somme a disposizione:	 	 	
I.V.A. 22% sui lavori	22,00%	           19.940,31 	
spese tecniche	9,80%	           12.496,79 	
contributo spese tecniche	5,00%	                624,84 	
I.V.A. 22% su spese tecniche	22,00%	             2.886,76 	
compenso art. 113 D.LGS. 50/2016	0,60%	                765,11 	
Totale somme a disposizione	 	          36.713,81 	
TOTALE PROGETTO	 	         127.351,60 	
economia a seguito ribasso	 	          22.648,41 	
TOTALE GENERALE	 	         150.000,00 	

2)	Di dare atto che i maggiori e direzione lavori saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario e dell'atto di sottomissione allegato alla variante che con la presente si approva;
3)	Di dare atto che l'opera è finanziata dal contributo di scopo concesso dalla Regione Umbria con D.G.R.  1341/2016 e che la relativa spesa è allocata al bilancio comunale al Cap. 2501 (imp. 262/2017);
4)	Di dare atto che l’opera ha le seguenti coordinate:
-	CUP: D77H17000000002 CIG: 728777917C

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 26-11-18 e vi resterà fino al 11-12-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------