COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  223   Del  28-11-19

NUM.REG.GEN.636

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: O.C.S.  N.  37/2017 - LAVORI DI "RIPARAZIONE E RI= 
PRISTINO  DELL'EDIFICIO  COMUNALE  PALAZZO NOBILI,
RESIDENZA  PER  ANZIANI". APPROVAZIONE 1°SAL E LI=
QUIDAZIONE.
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
-	che con Ordinanza n. 37 del 09/06/2017 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016, è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
-	che, ai sensi dell’Ordinanza suddetta, con Decreto Dirigenziale n. 418 del 28/11/2018 dell’Ufficio Speciale Ricostruzione per l’Umbria è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dell’intervento “Riparazione e ripristino dell’edificio comunale Palazzo Nobili, Residenza per Anziani” ed è stato concesso al Comune di Cerreto di Spoleto il contributo per un importo totale di € 162.300,00;
-	che con D.D. n. 213 del 31/10/2017, integrata con D.D. n. 70 del 21/04/2018, è stato incaricato l’Ing. Junior Valentino Ergasti per la progettazione e direzione lavori e coordinamento sicurezza dell'intervento “Riparazione dell'edificio comunale denominato Palazzo Nobili”;
-	che con D.D. n. 192 del 01/10/2018 è stato preso atto ed approvato che per l’esecuzione degli incarichi disposti con D.D. n. 213/2017 e n. 70/2018, il professionista incaricato, ing. Junior Ergasti Valentino, ha costituto, con rogito notaio Massimo Donati rep. 3016 del 01/08/2018, il raggruppamento con i seguenti professionisti: Arch. Marco Cintioli, Ing. Simone Martelli, Ing. Alberto Nicoletti;
-	che con delibera di G.C. n. 29 del 19/03/2018 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori per l’importo di € 162.300,00;
-	che con delibera di G.C. nr. 74 del 23/05/2018 è stato approvato l’aggiornamento del progetto esecutivo a firma dell’Ing. Junior Ergasti Valentino e dall’Arch. Marco Cintioli;
-	che con D.D. n. 192 del 01/10/2018 è stata approvata la revisione del progetto esecutivo rimessa in data 26/09/2019 dai progettisti incaricati, in ossequio ai rilievi disposti dall.U.S.R.;
-	che i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta PATELLA S.R.L. (P.IVA 01961670674) con sede in Montorio al Vomano (TE), per l’importo netto di appalto pari a € 107.088,21 oltre IVA come da legge e con la medesima determinazione è stato approvato il quadro economico a seguito dell’appalto come segue:
QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE		IMPORTI (€)	
Importo lavori soggetto a ribasso		        111.738,03 	
costi della sicurezza non soggetti a ribasso		          15.664,15 	
IMPORTO LAVORI		         127.402,18 	
ribasso offerto	18,18%	          20.313,97 	
IMPORTO DI CONTRATTO		         107.088,21 	
Somme a disposizione:		 	
IVA 10%	10,00%	           10.708,82 	
onorario progetto e d.l.	10,95%	           13.950,54 	
contributo previdenziale	4,00%	                558,02 	
I.V.A. onorari tecnici	22,00%	             3.191,88 	
saggi stratigrafici		                500,00 	
I.V.A. saggi stratigrafici	22,00%	                110,00 	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	0,80%	             1.019,22 	
imprevisti e arrotondamento		             2.827,93 	
Totale Somme a disposizione		          32.866,42 	
TOTALE		         139.954,63 	
economia a seguito di ribasso	 	          22.345,37 	
TOTALE PROGETTO	 	         162.300,00 	

-	che con la ditta PATELLA S.r.l. è stato stipulato il contratto Rep. 2084 del 17/04/2019;
-	che la spesa per l’intervento in oggetto è imputata al bilancio comunale al Cap. 2669 (Imp. 237/2018) ed il contributo concesso con Decreto n. 418 del 28/11/2018 del Dirigente dell'Ufficio Speciale Ricostruzione per l’Umbria è accertato al bilancio comunale al Cap. 636 (Acc. 223/2018).
Considerato:
-	che in data 17/04/2019, giusto verbale della Direzione Lavori, è stata effettuata la consegna parziale dei lavori per allestimento cantiere e ponteggi, e che in data 27/06/2019 con verbale della D.L. è stata eseguita la consegna totale dei lavori;
-	che la D.L. Ing. J. Ergasti Valentino e Arch. Marco Cintioli in data 18/09/2019 hanno rimesso la contabilità dei lavori condotti dalla ditta esecutrice a tutto il 09/09/2019 relativa al 1° SAL per l'importo al netto del ribasso d’asta di € 88.091,26 con i seguenti allegati:
o	1° SAL
o	Registro di contabilità
o	Sommario registro di contabilità
o	Libretto delle misure
o	Quadro comparativo
-	che il responsabile del procedimento, geom. Pietro Forti, ha rimesso il certificato di pagamento n. 1 in data 18/09/2019 per l'importo di € 87.650,00 al netto della ritenuta infortuni, oltre € 8.765,00 per IVA 10%, per un totale di € 96.415,00.
Visto:
-	che la ditta esecutrice PATELLA S.r.l. ha emesso la fattura n. E32 del 14/10/2019 relativa al 1°SAL per l'importo netto di € 87.650,00 oltre € 8.765,00 per IVA 10% per un totale di € 96.415,00;
-	che nei confronti della ditta suddetta è stato acquisito il DURC on line prot. n. 18660861 del 18/10/2019 con esito regolare e scadenza al 15/02/2020;
-	che la ditta esecutrice per il 1°SAL ha provveduto in data 11/11/2019 prot. 2019113746PG00 alla richiesta del DURC di Congruità ai sensi dell’O.C.S. n. 78/2019, con esito positivo attestato dalla Cassa Edile in data 18/11/2019 prot. 116039;
-	che l'impresa esecutrice ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con la sottoscrizione del contratto di appalto.
Ritenuto:
-	di procedere all’approvazione e liquidazione del 1°SAL;
Visto: 
-	il D.Lgs. n. 165/2001;
-	la Legge n. 241/1990;
-	la Legge regionale n. 8/2011;
-	il D.Lgs. n. 33/2013;
-	il T.U. Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;
-	lo Statuto comunale;
-	il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-	il "Programma Triennale delle Opere Pubbliche e Elenco Annuale" approvato da questo Ente;
-	il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 55/2019;
-	il D.L. n. 189/2016 e s.m.i.;
-	l’O.C.S. n. 37/2017;
-	l’O.C.S. n. 78/2019.

D E T E R M I N A 
1)	Di approvare il 1° SAL relativo ai lavori di “Riparazione e ripristino dell’edificio comunale Palazzo Nobili, Residenza per Anziani” redatto dalla Direzione Lavori Ing. J. Ergasti Valentino e Arch. Marco Cintioli, per l'importo netto di € 88.091,26 con i seguenti allegati:
o	1° SAL
o	Registro di contabilità
o	Sommario registro di contabilità
o	Libretto delle misure
o	Quadro comparativo
2)	Di approvare il certificato di pagamento n. 1 redatto dal responsabile del procedimento geom. Pietro Forti in data 18/09/2019 per l'importo di € 87.650,00 al netto della ritenuta infortuni, oltre € 8.765,00 per IVA 10%, per un totale di € 96.415,00. 
3)	Di liquidare alla ditta PATELLA S.R.L. (P.IVA 01961670674) con sede in Montorio al Vomano (TE), la fattura E32 del 14/10/2019 relativa al 1°SAL per l'importo netto di € 87.650,00 oltre € 8.765,00 per IVA 10% per un totale di € 96.415,00.
4)	Di disporre il pagamento nei confronti della ditta esecutrice suddetta mediante bonifico bancario su conto corrente identificato da IBAN: IT73A0100515300000000005000.
5)	Di liquidare la spesa al Cap. 2669 (Imp. 237/2018) dando atto che il contributo concesso con Decreto n. 418 del 28/11/2018 del Dirigente dell'Ufficio Speciale Ricostruzione per l’Umbria è accertato al bilancio comunale al Cap. 636 (Acc. 223/2018) del B.P. 2019-2021.
6)	Di dare atto che le coordinate identificative dell’appalto sono: CUP: D74E17000550002 - CIG: 7761204C24

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

--------------------------------------------------------------------- 

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 02-12-19 e vi resterà fino al 17-12-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------