COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  249   Del  07-12-18

NUM.REG.GEN.600

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE DI= 
FESE  SPONDALI  DEL  FIUME NERA A VALLE DELLA CON=
FLUENZA  DEL FIUME VIGI A BORGO CERRETO. REVISIONE
PERIZIA DI VARIANTE.
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sette del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
-	che con delibera di G.C. n. 238 del 15/11/2018 è stata approvata la perizia di variante per l’intervento di "Messa in sicurezza delle difese spondali del Fiume Nera a valle della confluenza del Fiume Vigi a Borgo Cerreto" redatto dall'Ufficio tecnico comunale per l'importo complessivo di € 73.015,61 come da seguente quadro economico;
VOCE	 	VARIANTE	
importo lavori soggetto a ribasso		                    51.930,74 	
incidenza mano d'opera soggetta a ribasso	33%	                    27.300,72 	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3,99%	                       3.295,37 	
Importo lavori da computo	 	                     82.526,83 	
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		                        1.014,20 	
Importo a base d'asta	 	                     83.541,03 	
ribasso offerto	39,775%	                    31.514,31 	
Importo netto lavori in appalto	 	                     52.026,72 	
Somme a disposizione della Amministrazione:			
I.V.A. 22% sui lavori	22%	                     11.445,88 	
onorario progetto, direzione lavori e sicurezza	7,90%	                        4.179,44 	
onorario geologo		                        1.300,00 	
onorario naturalista		                             750,00 	
contributo previdenziale spese tecniche (2% e 4%)		                             223,18 	
I.V.A. 22% spese tecniche	22%	                        1.419,58 	
compenso 2% art. 113 D.Lgs 50/2016	2,00%	                        1.670,82 	
Sommano		                    20.988,89 	
TOTALE PROGETTO	 	                     73.015,61 	

CONSIDERATO:
-	che nella perizia di variante era erroneamente stata attribuita un’incidenza della manodopera pari al 33% mentre dalla stima dell’incidenza della manodopera, correttamente rielaborata dal D.L. Pietro Forti in data 07/12/2018, è stato verificato che il costo di questa ammonta a complessivi € 13.112,25 con incidenza pari al 15,696% sull’importo lavori a base d’asta;
-	che, vista la corretta stima dell’incidenza della manodopera, occorre rettificare il quadro economico della variante come appresso:
VOCE		VARIANTE	REVISIONE VARIANTE	
importo lavori soggetto a ribasso		51.930,74	66.119,21	
incidenza mano d'opera soggetta a ribasso		27.300,72	13.112,25	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3,99%	3.295,37	3.295,37	
Importo lavori da computo		82.526,83	82.526,83	
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		1.014,20	1.014,20	
Importo a base d'asta		83.541,03	83.541,03	
ribasso offerto	39,775%	31.514,31	31.514,31	
Importo netto lavori in appalto		52.026,72	52.026,72	
Somme a disposizione della Amministrazione:				
I.V.A. 22% sui lavori	22%	11.445,88	11.445,88	
onorario progetto, direzione lavori e sicurezza	7,90%	4.179,44	4.179,44	
onorario geologo		1.300,00	1.300,00	
onorario naturalista		750,00	750,00	
contributo previdenziale spese tecniche (2% e 4%)		223,18	223,18	
I.V.A. 22% spese tecniche	22%	1.419,58	1.419,58	
compenso 2% art. 113 D.Lgs 50/2016	2,00%	1.670,82	1.670,82	
Sommano		20.988,89	20.988,89	
TOTALE PROGETTO		73.015,61	73.015,61	

-	che al netto delle relative incidenze l’importo contrattuale è ripartito come appresso:
Lavori soggetti a ribasso	                     € 40.227,66 	
Mano d'opera soggetta a ribasso	                        € 7.489,48 	
Oneri sicurezza	                        € 3.295,37 	
Costi sicurezza	                        € 1.014,20 	
NETTO	                     € 52.026,72 	
RITENUTO:
-	di approvare la revisione della variante in corso d’opera;
VISTO:
-	il D.Lgs. n. 50/2016
-	il D.P.R. n. 207/2010
-	il D.M. n. 49/2018
-	la L.R. n. 15/2008
DELIBERA
1.	Di approvare, ad integrazione della perizia di variante approvata con D.D. n. 238 del 15/11/2018, l’elaborato in data 07/12/2018 “Stima Incidenza Manodopera per i lavori di “Messa in sicurezza delle difese spondali danneggiate del Fiume Nera a valle della confluenza con il Fiume Vigi in località Borgo Cerreto”.  
2.	Di approvare la revisione del quadro economico della Perizia di Variante in corso d’opera, approvata con D.D. n. 238 del 15/11/2018, come appresso:
VOCE		VARIANTE	REVISIONE VARIANTE	
importo lavori soggetto a ribasso		51.930,74	66.119,21	
incidenza mano d'opera soggetta a ribasso		27.300,72	13.112,25	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3,99%	3.295,37	3.295,37	
Importo lavori da computo		82.526,83	82.526,83	
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		1.014,20	1.014,20	
Importo a base d'asta		83.541,03	83.541,03	
ribasso offerto	39,775%	31.514,31	31.514,31	
Importo netto lavori in appalto		52.026,72	52.026,72	
Somme a disposizione della Amministrazione:				
I.V.A. 22% sui lavori	22%	11.445,88	11.445,88	
onorario progetto, direzione lavori e sicurezza	7,90%	4.179,44	4.179,44	
onorario geologo		1.300,00	1.300,00	
onorario naturalista		750,00	750,00	
contributo previdenziale spese tecniche (2% e 4%)		223,18	223,18	
I.V.A. 22% spese tecniche	22%	1.419,58	1.419,58	
compenso 2% art. 113 D.Lgs 50/2016	2,00%	1.670,82	1.670,82	
Sommano		20.988,89	20.988,89	
TOTALE PROGETTO		73.015,61	73.015,61	

3.	Di dare atto che la spesa complessiva è imputata al cap. 2503 (imp.102/2016) e accertata al cap. 622 (Acc.51/2016);
4.	Di dare atto che al presente intervento sono attribuite le seguenti coordinate:
-	CUP: D74H15001490002
-	CIG: 75006574F0

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 10-12-18 e vi resterà fino al 25-12-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------