COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  55   Del  13-03-18

NUM.REG.GEN.137

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: EVENTI SISMICI 2016. LAVORI URGENTI E INDIFFERIBI= 
LI  A  SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER
LA  MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO SU VIA
CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE CONTO
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  tredici del mese di marzo nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
-	che con D.D. n. 135 del 04/08/2017 è stato incaricato l'Ing. Ergasti Valentino per lo svolgimento delle incombenze tecniche di redazione del progetto, direzione e coordinamento sicurezza dei lavori per “Opere provvisionali a salvaguardia della pubblica incolumità per la messa in sicurezza del muro di sostegno su Via Circonvallazione del Capoluogo” parzialmente crollato a seguito degli eventi sismici del 2016;
-	che con delibera di G.C. n. 87 del 05/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori suddetti, redatto dal professionista incaricato, per l'importo di € 13.803,98 di cui € 10.088,47 per lavori ed € 3.715,51 per somme a disposizione;
-	che con D.D. n. 155 del 09/09/2017 (r.g. n. 400) è stata impegnata la spesa per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per la “Messa in sicurezza del muro di sostegno su Via Circonvallazione del Capoluogo” al Cap. 2706 (Imp. 168) del B.P. 2017-2019 il cui importo sarà accertato a rendicontazione al Cap. 664 (Acc. 49) del B.P. 2017-2019;
-	che con D.D. n. 174 del 22/09/2017 sono stati affidati alla ditta Fr.lli Nicolucci S.n.c. (P.IVA 02149200541), con sede legale in Via degli Archi n. 22 – 06041 Cerreto di Spoleto (PG), i lavori di cui trattasi per l'importo di € 9.538,29 per lavori, al netto del ribasso offerto del 6,0%, e € 918,87 per oneri e costi della sicurezza;
-	che il RUP Geom. Pietro Forti ha sottoscritto con la ditta appaltatrice il Foglio di Patti e Condizioni in data 24/10/2017;
-	che il Direttore dei Lavori Ing. Valentino Ergasti con verbale in data 04/12/2017 ha proceduto alla consegna dei lavori in oggetto;
-	che il medesimo ha certificato l’ultimazione dei lavori in data 12/01/2018;

VERIFICATO:
-	che il D.L. Ing. Valentino Ergasti ha rimesso il Conto Finale dell'opera  con i seguenti allegati: 
•	Relazione sul conto finale 
•	Certificato di regolare esecuzione del 15/01/2018
•	Registro di contabilità
•	Sommario registro di contabilità
•	Libretto delle misure
•	Stato avanzamento lavori finale  
•	Certificato di pagamento 
•	Elaborati grafici stato finale 
•	Documentazione fotografica finale

-	che dagli atti del conto finale risulta un credito a vafore dell'impresa esecutrice pari a € 9.519,19;
-	il RUP, geom. Pietro Forti, ha redatto la relazione acclarante i rapporti tra Comune e Regione in data 06/03/2018, dalla quale risulta il seguente quadro economico a consuntivo:
CONTO FINALE	FINALE	
Importo lavori soggetto a ribasso	              9.116,09 	
importo lavori per la sicurezza non soggetti a ribasso	                 950,07 	
Importo a base d'asta	             10.066,16 	
ribasso d'asta 6%	                 546,97 	
IMPORTO NETTO EDI LAVORI	               9.519,19 	
Somme a disposizione:		
I.V.A. sui lavori 	                  951,92 	
spese tecniche	               1.258,27 	
contributo INARCASSA	                    50,33 	
I.V.A. spese tecniche	                  287,89 	
Totale somme a disposizione	               2.548,41 	
TOTALE PROGETTO	             12.067,61 	

VISTO:
-	che l'impresa appaltatrice Fr.lli Nicolucci S.n.c. (P.IVA 02149200541) ha rimesso la fattura n. 01/PA del 08/03/2018 per l'importo di € 9.519,19 oltre IVA 10% pari a € 951,92 per un totale di € 10.471,11;
-	che nei confronti della ditta appaltatrice è stato acquisito il DURC on line prot. n. 10847523 del 08/03/2018; 
-	che è stato acquisito il certificato di congruità della manodopera prot. n. 016699/GC del 02/03/2018 con esito regolare; 
-	che l'impresa esecutrice ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
-	che l'Ing. Ergasti Valentino (P.IVA 03068600547), a saldo per la progettazione e direzione dei lavori, ha rimesso la fattura n. 01/PA del 22/02/2018 per l’onorario di € 1.258,27 oltre contributo previdenziale 4% pari a € 50,33 per un totale imponibile di € 1.308,60 oltre IVA 22% pari a € 287,89 per un totale di € 1.596,49; 
-	che nei confronti del professionista suddetto è stato acquisito il documento di regolarità contributiva presso la cassa previdenziale di appartenenza prot. n.0171417 del 20/02/2018;
-	che il medesimo ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
-	che il direttore lavori nella Relazione sul conto finale del 15/01/2018 ha certificato il ripristino della piena transitabilità sulla strada comunale Via Circonvallazione;

RITENUTO:
-	di approvare il conto finale;
-	di provvedere alle liquidazioni; 

D E T E R M I N A 

1)	Di approvare il conto finale e con esso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Opere provvisionali a salvaguardia della pubblica incolumità per la messa in sicurezza del muro di sostegno su Via Circonvallazione del Capoluogo” rimesso dal Direttore dei lavori Ing. Valentino Ergasti per un importo netto dei lavori di € 9.519,19;
2)	Di approvare la relazione acclarante in data 06/03/2018 dalla quale risulta il seguente quadro economico a consuntivo:
CONTO FINALE	FINALE	
Importo lavori soggetto a ribasso	              9.116,09 	
importo lavori per la sicurezza non soggetto a ribasso	                 950,07 	
importo a base d'asta	             10.066,16 	
ribasso d'asta 	                 546,97 	
IMPORTO DI CONTRATTO	               9.519,19 	
Somme a disposizione:		
I.V.A. sui lavori 	                  951,92 	
spese tecniche	               1.258,27 	
contributo INARCASSA	                    50,33 	
I.V.A. spese tecniche	                  287,89 	
Totale somme a disposizione	               2.548,41 	
TOTALE PROGETTO	             12.067,61 	

3)	Di liquidare a saldo dei lavori eseguiti alla ditta Fr.lli Nicolucci S.n.c. (P.IVA 02149200541) con sede in Cerreto di Spoleto (PG), la fattura n. 01/PA del 08/03/2018 per l'importo di € 9.519,19 oltre IVA 10% pari a € 951,92 per un totale di € 10.471,11 mediante bonifico bancario su conto corrente identificato dal codice IBAN: IT 30P057 0438 6700 0000 7002 277. 
4)	Di liquidare all'Ing. Valentino Ergasti (C.F. RGSVNT79L31I921U – P.IVA 03068600547), a saldo per la progettazione e direzione dei lavori, la fattura n.1/PA del 22/02/2018 per l’onorario di € 1.258,27 oltre contributo previdenziale 4% pari a € 50,33 per un totale imponibile di € 1.308,60 oltre IVA 22% pari a € 287,89 per un totale di € 1.596,49 mediante bonifico bancario su conto corrente identificato da IBAN: IT42 B057 0421 8010 0000 7002 446.
5)	Di liquidare la spesa complessiva di € 12.067,61 di cui al presente atto al Cap. 2706 (Imp. 168) G.R. 2017 che verrà introitata al Cap. 664 (Acc. 49) G.R. 2017.
6)	Di richiedere alla Regione Umbria - Centro Operativo Regionale di Protezione Civile, l’approvazione degli atti di rendiconto e l’erogazione del relativo importo al Comune, ai sensi e per gli effetti di cui alla Circolare CDPC n. 72035/2016 e alla D.D. Regione Umbria n. 1839/2017 e s.m.i..
7)	Di dare atto che è stata ripristinata la transitabilità a doppio senso sulla strada comunale su Via Circonvallazione del Capoluogo.
8)	Di dare atto che l’intervento ha le seguenti coordinate:
   - CUP: D79J17000470002
   - CIG: Z941F8AD0A

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 19-03-18 e vi resterà fino al 03-04-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------