COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  145   Del  22-08-19

NUM.REG.GEN.440

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: "LAVORI  DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI PROTEZIONE 
CIVILE  DI FORCATURA". APPROVAZIONE PERIZIA DI VA=
RIANTE.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventidue del mese di agosto nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
-	che il Comune di Cerreto di Spoleto è proprietario del complesso immobiliare sito in località Forcatura distinto al catasto al foglio nr. 22 particella nr. 505, con destinazione urbanistica di “Zona di Protezione Civile”; 
-	che, a seguito degli eventi sismici del 2016, la “Società Associazioni Generali Spa” e la “Fondazione Generali onlus” di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno destinato al Comune di Cerreto di Spoleto il finanziamento proveniente da donazioni liberali per un importo complessivo di € 300.000,00 per la realizzazione del Centro di Protezione Civile di Forcatura”; 
-	che con D.D. nr. 26 del 05/02/2018 è stato incaricato l’arch. Piero Rosi di Perugia per la progettazione dell’opera; 
-	che con delibera di G.C. n. 99 del 22/07/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori redatto dall’arch. Piero Rosi per l’importo di € 300.000,00 di cui € 201.803,33 per lavori e € 98.196,67 per somme a disposizione;
-	che con lo stesso atto è stata dichiarata di pubblica utilità l’esecuzione dell’opera ed è stata approvato il piano particellare di esproprio;
-	che con delibera di G.C. n. 99 del 22/07/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori redatto dall’arch. Piero Rosi per l’importo di € 300.000,00 di cui € 201.803,33 per lavori e € 98.196,67 per somme a disposizione;
-	che con D.D. n. 147 (R.G. 392) del 07/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo e la determina a contrarre con il seguente Quadro economico:
PROGETTO ESECUTIVO		IMPORTI	
Importo lavori soggetto a ribasso		182.752,39 	
oneri per la sicurezza soggetti a ribasso		5.353,20 	
Importo lavori da computo		188.105,59 	
costi per la sicurezza da computo		13.697,74 	
Importo lavori a base d'asta		201.803,33 	
Somme a disposizione:			
imprevisti		7.803,81 	
I.V.A. lavori	10%	20.180,33 	
spese tecniche	11,95%	24.115,50 	
contributo spese tecniche	4%	964,62 	
I.V.A. spese tecniche	22%	5.517,63 	
collaudi e verifiche		2.200,00 	
contributo spese tecniche	4%	88,00 	
I.V.A. spese tecniche	22%	503,36 	
relazione geologica	0,80%	1.614,43 	
contributo prev. Relazione geologica	2%	32,29 	
I.V.A relazione geologica	22%	362,28 	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016		1.614,43 	
acquisizione terreni		32.000,00 	
spese amministrative		1.200,00 	
Somme a disposizione:		98.196,67 	
IMPORTO TOTALE		300.000,00 	

-	che la spesa di cui sopra è imputata al capitolo n. 2668 (imp. 331/2017) e accertata al capitolo n. 545 (acc. 171/2017);
-	che con D.D. n. 240 del 15/11/2018 (RG 573) i lavori sono stati affidati alla ditta Serena Costruzioni Generali s.r.l. per l’importo di € 143.264,87 di cui € 13.697,74 per costi sulla sicurezza e € 129.567,13 per lavori al netto dell’offerto ribasso del 31,12%;
-	che con la ditta sopra citata è stato stipulato il contratto rep. 2081 del 14/01/2019;
PRESO ATTO:
-	che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nell’avviso di manifestazione di interesse relativo alla procedura di gara di appalto nonché all’art. 37, comma 11, del capitolato Speciale di Appalto, è stato chiaramente esplicitato che: 
“la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto principale, senza alterarne la natura, per lavorazioni integrative e di completamento appresso specificate:
o	realizzazione cordolo in c.a. per recinzione e parziale modifica del tracciato recinzione
o	opere di miglioramento paesaggistico (rinverdimento scarpate, impianto irrigazione)
o	miglioramento e completamento impianti e finiture
o	completamento pavimentazioni di asfalto
o	servizi igienici prefabbricato in legno
Tali lavorazioni, per un importo massimo pari a € 60.000, saranno computate a misura sulla base dell’elenco dei prezzi unitari di progetto al netto del ribasso di gara.
Non sono previste clausole di revisione e di adeguamento dei prezzi.”

CONSIDERATO:
-	Che in corso d’opera si è ravvisata la necessità di apportare delle modifiche alle previsioni progettuali in linea con le finalità progettuali ed agli indirizzi disposti in sede di gara di appalto, come appresso specificato:
-	Viene integrata la pavimentazione con mattonelle drenanti presso l’area destinata all’accoglienza in fase di prima emergenza (tende roulotte e camper);
-	Si deve realizzare di un cordolo in cls per la recinzione metallica;
-	Si deve integrare la pavimentazione di asfalto sulla strada di ingresso;
-	Si deve realizzarne un nuovo cancello sulla recinzione;
-	Si completano e si migliorano gli interventi nella struttura logistica e multifunzionale mediante sostituzione dei pannelli di copertura, realizzazione bagno e rampa per disabili, pavimento in monocottura;
-	Si completano le sistemazioni esterne;
-	Si prevede la spesa per l’allestimento della sala logistica;
VISTO:
-	Che per lo scopo, la direzione dei lavori, condotta dall’arch. Piero Rosi, ha predisposto la Perizia di variante in corso d’opera con il seguente quadro economico:
VARIANTE	IMPORTI	
Importo lavori soggetto a ribasso	              247.119,26 	
oneri per la sicurezza soggetti a ribasso	                    7.238,64 	
Importo lavori da computo	              254.357,90 	
costi per la sicurezza da computo	                 12.573,75 	
Importo lavori a base d'asta	              266.931,65 	
ribasso di gara 31,12%	                79.156,18 	
IMPORTO DI CONTRATTO	              187.775,47 	
Somme a disposizione:		
I.V.A. 10% sui lavori 	                 18.777,55 	
spese tecniche 11,95%	                 31.898,33 	
contributo spese tecniche 4%	                    1.275,93 	
I.V.A. spese tecniche 22%	                    7.298,34 	
collaudi e verifiche	                    1.500,00 	
contributo spese tecniche 4%	                            60,00 	
I.V.A. spese tecniche 22%	                         343,20 	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	                    4.698,00 	
acquisizione terreni	                 33.465,78 	
spese amministrative	                         225,00 	
forniture per sala logistica	                 12.682,40 	
Somme a disposizione:	             112.224,53 	
IMPORTO TOTALE	              300.000,00 	

CONSIDERATO:
-	Che, rispetto all’importo originario di contratto, vi è una maggiore spesa di € 44.510,60 che è inferiore al limite di € 60.000,00 stabilito nella documentazione della gara di appalto e nel capitolato speciale di appalto;
-	Che la variante presenta il profilo di legittimità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 atteso che le lavorazioni di cui alla perizia di variante:
o	Sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili e non superano il limite di spesa previsto;
o	Non alterano la natura del contratto originario;
o	Non sono attinenti a clausole di revisione dei prezzi;
RITENUTO:
-	Di approvare la variante in corso d’opera e dare corso alla esecuzione dei lavori;
VISTO:
-	il D.Lgs. n. 50/2016
-	il D.P.R. n. 207/2010
-	il D.M. n. 49/2018
DELIBERA
1.	Di approvare la Perizia di Variante in corso d’opera in data “Luglio 2019” dei lavori di “Realizzazione del Centro di Protezione Civile in località Forcatura” redatta dall’arch. Piero Rosi, con il seguente quadro economico:
VARIANTE	IMPORTI	
Importo lavori soggetto a ribasso	              247.119,26 	
oneri per la sicurezza soggetti a ribasso	                    7.238,64 	
Importo lavori da computo	              254.357,90 	
costi per la sicurezza da computo	                 12.573,75 	
Importo lavori a base d'asta	              266.931,65 	
ribasso di gara 31,12%	                79.156,18 	
IMPORTO DI CONTRATTO	              187.775,47 	
Somme a disposizione:		
I.V.A. 10% sui lavori 	                 18.777,55 	
spese tecniche 11,95%	                 31.898,33 	
contributo spese tecniche 4%	                    1.275,93 	
I.V.A. spese tecniche 22%	                    7.298,34 	
collaudi e verifiche	                    1.500,00 	
contributo spese tecniche 4%	                            60,00 	
I.V.A. spese tecniche 22%	                         343,20 	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	                    4.698,00 	
acquisizione terreni	                 33.465,78 	
spese amministrative	                         225,00 	
forniture per sala logistica	                 12.682,40 	
Somme a disposizione:	             112.224,53 	
IMPORTO TOTALE	              300.000,00 	

2.	Di dare atto che i maggiori e diversi lavori saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice Serena Costruzioni Generali S.r.l. agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario nonché dell’atto di sottomissione in data 22/08/2019 il quale, con la presente, si approva per formare parte integrante e sostanziale del presente atto ancorchè non allegato;
3.	Di dare atto che la spesa complessiva è imputata al capitolo n. 2668 (imp. 331/2017) e accertata al capitolo n. 545 (acc. 171/2017);
4.	Di dare atto che al presente intervento sono attribuite le seguenti coordinate:
-	CUP: D78C18000000007
-	CIG: 7593365307

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 27-08-19 e vi resterà fino al 11-09-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------