COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  103   Del  18-06-19

NUM.REG.GEN.318

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: LAVORI  DI  "MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO IMPIANTO 
SPORTIVO  DI BORGO CERRETO". APPROVAZIONE VARIANTE
N. 1 IN CORSO D'OPERA.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
-	che con delibera di G.C. n. 98 del 26/10/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione e miglioramento impianto sportivo di Borgo Cerreto” redatto dal geom. Cocciarelli Riccardo per l’importo di € 150.000,00 di cui € 104.332,63 per lavori e € 45.667,37 per somme a disposizione;
-	che con D.D. n. 181 del 20/09/2018 è stata approvata la revisione del progetto esecutivo per l’importo di € 150.000,00 di cui € 105.311,03 per lavori e € 44.688,97 per somme a disposizione;
-	che la spesa è coperta dal mutuo di scopo acceso con l'Istituto del Credito Sportivo (mutuo di € 150.000,00 – pratica n. 4428300) e la stessa è imputata al Bilancio comunale al Cap. 2951 (Imp. 273/2016);
-	che con D.D. dell’Area tecnica n. 239 del 15/11/2018 sono stati affidati i lavori di “Manutenzione e miglioramento impianto sportivo di Borgo Cerreto” alla ditta EDO Costruzioni S.r.l. (P.IVA 02639980602) con sede in Via Baiolardo n. 59 – 03039 Sora (FR), per l’importo di € 71.001,55 al netto del ribasso offerto del 23,786% oltre € 12.150,26 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di appalto di € 83.151,81 oltre IVA come da legge, come da seguente quadro economico:
VOCI DI COSTO	%	REVISIONE PROGETTO - D.D. n. 181/SETT. 2018	POST AFFIDAMENTO	
Importo lavori da computo		                 93.160,77 	           93.160,77 	
costi per la sicurezza da computo		                 12.150,26 	          12.150,26 	
IMPORTO A BASE D'ASTA		               105.311,03 	         105.311,03 	
ribasso di gara	23,786%		          22.159,22 	
IMPORTO DI CONTRATTO		               105.311,03 	           83.151,81 	
Somme a disposizione della amministrazione:				
Lavori in economia		                   6.000,00 	             6.000,00 	
Imprevisti	5,00%	                   5.265,55 	             5.265,55 	
I.V.A. 10% sui lavori	10,00%	                 11.131,10 	             8.315,18 	
Spese tecniche progetto, d.l. e sicurezza	14,00%	                 15.583,54 	           15.583,54 	
contributo spese tecniche	4,00%	                      623,34 	                623,40 	
I.V.A. spese tecniche	22,00%	                   3.565,51 	             3.565,51 	
Collaudo statico		                      900,00 	                900,00 	
contributo spese tecniche collaudo statico	4,00%	                        36,00 	                  36,00 	
I.V.A. spese tecniche collaudo statico	22,00%	                      205,92 	                205,92 	
compenso ex art. 93 D.Lgs. 163/2006	0,80%	                      842,49 	                842,49 	
Spese amministrative		                      535,51 	                535,31 	
Totale somme a disposizione		                 44.688,97 	          41.872,90 	
Importo totale		               150.000,00 	         125.024,71 	
somma disponibile		-                        0,00 	          24.975,29 	
TOTALE PROGETTO	 	               150.000,00 	         150.000,00 	

-	che con la ditta suddetta è stato stipulato il contratto REP n. 2078 del 12/12/2018;
-	che i lavori sono stati consegnati in data 14/01/2019 giusto verbale del Direttore Lavori;
-	che con D.D. n. 96 del 10/06/2019 è stato approvato il 1°SAL per l'importo netto di € 62.599,03 rimesso dal D.L. Geom. Riccardo Cocciarelli con la contabilità dei lavori condotti dalla ditta esecutrice a tutto il 15/05/2019.
CONSIDERATO: 
-	che durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune lavorazioni aggiuntive rispetto al progetto esecutivo, il quale viene in toto confermato, pertanto il Direttore dei Lavori ha rappresentato la necessità di apportare una perizia di variante in corso d’opera per far fronte a tali eventi imprevisti e imprevedibili emersi durante l’esecuzione dei lavori e al tempo stesso per rendere l’intervento più armonico e risolutivo;
-	che le lavorazioni in variante riguardano in sintesi:
o	variazione di quantità di lavoro sia in relazione al rinterro per il consolidamento della scarpata dove è realizzata la gradinata, sia in relazione alle opere di smantellamento della impermeabilizzazione del tetto degli spogliatoi;
o	revisione completa del manto di copertura per sostituire le tegole danneggiate;
o	altre opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell’edificio spogliatoi che del campo sportivo e delle recinzioni;
-	che pertanto il D.L. geom. Cocciarelli Riccardo, su autorizzazione del R.u.p., ha prodotto la perizia di variante in corso d’opera n. 1 che presenta il seguente quadro economico:
VOCI DI COSTO	%	VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1 	
Importo lavori da computo		                111.102,42 	
costi per la sicurezza da computo		                  10.624,46 	
IMPORTO A BASE D'ASTA		                121.726,88 	
ribasso di gara	23,786%	                  26.426,82 	
IMPORTO DI CONTRATTO		                  95.300,06 	
Somme a disposizione della amministrazione:			
Lavori in economia		                  20.375,00 	
Imprevisti	5,00%		
I.V.A. 10% sui lavori	10,00%	                  11.567,51 	
Spese tecniche progetto, d.l. e sicurezza	14,00%	                  16.150,00 	
contributo spese tecniche	4,00%	                       646,00 	
I.V.A. spese tecniche	22,00%	                    3.695,12 	
Collaudo statico		                       900,00 	
contributo spese tecniche collaudo statico	4,00%	                         36,00 	
I.V.A. spese tecniche collaudo statico	22,00%	                       205,92 	
compenso ex art. 93 D.Lgs. 163/2006	0,80%	                       842,49 	
Spese amministrative		                       281,91 	
Totale somme a disposizione		                  54.699,95 	
Importo totale		                150.000,00 	
somma disponibile		-                          0,00 	
TOTALE PROGETTO	 	                150.000,00 	

-	che la perizia di variante comporta un aumento dell’importo netto dei lavori di € 12.148,25 con un incremento dell’importo contrattuale del 15%; 
-	che la perizia di variante di cui sopra presenta i presupposti di legittimità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dato atto che: 
o	le modifiche non alterano la natura generale del contratto ed era espressamente previsto nei documenti di appalto l’eventualità di incremento delle lavorazioni fino all’importo di € 30.000,00;
o	la necessità delle modifiche è determinata da cause impreviste e imprevedibili non contemplabili nella fase progettuale.
CONSIDERATO ALTRESì: 
-	che con la perizia di variante n. 1 vengono utilizzate le ulteriori economie a seguito della gara di appalto insieme alla voce imprevisti per eseguire lavorazioni in economia volte al rifacimento dell’impianto di irrigazione del campo di calcio e alla sostituzione della pompa di alimentazione dell’impianto medesimo, per l’importo complessivo previsto di € 20.375,00;
-	che tali lavori in economia saranno affidati dall’Ente con nuova procedura di appalto.
RITENUTO: 
-	di approvare la perizia di variante n. 1 ai lavori di “Manutenzione e miglioramento impianto sportivo di Borgo Cerreto”.
VISTO:
-	l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

D E T E R M I N A
1)	Di approvare la perizia di variante n. 1 in corso d’opera dei lavori di “Manutenzione e miglioramento impianto sportivo di Borgo Cerreto” redatta dal geom. Cocciarelli Riccardo con il seguente quadro economico:
VOCI DI COSTO	%	VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1 	
Importo lavori da computo		                111.102,42 	
costi per la sicurezza da computo		                  10.624,46 	
IMPORTO A BASE D'ASTA		                121.726,88 	
ribasso di gara	23,786%	                  26.426,82 	
IMPORTO DI CONTRATTO		                  95.300,06 	
Somme a disposizione della amministrazione:			
Lavori in economia		                  20.375,00 	
Imprevisti	5,00%		
I.V.A. 10% sui lavori	10,00%	                  11.567,51 	
Spese tecniche progetto, d.l. e sicurezza	14,00%	                  16.150,00 	
contributo spese tecniche	4,00%	                       646,00 	
I.V.A. spese tecniche	22,00%	                    3.695,12 	
Collaudo statico		                       900,00 	
contributo spese tecniche collaudo statico	4,00%	                         36,00 	
I.V.A. spese tecniche collaudo statico	22,00%	                       205,92 	
compenso ex art. 93 D.Lgs. 163/2006	0,80%	                       842,49 	
Spese amministrative		                       281,91 	
Totale somme a disposizione		                  54.699,95 	
Importo totale		                150.000,00 	
somma disponibile		-                          0,00 	
TOTALE PROGETTO	 	                150.000,00 	

2)	Di dare atto che i maggiori e diversi lavori sono eseguiti dalla ditta appaltatrice EDO Costruzioni S.r.l. agli stessi patti e condizioni di cui al contratto REP n. 2078 del 12/12/2018 ed all’atto di sottomissione facente parte della perizia di variante che con la presente si approva.
3)	Di dare mandato all’ufficio tecnico per procedere all’affidamento dei lavori in economia contemplati nella perizia di variante n. 1 i quali lavori saranno oggetto di nuova procedura di appalto formalizzata con successivo atto. 
4)	Di dare atto che la spesa è coperta dal mutuo di scopo acceso con l'Istituto del Credito Sportivo (mutuo di € 150.000,00 – pratica n. 4428300) e la stessa è imputata al Bilancio comunale al Cap. 2951 (Imp. 273/2016).
5)	Di dare atto che l’intervento ha le seguenti coordinate: 
   - CUP: D74H15000510005 
   - CIG: 76301739F1  

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 24-06-19 e vi resterà fino al 09-07-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------