COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  215   Del  20-10-18

NUM.REG.GEN.518

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016  OPERE PROVVISIONALI A SALVA= 
GUARDIA  DELLA  PUBBLICA  INCOLUMITA'   ZONA ROSSA
TRIPONZO  - LAVORI IN QUOTA (CAT. OS21) - VARIANTE
2
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese di ottobre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
-	che a seguito delle forti scosse di terremoto del 24 Agosto, 26 e 30 Ottobre 2016, sono state fortemente danneggiate diverse località del territorio comunale, tra cui il nucleo abitato di Triponzo;
-	che con Ordinanze sindacali n. 103 del 31/10/2016 e n. 140 del 29/11/2016 è stata disposta la chiusura al transito e dichiarata la “zona rossa” nell’abitato di Triponzo a causa del rischio crollo della Torre Civica e dei fabbricati siti in Via Del Castello distinti al Catasto al foglio n. 35 particelle n. 36, 42, 43 e 49;
-	che con Ordinanza sindacale n. 45 del 27/03/2017 è stata interdetta la libera circolazione nel tratto di via Santa Maria a Triponzo a causa del rischio di crollo di massi dal versante foglio n. 35 particelle n. 276 e 29/parte;
-	che con verbale in data 19/05/2017, i lavori per la esecuzione delle “Opere provvisionali a salvaguardia della pubblica incolumità e tutela beni culturali. Ripristino della transitabilità in località Triponzo” sono stati dichiarati di "Somma Urgenza" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-	che con D.D. n. 10 del 20/01/2017 è stato incaricato lo studio Tecnico ABACO Soc. Coop. per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza;
-	che con delibera di G.C. n. 28 del 29/03/2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto  dallo studio  ABACO Soc. Coop. Per l’importo di € 56.057,96 di cui € 42.387,87 per lavori e € 13.670,09 per somme a disposizione;
-	che con D.D. n. 145 del 31/08/2017 i lavori sono stati affidati alla Ditta Giovannoli Alberto di Cascia per l'importo di € 34.499,92 di cui € 31.583,39 per lavori del ribasso del 19,985% e € 2.916,03 per costi sulla sicurezza;
-	che con la ditta Giovannoli Alberto è stato stipulato il Foglio di Patti e Condizioni in data 15/09/2017;
VISTO:
-	che con D.D. n. 253 del 27/12/2017, è stata approvata la perizia di variante n. 1 dei lavori con il seguente quadro economico:

VARIANTE 1	%	Lavori edili       (Cat. OG1-OG2)	%	Lavori in quota (cat. OS21)	TOTALE Q.E.	
Importo lavori soggetto a ribasso		23.014,73		16.748,78	39.763,51	
oneri per la sicurezza sulle spese generali		1.121,99		811,22	1.933,21	
importo lavori da computo		24.136,72		17.560,00	41.696,72	
costi per la sicurezza		997,00			997,00	
importo a base d'asta		25.133,72		17.560,00	42.693,72	
ribasso d'asta 	19,985%	4.599,49	0,00%	-	4.599,49	
IMPORTO NETTO DEI LAVORI		20.534,23		17.560,00	38.094,23	
Somme a disposizione:					-	
I.V.A. 10% sui lavori 	10%	2.053,42	10%	1.756,00	3.809,42	
imprevisti e arrot.nto	5%	1.256,69	5%	878,00	2.134,69	
onorario progetto e direzione lavori 12,50%	12,50%	3.141,72	12,50%	2.195,00	5.336,72	
IVA 22% spese tecniche	22%	691,18	22%	482,90	1.174,08	
incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06	2%	502,67	2%	351,20	853,87	
disgaggio e rilievo in quota				1.160,93	1.160,93	
IVA disgaggio e rilievo in quota			10%	116,09	116,09	
Totale somme a disposizione		7.645,68		6.940,12	14.585,80	
TOTALE PROGETTO	 	           28.179,90 	            -   	           24.500,12 	           52.680,02 	
economia a seguito ribasso					            3.377,93 	
TOTALE  SPESA AMMISSIBILE	           56.057,96 	

-	che a seguito della perizia di variante di cui sopra, con l’impresa appaltatrice Giovannoli Alberto, è stato stipulato l’atto di sottomissione con il quale è stato preso atto che la medesima esegue i soli lavori edili in Cat. OG1 e OG2 per l’importo netto di cui € 20.534,23;
-	che con D.D. n. 22 del 02/02/2018 è stata affidata alla Ditta Vertical Game-Work di Orte l’esecuzione dei lavori in quota rientranti nella Categoria OS21 per l'importo di € 15.382,66 di cui € 14.571,44 per lavori del ribasso del 13,00% e € 811,22 per costi sulla sicurezza;
-	che, con la ditta Vertical Game-Work è stato stipulato il Foglio di Patti e Condizioni in data 13/02/2018;
ACCERTATO:
-	che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di fare fronte a circostanze impreviste ed imprevedibili quali: “necessità di eseguire il ripristino della continuità muraria del tratto di mura a dx della parte sommitale della Torre che è risultata incoerente con rischio di crollo della muratura in pietra” per cui, il direttore dei lavori, ha prodotto la perizia di Variante n. 2 datata “Maggio 2018”;
-	che l’esecuzione di tali lavorazioni, che riguarda le sole lavorazioni in quota rientranti nella Cat. OS21 affidate alla ditta  Vertical Game-Work, sono state autorizzata in regime di urgenza con l’atto di sottomissione del 02/05/2048 stante l’esigenza di garantire al più presto l’ultimazione dei lavori a salvaguardia della pubblica incolumità;
-	che i lavori relativi alla messa in sicurezza della Torre, eseguiti in quota dalla ditta Vertical Game-Work, sono conclusi in data 04/05/2018;
-	che in data 09/05/2018 è stata accertata l’ultimazione dei “lavori strutturali” condotti dalla ditta Giovannoli e Vertical Game-Work e, con ordinanza sindacale n. 31 del 17/05/2018 è stata disposta la revoca della Zona Rossa di Triponzo ed il rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie evacuate per inagibilità indotta;
VISTO:
-	Che la suddetta perizia di Variante n. 2,la quale riguarda i soli lavori in quota (Cat. OS21) eseguiti dalla ditta Vercal Game-Work, presenta il seguente quadro economico:

VARIANTE 2	%	Lavori in quota (cat. OS21) - VARIANTE 1	Lavori in quota (cat. OS21) POST-AFFIDAMENTO	Lavori in quota (cat. OS21) VARIANTE 2	
Importo lavori soggetto a ribasso	 	            16.748,78 	             16.748,78 	             21.127,43 	
oneri per la sicurezza sulle spese generali	 	                 811,22 	                  811,22 	               1.252,57 	
importo lavori da computo	 	             17.560,00 	             17.560,00 	             22.380,00 	
costi per la sicurezza	 	 	 	 	
importo a base d'asta	 	             17.560,00 	             17.560,00 	             22.380,00 	
ribasso d'asta 	13,00%	              2.177,34 	               2.177,34 	               2.746,57 	
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	 	             15.382,66 	             15.382,66 	             19.633,43 	
Somme a disposizione:	 	 	 	 	
I.V.A. 10% sui lavori 	10%	               1.538,27 	               1.538,27 	               1.963,34 	
imprevisti e arrot.nto	5%	                  878,00 	                  878,00 	 	
onorario progetto e direzione lavori 12,50%	12,50%	               2.195,00 	               2.195,00 	               2.797,50 	
IVA 22% spese tecniche	22%	                  482,90 	                  482,90 	                  615,45 	
incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06	2%	                  351,20 	                  351,20 	                  447,60 	
disgaggio e rilievo in quota	 	               1.160,93 	               1.160,93 	               1.160,93 	
IVA disgaggio e rilievo in quota	10%	                  116,09 	                  116,09 	                  116,09 	
Totale somme a disposizione	 	              6.722,39 	              6.722,39 	              7.100,92 	
TOTALE INTERVENTO OS21	            -   	             22.105,05 	             22.105,05 	             26.734,35 	

-	Che, complessivamente, il quadro economico dell’opera generale, risulta aggiornato come appresso:
VOCE 	 % 	 PROGETTO 	 Post Affidamento (lavori edili) 	 VARIANTE 1 	 VARIANTE 2 	
 Importo lavori soggetto a ribasso 	 	          39.471,84 	          39.471,84 	          39.763,51 	          44.142,16 	
 oneri per la sicurezza sulle spese generali 	 	            1.919,03 	            1.919,03 	            1.933,21 	            2.374,56 	
 importo lavori da computo 	 	           41.390,87 	           41.390,87 	           41.696,72 	           46.516,72 	
 costi per la sicurezza 	 	                997,00 	                997,00 	                997,00 	                997,00 	
 importo a base d'asta 	 	           42.387,87 	           42.387,87 	           42.693,72 	           47.513,72 	
 ribassi d'asta  	 	 	            7.888,45 	            4.599,49 	            7.346,06 	
 IMPORTO NETTO DEI LAVORI 	 	           42.387,87 	           34.499,42 	           38.094,23 	           40.167,66 	
 Somme a disposizione: 	 	 	 	                       -   	                       -   	
 I.V.A. 10% sui lavori  	10,00%	             4.238,79 	             3.449,94 	             3.809,42 	             4.016,77 	
 imprevisti e arrot.nto 	5,00%	             2.119,39 	             2.119,39 	             2.134,69 	                       -   	
 onorario progetto e direzione lavori 12,50% 	12,50%	             5.298,48 	             5.298,48 	             5.336,72 	             5.939,22 	
 IVA 22% spese tecniche 	22,00%	             1.165,67 	             1.165,67 	             1.174,08 	             1.306,63 	
 incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 	2,00%	                847,76 	                847,76 	                853,87 	                950,27 	
 disgaggio e rilievo in quota 	 	 	             1.160,93 	             1.160,93 	             1.160,93 	
 IVA disgaggio e rilievo in quota 	 	 	                116,09 	                116,09 	                116,09 	
 Totale somme a disposizione 	 	          13.670,09 	          14.158,27 	          14.585,80 	          13.489,91 	
 TOTALE PROGETTO 	 	           56.057,96 	           48.657,69 	           52.680,02 	           53.657,57 	
 economia a seguito ribasso 	 	 	            7.400,27 	            3.377,93 	            2.400,39 	
 TOTALE SPESA AMMISSIBILE 	 	           56.057,96 	           56.057,96 	           56.057,96 	           56.057,96 	

-	Che, come sopra specificato, la perizia di variante n. 2 è relativa ai soli “lavori in quota – Cat. OS21” eseguiti dalla ditta Vertical Game-Work il cui importo netto, da € 15.382,66, passa a € 19.633,43 con un incremento di € 4.250,78 pari al 28%;
RITENUTO:
- di approvare comunque la perizia di variante n. 2;

VISTO: 
- il D.Lgs. n. 50/2016
- il DPR n. 207/2010
- il D.L. n. 189/2016

D E T E R M I N A 

1)	Di approvare la perizia di variante n° 2 dei lavori per la realizzazione di "Opere provvisionali finalizzate al recupero della transitabilità in località  Triponzo interdetta a seguito del sisma del 2016" redatta dal direttore dei lavori arch. Luciano Elisei in data: Maggio 2018, con il seguente quadro economico: 

VOCE 	 % 	VARIANTE 2	
 Importo lavori soggetto a ribasso 	 	          44.142,16 	
 oneri per la sicurezza sulle spese generali 	 	            2.374,56 	
 importo lavori da computo 	 	           46.516,72 	
 costi per la sicurezza 	 	                997,00 	
 importo a base d'asta 	 	           47.513,72 	
 ribassI d'asta  	 	            7.346,06 	
 IMPORTO NETTO DEI LAVORI 	 	           40.167,66 	
 Somme a disposizione: 	 	                       -   	
 I.V.A. 10% sui lavori  	10,00%	             4.016,77 	
 imprevisti e arrot.nto 	5,00%	                       -   	
 onorario progetto e direzione lavori 12,50% 	12,50%	             5.939,22 	
 IVA 22% spese tecniche 	22,00%	             1.306,63 	
 incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 	2,00%	                950,27 	
 disgaggio e rilievo in quota 	 	             1.160,93 	
 IVA disgaggio e rilievo in quota 	 	                116,09 	
 Totale somme a disposizione 	 	          13.489,91 	
 TOTALE PROGETTO 	 	           53.657,57 	
 economia a seguito ribasso 	 	            2.400,39 	
 TOTALE SPESA AMMISSIBILE 	 	           56.057,96 	

2)	Di dare atto che la presente perizia è relativa ai soli “lavori in quota – cat. OS21” e, i relativi lavori, sono stati eseguiti dalla ditta affidataria Vertical Game-Work agli stessi patti e condizioni di cui al Foglio di Patti e Condizioni in data 13/02/2018 e all’atto di sottomissione in data 02/05/2018 che con la presente si approva;
3)	Di dare atto che l’opera è finanziata  dalla Regione Umbria ai sensi del D.L. 189/2016, con le modalità di cui alla Circolare C.D.P.C. n. 72035/2016 e D.D. n. 1839/2017 giusto nulla-osta nr. 22 del 26/07/2017 disposto dal Servizio Regionale di Protezione Civile e che la relativa spesa è imputata al cap. 2706 – Imp. 134/2017;
4)	Di dare atto che l’intervento ha le seguenti coordinate: 
-	CUP: D71B17000000002
-	CIG: ZCF1DFD00D

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 24-10-18 e vi resterà fino al 08-11-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------