COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  158   Del  21-08-18

NUM.REG.GEN.411

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: (CUP. D71B1700000000 - CIG. ZCF1DFD00D ) EMERGENZA 
SISMA  2016    OPERE  PROVVISIONALI A SALVAGUARDIA
DELLA  PUBBLICA  INCOLUMITA'  ZONA ROSSA TRIPONZO
1° S.A.L. LAVORI IN QUOTA (Cat.OS21) .
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventuno del mese di agosto nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
-	che a seguito delle forti scosse di terremoto del 24 Agosto, 26 e 30 Ottobre 2016, sono state fortemente danneggiate diverse località del territorio comunale, tra cui il nucleo abitato di Triponzo;
-	che con Ordinanze sindacali n. 103 del 31/10/2016 e n. 140 del 29/11/2016 è stata disposta la chiusura al transito e dichiarata la “zona rossa” nell’abitato di Triponzo a causa del rischio crollo della Torre Civica e dei fabbricati siti in Via Del Castello distinti al Catasto al foglio n. 35 particelle n. 36, 42, 43 e 49;
-	che con Ordinanza sindacale n. 45 del 27/03/2017 è stata interdetta la libera circolazione nel tratto di via Santa Maria a Triponzo a causa del rischio di crollo di massi dal versante foglio n. 35 particelle n. 276 e 29/parte;
-	che con verbale in data 19/05/2017, i lavori per la esecuzione delle “Opere provvisionali a salvaguardia della pubblica incolumità e tutela beni culturali. Ripristino della transitabilità in località Triponzo” sono stati dichiarati di "Somma Urgenza" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-	che con D.D. n. 10 del 20/01/2017 è stato incaricato lo studio Tecnico ABACO Soc. Coop. per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza;
-	che con delibera di G.C. n. 28 del 29/03/2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo studio ABACO Soc. Coop. Per l’importo di € 56.057,96 di cui € 42.387,87 per lavori e € 13.670,09 per somme a disposizione;
-	che con D.D. n. 88 (R.g. 216) del 22/05/2017 è stata impegnata la spesa per la realizzazione dell’intervento in progetto al Cap. 2706 (Imp. 134) e accertata al Cap. 664 (Acc.2017);
-	che con D.D. n. 145 del 31/08/2017 i lavori sono stati affidati alla Ditta Giovannoli Alberto di Cascia per l'importo di € 34.499,92 di cui € 31.583,39 per lavori del ribasso del 19,985% e € 2.916,03 per costi sulla sicurezza;
-	che con la ditta Giovannoli Alberto è stato stipulato il Foglio di Patti e Condizioni in data 15/09/2017;
-	che per garantire la sicurezza degli operatori in cantiere dall’eventuale crollo di pietre instabili, è stato necessario effettuare un rilievo preliminare sulla sommità della torre;
-	che pertanto con D.D. n. 179 del 29/09/2017 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 163 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla ditta Vertical Game Work Solution di Orte l’esecuzione del rilievo in quota e disgaggio delle parti pericolanti (Cat. OS21) per l’importo di € 1.160,93 oltre € 116,09 per IVA 10% per un totale di € 1.277,02; 
VISTO:
-	che con D.D. n. 253 del 27/12/2017, è stata approvata la perizia di variante n. 1 dei lavori con il seguente quadro economico:
VARIANTE 1	%	Lavori edili
(Cat. OG1-OG2)	%	Lavori in quota
(cat. OS21)	TOTALE Q.E.	
Importo lavori soggetto a ribasso		          23.014,73 		          16.748,78 	          39.763,51 	
oneri per la sicurezza sulle spese generali		            1.121,99 		               811,22 	            1.933,21 	
importo lavori da computo		           24.136,72 		           17.560,00 	           41.696,72 	
costi per la sicurezza		                997,00 			               997,00 	
importo a base d'asta		           25.133,72 		           17.560,00 	           42.693,72 	
ribasso d'asta 	19,985%	            4.599,49 	0%	                       -   	            4.599,49 	
IMPORTO NETTO DEI LAVORI		           20.534,23 		           17.560,00 	           38.094,23 	
Somme a disposizione:					                       -   	
I.V.A. 10% sui lavori 	10%	             2.053,42 	10%	             1.756,00 	             3.809,42 	
imprevisti e arrot.nto	5%	             1.256,69 	5%	                878,00 	             2.134,69 	
onorario progetto e direzione lavori 12,50%	12,50%	             3.141,72 	12,50%	             2.195,00 	             5.336,72 	
IVA 22% spese tecniche	22%	                691,18 	22%	                482,90 	             1.174,08 	
incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06	2%	                502,67 	2%	                351,20 	                853,87 	
disgaggio e rilievo in quota				             1.160,93 	             1.160,93 	
IVA disgaggio e rilievo in quota			10%	                116,09 	                116,09 	
Totale somme a disposizione		            7.645,68 		            6.940,12 	          14.585,80 	
TOTALE PROGETTO		           28.179,90 	            -   	           24.500,12 	           52.680,02 	

-	che a seguito della perizia di variante di cui sopra, con l’impresa appaltatrice Giovannoli Alberto, è stato stipulato l’atto di sottomissione con il quale è stato preso atto che la medesima esegue i soli lavori edili in Cat. OG1 e OG2 per l’importo netto di cui € 20.534,23;
-	che con D.D. n. 22 del 02/02/2018 è stata affidata alla Ditta Vertical Game Work Solution di Orte l’esecuzione dei lavori in quota, previsti dalla perizia di variante, rientranti nella Categoria OS21 per l'importo di € 15.382,66 di cui € 14.571,44 per lavori al netto del ribasso del 13,00% e € 811,22 per costi sulla sicurezza;
-	che, con la ditta Vertical Game-Work è stato stipulato il Foglio di Patti e Condizioni in data 13/02/2018;
-	che, con la D.D. 22/2018 sopra citata, è stato aggiornato il quadro economico dell’appalto come segue:
VOCE	%	Lavori edili
(Cat. OG1-OG2)	%	Lavori in quota (cat. OS21)	TOTALE Q.E.	
Importo lavori soggetto a ribasso	 	          23.014,73 	 	          16.748,78 	          39.763,51 	
oneri per la sicurezza sulle spese generali	 	            1.121,99 	 	               811,22 	            1.933,21 	
importo lavori da computo	 	           24.136,72 	 	           17.560,00 	           41.696,72 	
costi per la sicurezza	 	                997,00 	 	 	               997,00 	
importo a base d'asta	 	           25.133,72 	 	           17.560,00 	           42.693,72 	
ribasso d'asta 	19,985%	            4.599,49 	13,00%	            2.177,34 	            6.776,84 	
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	 	           20.534,23 	 	           15.382,66 	           35.916,88 	
Somme a disposizione:	 	 	 	 	                       -   	
I.V.A. 10% sui lavori 	10%	             2.053,42 	10%	             1.538,27 	             3.591,69 	
imprevisti e arrot.nto	5%	             1.256,69 	5%	                878,00 	             2.134,69 	
onorario progetto e direzione lavori 12,50%	12,50%	             3.141,72 	12,50%	             2.195,00 	             5.336,72 	
IVA 22% spese tecniche	22%	                691,18 	22%	                482,90 	             1.174,08 	
incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06	2%	                502,67 	2%	                351,20 	                853,87 	
disgaggio e rilievo in quota	 	 	 	             1.160,93 	             1.160,93 	
IVA disgaggio e rilievo in quota	 	 	10%	                116,09 	                116,09 	
Totale somme a disposizione	 	            7.645,68 	 	            6.722,39 	          14.368,06 	
TOTALE PROGETTO	 	           28.179,90 	            -   	           22.105,05 	           50.284,95 	
economia a seguito ribasso					            5.773,01 	
SOMMA SPESA AMMISSIBILE	           56.057,96 	

CONSIDERATO:
-	che il direttore dei lavori, arch. Luciano Elisei, ha rimesso il 1° Stato di Avanzamento per i Lavori in quota (Cat. OS21) eseguiti dalla ditta Vertical Game Work, dal quale risulta un ammontare netto dei lavori pari a € 10.022,40;
-	che il Rup Geom. Pietro Forti, ha rimesso il 1° Certificato di Pagamento dei Lavori in quota (Cat. OS21) dal quale risulta che può essere pagata all’impresa esecutrice la somma di € 9.972,29 oltre I.V.A. 10% per un totale di € 10.969,52;
-	che a fronte del credito maturato, l’impresa Vertical Game Work Solution ha rimesso la fattura n. 2/PA del 10/08/2018 di € 9.972,29 oltre I.V.A. 10% pari a € 997,23 per un totale di € 10.969,52;
-	che a fronte del credito maturato per l’esecuzione del rilievo e disgaggio sulla sommità della torre, l’impresa Vertical Game Work ha rimesso la fattura n. 3/PA del 10/08/2018 di € 1.160,93 oltre I.V.A. 10% pari a 116,09 per un totale di € 1.277,02;
-	che nei confronti della medesima è stato acquisito il DURC prot. n. 12590131 del 27/07/2018 con esito positivo;
-	che nei confronti della medesima non necessita acquisire il “Certificato di Congruità” in quanto trattasi di impresa senza dipendenti iscritti al contratto collettivo dei lavoratori edili;
-	che la medesima ditta ha rilasciato la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTO:
-	di approvare il 1°SAL e liquidare il relativo credito;
-	di liquidare il credito maturato dalla ditta per l’esecuzione del rilievo e disgaggio;

VISTO: 
- il D.Lgs. n. 50/2016
- il DPR n. 207/2010
- il D.L. n. 189/2016

D E T E R M I N A 

1.	Di approvare il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori in Quota (Cat. OS21) ricompresi nell’opera di “Sisma 2016 - Opere provvisionali a salvaguardia della pubblica incolumità – ripristino transitabilità in località Triponzo” rimesso dal direttore dei lavori arch. Luciano Elisei dello Studio Abaco per l’importo di € 10.022,40;
2.	Di approvare il relativo Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal responsabile del procedimento geom. Pietro Forti in data 08/08/2018, dal quale risulta che può pagarsi all’impresa esecutrice la somma di € 9.972,29 oltre I.V.A. 10% per un totale di € 10.969,52;
3.	Di liquidare il 1°SAL all’impresa “Vertical Game-Work Solution di Alessandro Quadriglia” con sede in Orte (VT) P.IVA 01994690566 e C.F. QDRLSN68L30L117J di cui alla fattura n. 2/PA del 10/08/2018 per l’imponibile di € 9.972,29 oltre € 997,2 per I.V.A. 10% per un totale di € 10.969,52 disponendo il pagamento mediante bonifico bancario su conto corrente identificato dal IBAN: IT46Q0311173221000000004386.
4.	Di liquidare il credito maturato dall’impresa “Vertical Game-Work Solution di Alessandro Quadriglia” con sede in Orte (VT), P.IVA 01994690566 e C.F. QDRLSN68L30L117J, per l’esecuzione delle operazioni preliminari di rilievo e disgaggio, di cui alla fattura n. 3/PA del 10/08/2018 per l’imponibile di € 1.160,93 oltre € 116,09 per I.V.A. 10% per un totale di € 1.277,02 disponendo il pagamento mediante bonifico bancario su conto corrente identificato dal IBAN: IT46Q0311173221000000004386.
5.	Di liquidare la spesa nascente dal presente atto al Cap. 2706 (Imp. 134/2017) il cui importo è accertato al Cap. 664 (Acc. 5/2017);
6.	Di dare atto che l’intervento ha le seguenti coordinate: 
•	CUP: D71B17000000002
•	CIG: ZCF1DFD00D

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 22-08-18 e vi resterà fino al 06-09-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------