COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  228   Del  05-12-19

NUM.REG.GEN.648

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: "LAVORI  DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI PROTEZIONE 
CIVILE  DI FORCATURA". APPROVAZIONE PERIZIA DI VA=
RIANTE N. 2.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  cinque del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
-	che il Comune di Cerreto di Spoleto è proprietario del complesso immobiliare sito in località Forcatura distinto al catasto al foglio nr. 22 particella nr. 505, con destinazione urbanistica di “Zona di Protezione Civile”; 
-	che, a seguito degli eventi sismici del 2016, la “Società Associazioni Generali Spa” e la “Fondazione Generali onlus” di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno destinato al Comune di Cerreto di Spoleto il finanziamento proveniente da donazioni liberali per un importo complessivo di € 300.000,00 per la realizzazione del Centro di Protezione Civile di Forcatura”; 
-	che con D.D. nr. 26 del 05/02/2018 è stato incaricato l’arch. Piero Rosi di Perugia per la progettazione dell’opera; 
-	che con delibera di G.C. n. 99 del 22/07/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori redatto dall’arch. Piero Rosi per l’importo di € 300.000,00 di cui € 201.803,33 per lavori e € 98.196,67 per somme a disposizione;
-	che con lo stesso atto è stata dichiarata di pubblica utilità l’esecuzione dell’opera ed è stata approvato il piano particellare di esproprio;
-	che con delibera di G.C. n. 99 del 22/07/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori redatto dall’arch. Piero Rosi per l’importo di € 300.000,00 di cui € 201.803,33 per lavori e € 98.196,67 per somme a disposizione;
-	che con D.D. n. 147 (R.G. 392) del 07/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per l’importo di € 300.000,00 di cui € 201.803,33 per lavori e € 98.196,67 per somme a disposizione;
-	che la spesa di cui sopra è imputata al capitolo n. 2668 (imp. 331/2017) e accertata al capitolo n. 545 (acc. 171/2017);
-	che con D.D. n. 240 del 15/11/2018 (RG 573) i lavori sono stati affidati alla ditta Serena Costruzioni Generali s.r.l. per l’importo di € 143.264,87 di cui € 13.697,74 per costi sulla sicurezza e € 129.567,13 per lavori al netto dell’offerto ribasso del 31,12%;
-	che con la ditta sopra citata è stato stipulato il contratto rep. 2081 del 14/01/2019;
-	che con D.D. n. 145 del 22/08/2019 è stata approvata la perizia di variante n. 1 con il seguente quadro economico:

VARIANTE 1	Importi	
Importo lavori soggetto a ribasso	              247.119,26 	
oneri per la sicurezza soggetti a ribasso	                    7.238,64 	
Importo lavori da computo	              254.357,90 	
costi per la sicurezza da computo	                 12.573,75 	
Importo lavori a base d'asta	              266.931,65 	
ribasso di gara 31.12%	                79.156,18 	
IMPORTO DI CONTRATTO	              187.775,47 	
Somme a disposizione:		
I.V.A. lavori 10%	                 18.777,55 	
spese tecniche 11,95%	                 31.898,33 	
contributo spese tecniche 4%	                    1.275,93 	
I.V.A. spese tecniche 22%	                    7.298,34 	
collaudi e verifiche	                    1.500,00 	
contributo spese tecniche 4%	                         60,00 	
I.V.A. spese tecniche 22%	                        343,20 	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	                    4.698,00 	
acquisizione terreni	                 33.465,78 	
spese amministrative	                        225,00 	
Lavori in economia e forniture	                 12.682,40 	
Somme a disposizione:	             112.224,53 	
IMPORTO TOTALE	              300.000,00 	
VISTO:
-	che il direttore dei lavori, arch. Piero Rosi, in data 05/12/2019 ha rimesso gli elaborati della 2/a perizia di variante con la quale propone l’approvazione di alcune modeste variazioni delle quantità progettuali che non comportano aumento dell’importo contrattuale come si evince dal quadro economico che segue:
VARIANTE 2	IMPORTI	
Importo lavori soggetto a ribasso	              247.077,11 	
oneri per la sicurezza soggetti a ribasso	                    7.237,41 	
Importo lavori da computo	              254.314,52 	
costi per la sicurezza da computo	                 12.573,75 	
Importo lavori a base d'asta	              266.888,27 	
ribasso di gara 31,12%	                79.142,68 	
IMPORTO DI CONTRATTO	              187.745,59 	
Somme a disposizione:		
I.V.A. lavori 10%	                 18.774,56 	
spese tecniche  11,95%	                 31.893,15 	
contributo spese tecniche 4%	                    1.275,73 	
I.V.A. spese tecniche 22%	                    7.297,15 	
collaudi e verifiche	                    1.500,00 	
contributo spese tecniche	                           60,00 	
I.V.A. spese tecniche	                        343,20 	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	                    4.698,00 	
acquisizione terreni	                 33.465,78 	
spese amministrative	                        225,00 	
Lavori in economia e forniture	                 12.721,85 	
Somme a disposizione:	             112.254,41 	
IMPORTO TOTALE	              300.000,00 	

RITENUTO:
-	Di approvare la variante in corso d’opera e dare corso alla esecuzione dei lavori;
VISTO:
-	il D.Lgs. n. 50/2016
-	il D.P.R. n. 207/2010
-	il D.M. n. 49/2018
DELIBERA
1.	Di approvare la Perizia di Variante n. 2 in data “05/12/2019” dei lavori di “Realizzazione del Centro di Protezione Civile in località Forcatura” redatta dall’arch. Piero Rosi, con il seguente quadro economico:
VARIANTE 2	IMPORTI	
Importo lavori soggetto a ribasso	              247.077,11 	
oneri per la sicurezza soggetti a ribasso	                    7.237,41 	
Importo lavori da computo	              254.314,52 	
costi per la sicurezza da computo	                 12.573,75 	
Importo lavori a base d'asta	              266.888,27 	
ribasso di gara 31,12%	                79.142,68 	
IMPORTO DI CONTRATTO	              187.745,59 	
Somme a disposizione:		
I.V.A. lavori 10%	                 18.774,56 	
spese tecniche  11,95%	                 31.893,15 	
contributo spese tecniche 4%	                    1.275,73 	
I.V.A. spese tecniche 22%	                    7.297,15 	
collaudi e verifiche	                    1.500,00 	
contributo spese tecniche	                           60,00 	
I.V.A. spese tecniche	                        343,20 	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	                    4.698,00 	
acquisizione terreni	                 33.465,78 	
spese amministrative	                        225,00 	
Lavori in economia e forniture	                 12.721,85 	
Somme a disposizione:	             112.254,41 	
IMPORTO TOTALE	              300.000,00 	

2.	Di dare atto che i diversi lavori saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice Serena Costruzioni Generali S.r.l. agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario nonché dell’atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi in data 05/12/2019 il quale, con la presente, si approva per formare parte integrante e sostanziale del presente atto ancorchè non allegato;
3.	Di dare atto che la spesa complessiva è imputata al capitolo n. 2668 (imp. 331/2017) e accertata al capitolo n. 545 (acc. 171/2017);
4.	Di dare atto che al presente intervento sono attribuite le seguenti coordinate:
-	CUP: D78C18000000007
-	CIG: 7593365307

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

--------------------------------------------------------------------- 

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 10-12-19 e vi resterà fino al 25-12-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------