COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  117   Del  06-07-17

NUM.REG.GEN.293

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: EVENTI  SISMICI  DEL  2016 - LAVORI URGENTI PER LA 
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA INTERNA IN LOCALI=
TA'  ROCCHETTA.  VARIANTE DI PROGETTO - IMPEGNO DI
SPESA.
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sei del mese di luglio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
- che con Deliberazione G.C. n. 106 del 12/12/2016 è stato approvato il progetto dei lavori urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, volti al ripristino della viabilità sulla strada del Pacino in località Rocchetta, redatto dall'Ing. Sergio Salvatori per l'importo di € 56.000,00 di cui € 37.473,20 per lavori e € 18.526,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con Determinazione n. 170 del 31/12/2016 è stata impegnata la somma di € 56.000,00 al Cap. 2706 del B.P. 2016 destinata all’esecuzione dei lavori di cui sopra; 

VISTO: 
- che con Deliberazione G.C. n. 21 del 23/03/2017 è stata approvata la Perizia di Variante in corso d’opera per i lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza della strada interna in località Rocchetta, redatta dal D.L. dall'Ing. Sergio Salvatori, per l'importo di € 71.787,65 di cui € 57.037,70 per lavori e € 14.749,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con nota prot. n. 266728 del 23/12/2016, la Regione Umbria ha autorizzato la spesa per l'esecuzione dei lavori in oggetto a valere sui fondi di cui alla OPCM n. 388/2016;

CONSIDERATO:
- che rispetto alla somma originariamente prevista ed impegnata di € 56.000,00 la variante approvata comporta una spesa aggiuntiva pari a € 15.787,65 per la quale si farà ricorso ai fondi di scopo di cui alla OPCM n. 388/2016;

- che necessita pertanto accertare al Cap. 664 B.P. 2017-2019 la somma di € 15.787,65;

- che necessita, altresì, formalizzare l’impegno di spesa relativo al costo della suddetta variante;

D E T E R M I N A 

1) Di accertare al Cap. 664 del B.P. 2017-2019 la spesa del progetto in variante. 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 15.787,65 al Cap. 2706 del B.P. 2017-2019 destinata all'esecuzione dei lavori in variante per la messa in sicurezza della strada interna in località Rocchetta;

3) Di dare atto che il presente intervento ha le seguenti coordinate: 
   - CUP: D79J16001210002
   - CIG: 6903153610

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 13-07-17 e vi resterà fino al 28-07-017 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------