COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  253   Del  27-12-17

NUM.REG.GEN.628

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: SISMA  2016.  OPERE  PROVVISIONALI  A SALVAGUARDIA 
DELLA  PUBBLICA INCOLUMITA' E TUTELA BENI CULTURA=
LI.  RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' IN LOCALITA'
TRIPONZO - PERIZIA DI VARIANTE.
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
-	che a seguito delle forti scosse di terremoto del 24 Agosto, 26 e 30 Ottobre 2016, sono state fortemente danneggiate diverse località del territorio comunale, tra cui il nucleo abitato di Triponzo;
-	che con Ordinanze sindacali n. 103 del 31/10/2016 e n. 140 del 29/11/2016 è stata disposta la chiusura al transito e dichiarata la “zona rossa” nell’abitato di Triponzo a causa del rischio crollo della Torre Civica e dei fabbricati siti in Via Del Castello distinti al Catasto al foglio n. 35 particelle n. 36, 42, 43 e 49;
-	che con Ordinanza sindacale n. 45 del 27/03/2017 è stata interdetta la libera circolazione nel tratto di via Santa Maria a Triponzo a causa del rischio di crollo di massi dal versante foglio n. 35 particelle n. 276 e 29/parte;
-	che con verbale in data 19/05/2017, i lavori per la esecuzione delle “Opere provvisionali a salvaguardia della pubblica incolumità e tutela beni culturali. Ripristino della transitabilità in località Triponzo” sono stati dichiarati di "Somma Urgenza" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto:
-	che con D.D. n. 10 del 20/01/2017 è stato incaricato lo studio Tecnico ABACO Soc. Coop. per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza;
-	che con delibera di G.C. n. 28 del 29/03/2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto  dallo studio  ABACO Soc. Coop. con il seguente quadro economico:
VOCE	PROGETTO	
Importo lavori soggetto a ribasso	          39.471,84 	
oneri per la sicurezza sulle spese generali	            1.919,03 	
importo lavori da computo	           41.390,87 	
costi per la sicurezza	                997,00 	
importo a base d'asta	           42.387,87 	
Somme a disposizione:		
I.V.A. 10% sui lavori 	             4.238,79 	
imprevisti e arrot.nto	             2.119,39 	
onorario progetto e direzione lavori 12,50%	             5.298,48 	
IVA 22% spese tecniche	             1.165,67 	
incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06	                847,76 	
Totale somme a disposizione	          13.670,09 	
TOTALE PROGETTO	           56.057,96 	

-	che con D.D. n. 145 del 31/08/2017 i laori sono stati affidati alla Ditta Giovannoli Alberto di Cascia per l'importo di € 34.499,92 di cui € 31.583,39 per lavori del ribasso del 19,985% e € 2.916,03 per costi sulla sicurezza;
-	che con la ditta Giovannoli Alberto è stato stipulato il Foglio di Patti e Condizioni in data 15/09/2017;

CONSIDERATO:
-  che in sede di cantierizzazione  dell'intervento di messa in sicurezza della Torre Civica è emersa  una condizione statica  non ottimale del muro di sostegno  del pianoro dove si sarebbe dovuto piazzare la piattaforma elevatrice autocarrata per cui, considerato il notevole peso dell'automezzo, si è ritenuto  che non vi fossero le condizioni  per il suo impiego in sicurezza; 
- che è stata anche esclusa la possibilità  di raggiungere la cima della torre mediante  il montaggio di un ponteggio data la presenza di pietre instabili in sommità  che pregiudicherebbero l'incolumità  delle maestranze sottostanti;

- che, al fine di eseguire la rimozione delle pietre  pericolanti ed avere una informazione puntuale e circostanziata circa l'effettivo stato della torre, con D.D. n. 179 del 29/09/2017, è stata incaricata la specializzata ditta Vertical Game Work Soluzioni per l'importo di € 1.160,09;

- che a seguito del resoconto dela suddetta ispezione, si è evidenziata  la necessità di modificare la tipologia degli interventi da eseguire per la messa in sicurezza della torre i quali, per l'appunto,  verranno eseguiti operando dall'alto da parte di personale specializzato nei  lavori in quota; 

VISTO: 
-che, pertanto, il direttore dei lavori arch. Luciano Elisei  dello studio ABACO in data 22/12/2017, ha rimesso la perizia di variante che prevede di realizzare l'intervento  di messa in sicurezza della Torre mediante opere provvisionali consistenti  nella fasciatura esterna con rete metallica paramassi contenuta alla parete per mezzo di un reticolo di funi opportunamente ancorate;

- che la perizia presenta il seguente quadro economico:

VOCE	%	Lavori edili       (Cat. OG1-OG2)	%	Lavori in quota (cat. OS21)	TOTALE Q.E.	
Importo lavori soggetto a ribasso		          23.014,73 		          16.748,78 	          39.763,51 	
oneri per la sicurezza sulle spese generali		            1.121,99 		               811,22 	            1.933,21 	
importo lavori da computo		           24.136,72 		           17.560,00 	           41.696,72 	
costi per la sicurezza		                997,00 			               997,00 	
importo a base d'asta		           25.133,72 		           17.560,00 	           42.693,72 	
ribasso d'asta 	19,985%	            4.599,49 	0%	                       -   	            4.599,49 	
IMPORTO NETTO DEI LAVORI		           20.534,23 		           17.560,00 	           38.094,23 	
Somme a disposizione:					                       -   	
I.V.A. 10% sui lavori 	10%	             2.053,42 	10%	             1.756,00 	             3.809,42 	
imprevisti e arrot.nto	5%	             1.256,69 	5%	                878,00 	             2.134,69 	
onorario progetto e direzione lavori 12,50%	12,50%	             3.141,72 	12,50%	             2.195,00 	             5.336,72 	
IVA 22% spese tecniche	22%	                691,18 	22%	                482,90 	             1.174,08 	
incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06	2%	                502,67 	2%	                351,20 	                853,87 	
disgaggio e rilievo in quota				             1.160,93 	             1.160,93 	
IVA disgaggio e rilievo in quota			10%	                116,09 	                116,09 	
Totale somme a disposizione		            7.645,68 		            6.940,12 	          14.585,80 	
TOTALE PROGETTO		           28.179,90 	            -   	           24.500,12 	           52.680,02 	

CONSIDERATO: 
- che i "lavori edili" - (Cat. OG1 e OG2), sono eseguiti dalla ditta Giovannoli Alberto in esecuzione dell'affidamento disposto con D.D. n. 145 del 31/08/2017 per cui l'importo  a suo carico passano da  € 34.499,92 a € 20.534,23 e saranno relativi alla messa in sicurezza  dell'edificio  pericolante in via del Castello della scarpata in Via Santa Caterina ed alcune riparazioni alla base della torre; 
- che i "lavori in quota" - (Cat. OS21), afferenti alla esecuzione delle opere provvisionali per la messa in sicurezza della Torre Civica, saranno oggetto di un nuovo affidamento a ditta specializzata;
- che  per lo scopo, in considerazione  della natura e della specificità  della lavorazione  si ritiene di attivare una procedura di affidamento  diretto con la specializzata ditta Vertical Game Work Soluzione che ha già condotto le attività di ispezione e disgaggio; 

VISTO: 
- che il raffronto tra i quadri economici di progetto,  psot-affidamento e variante, comporta i seguenti risultati: 

VOCE	%	PROGETTO	Post Affidamento lavori edili	VARIANTE	
Importo lavori soggetto a ribasso		              39.471,84 	          39.471,84 	          39.763,51 	
oneri per la sicurezza sulle spese generali		                1.919,03 	            1.919,03 	            1.933,21 	
importo lavori da computo		               41.390,87 	           41.390,87 	           41.696,72 	
costi per la sicurezza		                    997,00 	                997,00 	                997,00 	
importo a base d'asta		               42.387,87 	           42.387,87 	           42.693,72 	
ribasso d'asta 	19,985%		            7.888,45 	            4.599,49 	
IMPORTO NETTO DEI LAVORI		               42.387,87 	           34.499,42 	           38.094,23 	
Somme a disposizione:				                       -   	
I.V.A. 10% sui lavori 	10,000%	                 4.238,79 	             3.449,94 	             3.809,42 	
imprevisti e arrot.nto	5,000%	                 2.119,39 	             2.119,39 	             2.134,69 	
onorario progetto e direzione lavori 12,50%	12,500%	                 5.298,48 	             5.298,48 	             5.336,72 	
IVA 22% spese tecniche	22,000%	                 1.165,67 	             1.165,67 	             1.174,08 	
incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06	2,000%	                    847,76 	                847,76 	                853,87 	
disgaggio e rilievo in quota			             1.160,93 	             1.160,93 	
IVA disgaggio e rilievo in quota			                116,09 	                116,09 	
Totale somme a disposizione		              13.670,09 	          14.158,27 	          14.585,80 	
TOTALE PROGETTO		               56.057,96 	           48.657,69 	           52.680,02 	
economia a seguito ribasso			            7.400,27 	            3.377,93 	
SOMMA SPESA AMMISSIBILE		               56.057,96 	           56.057,96 	           56.057,96 	

RITENUTO:
- di approvare  la perizia di variante;

VISTO: 
- il D.Lgs. n. 50/2016
- il DPR n. 207/2010
- il D.L. n. 189/2016

D E T E R M I N A 

1) Di approvare la perizia di variante dei lavori per la realizzazione di "Opere provvisionali finalizzate al recupero della transitabilità in località  Triponzo interdetta a seguito del sisma del 2016" redatta dal direttore dei lavori arch. Luciano Elisei con il seguente quadro economico: 

VOCE	%	PROGETTO	Post Affidamento lavori edili	VARIANTE	
Importo lavori soggetto a ribasso		              39.471,84 	          39.471,84 	          39.763,51 	
oneri per la sicurezza sulle spese generali		                1.919,03 	            1.919,03 	            1.933,21 	
importo lavori da computo		               41.390,87 	           41.390,87 	           41.696,72 	
costi per la sicurezza		                    997,00 	                997,00 	                997,00 	
importo a base d'asta		               42.387,87 	           42.387,87 	           42.693,72 	
ribasso d'asta 	19,985%		            7.888,45 	            4.599,49 	
IMPORTO NETTO DEI LAVORI		               42.387,87 	           34.499,42 	           38.094,23 	
Somme a disposizione:				                       -   	
I.V.A. 10% sui lavori 	10,000%	                 4.238,79 	             3.449,94 	             3.809,42 	
imprevisti e arrot.nto	5,000%	                 2.119,39 	             2.119,39 	             2.134,69 	
onorario progetto e direzione lavori 12,50%	12,500%	                 5.298,48 	             5.298,48 	             5.336,72 	
IVA 22% spese tecniche	22,000%	                 1.165,67 	             1.165,67 	             1.174,08 	
incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06	2,000%	                    847,76 	                847,76 	                853,87 	
disgaggio e rilievo in quota			             1.160,93 	             1.160,93 	
IVA disgaggio e rilievo in quota			                116,09 	                116,09 	
Totale somme a disposizione		              13.670,09 	          14.158,27 	          14.585,80 	
TOTALE PROGETTO		               56.057,96 	           48.657,69 	           52.680,02 	
economia a seguito ribasso			            7.400,27 	            3.377,93 	
SOMMA SPESA AMMISSIBILE		               56.057,96 	           56.057,96 	           56.057,96 	

2) Di dare atto che la parte delle opere afferenti i "lavori edili - (Cat. OG1 e OG2)" sono eseguiti dala ditta Giovannoli Alberto in forza della Determina di affidamento nr. 145 del 31/08/2017 agli stessi patti e condizioni di cui al Foglio di patti e condizioni in data 15/09/2017 ed all'atto di sottomissione in data 11/12/2017 che con la presente si approva; 

3) Di dare atto che la parte di opere afferente i "lavori in quota - (Cat. OS21)" saranno oggetto di nuovo affidamento a ditta specializzata per cui, avendo il presente atto valore di determina a contrarre, si stabiliscono le seguenti  condizioni:
•	procedura di affidamento:  incarico diretto  ai sensi  dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura negoziata con la ditta Vertical Game Work Soluzion con sede in Orte (VT); 
•	criterio di relazione: prezzo più basso mediante ribasso unico sull'elenco prezzi di progetto;
•	principali condizioni contrattuali: 
     - base d'asta  € 17.560,00 di cui € 811,22 per oneri sulla sicurezza; 
     - tempo di esecuzione: gg. 30 dalla consegna 
     - penale per ritardo  nella esecuzione: €/gg.100,00 
     - pagamento: a saldo previa collaudazione dei lavori

4) Di dare atto che la spesa complessiva è finanziata  dalla Regione Umbria ai sensi del D.L. 189/2016, con le modalità di cui alla Circolare C.D.P.C. n. 72035/2016 e D.D. n. 1839/2017 e giusto nulla - osta disposto dal Servizio Regionale di Protezione Civile nr. 22 del 26/07/2017;

5) Di dare atto che l’intervento ha le seguenti coordinate: 
   - CUP: D71B17000000002
   - CIG: ZCF1DFD00D

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 29-01-18 e vi resterà fino al 13-02-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------