COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  226   Del  11-11-17

NUM.REG.GEN.540

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: EVENTI  SISMICI  2016.    MESSA IN SICUREZZA DELLA 
CHIESA DELLA MADONNA DEL VERDE A ROCCHETTA AFFIDA=
MENTO PRESTAZIONI SPECIALISTICA.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciassette il giorno  undici del mese di novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
-	che a seguito degli eventi sismici del 2016 la Chiesa della Madonna del Verde sita in località a Rocchetta distinta al Catasto al foglio n. 60 particella n. A) ha subito gravi danni tanto che è compromessa la pubblica incolumità all’interno dell’edificio e nello spazio pubblico antistante la facciata;
-	che con Ordinanza sindacale n. 28 del 25/08/2016, a seguito dei danni causati dal terremoto del 24/08/2016 è stata dichiarata l’inagibilità dello stabile;
-	che è urgente e indifferibile attuare l’intervento di messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità e a tutela del bene di interesse culturale;
-	che con D.D. n. 26 09/02/2017 è stato incaricato l’Ing. Sergio Salvatori per lo svolgimento delle incombenze tecniche di redazione del progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza;
-	che con delibera di G.C. n. 24 del 23/03/2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza della Chiesa della Madonna del Verde a Rocchetta" redatto dall'Ing. Sergio Salvatori per l'importo di € 46.652,82 di cui € 35.912,71 per lavori e restanti per somme a disposizione; 
-	che a seguito dei rilievi operati dalla Soprintendenza dell'Umbria, sono state apportate delle modifiche al progetto approvato per cui, il tecnico incaricato, Ing. Sergio Salvatori, ha rimesso la revisione progettuale al 21/07/2017;
-	che con delibera di G.C. n. 88 del 05/09/2017 è stata approvata la suddetta revisione al progetto esecutivo dei lavori di "Messa in Sicurezza della Chiesa Madonna del Verde a Rocchetta" redatta dall'Ing. Sergio Salvatori e Arch. Elisabetta Antonini, per l'importo complessivo di € 39.527,89;
-	che il progetto prevede l’esecuzione di opere di messa in sicurezza mediante interventi di ancoraggio delle murature lesionate, cuci e scuci, cerchiature, sistemazione coppi del manto di copertura, oltre le lavorazioni connesse;
-	che con D.D. n. 166 del 20/09/2017 sono stati affidati i lavori per la "Messa in sicurezza della Chiesa della Madonna del Verde a Rocchetta" alla ditta Spada Avariste di Poggiodomo;
-	che con nota prot. n. 4121 del 12/10/2017 è stata comunicata l'attivazione dell'intervento e l'inizio lavori alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Umbria, ai sensi della Circolare C.D.P.C. n. 72035/2016 e D.D. Regione Umbria n. 1839/2017; 

VISTO:
- che con D.D. n. 212 del 30/10/2017 è stata affidata l'esecuzione dei saggi stratigrafici alla ditta Coo.BE.C. Soc. Coop. di Spoleto per l'importo di € 609,00 oltre mIVA 22%, per un totale di € 742,98; 

- che a seguito  della suddetta campagna di saggi sono emerse delle superfici decoerate sulla facciata interna della Chiesa ove debbono eseguirsi i lavori; 

- che su indicazione delle Soprintendenza è opportuno eseguire la messa in sicurezza di tali superfici decorate;  

- che per lo scopo è stata interpellata la medesima Soc.COO.BE.C. , la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire l'intervento al prezzo  a corpo di € 1.350,00 oltre IVA 22%; 
 
- che  nei confronti  della suddetta ditta è stata verificata la regolarità  contributiva attraverso l'acquisizione del DURC;  

RITENUTO:
-	di provvedere in merito; 

VISTO:
-	l'art. 36  comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

D E T E R M I N A 

1) Di disporre, nell'ambito della attuazione del progetto dei lavori di "Opere provvisionali a salvaguardia della pubblica incolumità e tutela del patrimonio culturale: Messa in sicurezza della Chiesa della Madonna del Verde a Rocchetta" l'esecuzione dell'intervento di "Messa in sicurezza delle superfici decorate" limitatamente alle zone individuate sulla parete interna a seguito dei saggi stratigrafici; 

2) Di affidare l'esecuzione dell'intervento alla ditta Coo.BE.C. Soc. Coop. (P.IVA 00429300544) di Spoleto, per l'importo di € 1.350,00  oltre IVA 22%, per un totale di € 1.647,00; 

3) Di aggiornare  il quadro economico dell'opera in oggetto come segue: 
 
VOCE	AFFIDAMENTO	
Importo lavori soggetto a ribasso	             23.616,92 	
importo lavori per la sicurezza	               6.851,10 	
importo a base d'asta	              30.468,02 	
ribasso d'asta 	               5.573,59 	
IMPORTO DI CONTRATTO	              24.894,43 	
Somme a disposizione:		
I.V.A. sui lavori 	                2.489,44 	
spese tecniche	                3.808,50 	
contributo INARCASSA	                   152,34 	
I.V.A. spese tecniche	                   871,39 	
esecuzione saggi stratigrafici	                   609,00 	
messa in sicurezza superfici decorate	                1.350,00 	
I.V.A interventi da restauratore	                   430,98 	
imprevisti e arr.nto	                1.180,84 	
Totale somme a disposizione	             10.892,49 	
economia a seguito di ribasso	               3.740,97 	
TOTALE PROGETTO	              39.527,89	

4) Di dare atto che la spesa di cui alla presente pari a complessivi € 1.647,00  è ricompresa nel quadro economico di progetto ed è imputata al Cap. 2706 B.P. 2017-2019 come da impegno di spesa con D.D. n. 153 del 07/09/2017;

5) Di dare atto che l’intervento ha le seguenti coordinate: 
   - CUP: D71B17000010002
   - CIG: 69745279BF

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 13-11-17 e vi resterà fino al 28-11-017 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------