COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  1   Del  08-01-19

NUM.REG.GEN.9

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: EVENTI  SISMICI 2016. OPERE PROVVISIONALI A SALVA= 
GUARDIA  DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' STRADA INTERNA
NOSTOSCE.  APPROVAZIONE CONTO FINALE E LIQUIDAZIO=
NE.
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di gennaio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
-	che a seguito delle forti scosse di terremoto del 24 Agosto, 26 e 30 Ottobre 2016, sono state fortemente danneggiate diverse località del territorio comunale, tra cui il nucleo abitato di Nortosce;
-	che il Responsabile del Servizio Geom. Pietro Forti, in data 24/09/2018 ha redatto relazione tecnica in cui evidenziava lo stato di pericolo per rischio crolli dell’edificio distinto al catasto al foglio nr. 54 particella nr. 208 sub. 1-2-3 e dell’edificio distinto al catasto al foglio nr. 54 particelle nr. 35 e nr. 413, entrambi incombenti sulla strada comunale interna al nucleo abitato di Nortosce;
-	che con Ordinanza Sindacale nr. 48 del 27/09/2018 è stata interdetta la circolazione pedonale e veicolare sulla strada nella mezzeria adiacente l’edificio distinto al catasto al foglio nr. 54 particella nr. 208 sub. 1-2-3; 
-	che con Ordinanza sindacale nr. 49 del 27/09/2018 è stato interdetto l’accesso alla corte privata in congruità al lato Ovest del fabbricato distinto al catasto al foglio nr. 54 particelle nr. 35 e nr. 413 ed è stata chiusa al transito pedonale e veicolare la strada comunale nella mezzeria adiacente l’edificio medesimo; 
-	che con verbale in data 29/09/2018 è stata dichiarata la somma urgenza per l'esecuzione dei lavori urgenti ed indifferibili a salvaguardia della pubblica incolumità per la “Messa in sicurezza di edifici pericolanti incombenti sulla strada interna in località Nortosce”;
-	che il responsabile del Servizio geom. Pietro Forti in data 29/09/2018 ha redatto la perizia giustificativa della spesa per l’esecuzione dell’intervento urgente e indifferibile di cui sopra;
-	che con Delibera di G.C. n. 117 del 10/10/2018 è stata approvata la perizia giustificativa della spesa per l’intervento di cui trattasi, redatta sulla base del Prezzario Unico per il Cratere Centro Italia 2016 di cui all’Ordinanza commissariale n. 58/2018, per l'importo complessivo di € 24.000,00 di cui € 19.360,54 per lavori ed € 4.639,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
-	che la progettazione dell’intervento per “Opere provvisionali per la messa in sicurezza di edifici pericolanti incombenti sulla strada interna in località Nortosce” è stata espletata dall’ufficio tecnico comunale e il Direttore dei Lavori è il Geom. Pietro Forti;
-	che l’esecuzione del progetto è finanziata con i fondi stanziati per la ricostruzione delle aree terremotate ai sensi e con le modalità di cui alla Circolare C.D.P.C. n. 72035 del 22/12/2016 e D.D. Regione Umbria n. 1839 del 27/02/2017;
-	che con D.D. n. 207 del 15/10/2018 sono stati affidati i lavori alla ditta Edilizia 2000 S.r.l. (P.IVA 03913851212) con sede legale in Vallo di Nera (PG), per l'importo di € 16.771,07 di cui € 12.199,07 per lavori al netto del ribasso offerto di 17,51% e € 4.572,00 per oneri e costi della sicurezza, come da quadro economico che segue:
VOCE		AFFIDAMENTO	
Importo lavori soggetto a ribasso		€ 14.788,54	
importo costi e oneri per la sicurezza		€ 4.572,00	
Importo lavori totale		€ 19.360,54	
ribasso d'asta	17,51%	€ 2.589,47	
IMPORTO DI CONTRATTO		€ 16.771,07	
Somme a disposizione:			
I.V.A. sui lavori	10%	€ 1.677,11	
imprevisti e arr.nto		€ 2.316,21	
incentivo funzioni tecniche - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	2%	€ 387,20	
Totale somme a disposizione		€ 4.380,52	
economia a seguito di ribasso		€ 2.848,41	
TOTALE PROGETTO		€ 24.000,00	

VISTO: 
-	che con la ditta Edilizia 2000 S.r.l. è stato stipulato il Foglio di Patti e Condizioni in data 20/10/2018 ed in pari data il Direttore dei Lavori Geom. Pietro Forti ha proceduto alla consegna dei lavori in oggetto;
-	che il direttore dei lavori Forti geom. Pietro in data 20/12/2018 ha emesso il conto finale dei lavori che si compone dei seguenti allegati:
•	verbale ultimazione dei lavori
•	stato finale
•	libretto delle misure
•	registro di contabilità 
•	documentazione fotografica a consuntivo 
•	relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
-	che sulla base delle risultanze del conto finale risulta il seguente quadro economico a consuntivo:
VOCE	FINALE	
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 15.992,02	
importo costi e oneri per la sicurezza	€ 2.331,20	
Importo lavori totale	€ 18.323,22	
ribasso d'asta 	€ 2.800,20	
IMPORTO DI CONTRATTO	€ 15.523,02	
Somme a disposizione:	 	
I.V.A. sui lavori 	€ 1.552,30	
Totale somme a disposizione	€ 1.552,30	
TOTALE PROGETTO	€ 17.075,32	

-	che dallo stato finale, risulta un credito a saldo dell'impresa esecutrice dei lavori di € 15.523,02 oltre IVA 10%;
-	che il responsabile del procedimento geom. Pietro Forti ha redatto la relazione acclarante i rapporti fra Comune e Regione in data 20/12/2018; 
-	che a fronte del credito maturato allo stato finale, l'impresa "Edilizia 2000 S.r.l." (P.I. 03913851212) ha prodotto la fattura a saldo nr. FPA 03/18 del 28/12/2018 di € 15.523,02 oltre € 1.552,30 per IVA 10% per un totale di € 17.075,32; 
-	che nei confronti della ditta esecutrice (Edilizia 2000 S.r.l.)  è stato acquisito il DURC on-line prot. INAIL 12428674 del 10/10/2018 e la dichiarazione di congruità della manodopera prot. n.  116151/DN del 19/12/2018; 
-	che l'impresa esecutrice ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
VISTO: 
-	il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-	il DPR n. 207/2010;
-	il D.L. n. 189/2016 e s.m.i.;
-	la Circolare del CDPC n. 72035/2016;
-	la D.D. Regione Umbria n. 1839/2017 e s.m.i.
RITENUTO: 
-	di provvedere all’approvazione del conto finale e alla liquidazione;

D E T E R M I N A

1)	Di approvare il conto finale e con esso il certificato di regolare esecuzione in data 20/12/2018 dell’intervento “Lavori urgenti e indifferibili a salvaguardia della pubblica incolumità mediante opere provvisionali per la messa in sicurezza di edifici pericolanti incombenti sulla strada interna in località Nortosce”, redatto dal D.L. Geom. Pietro Forti per l'importo di € 15.523,02.
2)	Di approvare il quadro economico a consuntivo dei lavori come di seguito riportato: 
 
VOCE	FINALE	
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 15.992,02	
importo costi e oneri per la sicurezza	€ 2.331,20	
Importo lavori totale	€ 18.323,22	
ribasso d'asta 	€ 2.800,20	
IMPORTO DI CONTRATTO	€ 15.523,02	
Somme a disposizione:	 	
I.V.A. sui lavori 	€ 1.552,30	
Totale somme a disposizione	€ 1.552,30	
TOTALE PROGETTO	€ 17.075,32	

3)	Di approvare la relazione acclarante datata 20/12/2018 redatta dal responsabile del procedimento.
4)	Di liquidare alla ditta Edilizia 2000 S.r.l. con sede in Vallo di Nera (PG) P.IVA 03913851212 a saldo di quanto dovuto per i lavori eseguiti la fattura n. FPA 03/18 del 28/12/2018 di € 15.523,02 oltre € 1.552,30 per IVA 10% per un totale di € 17.075,32.
5)	Di disporre il suddetto pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente identificato da IBAN: IT83 G057 0438 6700 0000 7001936. 
6)	Di dare atto che i lavori necessari alla messa in sicurezza degli edifici pericolanti incombenti sulla strada interna della località Nortosce sono conseguenti ai danni causati dagli eventi sismici del 2016 e che la spesa totale del progetto è finanziata con i fondi stanziati per l'emergenza post-sisma 2016, ai sensi e con le modalità di cui alla Circolare C.D.P.C. n. 72035 del 22/12/2016 e D.D. Regione Umbria n. 1839 del 27/02/2017.
7)	Di dare atto che la spesa suddetta è imputata al bilancio comunale al Cap. 2706 (Imp. 219/2018) ed accertata al Cap. 664 (Acc. 182/2018).
8)	Di dare atto che il presente intervento ha le seguenti coordinate:
- CUP: D77B18000150002
- CIG: Z22253BE4B

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 12-01-19 e vi resterà fino al 27-01-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------