COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  87   Del  23-05-19

NUM.REG.GEN.267

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: LAVORI  DI  RIPRISTINO  INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE 
DAL MALTEMPO 2015. APPROVAZIONE CONTO FINALE E LI=
QUIDAZIONE.

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di maggio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO: 
-	che con decreto in data 30/09/2016 del Dipartimento per gli affari Interni Territoriali del Ministero dell’Interno, è stato concesso il contributo di € 90.000,00 per l’esecuzione delle opere di “Ripristino Infrastrutture viarie danneggiate dal maltempo anno 2015”; 
-	che con D.D. n. 168 del 29/12/2016 è stato incaricato l’Ing. Jun. Ergasti Valentino per la progettazione e direzione dei lavori;
-	che con delibera di G.C. n. 92 del 05/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per l’importo di € 90.000,00 come appresso risultante: 
DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO	
Importo lavori a base d'asta	                        63.611,97 	
Somme a disposizione della Amministrazione:		
Lavori in economia	                          4.599,43 	
Imprevisti	                          3.180,60 	
I.V.A.  22% sui lavori 	                          5.355,67 	
I.V.A. 10% sui lavori 	                          3.926,80 	
spese tecniche	                          6.361,20 	
contributo previdenziale spese tecniche	                             254,45 	
I.V.A. spese tecniche	                          1.455,44 	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	                             254,45 	
spese amministrative e costo discariche	                          1.000,00 	
Totale somme a disposizione	                        26.388,03 	
TOTALE PROGETTO	                        90.000,00 	

-	che con D.D. n. 53 del 27/03/2018 i lavori sono stati affidati alla Ditta VA.RI.AN. S.r.l. di Gualdo Cattaneo per l’importo di € 50.046,60 di cui € 6.611,60 per oneri sulla sicurezza e € 43.435,00 per lavori al netto del ribasso del 23,80%; 
-	che con la ditta è stato stipulato il contratto Rep. 2076 del 25/05/2018;
-	che con D.D. n. 137 del 10/07/2018 è stata approvata la perizia di variante n. 1 in corso d’opera dei lavori di “Ripristino infrastrutture danneggiate dal maltempo 2015” redatta dal Direttore dei lavori Ing. Jun. Ergasti Valentino per l’importo complessivo dei lavori di € 54.598,87 al netto del ribasso del 23,80% e compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
-	che, per far fronte a necessità impreviste e imprevedibili sulle strade comunali già oggetto dei lavori, il Rup in data 04/10/2018 ha autorizzato il direttore dei lavori a predisporre la perizia di variante in corso d’opera n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 1), lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, approvata con atto di sottomissione in data 25/10/2018;
-	che per effetto della perizia di variante n. 2 l’importo dei lavori di contratto viene stabilito in € 65.330,25 al netto del ribasso del 23,80% e compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
CONSIDERATO:
-	che la consegna dei lavori è avvenuta in data 28/05/2018 e che i medesimi, giuste proroghe e sospensioni autorizzate, sono stati ultimati in data 15/12/2018 come da verbale di fine lavori redatto dalla direzione lavori;
-	che il direttore dei lavori Ing. Jun. Ergasti Valentino ha rimesso il Conto Finale in data 12/01/2019 comprensivo dei seguenti elaborati:
•	Stato finale
•	Libretto delle misure
•	Registro di contabilità
•	Verbali di ripresa, sospensione e ultimazione dei lavori
•	Certificato di regolare esecuzione
•	Documentazione fotografica
-	che dagli atti del conto finale risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a € 62.262,33 al netto del ribasso del 23,80% oltre € 10.299,27 per IVA;
-	che in data 06/05/2019 il responsabile del procedimento ha rimesso il certificato di pagamento n. 01-Finale dal quale risulta che può pagarsi all’impresa la somma di € 62.262,33 oltre IVA 10% e 22% per un totale di € 72.561,60 come appresso specificato:
•	€ 33.941,96 oltre € 7.467,23 per IVA 22%
•	€ 28.320,37 oltre € 2.832,04 per IVA 10%
-	che in conclusione, l’importo finale dei lavori è ripartito come appresso:
QUADRO ECONOMICO	 	CONTO FINALE	
1) - Strada della Costa e via Cerretana		            29.209,49 	
2) - Cerreto - Via del Colle		            17.341,75 	
3) - Borgo - Sito di San Paterniano		               5.702,96 	
4) - Macchia - strada interna		            10.962,09 	
5) - strade Casa Bruciata e Casapaolangelo		            11.547,65 	
Importo totale dei lavori		        74.763,94 	
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3,205%	               2.395,85 	
di cui costi per la sicurezza da computo	6,316%	          4.722,00 	
Importo lavori a base d'asta		        79.485,94 	
ribasso del 23,80%	23,80%	        17.223,61 	
Importo di contratto		        62.262,33 	

-	che, rispetto ai lavori previsti in progetto, il conto finale non contempla l’esecuzione dei lavori da fabbro relativi alla realizzazione di alcune ringhiere le quali verranno commissionate direttamente dall’ufficio con le economie risultanti dall’appalto;
VISTO: 
-	che a saldo dei lavori eseguiti l’impresa VA.RI.AN. S.r.l. (P.IVA 02050500426 – C.F. 00759830540) ha prodotto la fattura n. 41 del 10/05/2019 dell’importo complessivo di € 72.561,60 di cui € 33.941,96 per lavori soggetti ad IVA 22% pari a € 7.467,23 e € 28.320,37 per lavori soggetti ad IVA 10% pari a € 2.832,04;
VERIFICATO:
-	che nei confronti della ditta appaltatrice VA.RI.AN. S.r.l. è stato acquisito il DURC OnLine prot. 14547226 del 09/03/2019 con esito regolare nonché il Certificato di congruità della mano d’opera prot. 37284 del 06/05/2019 rilasciato dalla Cassa Edile di Perugia anch’esso con esito regolare;
-	che l’impresa VA.RI.AN. S.r.l. ha assolto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari con relativa dichiarazione;
-	che ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 è stato pubblicato l’Avviso ai Creditori senza esito di ricorsi come risulta dal certificato del R.u.p. in data 16/05/2019.
RITENUTO:
-	di approvare il conto finale e di dare corso alla liquidazione del credito vantato dall’impresa;
VISTO:
-	il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-	il D.Lgs. n. 56/2017;
-	il T.U. Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;
-	il DPR n. 207/2010;
-	lo Statuto comunale;
-	il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-	il Decreto sindacale n. 10 del 28/12/2018 di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica.

D E T E R M I N A

1.	Di approvare il CONTO FINALE e con esso il certificato di regolare esecuzione in data 12/10/2019 dei lavori di “Ripristino infrastrutture danneggiate dal maltempo 2015” redatti dal Direttore dei lavori Ing. Jun. Ergasti Valentino per un importo netto dei lavori eseguiti pari a 62.262,33.
2.	Di liquidare all’impresa VA.RI.AN. S.r.l. (P.IVA 02050500426 – C.F. 00759830540) la fattura a saldo n. 41 del 10/05/2019 dell’importo complessivo di € 72.561,60 di cui € 33.941,96 per lavori soggetti ad IVA 22% pari a € 7.467,23 e € 28.320,37 per lavori soggetti ad IVA 10% pari a € 2.832,04 disponendo il pagamento dell’importo imponibile mediante bonifico bancario su c/c bancario identificato da IBAN: IT 35 R 02008 38422 00002 9495055.
3.	Di imputare la spesa complessiva di € 72.561,60 di cui sopra al Cap. 2504 (Imp. 220/2016) del B.P. 2019-2021.
4.	Di dare atto che l’intervento ha le seguenti coordinate:
CUP: D77H16000730001
CIG: 6895586195 
5.	Di dare atto, altresì, che questo Ente provvederà ad affidare direttamente l’esecuzione delle ringhiere in ferro già previste in progetto.
6.	Di rimandare a successivo atto l’approvazione del rendiconto finale e la liquidazione dei residui crediti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Segretario comunale
F.to Canafoglia Valter

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 24-05-19 e vi resterà fino al 08-06-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------