COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  275   Del  31-12-18

NUM.REG.GEN.660

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: EVENTI SISMICI 2016. ORDINANZA DEL COMMISSARIO DE= 
LEGATO  N.  37/2017  - "EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL
MUNICIPIO" -  APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA E ACCER=
TAMENTO DELL'ENTRATA.
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
-	la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
-	il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
-	il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.”, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni;
-	l’Ordinanza nr. 37 del 08/09/2017 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, di approvazione del “primo programma delle opere pubbliche danneggiate dal sisma” nel quale è compreso l’edificio di proprietà del Comune di Cerreto di Spoleto sede del Municipio, distinto al Catasto al foglio n. 33 part.lle 30 e 686, per un importo ammesso a finanziamento di € 476.580,00;
CONSIDERATO:
-	che con D.D. n. 224 (R.G. n. 535) del 08/11/2017 è stato incaricato lo studio tecnico Cooperstudio Soc. Coop per la progettazione e direzione dei lavori;
-	che con D.D. n. 231 (R.G. n. 552) del 20/11/2017 è stato incaricato il Dott. Geol. Pierpaolo Chiraz per la redazione della relazione geologica a supporto del progetto strutturale;
-	che con D.D. n. 35 (R.G. n. 74) del 15/02/2018 è stato esteso l’incarico al Dott. Geol. Pierpaolo Chiraz per l’esecuzione delle indagini sismiche propedeutiche alla redazione della relazione geologica;
-	che con D.D. n. 160 (R.G. n. 418) del 31/08/2018 è stato incaricato il Geom. Cocciarelli Riccardo per i servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
-	che con D.D. n. 247 (R.G. n. 590) del 29/11/2018 sono state rettificate le suddette determinazioni inserendo il corretto Codice Unico di Progetto assegnato all’intervento di “Riparazione dell’edificio comunale sede del Municipio” C.U.P.: D79C18000030002 e sono stati attribuiti alle medesime i codici identificativi gara Smart C.I.G. per ciascun affidamento;
DATO ATTO:
-	che, per l’espletamento della progettazione definitiva da parte dei tecnici incaricati e delle successive fasi di approvazione da parte dell’Ente e dell’Ufficio Speciale Ricostruzione per l’Umbria è stimato un tempo di 90 giorni;
-	che il primo acconto del contributo ammesso a finanziamento verrà erogato dopo l’approvazione definitiva del progetto e l’adozione del decreto di concessione del contributo da parte dell’U.S.R. Umbria;
-	che occorre formalizzare l’accertamento al bilancio comunale del finanziamento regionale ammesso per l’intervento all’oggetto, di cui all’Allegato 1 all’Ordinanza nr. 37 del 08/09/2017 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione;
-	che la spesa per i servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, relazione geologica, indagini e coordinamento della sicurezza, di cui alle determinazioni sopra citate, ammonta complessivamente ad € 38.827,98;
-	che tale somma è imputata al Bilancio comunale al Cap. 2667 (Imp. 135/2018) ed accertata al Cap. 634 (Acc. 116/2018);
-	che necessita accertare il contributo complessivo di € 476.580,00 ammesso a finanziamento per l’intervento all’oggetto al netto dell’accertamento già in essere, ovvero per l’importo di € 437.752,02;
RITENUTO:
-	di provvedere in merito;
VISTO: 
-	il vigente "Programma Triennale delle Opere Pubbliche e Elenco Annuale" approvato da questo Ente nel quale è contemplata l’esecuzione dell’opera in oggetto; 
-	il T.U. Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;
-	lo Statuto comunale;
-	il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-	il Decreto sindacale n. 3736 del 02/07/2018 di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica
-	il D.L. n. 189/2016 e s.m.i.;
-	l’O.C.D. n. 37/2017 e s.m.i.
D E T E R M I N A 

1)	Di dare atto che con Ordinanza nr. 37 del 08/09/2017 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, di approvazione del “primo programma delle opere pubbliche danneggiate dal sisma”, è stato ammesso a finanziamento per l’importo di € 476.580,00 l’intervento per la riparazione dell’edificio di proprietà del Comune di Cerreto di Spoleto sede del Municipio, distinto al Catasto al foglio n. 33 part.lle 30 e 686.
2)	Di approvare il cronoprogramma di 90 giorni necessari fino all’approvazione dell’intervento in oggetto da parte dell’U.S.R. Umbria.
3)	Di dare atto che il primo acconto del contributo verrà erogato dopo l’approvazione definitiva del progetto e l’adozione del decreto di concessione del contributo da parte dell’U.S.R. Umbria.
4)	Di dare atto, altresì, che con D.D. n. 224 (R.G. n. 535) del 08/11/2017, D.D. n. 231 (R.G. n. 552) del 20/11/2017, D.D. n. 35 (R.G. n. 74) del 15/02/2018, D.D. n. 160 (R.G. n. 418) del 31/08/2018, come rettificate con D.D. n. 247 (R.G. n. 590) del 29/11/2018, sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, relazione geologica, indagini e coordinamento della sicurezza per la somma complessiva di € 38.827,98 imputata al Bilancio comunale al Cap. 2667 (Imp. 135/2018) ed accertata al Cap. 634 (Acc. 116/2018).
5)	Di accertare al Cap. 634 del bilancio comunale l’importo di € 437.752,02 il quale, unitamente all’accertamento già in essere (Acc. 116/2018), copre l’intero importo del finanziamento ammesso pari a € 476.580,00.

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 17-01-19 e vi resterà fino al 01-02-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------