COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  238   Del  15-11-18

NUM.REG.GEN.571

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE DI= 
FESE  SPONDALI  DEL  FIUME NERA A VALLE DELLA CON=
FLUENZA  DEL  FIUME VIGI A BORGO CERRETO. APPROVA=
ZIONE PERIZIA DI VARIANTE.
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese di novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
-	che con delibera di G.C. n. 82 del 30/10/2015 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "Messa in sicurezza di un tratto di difesa spondale in sponda dx in località Borgo Cerreto sulla confluenza tra il Fiume Nera ed il Fiume Vigi" redatto dall'Ufficio tecnico comunale per l'importo di € 75.000,00;
-	che la Regione Umbria, con delibera di Giunta Regionale n. 1422 del 30/11/2015, ha concesso il contributo di € 75.000,00 per l'esecuzione dell'opera di cui sopra; 
-	che con D.D. n. 86 del 10/06/2016 è stato incaricato lo studio tecnico HD Engineering S.r.l. di Roma per la progettazione e direzione dei lavori; 
-	che con D.D. n. 107 del 01/07/2016 è stato incaricato il dott. Geol. Giorgetti Roberto per la redazione della relazione geologica ed il Dott. Simone Alemanno per la redazione della relazione di valutazione Ambientale in Zona S.I.C.; 
-	che con delibera di G.C. n. 12 del 06/03/2017, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per l'importo di € 75.000,00 di cui € 52.904,35 per lavori e € 22.095,65 per somme a disposizione; 
-	che con delibera di G.C. n. 79 del 02/08/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per l’importo di € 75.000,00 di cui e 52.904,35 per lavori e € 22.095,65 per somme a disposizione;
-	che con delibera di G.C. n. 100 del 24/07/2018 è stata approvata la 2/a revisione del progetto esecutivo con il seguente quadro economico:
 
Q.E. REVISIONE N° 2	IMPORTI	
importo lavori soggetto a ribasso	               31.339,01 	
incidenza mano d'opera soggetta a ribasso	                16.475,36 	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	                   1.988,68 	
Importo lavori da computo	            49.803,05 	
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	               2.110,20 	
Importo a base d'asta	51.913,25 	
Somme a disposizione della Amministrazione:		
I.V.A. 22% sui lavori 	            11.420,92 	
onorario progetto, direzione lavori e sicurezza	               4.179,44 	
onorario geologo	               1.300,00 	
onorario naturalista	                  750,00 	
contributo previdenziale spese tecniche (2% e 4%)	                  223,18 	
I.V.A. 22% spese tecniche 	               1.419,58 	
spese amministrative e tributo discariche	                  750,00 	
Spese caratterizzazione materiale risulta scavi	1.100,00	
compenso 2% art. 113 D.Lgs 50/2016 	996,06 	
imprevisti e arr.	                  947,58 	
Sommano	            23.086,75 	
TOTALE PROGETTO	            75.000,00 	

-	che con D.D. n. 191 del 27/09/2018, i lavori sono stati appaltati alla ditta O.S.F.E. s.a.s. con sede in Cetraro (CS)per l’importo di € 32.895,08 di cui € 4.098,88 per oneri e costi per la sicurezza e € 28.796,20 per lavori al netto dell’offerto ribasso del 39,775%;
-	che con la ditta appaltatrice è stato stipulato il Foglio di Patti e Condizioni in data 15/10/2018 con validità di contratto;
PRESO ATTO:
-	che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nella documentazione della gara di appalto (avviso manifestazione di interesse e lettera di invito) è stato chiaramente esplicitato che: “la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto principale, senza alterarne la natura, per lavorazioni  integrative e di completamento e, specificatamente  “completamento difese spondali mediante scogliere” per un importo massimo di € 20.000,00”; 
CONSIDERATO:
-	Che in corso d’opera si è ravvisata la necessità di apportare delle modifiche alle previsioni progettuali in linea con le finalità progettuali ed agli indirizzi disposti in sede di gara di appalto, come appresso specificato:
-	Come sollecitato dal servizio di protezione civile regionale, al fine di garantire un più completo intervento di messa in sicurezza idraulica, viene previsto il completamento delle scogliere nelle zone più a valle (all’altezza dello stabilimento delle acque minerali) ove le difese spondali esistenti erano crollate e in condizioni assai critiche (interventi DX_2 e SX_2);
-	vengono completate le operazioni di ridistribuzione dei depositi alluvionali in alveo nei tratti dove sono state costruite le nuove scogliere, al fine di garantire e ripristinare la sezione e l’officiosità idraulica del fiume in quei tratti;
-	come sollecitato dal servizio per la tutela ittica, nella zona compresa tra la scogliera DX_1 e SX_1, viene previsto di posizionare alcuni massi in alveo al fine di costituire riparo alla fauna ittica e di rinverdire con talee le scarpate ripariali createsi a seguito dei lavori di ridistribuzione dei depositi alluvionali;
-	viene previsto l’onere a compenso di sondaggi esplorativi eseguiti per l’intercettazione di sottoservizi in corrispondenza delle scogliere DX_1 e SX_1 al fine di evitare il loro danneggiamento
-	viene prevista un’opera di sistemazione del piazzale pubblico e della stradina retrostanti la scogliera “SX_1” danneggiati dagli eventi alluvionali; tale intervento prevede: la sostituzione della balaustra di legno esistente danneggiata e l’integrazione della medesima, la stesa di stabilizzato di cava, il tutto finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza per il pubblico;
-	viene rimodulato il quadro economico dell’appalto sulla base delle effettive spese afferenti le “somme a disposizione della amministrazione”;
VISTO:
-	Che per lo scopo, la direzione dei lavori, condotta dal geom. Pietro Forti coadiuvato dai collaboratori, geol. Nadia Silla e geom. Marco Donnini, dell’ufficio tecnico comunale, ha predisposto la Perizia di variante in corso d’opera con il seguente quadro economico:
VOCE	 	VARIANTE	
importo lavori soggetto a ribasso		                    51.930,74 	
incidenza mano d'opera soggetta a ribasso	33%	                    27.300,72 	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3,99%	                       3.295,37 	
Importo lavori da computo	 	                     82.526,83 	
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		                        1.014,20 	
Importo a base d'asta	 	                     83.541,03 	
ribasso offerto	39,775%	                    31.514,31 	
Importo netto lavori in appalto	 	                     52.026,72 	
Somme a disposizione della Amministrazione:			
I.V.A. 22% sui lavori	22%	                     11.445,88 	
onorario progetto, direzione lavori e sicurezza	7,90%	                        4.179,44 	
onorario geologo		                        1.300,00 	
onorario naturalista		                             750,00 	
contributo previdenziale spese tecniche (2% e 4%)		                             223,18 	
I.V.A. 22% spese tecniche	22%	                        1.419,58 	
compenso 2% art. 113 D.Lgs 50/2016	2,00%	                        1.670,82 	
Sommano		                    20.988,89 	
TOTALE PROGETTO	 	                     73.015,61 	

CONSIDERATO:
-	Che, rispetto all’importo originario di contratto, vi è una maggiore spesa di € 19.131,63 che è inferiore al limite di e 20.000,00 stabilito nella documentazione della gara di appalto;
-	Che l’esecuzione dei lavori in variante permette di ripristinare le condizioni di sicurezza idraulica per l’abitato di Borgo Cerreto compromesse a seguito del crollo e del cedimento delle difese spondali; 
-	Che la variante presenta il profilo di legittimità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 atteso che le lavorazioni di cui alla perizia di variante:
o	Sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili “completamento difese spondali mediante scogliere” e non superano il limite di spesa di € 20.000,00”;
o	Non alterano la natura del contratto originario;
o	Non sono attinenti a clausole di revisione dei prezzi;
VISTO ALTRESI’:
-	che la Regine Umbria, con D.D. n. 10187 del 08/10/2018, nell’approvare il progetto esecutivo, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 06/2018, la spesa ammissibile per “spese generali” è pari al 12% della spesa complessiva di € 75.000,00;
-	che con la stessa D.D. regionale, è stato rideterminato il quadro economico di progetto alla luce delle percentuali ammesse per spese generali come appresso:
PROGETTO – REV. D.D. 10187/2018	IMPORTI	
importo lavori soggetto a ribasso	                      31.339,01 	
incidenza mano d'opera 	                      16.475,36 	
oneri per la sicurezza 	                         1.988,68 	
Importo lavori da computo	                       49.803,05 	
costi per la sicurezza 	                          2.110,20 	
Importo a base d'asta	                       51.913,25 	
Somme a disposizione della Amministrazione:		
I.V.A. 22% sui lavori	                       11.420,92 	
Spese generali (12% di € 75.000,00)	                          9.000,00 	
imprevisti e arr.	                          2.665,83 	
Sommano	                      23.086,75 	
TOTALE MODELLO A)	                       75.000,00 	

-	che, alla luce delle risultanze di cui alla D.D. 10187/2018, la spesa ammissibile a contributo, sull’importo complessivo di € 73.015,61 della variante, ammonta a € 72.472,59 come appresso risultante:
-	spesa ammissibile per lavori 													€ 52.026,72
-	spesa ammissibile per IVA 														€ 11.445,88
-	spesa ammissibile per spese generali (12% di € 75.000,00) 	€  9.000,00
-	Totale ammesso a contributo 													€ 72.472,59
-	Che, pertanto, è a carico del Comune di Cerreto di Spoleto la restante somma di € 543,01;
RITENUTO:
-	Di approvare la variante in corso d’opera e dare corso alla esecuzione dei lavori;
VISTO:
-	il D.Lgs. n. 50/2016
-	il D.P.R. n. 207/2010
-	il D.M. n. 49/2018
-	la L.R. n. 15/2008
DELIBERA
1.	Di approvare la Perizia di Variante in corso d’opera in data 09/11/2018 dei lavori di “messa in sicurezza delle difese spondali danneggiate sul Fiume Nera a valle della confluenza con il Fiume Vigi in località Borgo Cerreto” redatta dall’ufficio tecnico comunale a firma del direttore dei lavori geom. Pietro Forti, geol. Nadia Silla e geom. Marco Donnini, con il seguente quadro economico:

VOCE	 	VARIANTE	
importo lavori soggetto a ribasso		                    51.930,74 	
incidenza mano d'opera soggetta a ribasso	33%	                    27.300,72 	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3,99%	                       3.295,37 	
Importo lavori da computo	 	                     82.526,83 	
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		                        1.014,20 	
Importo a base d'asta	 	                     83.541,03 	
ribasso offerto	39,775%	                    31.514,31 	
Importo netto lavori in appalto	 	                     52.026,72 	
Somme a disposizione della Amministrazione:			
I.V.A. 22% sui lavori	22%	                     11.445,88 	
onorario progetto, direzione lavori e sicurezza	7,90%	                        4.179,44 	
onorario geologo		                        1.300,00 	
onorario naturalista		                             750,00 	
contributo previdenziale spese tecniche (2% e 4%)		                             223,18 	
I.V.A. 22% spese tecniche	22%	                        1.419,58 	
compenso 2% art. 113 D.Lgs 50/2016	2,00%	                        1.670,82 	
Sommano		                    20.988,89 	
TOTALE PROGETTO	 	                     73.015,61 	

2.	Di dare atto che i maggiori e diversi lavori saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice O.S.F.E. s.a.s. agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario nonché dell’atto di sottomissione in data 09/11/2018 il quale, con la presente, si approva per formare parte integrante e sostanziale del presente atto ancorchè non allegato;
3.	Di dare atto che la spesa complessiva è imputata al cap. 2503 (imp.102/2016) e accertata al cap. 622 (Acc.51/2016);
4.	Di dare atto che dell’importo complessivo di € 73.015,61, € 72.472,59 è ammissibile a contributo regionale ai sensi della DGR 1422/2015 e € 543,01 è a carico del bilancio comunale;
5.	Di dare atto che al presente intervento sono attribuite le seguenti coordinate:
-	CUP: D74H15001490002
-	CIG: 75006574F0

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 28-11-18 e vi resterà fino al 13-12-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------