COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  59   Del  21-03-18

NUM.REG.GEN.141

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: SISMA  2016  -  OPERE PROVVISIONALI A SALVAGUARDIA 
DELLA  PUBBLICA INCOLUMITA' E TUTELA BENI CULTURA=
LI.  RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' IN LOCALITA'
TRIPONZO. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE.
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventuno del mese di marzo nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
-	che a seguito delle forti scosse di terremoto del 24 Agosto 2016 e successive, sono state fortemente danneggiate diverse località del territorio comunale, tra cui il nucleo abitato di Triponzo;
-	che con Ordinanze sindacali n. 103 del 31/10/2016 e n. 140 del 29/11/2016 è stata disposta la chiusura al transito e dichiarata la “zona rossa” nell’abitato di Triponzo a causa del rischio crollo della Torre Civica e dei fabbricati siti in Via Del Castello distinti al Catasto al foglio n. 35 particelle n. 36, 42, 43 e 49;
-	che con Ordinanza sindacale n. 45 del 27/03/2017 è stata interdetta la libera circolazione nel tratto di via Santa Maria a Triponzo a causa del rischio di crollo di massi dal versante foglio n. 35 particelle n. 276 e 29/parte;
-	che con verbale in data 19/05/2017 a firma dello scrivente in qualità di RUP sono stati dichiarati di "Somma Urgenza", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori per l’esecuzione delle “Opere provvisionali a salvaguardia della pubblica incolumità e tutela beni culturali. Ripristino della transitabilità in località Triponzo”;
-	che con D.D. n. 10 del 20/01/2017 è stato incaricato lo studio Tecnico ABACO Soc. Coop. per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza;
-	che con delibera di G.C. n. 28 del 29/03/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, il quale prevede la messa in sicurezza della Torre Civica di Triponzo (Fg. n. 35 part.lla n. 12), del fabbricato sito in Via del Castello all’incrocio con Via Santa Maria (Fg. n. 35 part.lla n. 49), della scarpata in Via Santa Maria (Fg. n. 35 part.lle n. 276 e n. 29-parte);
-	che con D.D. n. 88 del 22/05/2017 (r.g. n. 216) è stata impegnata la spesa per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento “Opere provvisionali a salvaguardia della pubblica incolumità e tutela beni culturali. Ripristino della transitabilità in località Triponzo”, al Cap. 2706 del B.P. 2017-2019 (Imp. 134) il cui importo è introitato al Cap. 664 del B.P. 2017-2019 (Acc. 5);
-	che la Regione Umbria Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile ha rilasciato il nulla osta n. 22 del 26/07/2017 all’esecuzione dei lavori di cui sopra e con D.D. 12898 del 01/12/2017 ha erogato la liquidazione dell’acconto pari al 60% dell’importo complessivo dell’intervento autorizzato a finanziamento, ai sensi e con le modalità di cui alla circolare C.D.P.C. n. 72035 del 22/12/2016 e D.D. Regione Umbria n. 1839 del 27/02/2017;

VISTO:
-	che con D.D. n. 145 del 31/08/2017 sono stati affidati i lavori di cui sopra alla Ditta Giovannoli Alberto, con sede in Cascia, per l'importo di € 34.499,42 di cui € 31.583,39 per lavori al netto del ribasso offerto del 19,985% e € 2.916,03 per oneri e costi sulla sicurezza;
-	che con la citata ditta è stato stipulato il Foglio di Patti e Condizioni in data 15/09/2017;
-	che con D.D. n. 253 del 27/12/2017 è stata approvata la perizia di variante nr. 1 redatta dallo studio ABACO Soc. Coop. per l'importo complessivo di € 52.680,02 di cui € 38.094,23 per lavori e € 14.585,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
-	che la perizia di variante contempla una parte dei lavori edili (Cat. OG1), affidati alla ditta Giovannoli Alberto, e una parte di lavori in quota (Cat. OS21), affidati a ditta specializzata;
-	che la parte di lavori edili in variante affidati alla ditta Giovannoli Alberto, giusto atto di sottomissione del 22/12/2017, ammonta a complessivi € di € 20.534,23 di cui € 18.415,24 per lavori al netto del ribasso offerto del 19,985% e 2.118,99 per costi e oneri della sicurezza;
VERIFICATO: 
-	che il D.L. arch. Luciano Elisei, ha rimesso la contabilità dei lavori edili (Cat. OG1) condotti dalla ditta Giovannoli Alberto a tutto il 28/02/2018 relativa al 1° SAL per l'importo netto di € 29.491,56 con i seguenti allegati:
•	1° SAL
•	Libretto delle misure
•	Registro di contabilità
-	che il responsabile del procedimento, geom. Pietro Forti, ha rimesso il certificato di pagamento nr. 1 in data 05/03/2018 per l'importo di € 29.344,10 al netto della ritenuta infortuni e oltre IVA 10% per un totale di € 32.278,51;
-	che l'impresa appaltatrice Giovannoli Alberto (C.F. GVNLRT58H10B948X) ha rimesso la fattura n. 21 del 13/03/2018 a saldo per il 1° SAL per l'importo di € 29.344,10 oltre IVA 10% di € 2.934,41 per un totale di € 32.278,51;
-	che nei confronti della ditta appaltatrice Giovannoli Alberto è stato acquisito il DURC on line prot. n. 10821553 del 06/03/2018 con esito regolare;
-	che è stato acquisito il certificato di congruità della manodopera prot. n. 17501/GC del 12/03/2018 con esito regolare;
-	che l'impresa esecutrice ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTO:
-	di provvedere all’approvazione e liquidazione del 1° SAL; 

D E T E R M I N A 

1)	Di approvare il 1° SAL relativo ai lavori edili (Cat. OG1) di “Opere provvisionali a salvaguardia della pubblica incolumità e tutela beni culturali" redatto dal D.L. Arch. Luciano Elisei dello studio ABACO Soc. Coop. per l'importo netto di € 29.491,56;
2)	Di approvare il certificato di pagamento nr. 1 redatto dal responsabile del procedimento Forti geom. Pietro 05/03/2018 per l'importo di € 29.344,10 al netto della ritenuta infortuni e oltre IVA 10% per un totale di € 32.278,51; 
3)	Di liquidare alla ditta Giovannoli Alberto con sede in Cascia (C.F. GVNLRT58H10B948X) la fattura nr. 21 del 13/03/2018 per un importo totale di € 32.278,51 di cui € 29.344,10 per lavori e € 2.934,41 per IVA 10%, mediante bonifico bancario su conto corrente identificato dal codice IBAN: IT 28E057 0438 3300 0000 0002123;
4)	Di liquidare la spesa di cui al presente atto al Cap. 2706 B.P. 2017-2019 (Imp. 134)
5)	Di dare atto che la Regione Umbria con D.D. n. 12898 del 01/12/2017 ha erogato l’acconto del finanziamento autorizzato per l’intervento il quale è introitato al Cap. 664 del B.P. 2017-2019 (Acc.5);
6)	Di dare atto che l’intervento ha le seguenti coordinate: 
   - CUP: D71B17000000002
   - CIG: ZCF1DFD00D

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

VISTO: per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 .

Il Ragioniere
F.to STACCINI SABRINA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 04-04-18 e vi resterà fino al 19-04-018 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------