COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
  COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero  146   Del  23-08-19

NUM.REG.GEN.441

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: LEGGE  DI BILANCIO 2019 - MESSA IN SICUREZZA DI E= 
DIFICI E PATRIMONIO COMUNALE - PERIZIA DI VARIANTE
-

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di agosto nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
-	che ai sensi dell’art. 1, commi 107-112, della Legge nr. 145 del 30/12/2018, vengono assegnati ai Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, contributi finanziari di Euro 40.000,00 per l’esecuzione di opere pubbliche di immediata cantierabilità volte alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
-	Che con delibera di G.C. n. 40 del 30/03/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori redatto dall’ufficio tecnico comunale con il seguente quadro economico:
VOCI	%	PROGETTO	
Importo lavori soggetto a ribasso		           28.636,66 	
costi per la sicurezza 		             5.847,24 	
IMPORTO A BASE D'ASTA		           34.483,90 	
Somme a disposizione			
I.V.A. 10%	10%	             3.448,39 	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	                689,68 	
costo smaltimento in discariche		                500,00 	
Imprevisti e arrot.nto		                878,03 	
Sommano		            5.516,10 	
TOTALE PROGETTO	 	           40.000,00 	

-	Che con D.D. n. 67 del 20/04/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Innocenzi Franco di Cerreto di Spoleto per l’importo di € 31.266,28 di cui € 5.847,24 per costi sulla sicurezza e €  25.419,04 per lavori al netto dell’offerto ribasso del l’11,236%.
-	Che con l’impresa appaltatrice è stato sottoscritto il Foglio di Patti e Condizioni in data 09/05/2019.
-	Che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare delle modifiche alle previsioni progettuali al fine di fare fronte a situazioni impreviste e per garantire la migliore esecuzione dell’opera;
Visto:
-	che il tecnico comunale, geom. Pietro Forti, in qualità di direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante dei lavori in data 03/08/2019 che presenta il seguente quadro economico:
VOCI	VARIANTE	
Importo lavori soggetto a ribasso	           36.580,03 	
costi per la sicurezza 	             3.313,84 	
IMPORTO A BASE D'ASTA	           39.893,87 	
ribasso d'asta 11,236%	             4.110,13 	
IMPORTO DI CONTRATTO	           35.783,74 	
Somme a disposizione		
I.V.A. 10%	             3.578,37 	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	                637,89 	
Sommano	            4.216,26 	
TOTALE PROGETTO	           40.000,00 	

-	Che la perizia di variante contempla le seguenti lavorazioni:
1)	Tenuta di Casale Saffignano:
a)	Edificio part.lla nr. 91 sub. 1:
•	L’intervento previsto in progetto rimane invariato;
b)	Edificio part.lla nr. 91 sub. 2: 
•	L’intervento previsto in progetto rimane invariato;
c)	Edificio part.lla nr. 8 part.lla 575: 
•	L’intervento previsto in progetto rimane invariato.
d)	 Edificio part.lla nr. 8 part.lla 568:  
•	Non verrà più eseguita la prevista intercapedine al lato monte né la messa in opera dei canali di gronda e discendenti.
2)	Edificio “Casa del Vergaro” altrimenti detto “La Caciera”:
•	L’intervento previsto in progetto rimane invariato.
3)	Pozzo di valle Mela:
•	Verrà ripristinato il paramento murario mediante scarifica e rinzaffo con malta anticata e verrà sostituito il manto di copertura in coppi;
•	Verranno demoliti e smaltiti gli abbeveratoi danneggiati;
•	Non verrà istallato l’impianto di pompaggio manuale.
4)	Messa in sicurezza strade comunali:
a)	Strada della Madonna del Monte e di Fergino:
•	Le recenti straordinarie avversità atmosferiche hanno causato la rovina del piano stradale nei tratti pavimentati con depolverizzato di asfalto mettendo a rischio la circolazione dei veicoli; Gli arbusti e la vegetazione sulle scarpate si sono appesantiti e hanno ostruito la visibilità della carreggiata
•	Si prevede di eseguire un intervento di messa in sicurezza mediante la scarifica ed il livellamento del piano stradale danneggiato inoltre verrà eseguita la triturazione con mezzo meccanico della vegetazione invasiva delle scarpate;
b)	Strada di Monte Maggiore e di Valle Mela
•	Viene confermato l’intervento di sistemazione dei tratti danneggiati della carreggiata mediante la scarificazione superficiale e l’apporto di stabilizzato di cava;
c)	Strada di Vallicelle
•	Viene previsto di eseguire un intervento puntuale all’altezza dell’incrocio della strada provinciale che presenta il continuo danneggiamento del piano stradale a causa della presenza di acqua stagnante sotterranea;
•	Verrà realizzato un cassonetto di scolo mediante lo scavo del materiale terroso ed il rinterro con materiale lapideo drenante.

-	Che la perizia presenta il profilo di legittimità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, c.2, del D.Lgs. n. 50/2016 essendo l’incremento dell’importo contrattuale inferiore al 15%;
Ritenuto:
-	di approvare la perizia
Visto:
-	il D.Lgs. n. 50/2016
-	il D.P.R.  n. 207/2010
DETERMINA
1.	Di approvare la perizia di variante in data 03/08/2019 dei lavori di “Piano 2019 per la messa in sicurezza di edifici e patrimonio comunale” redatta dal direttore dei lavori, geom. Pietro Forti, con il seguente quadro economico:
VOCI	VARIANTE	
Importo lavori soggetto a ribasso	           36.580,03 	
costi per la sicurezza 	             3.313,84 	
IMPORTO A BASE D'ASTA	           39.893,87 	
ribasso d'asta 11,236%	             4.110,13 	
IMPORTO DI CONTRATTO	           35.783,74 	
Somme a disposizione		
I.V.A. 10%	             3.578,37 	
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	                637,89 	
Sommano	            4.216,26 	
TOTALE PROGETTO	           40.000,00 	

2.	Di dare atto che i diversi e maggiori lavori saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice, Innocenzi Franco, alle stesse condizioni contrattuali ed all’atto di sottomissione facente parte della perizia che con la presente formalmente si approva;
3.	di dare atto che la spesa è allocata, in uscita, al bilancio comunale al cap. 2671 ed, in entrata, al cap. 648; 
4.	di dare atto che il presente intervento ha le seguenti coordinate:
-	CUP: D79F1900080001
-	CIG: 7856005469

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

--------------------------------------------------------------------- 
Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nel sito web istituzione di questo Comune dal 27-08-19 e vi resterà fino al 11-09-019 .

Il Responsabile della Pubblicazione   

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------