Comune di Apiro 
                                  Provincia di Macerata 

           COPIA DI DELIBERAZIONE
              DELLA
            GIUNTA COMUNALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  10 DEL  08-02-19

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO VIALE TRIESTE - APPROVAZIONE VARIANTE
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di febbraio alle ore 22:35, nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

======================================================================

SCUPPA UBALDO	SINDACO	P	
LUCHETTI RICCARDO	ASSESSORE	P	
SPARAPANI NADIA	ASSESSORE	P	

======================================================================

Assegnati n. 3  In carica n.  3 Presenti n.   3  Assenti n.   0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. TROJANI FABIO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. SCUPPA UBALDO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:

- che nei giorni di 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, il centro Italia è stato colpito da violenti eventi sismici che hanno danneggiato diversi edifici sia privati che pubblici;

- che in data 8/11/2017, a seguito di sopralluogo delle squadre AEDES, la scuola primaria e asilo nido “E. Mestica” sita in Corso Vittorio Emanuele III è stata dichiarata inagibile;

- che con Ordinanza n. 33 del 11/07/2017 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è stato approvato l’intervento di nuova costruzione scuola elementare “E.Mestica” in località Cupo (intervento n. 11 Allegato 1) 

VISTA quindi la necessità di realizzare un marciapiede lungo viale Trieste per garantire l’accessibilità pedonale dal centro storico verso il nuovo polo scolastico;

RILEVATO che ANCI ha pubblicato il Bando “ANCI CROWD – SISMA CENTRO ITALIA” (nel prosieguo, il “Bando”), le cui tematiche progettuali ammesse sono in linea con l’intervento dell’Amministrazione sopra richiamato;

DATO ATTO che ANCI concede un cofinanziamento fino al massimo del 50% per i progetti che avranno raggiunto con la raccolta attraverso la rete almeno il 50% del traguardo prefissato nel corso della campagna di crowdfunding di 90 giorni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 27-10-2017 con la quale il Comune di Apiro ha deliberato la partecipazione al bando con la richiesta di un budget di € 55.000,00 per il finanziamento del progetto di “realizzazione marciapiede lungo viale Trieste”, di cui almeno il 50% da raccogliere nel corso della campagna di crowdfunding di 90 giorni e il restante importo fino al raggiungimento del traguardo prefissato, da ricevere quale cofinanziamento da parte dell’ANCI secondo i criteri di rendicontazione e liquidazione previsti dalla Misura 1 dal Bando.

VISTO che la raccolta fondi online, conclusa il 20.03.2018, ha raggiunto il traguardo del 50% prefissato ed il progetto ha quindi ottenuto l’ulteriore 50% da ANCI per un totale di € 55.000,00;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 73 del 06.06.2018 di approvazione del progetto DEFINITIVO dei lavori di “realizzazione marciapiedi lungo viale Trieste” redatto dall’Ufficio Sisma, dell’importo totale di € 55.000,00, di cui € 48.101,79 per lavori ed € 6.898,21 per somme a disposizione;

VISTA la Determinazione n° 294 R.G. del 03.07.2018, dell’Ufficio Sisma del Comune di Apiro, con cui è stato approvato il progetto ESECUTIVO dei lavori, con il seguente quadro economico di progetto:

lavori	€	48.101,79	
oneri per la sicurezza	€	1.443,05	
importo soggetto a ribasso	€	46.658,74	
ribasso d'asta	€	-	
importo netto lavori	€		48.101,79
Somme a disposizione			
IVA sui lavori	€	4.810,18	
spese tecniche	€	962,04	
CNPAIA	€	-	
IVA su spese tecniche	€	-	
imprevisti	€	1.126,00	
sommano	€		6.898,21
Totale progetto	€		55.000,00

VISTO che l’opera non è ricompresa nel Piano delle Opere Pubbliche in quanto ha un importo inferiore a € 100.000,00;

DATO ATTO che con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 06.06.2018 l’arch. Simone Salta è stato nominato Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione dell’Ufficio Sisma n. 295 del 03.07.2018 con la quale è stato approvato il bando di gara ed è stata indetta la gara di appalto per la “realizzazione del marciapiede lungo viale Trieste”;

Vista la Determina di aggiudicazione n° 368 del 14.08.2018 dell’Ufficio Sisma del Comune di Apiro di aggiudicazione alla ditta “Scavi e Condotte S.r.l.” di Apiro (MC), l’appalto dei lavori di “realizzazione marciapiede lungo viale Trieste” per un importo complessivo di € 31.771,23 al netto del ribasso d’asta del 35,00% di cui € 1.443,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA;

VISTO quindi il seguente quadro economico di aggiudicazione:
lavori	€	48.101,79	
oneri per la sicurezza	€	1.443,05	
importo soggetto a ribasso	€	46.658,74	
ribasso d'asta	€	-16.330,56	
importo netto lavori	€		31.771,23
Somme a disposizione	
IVA sui lavori	€	3.177,12
spese tecniche	€	962,04
CNPAIA	€	-
IVA su spese tecniche	€	-
Imprevisti	€	1.126,00
Ribasso d’asta	€	17.963,61
sommano	€		23.228,77
Totale progetto	€		55.000,00

DATO ATTO che il progetto è finanziato per € 55.000,00 con i fondi raccolti tramite la partecipazione al Bando “ANCI CROWD – SISMA CENTRO ITALIA” riconducibili al cap.2850 del bilancio;

DARE ATTO che durante l’esecuzione dei lavori è stata riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche al progetto approvato, infatti, con l’arrivo della stagione estiva e la crescita della vegetazione lungo la strada provinciale, si è notato che il punto iniziale del marciapiede, dove verrà realizzato un attraversamento pedonale, rimaneva coperto alla vista degli automobilisti e ciò poteva creare un potenziale pericolo per i pedoni;

RILEVATO che:
- per quanto sopra esposto si è deciso di prolungare il marciapiede di ulteriori 31,95 metri al fine di posizionare l’attraversamento stradale in un punto più scoperto ed eliminare ogni rischio per gli utenti;
- durante i lavori è stata riscontrata la necessità di realizzare alcuni lavori in economia a causa di interferenze di strutture esistenti con il nuovo marciapiede e precisamente:
1) il prolungamento della tubazione di scarico di un attraversamento stradale;
2) la sistemazione della fondazione di un muro adiacente al marciapiede;
3) lo spostamento di un cancello per garantire l’accesso a una proprietà privata;
4) la sistemazione di una fognatura comunale preesistente;
5) la sistemazione delle prese del gas presenti a confine con le proprietà private;
6) la rimozione e risistemazione di una pavimentazione in betonelle preesistente al fine di ottenere pendenze tali da garantire la percorribilità del marciapiede anche ai portatori di handicap;

VISTA quindi, la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, arch,. Simone Salta riutilizzando il ribasso d’asta e parte degli imprevisti già stanziati, composta dai seguenti elaborati:
- relazione di variante
- schema dell’atto di sottomissione
- computo metrico
- quadro comparativo
- computo metrico lavori in economia
- distinta ore per economie
- planimetria generale

VISTO quindi il seguente quadro economico di variante;
lavori	€	        54.453,19	
oneri per la sicurezza	€	         1.633,60	
importo soggetto a ribasso	€	        52.819,59	
ribasso d'asta 35%	€        	18.486,86	
importo netto lavori	€		35.966,33
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 10%	€        	3.596,63
spese tecniche	€	          962,04
lavori in economia	€	        9.221,48
IVA su lavori in economia	€	          922,15
Rifacimento cancello       €        2.000,00
Imprevisti	€	        2.331,37
sommano	€		19.033,67
Totale progetto	€		55.000,00

DATO ATTO che l’intervento è perfettamente compatibile con le previsioni di PRG e sono stati acquisiti i necessari pareri degli Enti competenti; 

DATO ALTRESI’ ATTO che la perizia di variante rientra tra quelle ammissibili ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n° 50/2016;

VISTO il d. lgs. 50/2016;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO l`art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI i favorevoli pareri resi sulla presente proposta di atto deliberativo rispettivamente dal responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del T.U.E.L., approvato con il D.Lg. 18 agosto 2000 n. 267;

All'unanimità dei voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

     1) Le premesse sono richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE la perizia di variante suppletiva con il seguente quadro economico riutilizzando il ribasso d’asta e parte degli imprevisti già stanziati: 

lavori	€	        54.453,19	
oneri per la sicurezza	€	         1.633,60	
importo soggetto a ribasso	€	        52.819,59	
ribasso d'asta	€ 35,00% 	18.486,86	
importo netto lavori	€		35.966,33
Somme a disposizione	
IVA sui lavori	€ 10,00% 	3.596,63
spese tecniche	€	          962,04
lavori in economia	€	        9.221,48
IVA su lavori in economia	€	          922,15
Rifacimento cancello       €        2.000,00
Imprevisti	€	        2.331,37
sommano	€		19.033,67
Totale progetto	€		55.000,00

4)DI APPROVARE i seguenti elaborati tecnici:
- relazione di variante
- schema dell’atto di sottomissione
- computo metrico
- quadro comparativo
- computo metrico lavori in economia
- distinta ore per economie
- planimetria generale

3) DI DARE ATTO che la deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Quindi, stante l'urgenza di accedere all’eventuale contributo regionale, con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000).

------------

==============================================================

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Apiro, 05-02-2019	Il Responsabile del servizio 	
	F.to SALTA SIMONE	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Apiro, 05-02-2019	Il Responsabile del servizio 	
	F.to Montresor Renzo	

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO
F.to SCUPPA UBALDO                    F.to TROJANI FABIO
______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.100/A.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene  pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-02-19.

[X] Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in  data
28-02-19, Prot. n. 1609.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 28-02-19                                     F.to TROJANI FABIO

______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

E` copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 28-02-19                                          TROJANI FABIO

______________________________________________________________________

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il         

[ ] non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
[ ] non essendo soggetta a controllo eventuale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to TROJANI FABIO

______________________________________________________________________