Comune di Apiro 
                                  Provincia di Macerata 

           COPIA DI DELIBERAZIONE
              DELLA
            GIUNTA COMUNALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  26 DEL  27-02-19

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOC. CUPO - APPROVAZIONE VARIANTE
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 13:15, nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

======================================================================

SCUPPA UBALDO	SINDACO	P	
LUCHETTI RICCARDO	ASSESSORE	P	
SPARAPANI NADIA	ASSESSORE	P	

======================================================================

Assegnati n. 3  In carica n.  3 Presenti n.   3  Assenti n.   0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. TROJANI FABIO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. SCUPPA UBALDO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
- la Delibera della Giunta Regionale Marche n. 124 del 02.03.2015 "D.L. n° 104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013, DM 23.01.2015 recante: misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca _ criteri per la formazione del piano regionale triennale 2015-2017 e del piano annuale 2015 di edilizia scolastica";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 02.03.2015 con cui sono stati approvati i "Criteri per la formazione del piano regionale triennale 2015-2017 e del piano annuale 2015 di edilizia scolastica";
- il Decreto del Dirigente della PF Edilizia ed Espropriazione - EDI n. 91/EDI del 09/03/2015 della Regione Marche, con cui è stato emanato il bando e approvata la modulistica per la formazione del piano regionale triennale 2015-2017 e del piano annuale 2015 di edilizia scolastica, di cui al precedente punto;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio LL.PP. del Comune di Apiro hanno individuato come ubicazione più idonea per la realizzazione del nuovo edificio, l’area, distinta catastalmente al foglio n° 36, part. n° 181 (porzione) e 51 (porzione) del Catasto terreni del Comune di Apiro, posta a valle dell'attuale scuola materna provvisoria in loc. Cupo e di proprietà del Comune di Apiro;

VISTA la Determinazione n. 18 (R.G. n. 90) del 24.03.2015 dell'Ufficio LL.PP. con cui è stato affidato all'arch. Pacifico Ramazzotti di Apiro l'incarico professionale per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di lavori di "Costruzione della nuova scuola materna in loc. Cupo";

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2015 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di “costruzione nuova scuola materna in loc. Cupo” dell’importo totale di € 1.280.000,00 e di modifica della zonizzazione precedentemente prevista dal PRG vigente da "FS" (servizi sportivi art. 38 NTA) a "GI" (servizi per l'istruzione art. 41 NTA);

VISTA la Determinazione n. 20 (R.G. n. 101) del 30.03.2015 dell’Ufficio LL.PP. del Comune di Apiro con cui è stato approvato il progetto ESECUTIVO dei lavori di “realizzazione nuova scuola materna in loc. Cupo”, dell’importo totale di € 1.280.000,00;

VISTO il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI A MISURA:		
C.S. movimenti terra, strutture, copertura, fognature	€   450.570,82 	
C.A. Opere di completamento e finiture	€   297.524,30 	
C.I. Impiantistica elettrica e termoidraulica	€   250.226,08 	
TOTALE LAVORI A MISURA	€   998.321,20 	
Somme a disposizione		
 - IVA su lavori (10%)	€    99.832,12 	
 - spese tecniche progettazione	€    39.250,00 	
 - spese tecniche D.L. misure e contabilità	€    38.500,00 	
 - relazione geologica	€     2.500,00 	
 - operazioni catastali 	€     3.000,00 	
 - collaudo statico	€     2.500,00 	
 - sicurezza cantieri progettazione ed esecuzione	€     8.500,00 	
 - contributi su prestazioni professionali (4%)	€     3.770,00 	
 - IVA su prestazioni professionali (22%)	€    21.564,40 	
 - competenze art. 113 D.Lgs. 50/2016	€     4.991,61 	
 - polizza assicurativa verificatore	€     1.200,00 	
 - spese di gara	€     3.500,00 	
 - prove di carico pali in c.a. e prove sui materiali	€     6.000,00 	
 - imprevisti e arrotondamento 	€    46.570,67 	
Totale Somme a Disposizione	€   281.678,80 	
TOTALE GENERALE	€ 1.280.000,00 	

VISTO il Decreto n° 49 del 30.09.2016 del Dirigente della Posizione Funzionale di Edilizia ed Espropriazione della Regione Marche, con cui è stato concesso al Comune di Apiro il contributo di 1.000.000,00 di euro per la realizzazione dell’opera in oggetto;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 04.11.2016 di approvazione della variazione al Piano Triennale 2016-2018 delle Opere Pubbliche e del Piano Annuale 2016, con contestuale variazione di bilancio, con cui è stato inserito l’intervento in oggetto nell’elenco delle opere da eseguire nell’anno 2016;

RILEVATO quindi che la copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera è così prevista:

•	per € 1.000.000,00 mediante contributo della Regione Marche;
•	per € 225.900,00 mediante la cessione dell’edificio di proprietà comunale individuato al catasto del Comune di Apiro al foglio n. 6 - particella n. 33;
•	per € 54.100,00 con fondi propri;

VISTA la determina a contrarre n° 296 dell’11.11.2016 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Apiro, con cui è stato stabilito di avviare la procedura di scelta di un operatore economico per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione nuova scuola materna in loc. Cupo” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;

VISTA la Determina n° 22 del 14.11.2016 della Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Cingoli e Apiro, di approvazione del bando di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, del disciplinare di gara e dell’elenco delle ditte da invitare oltre che di indizione della gara di Appalto;

VISTO il verbale di gara del 15.12.2016 e il verbale di aggiudicazione PROVVISORIA del 19.12.2016, della gara alla ditta “Centro Impianti s.r.l.”, di Apiro (MC), che ha totalizzato 97 punti e offerto il ribasso del 2,171% sull’elenco prezzi posto a base di gara per un importo netto di € 977.297,85 di cui € 29.949,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO che il Responsabile del Procedimento, arch. Simone Salta, ha provveduto ad effettuare la verifica sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n° 50 del 18.04.2016 da parte della ditta Aggiudicataria;

VISTA la lettera della Regione Marche, serv. Infrastrutture, Trasporti ed Energia, prot. 440.50/2015/EDI/14/annualità2016 assunta al protocollo del Comune di Apiro il 31.08.2017 al n° 6725, con cui è stato trasmesso il Decreto Interministeriale n° 390 del 06.06.2017 vistato dalla Corte dei Conti in data 28.07.2017 con cui gli Enti ammessi a finanziamento vengono autorizzati alla stipula dei contratti e all’esecuzione dei lavori;

VISTA la determinazione n° 22 del 12.09.2017 della Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Cingoli e Apiro con cui è stata aggiudicata DEFINITIVAMENTE la gara di appalto per la realizzazione della nuova scuola materna in loc. Cupo alla ditta “Centro Impianti s.r.l.”, di Apiro (MC), che ha totalizzato 97 punti e offerto:

•	il ribasso del 2,171% sull’elenco prezzi posto a base di gara per un importo netto di € 977.297,85 di cui € 29.949,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
•	il prezzo di € 251.600,00 relativamente alla cessione dell’edificio di proprietà comunale individuato al catasto del Comune di Apiro al foglio n. 6 - particella n. 33;

VISTO quindi il seguente quadro economico di aggiudicazione:
LAVORI A MISURA:		
C.S. movimenti terra, strutture, copertura, fognature	€   450.570,82 	
C.A. Opere di completamento e finiture	€   297.524,30 	
C.I. Impiantistica elettrica e termoidraulica	€   250.226,08 	
TOTALE LAVORI A MISURA	€   998.321,20 	
Oneri per la sicurezza	€    29.949,64 	
Importo soggetto a ribasso	€   968.371,56 	
Ribasso d’asta 2,171%	€    21.023,35 	
Importo netto lavori	€   977.297,85	
Somme a disposizione		
 - IVA su lavori (10%)	€    97.729,79 	
 - spese tecniche progettazione	€    39.250,00 	
 - spese tecniche D.L. misure e contabilità	€    38.500,00 	
 - relazione geologica	€     2.500,00 	
 - operazioni catastali 	€     3.000,00 	
 - collaudo statico	€     2.500,00 	
 - sicurezza cantieri progettazione ed esecuzione	€     8.500,00 	
 - contributi su prestazioni professionali (4%)	€     3.770,00 	
 - IVA su prestazioni professionali (22%)	€    21.564,40 	
 - competenze art. 113 D.Lgs. 50/2016	€     4.991,61 	
 - polizza assicurativa verificatore	€     1.200,00 	
 - spese di gara	€     3.500,00 	
 - prove di carico pali in c.a. e prove sui materiali	€     6.000,00 	
 - imprevisti e arrotondamento 	€    46.570,67 	
 - ribasso d’asta	€    23.125,68	
Totale Somme a Disposizione	€   302.702,14 	
TOTALE GENERALE	€ 1.280.000,00 	

Rilevato che da una verifica congiunta con gli insegnanti e gli altri operatori della scuola materna è emersa l’esigenza di modificare alcuni spazi distributivi interni al fine di ottimizzare le attività del personale e degli alunni;

VISTA quindi la Delibera di Giunta Comunale n° 9 del 29/01/2018 con cui è stata approvata una modifica distributiva interna promossa dall’Ufficio LL.PP. che ha comportato lievi modifiche, coerentemente con il progetto originario;

RILEVATO che in fase di esecuzione sono emersi alcuni imprevisti non ipotizzabili in fase di progetto, descritti nella relazione tecnica di variante, che hanno comportato la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni rispetto a quelle preventivate.

VISTA quindi la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Federico Ciattaglia, composta dai seguenti elaborati:

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
RELAZIONI: 
- RA – V1: relazione tecnica generale 
ELABORATI ARCHITETTONICI: 
- A2 – V1: planimetria generale, profili, sistemazioni esterne 
- A3 – V1: piante e verifica standard D.M. 18/12/1975 
- A4 – V1: prospetti, sezioni, dettagli costruttivi 
- A5 – V1: planimetria generale – schema impianti 
ELABORATI STRUTTURALI: 
- S12 – V1: Fascicolo relazioni e calcoli strutturali 
- S13 – V1: carpenteria copertura – nodi unioni legno 
- S14 – V1: particolari costruttivi nodi legno 
- S15 – V1: esecutivi scala esterna in acciaio 
- S16 – V1: esecutivi muri esterni e recinzioni 
- S17 – V1: Piano di manutenzione 
ELABORATI IMPIANTI: 
- IM1 - V1: Meccanici – adduzione e distribuzione principale 
- IM2 - V1: Meccanici – schema fluido termovettore 
- IM3 - V1: Meccanici – schema funzionale impianto termico 
- IM4 - V1: Meccanici – schema ventilazione meccanica controllata 
- IM5 - V1: Meccanici – impianto pannelli radianti 
- IM6 - V1: Meccanici – impianto idrico sanitario 
- IE1 - V1: Schema planimetrico impianto luce 
- IE2 - V1 Schema planimetrico impianto forza motrice 
- IE3 - V1 Schema planimetrico impianti elettrici speciali 
- IE4 - V1 Schemi unifilari 
- IE5 - V1 Schemi regolazione 
- IE6 - V1 Schema planimetrico impianto elettrico esterno e di terra 
ELABORATI TECNICO ECONOMICI: 
- CG1 – V1: computo metrico generale 
- CG2 – V1: elenco prezzi – analisi nuovi prezzi 
- CG3 – V1: quadro economico – schema parcella professionale

VISTO che dai suddetti elaborati scaturisce il seguente quadro economico di variante:	
LAVORI A MISURA:		
C.S. movimenti terra, strutture, copertura, fognature	€   459.685,97 	
C.A. Opere di completamento e finiture	€   340.401,81 	
C.I. Impiantistica elettrica e termoidraulica	€   222.932,77 	
TOTALE LAVORI A MISURA	€ 1.023.020,55 	
Oneri per la sicurezza	€    30.690,62 	
Importo soggetto a ribasso	€   992.329,93 	
Ribasso d’asta 2,171%	€    21.543,48 	
Importo netto lavori	€ 1.001.477,07 	
Somme a disposizione		
 - IVA su lavori (10%)	€   100.147,71 	
 - progettazione generale ed esecutiva	€    39.250,00 	
 - direzione lavori, misure e contabilità	€    38.500,00 	
 - spese tecniche perizia di variante	€    20.000,00	
 - prestazioni specialistiche – collaudo statico	€     2.500,00	
 - sicurezza cantieri progettazione ed esecuzione	€     6.800,00 	
 - contributi su prestazioni professionali (4%)	€     4.282,00 	
 - IVA su prestazioni professionali (22%)	€    24.493,04 	
 - operazioni catastali 	€     1.409,10 	
 - relazione geologica 	€     3.111,00 	
 - competenze art. 113 D.Lgs. 50/2016	€     5.115,10 	
 - polizza assicurativa verificatore	€         0,00 	
 - spese di gara	€       375,00 	
 - prove di carico pali in c.a. e prove sui materiali	€     4.604,28 	
 - allaccio metano	€       561,20 	
 - allaccio ENEL	€     3.076,44 	
 - imprevisti e arrotondamento	€       600,23 	
 - ribasso d’asta sui lavori 	€    23.697,83 	
Totale Somme a Disposizione	€   278.522,93 	
TOTALE GENERALE	€ 1.280.000,00 	

RILEVATO che, come si evince dal raffronto dei quadri economici, non vi sono costi aggiuntivi per l’Amministrazione;

DATO ATTO che la suddetta variante risulta tra quelle ammissibili ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lette. c) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s. m. e i..

DATO ATTO altresì che per l’approvazione della suddetta variante non è necessario acquisire il parere preventivo di altri Enti;

VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;

VISTO il d. lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Ministero Interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28 febbraio 2019;

	VISTO il Decreto del Ministero Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte dei comuni e conseguentemente autorizzato fino a tale termine l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del d. lgs. 267/2000;

VISTI i pareri del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Apiro, per quanto riguarda la regolarità tecnica, e del Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con il D.Lg. 18 agosto 2000 n. 267;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1)	Le premesse sono ivi richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)	DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Federico Ciattaglia, composta dai seguenti elaborati:

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
RELAZIONI: 
- RA – V1: relazione tecnica generale 
ELABORATI ARCHITETTONICI:
- A2 – V1: planimetria generale, profili, sistemazioni esterne 
- A3 – V1: piante e verifica standard D.M. 18/12/1975 
- A4 – V1: prospetti, sezioni, dettagli costruttivi 
- A5 – V1: planimetria generale – schema impianti 
ELABORATI STRUTTURALI:
- S12 – V1: Fascicolo relazioni e calcoli strutturali 
- S13 – V1: carpenteria copertura – nodi unioni legno 
- S14 – V1: particolari costruttivi nodi legno 
- S15 – V1: esecutivi scala esterna in acciaio 
- S16 – V1: esecutivi muri esterni e recinzioni 
- S17 – V1: Piano di manutenzione 
ELABORATI IMPIANTI:
- IM1 - V1: Meccanici – adduzione e distribuzione principale 
- IM2 - V1: Meccanici – schema fluido termovettore 
- IM3 - V1: Meccanici – schema funzionale impianto termico 
- IM4 - V1: Meccanici – schema ventilazione meccanica controllata 
- IM5 - V1: Meccanici – impianto pannelli radianti 
- IM6 - V1: Meccanici – impianto idrico sanitario 
- IE1 - V1: Schema planimetrico impianto luce 
- IE2 - V1 Schema planimetrico impianto forza motrice 
- IE3 - V1 Schema planimetrico impianti elettrici speciali 
- IE4 - V1 Schemi unifilari 
- IE5 - V1 Schemi regolazione 
- IE6 - V1 Schema planimetrico impianto elettrico esterno e di terra 
ELABORATI TECNICO ECONOMICI: 
- CG1 – V1: computo metrico generale 
- CG2 – V1: elenco prezzi – analisi nuovi prezzi 
- CG3 – V1: quadro economico – schema parcella professionale

3)	DI APPROVARE il seguente quadro economico di variante:	
LAVORI A MISURA:		
C.S. movimenti terra, strutture, copertura, fognature	€   459.685,97 	
C.A. Opere di completamento e finiture	€   340.401,81 	
C.I. Impiantistica elettrica e termoidraulica	€   222.932,77 	
TOTALE LAVORI A MISURA	€ 1.023.020,55 	
Oneri per la sicurezza	€    30.690,62 	
Importo soggetto a ribasso	€   992.329,93 	
Ribasso d’asta 2,171%	€    21.543,48 	
Importo netto lavori	€ 1.001.477,07 	
Somme a disposizione		
 - IVA su lavori (10%)	€   100.147,71 	
 - progettazione generale ed esecutiva	€    39.250,00 	
 - direzione lavori, misure e contabilità	€    38.500,00 	
 - spese tecniche perizia di variante	€    20.000,00	
 - prestazioni specialistiche – collaudo statico	€     2.500,00	
 - sicurezza cantieri progettazione ed esecuzione	€     6.800,00 	
 - contributi su prestazioni professionali (4%)	€     4.282,00 	
 - IVA su prestazioni professionali (22%)	€    24.493,04 	
 - operazioni catastali 	€     1.409,10 	
 - relazione geologica 	€     3.111,00 	
 - competenze art. 113 D.Lgs. 50/2016	€     5.115,10 	
 - polizza assicurativa verificatore	€         0,00 	
 - spese di gara	€       375,00 	
 - prove di carico pali in c.a. e prove sui materiali	€     4.604,28 	
 - allaccio metano	€       561,20 	
 - allaccio ENEL	€     3.076,44 	
 - imprevisti e arrotondamento	€       600,23 	
 - ribasso d’asta sui lavori 	€    23.697,83 	
Totale Somme a Disposizione	€   278.522,93 	
TOTALE GENERALE	€ 1.280.000,00 	

4) DI DARE ATTO che, come si evince dal raffronto dei quadri economici, non vi sono costi aggiuntivi per l’Amministrazione;

5) DI DARE ATTO che la suddetta variante risulta tra quelle ammissibili ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lette. c) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s. m. e i..

6) DI DARE ATTO altresì che per l’approvazione della suddetta variante non è necessario acquisire il parere preventivo di altri Enti;

7) DI DARE ATTO che l'approvazione del progetto di VARIANTE ha i medesimi effetti della concessione edilizia ai sensi dell'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993 n° 398 convertito nella L. 4 dicembre 1993 n° 493, come sostituito dall'art. 2 comma 60 della L. 23 dicembre 1996 n° 662, essendo l'opera di cui trattasi conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici;

8) DI DARE ATTO che la spesa per la realizzazione della nuova scuola materna in loc. Cupo trova copertura nell’ambito dei seguenti stanziamenti del bilancio 2016-2018:
•	- per € 1.000.000,00 al cap. 2644, Costruzione nuova scuola materna (Contributo Regionale), annualità 2017, impegno n. 638/2016;
•	- per € 225.900,00 al cap. 2645 Costruzione nuova scuola materna (fondi propri), annualità 2017, impegno n. 640/2016;
•	- per € 54.100,00 al cap. 2645 Costruzione nuova scuola materna (fondi propri), annualità 2016, impegno n. 639/2016;

9) DI DARE ATTO che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 13 c. 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i. e art. 27 del D. Lgs. 50/2016, l'approvazione della variante equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza delle realizzande opere;

10) DI DARE ATTO che la deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Quindi, stante l’urgenza di dover provvedere, con espressa votazione all’unanimità dei presenti, nei modi di legge,

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000).

==============================================================

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Apiro, 27-02-2019	Il Responsabile del servizio 	
	F.to PIERSIGILLI CARLO	

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Apiro, 27-02-2019	Il Responsabile del servizio 	
	F.to SALTA SIMONE	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Apiro, 27-02-2019	Il Responsabile del servizio 	
	F.to Montresor Renzo	

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO
F.to SCUPPA UBALDO                    F.to TROJANI FABIO
______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.126/A.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene  pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21-03-19.

[X] Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in  data
21-03-19, Prot. n. 2223.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 21-03-19                                     F.to TROJANI FABIO

______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

E` copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 21-03-19                                          TROJANI FABIO

______________________________________________________________________

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il         

[ ] non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
[ ] non essendo soggetta a controllo eventuale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to TROJANI FABIO

______________________________________________________________________