Comune di Apiro 
                                  Provincia di Macerata 

           COPIA DI DELIBERAZIONE
              DELLA
            GIUNTA COMUNALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  41 DEL  23-03-18

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

CASA DI RIPOSO - RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - APPROVAZIONE
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 12:30, nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

======================================================================

SCUPPA UBALDO	SINDACO	P	
LUCHETTI RICCARDO	ASSESSORE	P	
SPARAPANI NADIA	ASSESSORE	P	

======================================================================

Assegnati n. 3  In carica n.  3 Presenti n.   3  Assenti n.   0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. TROJANI FABIO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. SCUPPA UBALDO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la determina Settore Tecnico n. 152 del 13.07.2017 con la quale è stato affidato l’incarico professionale allo Studio “Scuppa Engeenering” per la progettazione e direzione lavori dell’intervento di RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA CASA DI RISPOSO DI APIRO, con assunzione della spesa complessiva pari ad € 1.903,20 al cap. 2753 Imp. n. 546/2017;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 111 del 15.09.2017, con la quale si è approvato il progetto esecutivo di RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA CASA DI RISPOSO DI APIRO, redatto dallo studio Associato di Progettazione “Scuppa Engineering”, per l’importo dei lavori e forniture di € 12.424,04 e complessivo di € 16.000,00;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 121 del 29.09.2017, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA CASA DI RISPOSO DI APIRO, redatto dallo studio Associato di Progettazione “Scuppa Engineering”, per l’importo dei lavori e forniture di € 14.850,16 e complessivo di € 18.500,00;

    EVIDENZIATO che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori alla ditta Termotecnica F.lli Pavani &. C. di cui alla determina Settore Tecnico n. 240 del 11.11.2017, ed il protrarsi della stagione invernale, in fase di esecuzione dei lavori è emerso la necessità di apportare alcune variazioni progettuali di seguito specificate, comportanti anche un lieve aumento dei lavori: 
- spostamento caldaie da centro locale alla parete;
- fornitura e posa in opera gruppo per riempimento automatico;
- modifica canna fumaria;
- realizzazione nuovo impianto elettrico all’interno della centrale;
- installazione di defangatore magnetico per pulizia acqua del circuito idraulico;
- liquido per lavaggio impianto;

DATO ATTO che il progettista e DD.LL. Ing. Scuppa Stefano ha proceduto alla presentazione di specifica variante in corso d’opera con conseguente adeguamento degli elaborati progettuali e del quadro tecnico economico con aumento dei lavori ad € 16.430,11 e complessiva di € 18.500,00 oltre alle spese progettuali, composta dai seguenti elaborati tecnici:
-	Elaborato V01 – Relazione tecnica di variante;
-	Elaborato V02 – Elaborato grafico;
-	Elaborato V03 – Elenco prezzi;
-	Elaborato V04 - Computo metrico;
-	Elaborato V05 - Quadro economico;

DATO ATTO che la spesa per l’attuazione del progetto ammonta ad € 18.500,00 per lavori ed € 1.903,20 per spese progettuali e direzioni lavori e quindi complessiva di € 20.403,20 e che la stessa trova copertura finanziaria suddivisa come segue:
- € 16.596,80 al Cap. 2752 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA CASA RIPOSO, imp. 724/2017;
- € 1.903,20 al Cap. 2545 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO (ONERI);
- € 1.903,20 al cap. 2753 Imp. n. 546/2017;

VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;

VISTI i pareri del Responsabile Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con il D.Lg. 18 agosto 2000 n. 267;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE la variante in corso d’opera e suppletiva al progetto esecutivo di RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA CASA DI RISPOSO DI APIRO, redatto dallo studio Associato di Progettazione “Scuppa Engineering”, per l’importo dei lavori e forniture di € 16.430,11 + iva 10%;

2) DI APPROVARE i seguenti elaborati progettuali dell’intervento:
-	Elaborato V01 – Relazione tecnica di variante;
-	Elaborato V02 – Elaborato grafico;
-	Elaborato V03 – Elenco prezzi;
-	Elaborato V04 - Computo metrico;
-	Elaborato V05 - Quadro economico;

3) DI DARE ATTO che la spesa del progetto ammontante ad € 18.500,00 per lavori, € 1.903,20 per spese progettuali e direzioni lavori e quindi complessivamente € 20.403,20, trova copertura nell’ambito dei seguenti stanziamenti dell’annualità 2018 del bilancio di previsione 2018-2020:
- quanto a € 16.596,80 al Cap. 2752 “Manutenzione straordinaria centrale termica casa di riposo”;
- quanto a € 1.903,20 al cap. 2753 “Incarico professionale per progetto manutenzione straordinaria centrale termica casa di riposo”;
- quanto a € 1.903,20 al Cap. 2545 “Manutenzione straordinaria del patrimonio”;

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con voti unanimi, legalmente espressi;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la Delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

==============================================================
Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Apiro, 23-03-2018	Il Responsabile del servizio 	
	F.to Montresor Renzo	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Apiro, 23-03-2018	Il Responsabile del servizio 	
	F.to PIERSIGILLI CARLO	

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO
F.to SCUPPA UBALDO                    F.to TROJANI FABIO
______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.787/A.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene  pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-09-18.

[X] Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in  data
24-09-18, Prot. n. 7400.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 24-09-18                                     F.to TROJANI FABIO

______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

E` copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 24-09-18                                          TROJANI FABIO

______________________________________________________________________

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il         

[ ] non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
[ ] non essendo soggetta a controllo eventuale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to TROJANI FABIO

______________________________________________________________________