Comune di Apiro 
                                  Provincia di Macerata 

           COPIA DI DELIBERAZIONE
              DELLA
            GIUNTA COMUNALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  62 DEL  11-05-18

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

RIRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO SULLA SRADA COMUNALE SAN LORENZO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  undici del mese di maggio alle ore 12:00, nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

======================================================================

SCUPPA UBALDO	SINDACO	P	
LUCHETTI RICCARDO	ASSESSORE	P	
SPARAPANI NADIA	ASSESSORE	P	

======================================================================

Assegnati n. 3  In carica n.  3 Presenti n.   3  Assenti n.   0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. TROJANI FABIO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. SCUPPA UBALDO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO CHE:
- diverse infrastrutture comunali sono state danneggiate a dagli eventi alluvionali di marzo 2015;
- tra gli altri danneggiamenti è stato riscontrato anche il crollo parziale del muro di contenimento sulla strada comunale S. Lorenzo;
- la Regione Marche, con Decreto del Commissario Delegato n° 4/CDM15 del 13.04.2016 ha ammesso a finanziamento l’intervento di “ripristino del muro di contenimento sulla strada comunale S. Lorenzo” per un importo di € 50.000,00;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 72 del 30 luglio 2016, di approvazione del progetto preliminare e definitivo dei lavori, redatto dall’ing. Giorgio Canella dell’importo totale di € 50.000,00, di cui € 39.987,92 per lavori ed € 10.012,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTA la validazione del progetto esecutivo redatta dall’arch. Simone Salta, Responsabile del procedimento e verificatore dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;

VISTA la Determinazione n° 212 del 4 agosto 2016, dell’Ufficio Tecnico del Comune di Apiro, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi da quale scaturiva la spesa di € 50.000,00, come da quadro economico di spesa che segue:

Lavori a misura ................. €    39.987,92
Oneri per la sicurezza .......... €     1.199,64
Importo soggetto a ribasso....... €    38.788,28
Ribasso d’asta .................. €         0,00
- importo lavori ................ €                 39.987,92
somme a disp. dell'Amm.ne:
- IVA su lavori e forniture 10%...€     3.998,79
- Spese tecniche..................€     2.799,15
- CNPAIA 4% ......................€       111,97
- IVA su spese tecniche 22%.......€       640,45
- Art. 92 D. Lgs. 163/2006........€       199,94
- collaudo .......................€       591,11
- CNPAIA 4% ......................€        23,64
- IVA su collaudo.................€       135,25
- danni e frutti pendenti.........€       150,00
- imprevisti .................... €     1.011,78
sommano ......................... €                 10.012,08
totale progetto ................. €                 50.000,00

VISTA la Determinazione n° 174 del 22 agosto 2017, dell’Ufficio Tecnico del Comune di Apiro, di approvazione del bando di gara, dell’elenco delle ditte da invitare e di indizione della gara di appalto;

VISTO il verbale di gara del 14 settembre 2017, dal quale è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta “S.G.F. di Scarponi Ivano & C. S.r.l.”, di Treia (MC), che aveva offerto il ribasso del 25,56% sull’elenco prezzi posto a base di gara per un importo netto di € 30.073,64 di cui € 1.199,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO che il Responsabile del Procedimento, arch. Simone Salta, ha proceduto ad effettuare la verifica sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n° 50 del 18.04.2016;

VISTA la Determinazione n° 205 del 5 ottobre 2017, dell’Ufficio Tecnico del Comune dei Apiro, con la quale i lavori in parola sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta “S.G.F. di Scarponi Ivano & C. S.r.l.”, di Treia (MC), ed è stato approvato il nuovo quadro economico di spesa come di seguito riportato: 

Lavori a misura ................. €    39.987,92
Oneri per la sicurezza .......... €     1.199,64
Importo soggetto a ribasso....... €    38.788,28
Ribasso d’asta 25,56%............ €     9.914,28
- importo lavori ................ €                 30.073,64
somme a disp. dell'Amm.ne:
- IVA su lavori e forniture 10%...€     3.007,36
- Spese tecniche..................€     2.799,15
- CNPAIA 4% ......................€       111,97
- IVA su spese tecniche 22%.......€       640,45
- Art. 92 D. Lgs. 163/2006........€       199,94
- collaudo .......................€       591,11
- CNPAIA 4% ......................€        23,64
- IVA su collaudo.................€       135,25
- danni e frutti pendenti.........€       150,00
- imprevisti .................... €     1.361,78
- ribasso d’asta ................ €    10.905,71
sommano ......................... €                 19.926,36
totale progetto ................. €                 50.000,00

VISTA la richiesta formulata dal Comune di Apiro alla Regione Marche (prot. n. 3223 del 21 aprile 2018), di autorizzazione all’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara, in quanto a causa delle abbondati nevicate e piogge del febbraio scorso si è dissestata un’ulteriore porzione del muro già oggetto di intervento, quindi si è ritenuto necessario intervenire sullo stesso allo scopo di garantire la sicurezza sulla strada comunale San Lorenzo; 

VISTA la nota della Regione Marche - prot. 0445626 del 23 aprile 2018 – di approvazione della variante;

VISTA la perizia di variante, redatta dall’Ing. Giorgio Canella, composta dai seguenti elaborati:

-relazione tecnica
-documentazione fotografica;

VISTO il nuovo quadro economico di spesa che deriva dall’impiego delle economie derivanti dal ribasso di gara:

Lavori a misura ................. €    51.636,34
Oneri per la sicurezza .......... €     1.549,09
Importo soggetto a ribasso....... €    50.087,25
Ribasso d’asta 25,56%............ €     12.802,30
- importo lavori netto........... €                 38.834,04
somme a disp. dell'Amm.ne:
- IVA su lavori e forniture 10%...€     3.883,40
- Spese tecniche 7%...............€     3.614,54
- CNPAIA 4% ......................€       144,58
- IVA su spese tecniche 22%.......€       827,01
- Art. 92 D. Lgs. 163/2006........€       258,18
- relazione geologica
- collaudo .......................€       750,00
- imprevisti .................... €     1.688,25
- totale somme a disposizione.... €                 11.165,96
totale progetto ................. €                 50.000,00

DATO ATTO che la suddetta perizia di variante è ammissibile ai sensi del comma 1, lett. c), punto 1,) dell’art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con il D.Lg. 18 agosto 2000 n. 267;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE la perizia di variante, redatta dall’Ing. Giorgio Canella, composta dai seguenti elaborati:

-relazione tecnica
-documentazione fotografica

2) DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dei lavori di cui trattasi che deriva dalla perizia di variante:

Lavori a misura ................. €    51.636,34
Oneri per la sicurezza .......... €     1.549,09
Importo soggetto a ribasso....... €    50.087,25
Ribasso d’asta 25,56%............ €     12.802,30
- importo lavori netto........... €                 38.834,04
somme a disp. dell'Amm.ne:
- IVA su lavori e forniture 10%...€     3.883,40
- Spese tecniche 7%...............€     3.614,54
- CNPAIA 4% ......................€       144,58
- IVA su spese tecniche 22%.......€       827,01
- Art. 92 D. Lgs. 163/2006........€       258,18
- relazione geologica
- collaudo .......................€       750,00
- imprevisti .................... €     1.688,25
- totale somme a disposizione.... €                 11.165,96
totale progetto ................. €                 50.000,00

3) DI DARE ATTO che la suddetta perizia di variante è ammissibile ai sensi del comma 1, lett. c), punto 1), dell’art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016;

4) DI DARE ATTO che l'approvazione e la validazione del progetto di VARIANTE ai sensi dell’art.7 del DPR 380/01 determina che l'opera di cui trattasi è conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici;

5) DI DARE ATTO che il progetto dei lavori di “Ripristino del muro di contenimento sulla strada comunale S. Lorenzo” è integralmente finanziato dalla Regione Marche, giusto decreto del Commissario delegato n° 4/CDM15 del 13 aprile 2016, accertato in entrata al Cap. 566 e con imputazione in spesa al Cap. 2849 del bilancio di previsione 2018;

6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Quindi, stante l'urgenza di procedere con l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000).

------------

==============================================================

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Apiro, 09-05-2018	Il Responsabile del servizio 	
	F.to PIERSIGILLI CARLO	

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Apiro, 09-05-2018	Il Responsabile del servizio 	
	F.to Montresor Renzo	

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO
F.to SCUPPA UBALDO                    F.to TROJANI FABIO
______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.866/A.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene  pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-10-18.

[X] Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in  data
05-10-18, Prot. n. 7831.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 05-10-18                                     F.to TROJANI FABIO

______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

E` copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 05-10-18                                          TROJANI FABIO

______________________________________________________________________

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il         

[ ] non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
[ ] non essendo soggetta a controllo eventuale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to TROJANI FABIO

______________________________________________________________________