Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI

n.  10           del  04-02-2017

Oggetto:	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. GINOBILI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  quattro del mese di febbraio  nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 23/01/2017, prot. N. 608, emanato ai sensi degli artt. 107 c. 2 e 3 e 109 c.2 del D.lgs. 267/2000, con il quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità dell’Area Lavori Pubblici;
RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.lgs n. 267/2000 per la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
	Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
	Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23.07.2015, atto esecutivo ai sensi di legge, con la quale si procedeva ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017,
Richiamati i seguenti atti di riferimento:
•	OPCM n. 3274 del 20/03/2003:
•	DGR n. 1616/2005 con la qual la Regione Marche ha inserito nell’elenco degli interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici la scuola elementare di Petriolo;
•	L’avviso di gara n. 391 del 24/01/2006 per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria, relativo alla progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza relativi all’ Adeguamento sismico Scuola Elementare “G. Ginobili sita in via Leopardi; 
•	D.G.C. n. 8 del 13/02/2006 con la quale si approvava il verbale di gara redatto in data 07/02/2006 dal quale risulta che l’incarico relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza è stato affidato all’ing. Enrico Mariotti dello studio Promar Engineering srl con sede in Colmurano;
Dato atto che con deliberazione della C.C. n. 27 del 23/07/2015 è stato approvato il programma triennale delle OO.PP. 2015-2017, con le previsioni, nell’elenco annuale, di realizzare il progetto di Adeguamento sismico Scuola Elementare “G. Ginobili; per l’importo complessivo di euro 455'467,62;
Richiamata la DGC n. 91 del 27/09/2014 con la quale si approvava, solo dal punto di vista tecnico, la documentazione progettuale esecutiva inerente “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE “G. GINOBILI” stilata dall’Ing. Enrico Mariotti di Colmurano validata dalla Regione Marche Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la Protezione Civile – Rischi Sismico ed Opere Pubbliche d’Emergenza con nota prot.598348/19/10/2009, per un importo generale d’intervento pari a Euro 455.467,62, di cui Euro 308.122,68 di lavori (di cui Euro 186.504,31 per opere strutturali, Euro 45.425,67 lavori di finitura connessi inerenti riduzione dispersione termica delle superfici esterne, Euro 76.192,70 per altri lavori di finitura connessi) e Euro 147.344,94 per somme a disposizione;
Vista la DGR Marche n.124 del 02/03/2015 con la quale sono stati approvati i criteri per l’individuazione degli interventi da inserire nel piano regionale triennale 2015-2017 ed annuale 2015 di edilizia scolastica e per il riparto delle risorse assegnate alla Regione Marche ai sensi dell’art.2 comma 3 del DM 23/01/2015;
Considerato che:
•	con Decreto del Dirigente della PF Edilizia ed Espropriazione n. 9/EDI del 09/03/2015 ai sensi dell’art.10 della Legge 128/2013, DM 23/01/2015, DGR 124 del 02/03/2015 è stato approvato il bando e la relativa modulistica per la formazione del piano regionale triennale 2015-2017 e del piano annuale 2015 di edilizia scolastica;
•	con D.G.C. n.39 del 23/03/2015 si approvava la modulistica per la richiesta di concessione contributo ai sensi degli atti summenzionati per l’intervento di “Adeguamento sismico della scuola primaria G. Ginobili” con domanda inoltrata in data 26/03/2015 prot.1593;
Visti: 
•	il Decreto del Dirigente della PF Edilizia ed Espropriazione n.17/EDI del 30/04/2015, con il quale è stata approvata la graduatoria degli interventi in oggetto per i quali è stata avanzata richiesta di contributo, in cui nell’allegato “A” al quinto posto risulta inserito il Comune di Petriolo per un costo totale di intervento pari ad Euro 455’467,62, con finanziamento richiesto pari ad Euro 228’467,62, nell’allegato “B” rubricato Piano annuale del fabbisogno finanziario per l’edilizia scolastica 2015 è inserito al settimo posto, seconda posizione per la Provincia di Macerata, il Comune di Petriolo;
•	la convenzione Rep. Reg. Marche n. 262 del 11/08/2016 sottoscritta dal sindaco di Petriolo e la Regione Marche per la realizzazione del progetto “Adeguamento sismico scuola primaria G. Ginobili” (CUP G31E14000650005) ex D.L. n. 104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013 - DGR n 123/2015, con l’utilizzo delle risorse finanziarie tratte dal mutuo contratto dalla Regione con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 29 dicembre 2015, Rep. n. 1307;
Considerato che:
•	con DDG n.332 del 10/12/2014 del Ministero dell’Istruzione, dell’Istruzione e della Ricerca il Comune di Petriolo è inserito al punto 12 dell’allegato A, quale beneficiario del contributo pari ad Euro 227.000,00 per l’intervento di Adeguamento sismico scuola primaria, a seguito di istanza avanzata in data 12/11/2014 prot.5416 ai sensi del Decreto n.267 del 10/10/2013 del MIUR;
•	con comunicazione assunta al prot.6187 del 30/12/2014 il MIUR comunica a questo Ente il contenuto del DDG n.332 del 10/12/2014;
•	con DGC n. 87 del 14/09/2015 si prendeva atto dei finanziamenti sopra citati e si forniva, quale atto di indirizzo, al Responsabile del Procedimento, di attivare con urgenza la gara d’appalto dei lavori di cui in oggetto, con procedura negoziata, invitando almeno 5 soggetti con idonea qualificazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del progetto esecutivo approvato con DGC n. 91 del 27/09/2014, applicando la riduzione dei termini e tutte le altre semplificazioni previste e disciplinate dall’art. 34 della Legge 164/2014;

Dato atto che:
•	la somma di € 3'081,23 inserita nel quadro economico dell’intervento in parola quale “incentivo per la progettazione spese tecniche (art. 92 D. Lgs. 163/2006)” è da intendersi “fondo per la progettazione e l’innovazione” accantonato ai sensi dell’art. 93, comma 7 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., introdotto dall'art. 13-bis della Legge n. 114 del 2014;

•	il CUP relativo al progetto è: G31E14000650005;

Richiamati:
•	la Det. Area Tecnica n. 147 del 24/12/2015 con la quale veniva approvato l’esito provvisorio della gara a favore della ditta Edilizia AZZACCONI srl di Sa Ginesio (MC) e i verbali delle sedute della commissione giudicatrice;
•	la Det. Area Lavori Pubblici n. 3 del 14/04/2016 con la quale venivano aggiudicati i alla ditta Edilizia AZZACCONI srl di San Ginesio (MC) per l’importo contrattuale di € 273'659,06, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza di € 8'439,07, CIG: 645655019D;

Rilevato che l’offerta economica presentata dal soggetto risultato aggiudicatario provvisorio ammonta:
•	ad € 265'219,99 per l’esecuzione dei lavori stessi al quale va sommato l’importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta in sede di gara, pari ad € 8'439,07, per un ribasso unico offerto del 11,500% sul prezzo globale dell’appalto posto a base di gara pari ad € 299'683,61;

Dato, pertanto, atto:
•	che l’importo contrattuale ammonta ad € 273'659,06 per i lavori comprensivo degli oneri relativi alla progettazione esecutiva di € 8'439,07;
•	dell’offerta tecnica presentata dalla Ditta Edilizia Azzacconi srl;
•	il contratto di appalto Rep. N. 1194 del 11/08/2016 e registrato a Macerata il 29/08/2016 Serie 1T, N. 8029;
•	che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Nazareno Sagretti, Responsabile Area LL.PP. del Comune di Petriolo;

VISTO:
la determina del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 2 del 14/04/2016 veniva costituito apposito ufficio di direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 147. Del D.P.R. n. 207/2010, aventi le seguenti funzioni:
•	direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, come da D.G.M. n. 8 del 13/02/2006;
•	attività di supporto al RUP,
•	attività di controllo progressione lavori mediante ispezione di cantiere,
•	aggiornamento e controllo post-opera mediante elaborazione di specifica relazione geologico/geotecnica;
•	la Det. LL.PP. n. 3 del 14/04/2016 con la quale sono stati affidati i lavori di “Adeguamento sismico scuola primaria G. Ginobili sita in via G. Leopardi n.1 - PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI LEGGE 289 DEL 21/12/2002 - ART. 80 - COMMA 21” – CUP G31E14000650005 - CIG 645655019D, alla ditta EDILIZIA AZZACCONI srl VIA ALVANETO N. 35 62026 SAN GINESIO – P.I. 00379100431 - ediliziazzacconi@pec.it;
•	la Det. LL.PP. n. 10 del 27/08/2016 con la quale sono stati affidati i seguenti servizi professionali e lavori:
•	ing. Andrea Linardelli di Macerata: collaudo statico;
•	geom. Massimo Carletti di Macerata: aggiornamento/adeguamento accatastamento edifico scolastico;
•	ditta Edlizia Azzacconi srl di San Ginesio (MC): lavori in economia relativi a lavori propedeutici l’inizio dell’attività scolastica;
	Preso atto che.
•	l’inizio dei lavori è stato verbalizzato in data 01/08/2016,
•	con det. LL.PP. n. 11 del 15/09/2016 è stata liquidata, alla ditta appaltatrice, l’anticipazione di € 60'204,99;
•	con det. LL.PP. n. 23 del 03/12/2016 sono state liquidate quote di spese tecniche per complessivi € 12'177,60;
VISTO lo stato di avanzamento N. 1 dei lavori al 05/01/2017, predisposto dal Direttore dei Lavori ing. Mariotti Enrico, per l’importo netto di € 73'597,35, approvato e liquidato con det. LL.PP. n. 4 del 28/01/2017

VISTO lo stato di avanzamento N. 2 dei lavori al 03/02/2017, predisposto dal Direttore dei Lavori ing. Mariotti Enrico, per l’importo netto di € 65'450,80 oltre iva per un importo totale di € 71'995,88, approvato e liquidato con det. LL.PP. n. 8 del 04/02/2017;

	VISTA la perizia tecnica di variante n. 1, redatta dal direttore dei Lavori ing. E. Mariotti, resasi necessaria a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016 con conseguente rimodulazione dell’offerta tecnica della ditta, e completa dai seguenti elaborati:
•	relazione tecnica illustrativa di variante,
•	elenco prezzi unitari di variante,
•	computo metrico estimativo di variante,
•	QTE,
•	quadro di confronto progetto-variante,
•	Relazione strutturale,
•	Tavola interventi – piante,
•	Tavola interventi – prospetti,
•	Tavola interventi – sezioni,
•	cerchiature,
•	stato modificato – piante,
•	stato modificato – prospetti,
•	stato modificato – sezioni,
•	schema atto sottomissione.

CONSIDERATO inoltre che:
•	la variante riguarda esplicitamente la parte tecnico/costruttiva mediante sostituzione ed integrazione di lavorazioni finalizzate alla riparazione e all’adeguamento sismico e che non comporta oneri economici aggiuntivi contrattuali, confermando l’importo del contratto originario pari a nette € 273'659,06;
•	Non può essere considerata variante in corso d'opera in quanto gli interventi disposti dal direttore dei lavori, anche se non risolve solo aspetti di dettaglio, è finalizzata a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento del bene stesso in relazione agli eventi sismici ancora in corso,  non modifica qualitativamente l'opera e non comporta significative variazioni del valore di ogni singola categoria di lavorazione, rimanendo inoltre invariato l'importo complessivo contrattuale;

Atteso che la Variante tecnica è meritevole di approvazione;

Dato, pertanto, atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Nazareno Sagretti, Responsabile Area LL.PP. del Comune di Petriolo;

	Ritenuto quindi potersi procedere in merito;
	Attesa la propria competenza nell’adozione del presente atto;

Vista e richiamata la normativa vigente in materia:
•	D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
•	Legge n. 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
•	D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
•	D.P.R. 207/2010 e s.m.i., Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore;
•	Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., Piano straordinario contro le mafie;
•	D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03-08-2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
•	Regolamenti comunali vigenti;

		Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della spesa inerente;

DETERMINA
1)	La premessa narrativa viene qui richiamata e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2)	di APPROVARE ed AUTORIZZARE la Variante tecnica n. 1, redatta dal direttore dei Lavori ing. E. Mariotti, resasi necessaria a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016 con conseguente rimodulazione dell’offerta tecnica della ditta, e completa dai seguenti elaborati:
•	relazione tecnica illustrativa di variante,
•	elenco prezzi unitari di variante,
•	computo metrico estimativo di variante,
•	QTE,
•	quadro di confronto progetto-variante,
•	Relazione strutturale,
•	Tavola interventi – piante,
•	Tavola interventi – prospetti,
•	Tavola interventi – sezioni,
•	cerchiature,
•	stato modificato – piante,
•	stato modificato – prospetti,
•	stato modificato – sezioni,
•	schema atto sottomissione.
3)	Di confermare l’imputazione di spesa al cap. 2620 art. 2, imp. 154;
4)	DI DARE atto che il Servizio Risorse finanziarie dell’Ente ha verificato il permanere delle condizioni di compatibilità della spesa, previsto dalla vigente normativa;
5)	DI TRASMETTERE la presente determinazione a:
•	alla Segreteria, Affari Generali, per gli adempimenti previsti dallo Statuto.
•	al Servizio Finanziarie per gli adempimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Sagretti Nazareno	

_____________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al           
lì,           

	IL MESSO COMUNALE	
	GIGLIOLA TEMPERINI