Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI

n.  9           del  18-02-2019

Oggetto:	AREA PALAZZO "DE NOBILI" - LAVORI DI RIMOZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA E DEL VERDE PRESENTE ALL'INTERNO DELL'AREA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  diciotto del mese di febbraio  nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto del Sindaco n. 13 del 02.07.2018 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con atto C.C. n. 3 del 14/03/2008, esecutivo ai sensi di legge;
CONSIDERATO, che ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00 senza dover ricorrere alle forme di aggregazione e centralizzazione della committenza;
ACCERTATO che all’interno del Centro Storico ed a ridosso delle Mura Castellane è presente la particolare situazione del Palazzo “De Nobili”, comunemente denominato “Palazzaccio”, compreso tra Via De Nobili (a monte) e Via di Portanuova (a valle);
RICORDATO che negli anni su tale fabbricato sono stati effettuati ripetuti interventi di demolizione al fine di rimuovere situazioni di potenziale pericolo, cosicché tale edificio risulta parzialmente demolito e dello stesso sono conservate le sole pareti perimetrali con esclusione della facciata Sud (di monte) anch’essa a suo tempo demolita;
PRESO ATTO, come illustrato nelle Determinazioni in precedenza assunte dallo scrivente in merito alla vicenda, della necessità di un intervento di sostanziale bonifica dell’area in questione, al fine di garantire l’igiene pubblica ed il pubblico decoro all’interno del Centro Storico;
RICORDATO che con Verbale di Somma Urgenza redatto in data 21.11.2018 dallo scrivente Responsabile dell’Area LL.PP., con il presupposto della somma urgenza, si procedeva a:
a)	incaricare l’ing. MARCO RUANI iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n° A1343 ed avente sede professionale in Morrovalle (Mc) – Via Padri Passionisti, 18, per la redazione del progetto di rimozione del materiale di risulta e del verde presente sull’area sopracitata;
b)	Individuare, per l’esecuzione di tali lavori, la Ditta COSTRUZIONI F.LLI RINALDI con sede in Via Puglia, 21 – 63100 Ascoli Piceno, la quale si è dichiarata disponibile ad intervenire immediatamente;
RICORDATA la Determina n. 89 del 10.12.2018 dello scrivente con la quale veniva approvato il progetto dell’ing. Marco Ruani relativo a “Lavori di rimozione del materiale di risulta e del verde presente sull’area del Palazzo De’ Nobili”. Tale progetto prevedeva un importo totale complessivo di € 65.000,00 suddivisi in € 38.769,58 per i lavori ed € 26.230,42 per le somme a disposizione (IVA di legge pari al 22%, spese tecniche, oneri previdenziali, imprevisti, economie ed altro);
DATO ATTO che, nel dettaglio, tale progetto per “Lavori di rimozione del materiale di risulta e del verde presente sull’area del Palazzo De’ Nobili” prevedeva un importo totale complessivo di € 65.000,00 ripartito secondo il seguente quadro tecnico economico:

RICORDATO che con la medesima Determina n. 89 del 10.12.2018 i lavori venivano affidati alla ditta COSTRUZIONI F.LLI RINALDI con sede in Via Puglia, 21 – 63100 Ascoli Piceno - P.Iva: 00392410445, che aveva offerto un ribasso del 7,25%, per cui l’importo contrattuale netto ammontava ad € 36.067,69 oltre Iva di legge al 22%, pari ad € 7.934,89 per un totale complessivo pari a € 44.002,58 cosicchè il quadro tecnico-economico aggiornato risultava essere il seguente:

RICORDATO che con l’impresa COSTRUZIONI F.LLI RINALDI è stato stipulato il contratto n° 1280 del 03.01.2019 relativo alle opere di cui sopra;
PRESO ATTO che, a seguito della consegna dei lavori effettuata in data 14.01.2019, il cantiere è stato avviato, ma, come relazionato dalla Direzione dei Lavori, nel corso dei lavori sono emersi dei fattori imprevisti correlati alla necessità di un approfondimento del piano di posa da liberare;
RILEVATO infatti che, stante l’impossibilità fisica di effettuare in via preventiva una accurata misurazione strumentale del materiale da rimuovere, è emersa la necessità di procedere ad un approfondimento del piano di posa da liberare, con la naturale conseguenza che la quantità di materiale da rimuovere è risultata notevolmente maggiore rispetto a quella originariamente prevista;
PRESO ATTO che allo scopo la Direzione Lavori ha sospeso i lavori ed ha provveduto a redigere una Perizia di variante al progetto originario consegnata in data 12.02.2019 e costituita dai seguenti elaborati:
a)	Relazione generale e Quadro tecnico-economico di variante;
b)	Computo metrico, con stima dell’incidenza della sicurezza
c)	Quadro comparativo;
d)	Atto di sottomissione
RILEVATO che l’importo complessivo della Variante risulta invariato rispetto al progetto originario, mentre l’importo lordo dei lavori ammonta ad € 46.201,64, per cui il quadro tecnico economico della stessa risulta essere il seguente:

RITENUTO che tale fattispecie di variante vada correttamente ricompresa nella casistica prevista all’art.106 -1° comma lett. C del D.Lgs. n° 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n° 56/2017, che prevede la possibilità di modifiche ai contratti durante il loro periodo di efficacia nel rispetto di 2 condizioni:
a)	la presenza di “circostanze impreviste e imprevedibili”;
b)	la “non alterazione” della natura generale del contratto;
PRESO ATTO inoltre che il successivo 7° comma del citato art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016 alle condizioni sopracitate aggiunge l’ulteriore condizione che “l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore di contratto iniziale”;
ACCERTATO che nel caso in esame tutte le condizioni soprariportate risultano rispettate e che pertanto è possibile approvare la perizia di variante presentata;
RICORDATO che i Codici Identificativi Gara (CIG) relativi all’intervento in esame sono:
•	Esecuzione delle opere:      Z54263F654 – Imp. Costruzioni F.lli Rinaldi;
•	Prestazione professionale:  ZC9263F67D – ing. Ruani;
RIBADITO che la spesa totale preventivata per tale opera di bonifica resta confermata nell’importo complessivo di € 65.000,00 e che la stessa viene finanziata con i fondi stanziati al Capitolo n. 2911 del bilancio corrente con l’impegno n. 284/2018;
RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;
VISTI:
•	la legge 7 agosto 1990, 241;
•	il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’art. 107;
•	lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
•	il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

•	DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente provvedimento;
•	DI APPROVARE, secondo quanto in premessa specificato, la Perizia di Variante in corso d’opera redatta dall’ing. MARCO RUANI e relativa ai lavori di “Rimozione del materiale di risulta e del verde presente sull’area del Palazzo De’ Nobili” per un importo dei lavori (al netto del ribasso del 7,25%,) pari a € 42.979,59, al quale si aggiungono le somme a disposizione (IVA di legge pari al 22%, spese tecniche per l’importo netto di € 6.750,00, oneri previdenziali, imprevisti, economie ed altro) di importo pari a € 22.020,41, per un importo totale complessivo di € 65.000,00;
•	DI DARE ATTO che tale perizia comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 7,25%, di € 6.911,90, un incremento per IVA 22% di € 1.520,62, un incremento per incentivo art. 113 del D.Lgs n.50/2016 di € 95,50;
•	DI DARE ATTO che tale perizia non altera la sostanza del progetto e rispetta le condizioni fissate dall’art. 106 – 1° e 7° comma del D.Lgs. n. 50/2106, per cui ricorrono i presupposti di legge per la sua approvazione;
•	DI APPROVARE l’atto di sottomissione in data 12.02.2019 con cui l’Impresa COSTRUZIONI F.LLI RINALDI, avente sede in Via Puglia, 21 – 63100 Ascoli Piceno, appaltatrice dell’opera, dichiara di accettare l’esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d’opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n° 1280 del 03.01.2019 ed in particolare con lo stesso ribasso del 7,25%;
•	DI DARE ATTO quindi che viene anche concessa una proroga di ulteriori 20 giorni in aggiunta agli attuali e rimanenti 30 giorni utili di contratto, portando pertanto a complessivi 50 giorni il tempo utile contrattuale per portare a termine l'appalto in questione, per cui la nuova scadenza per la consegna dei lavori resta fissata per il 03.04.2019;
•	DI DARE ATTO che i Codici Identificativi Gara (CIG) relativi all’intervento in esame sono:
•	Esecuzione delle opere:      Z54263F654 – Imp. Costruzioni F.lli Rinaldi;
•	Prestazione professionale:  ZC9263F67D – ing. Ruani;
•	DI CONFERMARE che il Responsabile del Procedimento resta il sottoscritto ing. Silvano Biancucci, il quale attesta, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
•	DI IMPUTARE la spesa, complessivamente ammontante ad € 65.000,00, con impegno n. 284/2018 al Capitolo n. 2911 del corrente bilancio;
•	DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili del Servizio Finanziario e del Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Biancucci Silvano	

_____________________________________________________________________

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	DE ANGELIS STEFANO	

_____________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-04-2019 al 12-05-2019
lì, 27-04-2019

	IL MESSO COMUNALE	
	TEMPERINI GIGLIOLA