COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

Numero  13    del  31-01-2019 

Oggetto:	APPROVAZIONE PROGETTO COMPLESSIVO DEL POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS" E VARIANTE IN CORSO D'OPERA

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  trentuno del mese di gennaio alle ore 10:00, nella residenza comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

   Nominativo	Carica	Pres. / Ass.	
Giuseppetti Luca Maria	Sindaco	P	

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.	
SPEZIANI Debora	Assessore	P	

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.	
FIASTRELLI Gianni	Assessore	P	

  Assegnati: 3	In carica: 3	Assenti    0	Presenti    3	

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale Sig. Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Giuseppetti Luca Maria nella sua qualità di Sindaco, e invita la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.

PREMESSO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs n. 267 18 agosto 2000, hanno espresso parere favorevole:
-	il Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
-	il Responsabile del Settore Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che, il territorio del Comune di Caldarola è stato interessato dall’evento sismico del 24 agosto 2016, a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che hanno pregiudicato la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati, nonché di vie e strade di collegamento;
CONSIDERATO che, in data 26/10/2016 e 30/10/2016, si sono verificati nuovi forti eventi sismici che hanno provocato ulteriori e gravi danneggiamenti ed hanno reso la sede scolastica dell’Istituto Comprensivo “De Magistris” completamente inagibile;
VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del:
-	25 agosto del 2016 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.”;
-	27 ottobre del 2016 recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.”;
-	31 ottobre del 2016 recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.”;
VISTE le diverse Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016 N. 388/2016 e seguenti;
VISTA l’Ordinanza Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 n. 14 del 17/01/2017 avente per oggetto “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018” con la quale è stata finanziata la ricostruzione del plesso scolastico sede della scuola primaria e secondaria “Simone De Magistris”;
DATO ATTO che un soggetto privato ha manifestato la volontà di donare al Comune di Caldarola il plesso scolastico sede della scuola primaria e secondaria “Simone De Magistris”;
VISTA la DGC n° 73/2017 del 01/08/2017 avente per oggetto “COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA "DE MAGISTRIS" - DONAZIONE LEGA COOP  ATTO DI INDIRIZZO ALL' U.T.C.” e con la quale si delibera di dare mandato al Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata di avviare ogni attività connessa e di supporto alla progettazione nelle more della formalizzazione degli accordi tra il soggetto donatore e il Comune di Caldarola;
CONSIDERATO che con Prot. n. 9009 del 04/08/2017 la Lega Coop, a seguito dei contatti intercorsi con il Commissario Straordinario Vasco Errani e con il Comune, ha manifestato la volontà di donare al Comune di Caldarola, costruendolo a proprie spese per un importo di € 2.750.000,00, il nuovo edificio scolastico capace di ospitare in via definitiva l’attività complessiva dell’Istituto De Magistris;
VISTA la DGC n° 76/2017 del 04/08/2017 avente per oggetto “ACCETTAZIONE DONAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA "SIMONE DE MAGISTRIS" DA PARTE DELLA  LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DI ROMA.” e con la quale si delibera di accettare la donazione della nuova sede dell’Istituto Comprensivo “De Magistris” da parte della Lega Coop che la costruirà a proprie spese e di autorizzare l’Ufficio Tecnico Comunale ad avviare tempestivamente le procedure per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione e di quelle necessarie che saranno a carico del Comune e degli enti pubblici competenti;
VISTO l’esito della Conferenza dei Servizi del 29/08/2017 che ha raccolto il parere favorevole degli enti partecipanti;  
VISTA la Determina U.T. n° 142 (R.G. 349) del 17/10/2017 avente per oggetto “NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO CONFERENZA DEI SERVIZI.” con la quale si determina di approvare il progetto per le opere di “RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DEL PLESSO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS” nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
1)	il locale cucina dovrà prevedere la presenza di uno o due lavamani in funzione dell’organizzazione delle attività lavorative e un secondo accesso tra la cucina ed il locale mensa;
2)	il locale sporzionamento della mensa dell’asilo dovrà prevedere un lavamani;
3)	per l’impianto antincendio, si prescrive di effettuare delle prove preventive di pressione e portata per verificare la necessità o meno di prevedere un serbatoio di accumulo di acqua;
4)	l’impianto antincendio dovrà prevedere un disconnettore idraulico ed un apposito contatore;
5)	per gli scarichi in pubblica fognatura, si prescrive di effettuare il calcolo degli AE per poter definire la necessità o meno dell’acquisizione dell’autorizzazione allo scarico, tramite Autorizzazione Unica Ambientale, secondo quanto previsto dal regolamento dell’ATO 3 – Marche Centro;
6)	nel caso risulti necessario l’abbattimento di specie arboree protette sarà necessario acquisire il necessario nulla osta secondo quanto previsto dalle vigenti normative;
7)	il parere di conformità ai sensi del D.P.R. 151/2011 e D.M. 7 Agosto 2012 dovrà essere acquisito per l’intero complesso scolastico;
8)	il compartimento al piano terra della scuola elementare dovrà essere dotato di ulteriore uscita sita in posizione contrapposta riaspetto a quella di progetto;
9)	la gestione della sicurezza ed il piano di emergenza dovrà essere effettuato per l’intero complesso (scuola secondaria di primo grado, scuola primaria e dell’infanzia);
10)	la scuola materna posta al piano terra deve essere conforme al D.M. 26/08/1992;
e di autorizzare l'esecuzione dei lavori di “RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DEL PLESSO SCOLASTICO “SIMONE DE MAGISTRIS””;
DATO ATTO che a seguito della modifica del Provvedimento finale della Conferenza dei Servizi del 29/08/2017 non sono pervenuti ricorsi o osservazioni e pertanto lo stesso è diventato efficace secondo quanto previsto dalla L. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO il progetto esecutivo consegnato in via informatica per l’avvio della procedura di validazione in data 27/11/2017 dall’ing. Carlo Majorano e composto da n° 104 elaborati; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 02/12/2017 avente per oggetto “RICOSTRUZIONE SEDE SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DEL POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". ATTO DI INDIRIZZO E NULLA OSTA ALL'AVVIO DEI LAVORI.” con la quale è stato autorizzato l’inizio dei lavori anche nelle more della validazione del progetto;
DATO ATTO che con verbale di validazione del 21/12/2017 protocollo n. 13524 sono stati validati gli elaborati architettonici e strutturali;
CONSIDERATO che verificati gli elaborati progettuali relativi agli impianti, in data 25/01/2018 il RUP comunicava per le vie brevi e via email alla ditta esecutrice, la necessità della predisposizione degli elaborati di cui alla Legge 10/1991 in attuazione del D.Lgs 192/2005 (relazione redatta in conformità al Decreto 26/06/2015 - Nuova Costruzione).
DATO ATTO che la risposta all’aggiornamento del progetto impiantistico da parte dell’impresa esecutrice ha comportato aggiunte di elementi indispensabili al progetto (pompa di calore) ed i relativi oneri in termini di costi, non risolvendo comunque in modo definitivo tutti gli aspetti connessi agli adempimenti degli obblighi di legge;
CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori, in accordo con il Responsabile del Procedimento e con l’impresa esecutrice ha ritenuto necessario procedere all’adeguamento progettuale degli impianti nel pieno rispetto delle norme tecniche e disposizioni legislative vigenti;
DATO ATTO che il RUP in accordo con il Direttore dei Lavori e l’impresa esecutrice ha disposto l’esecuzione di variante relativa alla sostituzione della scala di emergenza “A”, ubicata presso l’Auditorium con una passerella, sempre con funzioni di emergenza, che conduce al piazzale della palestra ai fini della ottimale funzionalità degli spazi del piazzale;
DATO ATTO che il RUP in accordo con il Direttore dei Lavori e l’impresa esecutrice ha disposto l’aggiornamento tecnico, in adeguamento alla normativa vigente:
-	per la struttura delle ringhiere;
-	per le strutture portanti delle grandi specchiature degli infissi;
-	per la stratigrafia delle pareti e della copertura per la chiusura termica dell’involucro edilizio,
DATO ATTO che l’impresa esecutrice ha proposto l’aggiornamento tecnico relativo alla struttura dell’auditorium;
VISTI gli elaborati di progetto e di variante allegati alla presente;
DATO ATTO che, il progetto così come modificato è stato validato dal RUP;
CONSIDERATO che le suddette varianti sopra indicate costituiscono aggiornamenti tecnici che non modificano in maniera sostanziale il progetto e sono stati realizzati al fine di migliorare la funzionalità dell’opera;
RITENUTO di approvare il progetto e gli elaborati di variante relativi alla “Ricostruzione della sede della scuola Primaria e dell’Infanzia “Simone De Magistris” allegato alla presente deliberazione;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1-	DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2-	DI APPROVARE il progetto e gli elaborati di variante relativi alla “Ricostruzione della sede della scuola Primaria e dell’Infanzia “Simone De Magistris” allegato alla presente deliberazione;
3-	DI DARE mandato ai Responsabili dei competenti uffici di predisporre gli atti necessari finalizzati all’esecuzione dei collaudi ed alla presa in carico dell’immobile;
Vista l'urgenza del presente provvedimento; 
LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco	Il Segretario Comunale	
F.to Giuseppetti Luca Maria	F.to Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco	

 li 25-05-2019
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line (www.comune.caldarola.mc.it)  per quindici giorni consecutivi.

E’ comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000. 
		
	Il Segretario Comunale	
	F.to Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco	
_______________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
È stata affissa all’Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 25-05-2019 al 08-06-2019 senza reclami.
È divenuta esecutiva il giorno:

[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n. 
     267/2000);

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Caldarola, li _________________	Il Responsabile del Servizio	
	F.to Angelo Seri	

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

Caldarola, li 31-01-2019			  	IL RAGIONIERE COMUNALE F.F.
                 F.to Seri Angelo

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Caldarola, li 25-05-2019	Il Segretario Comunale	
	Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco