COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

Numero  93    del  22-09-2017 

Oggetto:	D.P.C.M. 8 LUGLIO 2014. FONDI STRAORDINARI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS. APPROVAZIONE VARIANTE N. 1.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventidue del mese di settembre alle ore 13:00, nella residenza comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

   Nominativo	Carica	Pres. / Ass.	
GIUSEPPETTI Luca Maria	Sindaco	P	

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.	
SPEZIANI Debora	Assessore	P	

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.	
FIASTRELLI Gianni	Assessore	P	

  Assegnati: 3	In carica: 3	Assenti    0	Presenti    3	

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale Sig. Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor GIUSEPPETTI Luca Maria nella sua qualità di Sindaco, e invita la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole:
- il  responsabile  del  servizio  interessato, per quanto concerne la regolarità? tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità? contabile;

 LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
CHE la Legge 326/2003 all’art. 32 bis istituisce il fondo per interventi Straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte;
CHE ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilità? del fondo.
CHE con DPCM 08 luglio 2014 sono state espletate le modalità? di accesso al fondo per gli interventi straordinari per conseguire l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico ed assegnati i fondi alla Regione Marche.
CHE il Comune di Caldarola con nota protocollo 5535 del 20/11/2014 ha presentato alla Regione Marche istanza di finanziamento per l’adeguamento strutturale dell’edificio scuola media presso il “Polo Scolastico Simone De Magistris” secondo quanto previsto dal DPCM 08/07/2014;
CHE il Comune di Caldarola con note prot. 5925 del 06/12/2014, prot. 5925 del 06/12/2014, prot. 6255 del 29/12/2014, prot. 312 del 23/01/2015, prot. 833 del 26/02/2015 ha prodotto la documentazione integrativa necessaria al completamento dell’istanza di ammissione a finanziamento;
CHE la regione Marche con nota protocollo 814809 del 25/11/2015 (protocollo comunale n. 814809 in data 25/11/2015) ha comunicato che con DPCM del 19/09/2015 (G.U. n. 270 del 19/11/2015) sono state assegnate le risorse per il finanziamento richiesto e fissati i termini per l’affidamento dell’incarico e dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 29/12/2015 avente per oggetto “ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.” Con la quale la progettazione dell’intervento è stata affidata al Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata del Comune di Caldarola;
VISTA la nota prot. 277 del 15/01/2016 con la quale è? stato comunicato alla Regione Marche l’avvenuto affidamento della Progettazione;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 28/05/2016 avente per oggetto “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS" con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento sismico dell'edificio scuola media del polo scolastico “Simone De Magistris”;
VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica –? LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 29 (R.G. 131) del 28/05/2016 avente per oggetto “DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO  LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS” con la quale è stato disposto di procedere all’espletamento della gara;
VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona Settore Urbanistica –? LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 3 (R.G. 135) del 07/06/2016 avente per oggetto “AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS. (D.P.C.M. 8 LUGLIO 2014. FONDI STRAORDINARI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI). INDIZIONE GARA DI APPALTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. "C" D.LGS. 50/2016” con la quale è stata indetta la procedura di gara;
VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona Settore Urbanistica –? LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 4 (R.G. 140) del 23/06/2016 avente per oggetto “ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". NOMINA COMMISSIONE DI GARA” con la quale è stata nominata la Commissione di Gara;
VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona Settore Urbanistica –? LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 5 (R.G. 146) del 28/06/2016 avente per oggetto “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS. (D.P.C.M. 8 LUGLIO 2014. FONDI STRAORDINARI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI). INDIZIONE GARA DI APPALTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. "C" D.LGS. 50/2016. REVOCA IN AUTOTUTELA DETERMINAZIONE N. 3 (R.G. N. 135) DEL 07.06.2016” con la quale è stata revocata in autotutela la procedura di gara;
VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona Settore Urbanistica –? LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 6 (R.G. 147) del 28/06/2016 avente per oggetto “AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS. (D.P.C.M. 8 LUGLIO 2014. FONDI STRAORDINARI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI). INDIZIONE GARA DI APPALTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. "C" D.LGS. 50/2016” con la quale è stata indetta la nuova procedura di gara;
VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona Settore Urbanistica –? LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 7 (R.G. 162) del 16/07/2016 avente per oggetto “ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO "SIMONE DE MAGISTRIS". NOMINA COMMISSIONE DI GARA. PROVVEDIMENTI.” con la quale è stata nominata la nuova commissione di gara;
VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona Settore Urbanistica –? LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 8 (R.G. 168) del 23/07/2016 avente per oggetto “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS. (D.P.C.M. 8 LUGLIO 2014. FONDI STRAORDINARI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.” con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori;
VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona Settore Urbanistica –? LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 9 (R.G. 171) del 02/08/2016 avente per oggetto “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS. (D.P.C.M. 08/07/2014. FONDI STRAORDINARI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI). RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 8 (R.G. 168) DEL 23-07-2016” con la quale è stata rettificata la Determina n. 9 del 02/08/2016;
VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica –? LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 17 (R.G. 62) del 25/02/2017 avente per oggetto “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E SICUREZZA” con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria per la direzione lavori, contabilità e sicurezza;
VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica –? LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 53 (R.G. 156) del 04/05/2017 avente per oggetto “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE” con la quale è stato assunto impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria ed approvato il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione della gara;
VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica –? LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 58 (R.G. 162) del 12/05/2017 avente per oggetto “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER COLLAUDO STRUTTURALE” con sono stati affidati i servizi di ingegneria per il collaudo strutturale;
VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica –? LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 61 (R.G. 166) del 18/05/2017 avente per oggetto “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE” con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a seguito delle dimissioni dal ruolo del tecnico incaricato;
VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica –? LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 89 (R.G. 220) del 17/06/2017 avente per oggetto “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1 LAVORI E SAL 1 SOMME A DISPOSIZIONE.” con la quale è stato liquidato il SAL 1 dei lavori ed il SAL 1 delle Somme a Disposizione dell’’Amministrazione;
VISTA la Determina a firma del Responsabile del Settore Urbanistica –? LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 106 (R.G. 260) del 22/07/2017 avente per oggetto “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO “SIMONE DE MAGISTRIS”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1BIS LAVORI E SAL 2 SOMME A DISPOSIZIONE.” con la quale è stato liquidato il SAL 1BIS dei lavori ed il SAL 2 delle Somme a Disposizione dell’’Amministrazione;
VISTI gli elaborati di Variante n. 1 al progetto delle opere di LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO “SIMONE DE MAGISTRIS” composto dai seguenti elaborati:
0	16_001_T_A_V1_RELAZIONE
1	16_001_T_A_V1-AR-001 –? STATO DI PROGETTO: INQUADRAMENTO
2	16_001_T_A_V1-AR-002 - STATO DI PROGETTO: PIANTE
3	16_001_T_A_V1-AR-003 - STATO DI PROGETTO: PROSPETTI
4	16_001_T_A_V1-AR-004 - STATO DI PROGETTO: SEZIONI
5	16_001_T_A_v1-St-00A
6	16_001_T_A_v1-St-001 –? CARPENTERIE COPERTURA
7	16_001_T_A_v1-St-002 –? CARPENTERIE COPERTURA
VISTO il Quadro Economico allegato al progetto in variante come di seguito riportato:
LAVORI	
TOTALE LAVORI A MISURA			€? 290.053,74	
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA			€? 6.414,24	
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€? 283.639,50	
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA			€? 290.053,74	
RIBASSO DI GARA	25,475%		€? 72.257,16	
IMPORTO NETTO LAVORI			€? 217.796,58	
IMPORTO NETTO CONTRATTO			€? 181.509,30	
OPERE DI VARIANTE			€? 36.287,28	
% INCREMENTO LAVORI			19,99%	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA SU LAVORI	10,00%		€? 21.779,66	
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE	
ECONOMIE DI GARA	10,00%	€? 0,00	€? 0,00	
IMPREVISTI (IVA Compresa)	10,00%	€? 0,00	€? 0,00	
LAVORI IN ECONOMIA PER REALIZZAZIONE OPERE MURARIE PER RIPRISTINO INTONACI E DANNI SISMA(IVA Compresa)	10,00%	€? 19.800,00	€? 21.780,00	
OPERE DI RIPRESA TINTEGGIATURE ESTERNE (IVA Compresa)	10,00%	€? 14.000,00	€? 15.400,00	
OPERE DI RIPRISTINO IMPIANTI AL PIANO PRIMO (IVA Compresa)	10,00%	€? 10.117,07	€? 11.128,78	
PER SPESE TECNICHE, DI GARA, ETC..	
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ?, ASSISTENZA AL COLLAUDO, LIQUIDAZIONE		€? 25.746,05		
C.AP. SU SPESE TECNICHE	4,00%	€? 1.029,84		
TOTALE SPESE TECNICHE E CAP		€? 26.775,89		
IVA SU SPESE TECNICHE E CAP	22,00%	€? 5.890,70		
TOTALE SPESE TECNICHE PER D.L., CONTABILITÀ?, ASSISTENZA AL COLLAUDO, LIQUID., COORD. SICUREZZA			€? 32.666,59	
COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		€? 9.216,00		
C.AP. SU SPESE TECNICHE	4,00%	€? 368,64		
TOTALE SPESE TECNICHE E CAP		€? 9.584,64		
IVA SU SPESE TECNICHE E CAP	22,00%	€? 2.108,62		
TOTALE SPESE TECNICHE PER D.L., CONTABILITÀ?, ASSISTENZA AL COLLAUDO, LIQUID., COORD. SICUREZZA			€? 11.693,26	
PRATICA VV.FF.		€? 3.600,00		
C.AP. SU SPESE TECNICHE	4,00%	€? 144,00		
TOTALE SPESE TECNICHE E CAP		€? 3.744,00		
IVA SU SPESE TECNICHE E CAP	22,00%	€? 823,68		
TOTALE SPESE TECNICHE PER PRATICA VV.FF.			€? 4.567,68	
COLLAUDO STATICO		€? 3.952,00		
C.AP. SU SPESE TECNICHE	4,00%	€? 158,08		
TOTALE SPESE TECNICHE E CAP		€? 4.110,08		
IVA SU SPESE TECNICHE E CAP	22,00%	€? 904,22		
TOTALE SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO			€? 5.014,30	
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E RUP (ART. 92 D.LGS. 163/2006)	1,20%		€? 3.480,64	
CONTRIBUTO AVCP			€? 225,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€? 127.735,91	
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€? 345.532,48	

RITENUTO necessario approvare il Progetto di Variante per le opere di LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO “SIMONE DE MAGISTRIS” per l’importo complessivo del quadro economico pari ad €? 345.532,48;

DATO ATTO che la spesa trova imputazione al Capitolo 2644 residui 2016.

VISTO il T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267; 

Con votazione unanime e favorevole, resa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1- La premessa è? parte integrante del presente provvedimento;

2- Di approvare il progetto in Variante per “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA DEL POLO SCOLASTICO SIMONE DE MAGISTRIS”, composto dagli elaborati di seguito elencati ed allegati al presente atto:
0	16_001_T_A_V1_RELAZIONE
1	16_001_T_A_V1-AR-001 –? STATO DI PROGETTO: INQUADRAMENTO
2	16_001_T_A_V1-AR-002 - STATO DI PROGETTO: PIANTE
3	16_001_T_A_V1-AR-003 - STATO DI PROGETTO: PROSPETTI
4	16_001_T_A_V1-AR-004 - STATO DI PROGETTO: SEZIONI
5	16_001_T_A_v1-St-00A
6	16_001_T_A_v1-St-001 –? CARPENTERIE COPERTURA
7	16_001_T_A_v1-St-002 –? CARPENTERIE COPERTURA

3 - Di approvare il Quadro Economico di Variante  allegato al progetto esecutivo come di seguito riportato:
LAVORI	
TOTALE LAVORI A MISURA			€? 290.053,74	
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA			€? 6.414,24	
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€? 283.639,50	
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA			€? 290.053,74	
RIBASSO DI GARA	25,475%		€? 72.257,16	
IMPORTO NETTO LAVORI			€? 217.796,58	
IMPORTO NETTO CONTRATTO			€? 181.509,30	
OPERE DI VARIANTE			€? 36.287,28	
% INCREMENTO LAVORI			19,99%	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA SU LAVORI	10,00%		€? 21.779,66	
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE	
ECONOMIE DI GARA	10,00%	€? 0,00	€? 0,00	
IMPREVISTI (IVA Compresa)	10,00%	€? 0,00	€? 0,00	
LAVORI IN ECONOMIA PER REALIZZAZIONE OPERE MURARIE PER RIPRISTINO INTONACI E DANNI SISMA(IVA Compresa)	10,00%	€? 19.800,00	€? 21.780,00	
OPERE DI RIPRESA TINTEGGIATURE ESTERNE (IVA Compresa)	10,00%	€? 14.000,00	€? 15.400,00	
OPERE DI RIPRISTINO IMPIANTI AL PIANO PRIMO (IVA Compresa)	10,00%	€? 10.117,07	€? 11.128,78	
PER SPESE TECNICHE, DI GARA, ETC..	
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ?, ASSISTENZA AL COLLAUDO, LIQUIDAZIONE		€? 25.746,05		
C.AP. SU SPESE TECNICHE	4,00%	€? 1.029,84		
TOTALE SPESE TECNICHE E CAP		€? 26.775,89		
IVA SU SPESE TECNICHE E CAP	22,00%	€? 5.890,70		
TOTALE SPESE TECNICHE PER D.L., CONTABILITÀ?, ASSISTENZA AL COLLAUDO, LIQUID., COORD. SICUREZZA			€? 32.666,59	
COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		€? 9.216,00		
C.AP. SU SPESE TECNICHE	4,00%	€? 368,64		
TOTALE SPESE TECNICHE E CAP		€? 9.584,64		
IVA SU SPESE TECNICHE E CAP	22,00%	€? 2.108,62		
TOTALE SPESE TECNICHE PER D.L., CONTABILITÀ?, ASSISTENZA AL COLLAUDO, LIQUID., COORD. SICUREZZA			€? 11.693,26	
PRATICA VV.FF.		€? 3.600,00		
C.AP. SU SPESE TECNICHE	4,00%	€? 144,00		
TOTALE SPESE TECNICHE E CAP		€? 3.744,00		
IVA SU SPESE TECNICHE E CAP	22,00%	€? 823,68		
TOTALE SPESE TECNICHE PER PRATICA VV.FF.			€? 4.567,68	
COLLAUDO STATICO		€? 3.952,00		
C.AP. SU SPESE TECNICHE	4,00%	€? 158,08		
TOTALE SPESE TECNICHE E CAP		€? 4.110,08		
IVA SU SPESE TECNICHE E CAP	22,00%	€? 904,22		
TOTALE SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO			€? 5.014,30	
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E RUP (ART. 92 D.LGS. 163/2006)	1,20%		€? 3.480,64	
CONTRIBUTO AVCP			€? 225,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€? 127.735,91	
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€? 345.532,48	
4- Di dare atto che la spesa trova imputazione al Capitolo 2644 residui 2016.

Data l'urgenza del provvedimento;

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità? di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^ comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco	Il Segretario Comunale	
F.to GIUSEPPETTI Luca Maria	F.to Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco	

 li 27-12-2018

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line (www.comune.caldarola.mc.it)  per quindici giorni consecutivi.

E’ comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

	Il Segretario Comunale	
	F.to Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco	
_______________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata affissa all’Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 27-12-2018 al 10-01-2019 senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno:

[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n. 
     267/2000);

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Caldarola, li _________________	Il Responsabile del Servizio	
	F.to Angelo Seri	

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Caldarola, li 27-12-2018	Il Segretario Comunale	
	Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco