Registro Generale n. 88

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 AREA III  - URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI 

N. 25 DEL 06-08-2016

Oggetto: INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, MEDIANTE IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DI VOLUMETRIE ESISTENTI QUALI LA RIMESSA ATTREZZI COMUNALE E LO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO, NONCHE LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - SBLOCCA ITALIA-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	

___________________________________________________________________________
REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO per la regolarità contabile della presente determinazione, per l’esecutività della stessa dalla data odierna e per l’attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall’art. 151, c. 4  e dall’art. 153, c. 5 del D.Lgs. 267/2000,  per la quale è stata impegnata la relativa somma sui seguenti capitoli:
- cap. _____ “_________________________________________________________” - €  
- cap. _____ “_________________________________________________________” - € _____________,____
-  per l’avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: 6446342982
Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE	

___________________________________________________________________________
_____ ATTESTATO DI ESECUTIVITA

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.
         Lì            .
	IL RESPONSABILE	
	F.to: CARDAMONE GIUSEPPE	
________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Registrata al n. ____________ del Registro delle Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Lì  _________________

	IL RESPONSABILE  	
	f.to: ……………………………….	

UFFICIO RAGIONERIA
Impegno             n. __________ del ________________

Liquidazione      n. __________ del ________________

Mandato             n. __________ del ________________	

N. 25 DEL 06-08-2016
Oggetto: INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, MEDIANTE IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DI VOLUMETRIE ESISTENTI QUALI LA RIMESSA ATTREZZI COMUNALE E LO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO, NONCHE LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - SBLOCCA ITALIA-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	

L'anno  duemilasedici addì  sei del mese di agosto  nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA III – URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

VISTO il Provvedimento Sindacale con il  quale sono stati individuati i Responsabili dell’attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

PREMESSO che
- con DETERMINA del Responsabile di Area III n° 84 del 11/08/2015 è stato incaricato il tecnico dott. Ing. Dario DI FRANCESCO per la redazione del progetto ESECUTIVO, per “Interventi di qualificazione e manutenzione del territorio, mediante il recupero e la riqualificazione di volumetrie esistenti quali la rimessa attrezzi comunale e lo spogliatoio a servizio dell'impianto sportivo (campo da calcio), nonché alla riduzione del rischio idrogeologico”.
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n°48 del 07/10/2015 con cui si è approvato il progetto ESECUTIVO dei lavori “Interventi di qualificazione e manutenzione del territorio, mediante il recupero e la riqualificazione di volumetrie esistenti quali la rimessa attrezzi comunale e lo spogliatoio a servizio dell'impianto sportivo (campo da calcio), nonché alla riduzione del rischio idrogeologico”. Per complessivi € 400.000,00 di cui per lavori € 315.386,62, come riportato nel quadro economico che segue:

A)	Importo per l’esecuzione delle lavorazioni			
A1)	Lavori a base d’asta		€ 217.397,06	
A2)	Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza - non soggetto a ribasso d’asta		€ 9.638,43	
A3)	Importo della mano d’opera - non soggetto a ribasso d’asta		€ 88.351,13	
	TOTALE GENERALE LAVORI		€ 315.386,62	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
B1)	IVA 10% sui lavori	€ 31.538,66		
B2)	Spese generali e tecniche	€ 32.583,31		
B3)	Cassa Previdenza ed Assistenza (4% su B2)	€ 1.303.33		
B4)	IVA 22% su B2+B3	€ 7.455,06		
B5)	Per accantonamento incentivazione – 2% dei lavori	€ 6.307,73		
B6)	Spese indagini geognostiche	€ 1.500,00		
B7)	IVA 22% su spese indagini geognostiche	€ 330,00		
B8)	Spese collaudo (compresa IVA e cassa)	€ 2.500,00		
B9)	Spese registrazione  atti	€ 1.095,29		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 84.613,38		
	TOTALE PROGETTO A+B	                  € 400.000,00	

DATO ATTO che l’opera è finanziata con fondi derivanti dal programma “Nuovi Progetti di Intervento” ai sensi del D.L. n° 133 del 12.09.2014 cosiddetto “ Sblocca Italia” art. 3 commi 2 e 3;

DATO ATTO, altresì, che a seguito di procedura di evidenza pubblica, con contratto rep. n° 460 del 18.05.2016 i lavori sono stati appaltati alla ditta PORCINARI srl di Montorio al Vomano (TE), al prezzo contrattuale di € 248.187,01;

EVIDENZIATO che nel corso di esecuzione dei lavori si è appalesata la necessità di risolvere alcune esigenze emerse solo in fase di lavorazione e non individuabili al momento della redazione del progetto esecutivo per cui siè resa necessaria la redazione da parte della DD.LL. di apposita perizia di variante tecnica il cui quadro economico risulta essere il seguente:
A)	Importo per l’esecuzione delle lavorazioni			
A1)	Lavori a base d’asta (soggette a ribasso)		€ 245.097,81	
A2)	Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza - non soggetto a ribasso d’asta (3,047%)		€ 11.265,13	
A3)	Importo della mano d’opera - non soggetto a ribasso d’asta (30,668%)		€ 113.398,49	
	TOTALE GENERALE LAVORI
(da computo di variante)		€ 369.761,43	
	Ribasso offerto (30,911% di A1) 		€ 75.762,18	
A4)	Importo totale lavori (al netto del ribasso)		€ 293.999,25	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
B1)	IVA 10% sui lavori	€ 29.399,93		
B2)	Spese generali e tecniche	€ 32.705,45		
B3)	Cassa Previdenza ed Assistenza (4% su B2)	€ 1.308.22		
B4)	IVA 22% su B2+B3	€ 7.483.01		
B5)	Per accantonamento incentivazione – 2% dei lavori	€ 7.395,23		
B6)	Spese indagini geognostiche	€ 1.500,00		
B7)	IVA 22% su spese indagini geognostiche	€ 330,00		
B8)	Spese collaudo (compresa IVA e cassa)	€ 2.500,00		
B9)	Spese registrazione  atti	€ 1.095,29		
B10)	Imprevisti e lavori in economia	€ 22.283,62		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 106.000,75		
	TOTALE PROGETTO A+B	                  € 400.000,00	

DATO ATTO, che la suddetta  Perizia di Variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 149 del  D.Lgs. 50/2016 e smi, in quanto redatta nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità. Durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre alcune variazioni e addizioni per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni oggetto di intervento, verificatisi in corso d’opera, non prevedibili nella fase di progetto [art.106 comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.18/04/2016, n°50].Infine a seguito di richiesta integrazioni da parte degli uffici regionali del genio civile prot. 169312 del 21 luglio 2016 si è reso necessaria una modifica alle strutture in acciaio della nuova copertura della rimessa attrezzi con aumento delle sezione e dei quantitativi, oltre che delle lavorazioni connesse, il tutto per non far gravare il peso della copertura sul solaio esistente. 
DATO ATTO, altresì, che l’impresa PORCINARI srl, aggiudicataria dei lavori principali ha già firmato lo schema dell’atto di sottomissione unitamente alla direzione dei lavori;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione della Perizia di Variante tecnica di dettaglio, redatta ai sensi dell’art. 132 punto 3 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
ACCERTATO che tale aumento dei costi non supera 1/5 dell’importo contrattuale e che pertanto si impone all’impresa di applicare le stesse condizioni contrattuali ed utilizzando il medesimo ribasso contrattuale del 30,911%;
VISTO lo Statuto Comunale;
ASSUNTA la propria competenza;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni riportate nelle premesse:
1.	DI APPROVARE la Perizia di Variante tecnica redatta dalla direzione lavori, relativa ai lavori “Interventi di qualificazione e manutenzione del territorio, mediante il recupero e la riqualificazione di volumetrie esistenti quali la rimessa attrezzi comunale e lo spogliatoio a servizio dell'impianto sportivo (campo da calcio), nonché alla riduzione del rischio idrogeologico” dell’importo complessivo di € 400.000,00 ripartito come in premessa;
2.	DI DARE ATTO che a seguito dell’approvazione della presente Perizia di Variante l’ammontare del contratto è aumentato di € 45.812,24 al netto del ribasso d’asta del 30,911%;
3.	RITENUTO, pertanto necessario procedere all’approvazione della perizia di variante tecnica, redatta ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs 50/2016 e smi contenute entro 1/5 dell’importo contrattuale  e che pertanto si impone all’impresa di applicare le stesse condizioni contrattuali ed utilizzando il medesimo ribasso contrattuale del 30,911%;
4.	DI AFFIDARE i lavori suppletivi previsti in perizia di € 45.812,24 al netto del ribasso d’asta e comprensivi di manodopera ed oneri sulla sicurezza, escluso I.V.A., all’Impresa PORCINARI srl di Montorio al Vomano, aggiudicataria dei lavori principali che ha già firmato lo schema dell’atto di sottomissione unitamente alla direzione dei lavori;
5.	DI DARE ATTO:
- CHE si procederà alla stipula dell’atto di sottomissione nella forma pubblica amministrativa, secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l’oggetto e le clausole ritenute essenziali;
-CHE il finanziamento della predetta spesa è assicurato  con fondi derivanti dal programma “Nuovi Progetti di Intervento” ai sensi del D.L. n° 133 del 12.09.2014 cosiddetto “ Sblocca Italia” art. 3 commi 2 e 3;
-CHE, inoltre, la perizia di variante approvata con il presente atto è stata redatta nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità;
6.	DI DARE ATTO, infine, che la perizia approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti l’opera di cui al progetto originario e trova copertura nel finanziamento come sopra indicato.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio comunale ed nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
        	La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al  servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to: D'Anselmo Dario)	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO