COMUNE DI CASTEL DI LAMA
            
 Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

                                                                                                                                        COPIA

COPIA DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 430

DETERMINAZIONE N. 208  DEL 25-06-19

===================================================================
OGGETTO:	Lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico, incremento dell'efficienza energetica, rimozione amianto, ripristino dell'idoneità igienico-sanitaria e abbattimento delle barriere architettoniche di una parte del plesso scolastico di via Garibaldi n. 2: approvazione quarto stato di avanzamento.	
===================================================================

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di giugno

IL RESPONSABILE 

Vista  la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

-con la deliberazione di G.C. n. 22 del 30 marzo 2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di “Messa in sicurezza dal rischio sismico, incremento dell’efficienza energetica, rimozione amianto, ripristino dell’idoneità igienico-sanitaria e abbattimento barriere architettoniche del plesso scolastico di Via Garibaldi n. 2”, per un costo di € 590.000,00, di cui euro 470.000 per lavori ed € 120.000 quali somme a disposizione della amministrazione, finanziato interamente con i fondi del Piano regionale triennale 2015-2017 e piano annuale 2015 di edilizia scolastica di cui all’art. 10 del d.l. 12/9/2013 convertito in legge 8/11/2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione università e ricerca, come disciplinati con D.M. 23/01/2015 e D.G.R. Marche n. 124 del 2 marzo 2015;

-con la determinazione n. 78 del 5/5/2016, a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione dei Comuni Vallata del Tronto, i lavori in questione furono aggiudicati, previo esperimento di gara in forma negoziata, alla ditta Comini Masino di Castel di Lana, per un importo netto di € 282.780,70 comprensivo della somma di euro 12.870,00 relativa agli oneri sulla sicurezza – come tali  non soggetti a ribasso-. Tale determinazione fu confermata dal Responsabile dell’Area Tecnica Comunale con la propria determinazione n. 427 di R.G. dell’8/8/2016, provvedendo nel contempo ad effettuare il  definitivo impegno di spesa della somma di € 429.158,77, risultante dalla applicazione del ribasso d’asta sull’importo dei lavori, ed oltre le somme a disposizione della amministrazione. La spesa in questione è interamente finanziata con il contributo concesso nell’ambito del Piano regionale edilizia scolastica sopra citato, reso disponibile sul capitolo nr. 765 della partita delle uscite nel bilancio di questo Ente;

-VISTO il contratto di appalto dei lavori stipulato con la ditta aggiudicataria – rep. N. 1605 del 28/9/2016  -, e il verbale per la loro consegna in data 12 ott. 2016, prot. n. 12302;

-VISTI i seguenti atti di approvazione/liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori e/o di anticipazione contrattuale, tutti facenti capo ai fondi iscritti al capitolo nr. 765 delle uscite del bilancio dell’Ente:
--determ. UTC n. 157 RG del 29/3/2017 per  anticipo contrattuale € 62.211,75, (€ 56.556,14 + iva 10%);
--determ. UTC n. 264 RG del 30/5/2017 per  1° S.A.L.  € 56.695,06 + iva 10%;
--determ. UTC n. 756 RG del 21/12/2017 per  2° S.A.L. € 69.879,86 + iva 10%;
--determ. UTC n. 149 RG del 13/3/2019 per  3° S.A.L.  € 61.117,96 + iva 10%
(per un totale di € 187.692,88 oltre iva 10% .

-VISTI i seguenti atti atti di approvazione delle perizie che hanno modificato la consistenza e l’importo  dei lavori da eseguire:
--delibera del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 9 del 31/10/2017 di approvazione della prima perizia di variante e suppletiva, che ha elevato l’importo netto dei lavori da eseguire da € 282.780,70 a 299.299,64,  lasciando peraltro inalterato il costo totale del progetto (euro 429.158,77);
-delibera della Giunta Comunale nr. 26 del 7/9/2018 di approvazione della seconda perizia di variante e suppletiva, che ha elevato l’importo netto dei lavori da eseguire da € 299.299,64 ad euro 359.053,89, portando  il costo totale del progetto al nuovo importo di euro 509.158,77, quindi procedendo all’impegno integrativo della somma di euro 80.000,00 sul capitolo nr. 765/1, necessaria per la copertura della spesa, con propri fondi di bilancio;
QUADRO ECONOMICO della seconda perizia - art. 16 D.P.R. n.207/2010

A) LAVORI	
1) Lavori a misura	€  	555.165,68	
2)  Lavori a Corpo	=	
3)  Lavori in Economia	=	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DEI GARA		€  555.165,68	
4)  Oneri della sicurezza	€     16.654,97	
5)  Manodopera                                      	€    195.057,49	
B)SOMME A DISPOSIZIONE della amministrazione:	
A.2) IMPORTO LORDO DEI LAVORI a cui applicare il ribasso del 57,10% 	€  343.453,22   	
A.3) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                       	€  359.053,89                            	
1)Rilievi, accertamenti ed indagini	
1.1)indagini geologiche	€  3.700,00	
1.2)rilievi	€  3.500,00	
1.3) altro: indagini sulle parti strutturali                      	€  2.400,00	
TOTALE                                           	€  9.600,00	
2)  Imprevisti (iva Compresa)               		                	€  3.080,58	
3)  Spese tecniche 	
 - Progetto	          		€  22.175,00	
- Direzione Lavori		                            	€  12.325,00	
- Coordinamento Sicurezza			   		€  14.500,00	
- Incentivi (D.Lgs. 163/06 – Art. 92 – c.5)	                   	€  11.103,31	
-Spese per la redazione della perizia n.1               	€   5.400,00	
-Spese per la redazione della perizia n.2               	€   7.000,00	
                          TOTALE                                           	€  75.583,89	
4)  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche  tecniche previste dal CSA	
-- Analisi di laboratorio	€  4.500,00              	
--Collaudo statico	€  3.500,00	
                            TOTALE                                            	€  8.000,00           	
5)  I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi	
5.1)  IVA per lavori in appalto	    	                   	€  35.905,39	
5.2)  IVA per spese tecniche, rilievi e collaudi e varianti   		€  17.045,60	
5.3)  IVA per spese di analisi 			                    	€   990,00	
5.4)  Contributi integrativi (spese tecniche, rilievi e collaudi)              	€  2.980,00	
TOTALE	€  56.920,99	
6) Somme accantonate dal ribasso ed IVA sull’affidamento dei lavori   -Det.nr.427 del 08/08/2016                             	€  160.841,23
	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZ.	           	€  150.104,88	
                                           IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	                   €  509.158,77	

-VISTO ora il quarto stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 31 maggio 2019, da cui risulta un importo lordo di  quelli a misura di € 501.915,84, (compresi oneri per la sicurezza e compresa manodopera), da cui si ha:

Descrizione categorie	Importo in €	Importo in €	
Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera:		495.292,58	
Materiali forniti a piè d’opera: pavimento in  linoleum 		6.623,26	
TOTALE (LORDO) LAVORI e materiali  forniti a piè d’opera 	
	501.915,84	
A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori	-14.858,78		
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	-174.021,07		
RESIDUANO: IMPORTO LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	306.412,73		
Ribasso d’asta del 57,1% su € 306.412,73 – (a dedurre) -	-174.961,67		
RESIDUANO: IMPORTO LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA, ONERI SICUREZZA E MANODOPERA	
131.451,06	
131.451,06	
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori		14.858,78	
Costo manodopera incluso nei lavori		174.021,07	
LAVORI A MISURA AL NETTO		320.330,91	
Importo lordo materiali a piè d’opera	6.623,26		
A dedurre costo della manodopera incluso nei lavori	174.021,07		
A dedurre ribasso d’asta del 57,1£% su € 6.623,26	3.781,88		
Costo dei materiali a piè d’opera – al netto -		2.841,38	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI E DEI MTRIALI FORNIUTI A PIE’ D’OPERA		
323.172,29	

--CONSIDERATO 	inoltre che, per quanto riguarda il certificato di pagamento nr.4, recante data 20 giu. 2019 e relativo alla quarta rata, risulta quanto segue:

Descrizione categorie	Importo in €	Importo in €	
Totale lavori e somministrazioni (inclusa manodopera per  € 174.021,07)	305.472,13		
Pr materiali forniti a piè d’opera	2.841,38		
SOMMANO	308.313,51		
Oneri afferenti alla sicurezza	14.858,78		
Sommano 	323.172,29	€ 323.172,29	
A detrarre: - ritenuta 0,50% per infortuni	1.615,86		
         “          - ammontare dei certificati precedenti	187.692,88	  	
         “          - 20% recupero quota parte anticipazione	56.145,36	 	
TOTALE DEDUZIONI	245.454,10	245.454,10	
RISULTA IL CREDITO DELL’IMPRESA	€ 77.718,19	

-Accertato che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli   Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,  a norma dell'articolo 54 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165”-  situazioni  di  conflitto di interessi di qualsiasi  natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado;

-Attestato  in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all’art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di “Prevenzione della corruzione” e  dell’Art. 9 in materia di ”Trasparenza e tracciabilita'”; 

-Dato atto  che il presente provvedimento viene da me proposto quale titolare della posizione organizzativa di Responsabile dell’Area tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. Decreto Sindacale nr. 58 del 21 Maggio 2019; 

-Visto  il “Codice dei Contratti” approvato con il D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50;  

-Visto il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali,

DETERMINA
- DI DARE ATTO CHE le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto;
-di APPROVARE 	il QUARTO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI di “Messa in sicurezza dal rischio sismico, incremento dell'efficienza energetica, rimozione amianto, ripristino dell'idoneita' igienico-sanitaria e abbattimento barriere architettoniche di una parte del plesso scolastico sito in via Garibaldi N. 12”,  insieme con il relativo certificato di pagamento n. 4, per un importo da pagare di euro 77.718,19 oltre iva 10%, e quindi per un totale di € 85.490,01, lavori eseguiti dalla ditta aggiudicataria “Comini Masino” di Castel di Lama;
-di DARE ATTO che lo Stato di Avanzamento in questione è a firma dei titolari della  Direzione dei Lavori ing. Marco Amabilli e Ing.Romeo Piersanti;
-di PAGARE  -in regime di scissione dei pagamenti - alla ditta affidataria dei lavori “Comini Masino” di Castel di Lama le spettanze sopra quantificate,  previa emissione di regolare fattura nei modi di legge; 
-di DARE ATTO che la somma necessaria per il pagamento delle competenze in questione è disponibile al capitolo nr. 765 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente - garantita in entrata con i fondi concessi a questo Comune con il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia ed Espropriazione della Regione Marche  nr. 35 del 7/7/2016 -  e al capitolo 765/1 per la somma di € 80.000 garantito con i fondi propri di questo Comune.
Codice CIG 6501854BA5, Codice CUP C71E15000220002.
Il Responsabile dell'Area	
F.to  FABIOLA CIOTTI	

______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 27-07-2019  al 11-08-2019.
Lì  27-07-2019
Il Responsabile Area Amministrativa 	
F.to Dott.ssa Rita Cherubini	

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale  per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area	
 FABIOLA CIOTTI