COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 27-04-2017 n. 43

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO SCARPATA STRADA COMUNALE SAN GIUSEPPE/PIANARELLE - DECRETO N. 38/ITE DEL 23.03.2016. - PERIZIA UTILIZZO ECONOMIE: PROVVEDIMENTI. 

L'Anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette
del mese di aprile alle ore 13:30, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza	
BENEDETTI	ARMANDO	SINDACO	Presente	
ORTENZI	MICHELE	ASSESSORE	Presente	
MARZIALETTI	STEFANO	ASSESSORE	Assente	
BACALINI	MARIA GIORDANA	ASSESSORE	Presente	
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Assente	

Presenti:    3
Assenti :    2

Assiste il Segretario  Dott. Tozzi Nando
Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

PREMESSO che:
•	con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 14.07.2016, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: “Intervento di ripristino scarpata strada comunale San Giuseppe/Pianarelle” per l’importo complessivo di euro 40.000,00, di cui euro 30.908,84 per lavori ed euro 9.091,16 per somme a disposizione dell’Amm.ne;
•	il quadro tecnico economico di progetto come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO
-	Importo lavori 
(di cui euro 634,00 quali oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso di gara)			euro	30.908,84
-	Somme a disp.ne dell’Amm.ne:
o	IVA 10% su lavori	euro	3.090,88
o	Spese indagini geologiche	euro	1.154,10
o	Spese calcoli strutturali opere in c.a.	euro	3.666,83
o	Spese tecniche (incentivazione 2% art.
113 D.Lgs. n. 50/2016) e validazione 	euro	1.000,00
o	Lavori extra in economia	euro	179,35
Totale somme a disp.ne dell’Amm.ne	euro	9.091,16	euro	9.091,16
	IMPORTO COMPLESSIVO			euro	40.000,00

•	che la copertura finanziaria dell’investimento sopra descritto dovrà essere garantita dagli appositi fondi regionali previsti, per il Comune di Montegiorgio, con Decreto Dirigente Servizio Infrastrutture della Regione marche n. 38/ITE del 23.03.2016 e che l’intervento in specie, per l’importo complessivo di €. 40.000,00, è stato previsto al Cap. 948/E/C corr. al Cap. 2842/U/C del bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016/2018 approvato con atto del C.C. n. 14 del 30.04.2016;
•	con la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patriomonio n. 232 del 6.12.2016 con la quale si è stabilito che i lavori di "Intervento di ripristino scarpata strada comunale San Giuseppe/Pianarelle (D.D. ITE n. 194/ITE/2016)", (C.U.P.: E87H16000780002 – C.I.G.: Z291BB0AEE) (progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 81 del 14.07.2016):
1.	sono stati aggiudicati alla TECNOCONDOTTE di Comini A. & F. S.r.l. con sede in Castel di Lama (AP) – via Chiefenti n. 5 (P.IVA 00447980442) per il ribasso percentuale offerto pari al 27,50% (diconsi ventisette virgola cinquanta per cento) quindi per il prezzo contrattuale pari ad euro 22.583,26 (diconsi euro ventiduemilacinquecentoottantatre//26) risultante dal calcolo come di seguito riportato.
Descrizione	Euro	
A - Importo lavori a misura soggetto a ribasso di gara	30.274,84	
B - Ribasso offerto (%)	27,50/100	
C - Importo ribasso offerto (A*B)	8.325,58	
D - Importo al netto del ribasso (A-C)	21.949,56	
E - Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara	634,00	

F - PREZZO OFFERTO (D+E)
	22.583,26	
2.	I lavori di: "Intervento di ripristino scarpata strada comunale San Giuseppe/Pianarelle (D.D. ITE n. 194/ITE/2016)", (C.U.P.: E87H16000780002 – C.I.G.: Z291BB0AEE) (progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 81 del 14.07.2016), sono stati aggiudicati alla ditta TECNOCONDOTTE di Comini A. & F. S.r.l. con sede in Castel di Lama (AP) – via Chiefenti n. 5 (P.IVA 00447980442) per il ribasso percentuale offerto pari al 27,50% (diconsi ventisette virgola cinquanta per cento) quindi per il prezzo contrattuale pari ad euro 22.583,26 (diconsi euro ventiduemilacinquecentoottantatre//26);
3.	è stato approvato il Q.T.E. di aggiudicazione sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
-	Importo lavori contrattuali
(di cui euro 634,00 quali oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso di gara)			euro	22.583,26
-	Somme a disp.ne dell’Amm.ne:
o	IVA 10% su lavori	euro	2.258,33
o	Spese indagini geologiche	euro	1.643,13
o	Spese calcoli strutturali opere in c.a.	euro	3.666,83
o	Spese tecniche (incentivazione 2% art.
113 D.Lgs. n. 50/2016) e validazione progetto 
e oneri assicurativi art. 24 c. 4, D.Lgs. n. 50/2016	euro	1.000,00
o	Lavori extra in economia e ribasso di gara	euro	8.848,45
	Totale somme a disp.ne dell’Amm.ne	euro	17.416,74	euro	17.416,74
	IMPORTO COMPLESSIVO			euro	40.000,00
•	che la copertura finanziaria dell’investimento sopra descritto dovrà essere garantita dagli appositi fondi regionali previsti, per il Comune di Montegiorgio, con Decreto Dirigente Servizio Infrastrutture della Regione marche n. 38/ITE del 23.03.2016 e che l’intervento in specie, per l’importo complessivo di €. 40.000,00, è stato previsto al Cap. 948/E/C corr. al Cap. 2842/U/C del bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016/2018 approvato con atto del C.C. n. 14 del 30.04.2016;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge ai sensi degli artt. 153 e 154 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, redatto e firmato dalle parti in data 6.02.2017;

ACCERTATO che in base all'art. 5 del Capitolato Speciale d’appalto l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla presente consegna, pertanto, il termine finale per dare ultimati i lavori è quello del  6/04/ 2017.

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori, redatto e firmato dalle parti in data 21 marzo 2017 dal quale risulta che gli gli stessi sono stati ultimati in pari data, pertanto entro il termine ultimo contrattuale. 

VISTO lo stato finale dei lavori di : "Intervento di ripristino scarpata strada comunale San Giuseppe/Pianarelle (D.D. ITE n. 194/ITE/2016)", (C.U.P.: E87H16000780002 – C.I.G.: Z291BB0AEE) (progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 81 del 14.07.2016),), relativo ai lavori eseguiti dalla ditta TECNOCONDOTTE di Comini A. & F. S.r.l. con sede in Castel di Lama (AP) – via Chiefenti n. 5 (P.IVA 00447980442) redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Urbanistica, composto dalla seguente documentazione:
-	Libretto delle misure;
-	Registro di contabilità;
-	Sommario del registro di contabilità;
-	Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 21.03.2017;
-	Certificato di pagamento n° 1 del 6 aprile 2017;
-	Verbale di consegna dei lavori firmato dalle parti in data 6 febbraio 2017;
-	Verbale di ultimazione dei lavori, firmato dalle parti in data  21 marzo 2017;
-	Quadro di raffronto Progetto / Stato finale dei lavori

ACCERTATO che dalle risultante dello stato finale dei lavori : "Intervento di ripristino scarpata strada comunale San Giuseppe/Pianarelle (D.D. ITE n. 194/ITE/2016)", (C.U.P.: E87H16000780002 – C.I.G.: Z291BB0AEE), risulta che l’impresa TECNOCONDOTTE di Comini A. & F. S.r.l. con sede in Castel di Lama (AP) – via Chiefenti n. 5 (P.IVA 00447980442), ha eseguito lavori per un importo di euro 21.758,45 oltre I.V.A. compresi gli oneri per la sicurezza e l’incidenza della manodopera ed al netto del ribasso d’asta;

ACCERTATO che, in relazione alle risultante dello stato finale, il quadro tecnico economico dell’intervento risulta essere così costituito:

Q.T.E. Stato finale	
Lavori a misura	21.758,45	
I.V.A.	2.175,85	
Spese indagini geologiche	1.630,66	
Spese calcoli strutturali opere in c.a.	
3.666,83	
Incentivazione, validazione ecc.	
822,94	
Economie	9.945,27	
Totale	40.000,00	
Risparmio netto	9.945,27	

VISTA la nota della Regione Marche, prot. 0250561 del 24.03.2017, pervenuta al protocollo del Comune di Montegiorgio li 29.03.2017 al n° 3967, con la quale, in relazione ai lavori in oggetto, si autorizza l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta per la realizzazione degli interventi previsti.

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra è stata la perizia relativa all’utilizzo delle economie dell’"Intervento di ripristino scarpata strada comunale San Giuseppe/Pianarelle (D.D. ITE n. 194/ITE/2016)", (C.U.P.: E87H16000780002 – C.I.G.: Z291BB0AEE), così come accertate nello stato finale dei lavori principali redatto e firmato dalle parti in data 24.03.2017, costituita dai seguenti elaborati:
•	Relazione tecnica e quadro tecnico economico
•	Elenco prezzi
•	Computo metrico estimativo
•	Elaborato grafico
•	Documentazione fotografica
•	Atto di sottomissione
che prevede la esecuzione delle categorie di ulteriori lavori connessi, funzionali e migliorativi dell’intervento approvato;

ACCERTATO che il progetto per l’utilizzo delle economie dei lavori di "Intervento di ripristino scarpata strada comunale San Giuseppe/Pianarelle (D.D. ITE n. 194/ITE/2016)", (C.U.P.: E87H16000780002 – C.I.G.: Z291BB0AEE) prevede il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
Importo lavori		11.893,62	
A detrarre incidenza sicurezza		380,00	
Importo soggetto a ribasso		11.513,62	
A detrarre il ribasso d’asta del 27,50%		3.166,24	
Sommando l’indicenza della sicurezza		380,00	
Importo netto		8.727,38	
			
Somme a disposizione:		
	
I.V.A. (10 %)		872,74	
Incentivazione (2 %)		237,87	
Economie		107,28	
Totale somme a disposizione		1.217,89	
Totale di progetto		9.945,27	

ACCERTATO  che tutte le opere previste dal progetto saranno eseguite su aree pubbliche e che pertanto non si rendono necessari espropri e/o acquisizioni di aree;

DI DARE ATTO che la perizia in oggetto prevede ulteriori lavori connessi, funzionali e migliorativi dell’intervento approvato e validato ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che, come confermato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, dalla definitiva realizzazione dell'intervento in oggetto, non derivano maggiori oneri a carico del Comune di Montegiorgio in aggiunta a quelli già normalmente ed appositamente previsti in bilancio;

RAVVISATA, al momento, la necessità di approvare la perizia sopra descritto, al fine di rispettare la tempistica dettata dalla Regione Marche: punto 4.D.D. Serv. I.T.E. n. 33/ITE del 10.03.2016 “……DI STABILIRE il termine di quattro mesi dalla notifica del presente atto per la presentazione della progettazione appaltabile relativa agli interventi di cui all’allegato “4””;

DATO ATTO che il finanziamento della perizia in oggetto, per l’importo complessivo di euro 9.945,27, rientra all’interno delle economie dell’intervento originario approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 14.07.2016, previsto al Cap. 948/E/C corr. al Cap. 2842/U/C del bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016/2018 approvato con atto del C.C. n. 14 del 30.04.2016;

VISTA la D.G.C. n. 50 del 13.05.2016 di assegnazione definitiva del budget ai Responsabili dei singoli Servizi per l’anno 2016;

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO  lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, sull’azione amministrativa e di regolarità contabile dell’atto;

P R O P O N E

1)	DI RICHIAMARE ed APPROVARE la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2)	DI APPROVARE, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e per quanto in premessa esposto e motivato, la perizia per l’utilizzo delle economie così come accertate dallo stato finale dei lavori di dell’"Intervento di ripristino scarpata strada comunale San Giuseppe/Pianarelle (D.D. ITE n. 194/ITE/2016)", (C.U.P.: E87H16000780002 – C.I.G.: Z291BB0AEE), così come accertate nello stato finale dei lavori principali redatto e firmato dalle parti in data 24.03.2017, costituita dai seguenti elaborati:
•	Relazione tecnica e quadro tecnico economico
•	Elenco prezzi
•	Computo metrico estimativo
•	Elaborato grafico
•	Documentazione fotografica
•	Atto di sottomissione
che prevede la esecuzione delle categorie di ulteriori lavori connessi, funzionali e migliorativi dell’intervento approvato;

3)	DI DARE ATTO che la peizia per l’utilizzo delle economie dei lavori di "Intervento di ripristino scarpata strada comunale San Giuseppe/Pianarelle (D.D. ITE n. 194/ITE/2016)", (C.U.P.: E87H16000780002 – C.I.G.: Z291BB0AEE) prevede il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
Importo lavori		11.893,62	
A detrarre incidenza sicurezza		380,00	
Importo soggetto a ribasso		11.513,62	
A detrarre il ribasso d’asta del 27,50%		3.166,24	
Sommando l’indicenza della sicurezza		380,00	
Importo netto		8.727,38	
			
Somme a disposizione:		
	
I.V.A. (10 %)		872,74	
Incentivazione (2 %)		237,87	
Economie		107,28	
Totale somme a disposizione		1.217,89	
Totale di progetto		9.945,27	

4)	DI DARE ATTO che il finanziamento della perizia in oggetto, per l’importo complessivo di euro 9.945,27 rientra all’interno delle economie dell’intervento originario approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 14.07.2016, previsto al Cap. 948/E/C corr. al Cap. 2842/U/C del bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016/2018 approvato con atto del C.C. n. 14 del 30.04.2016;

5)	DI DARE ATTO che, come confermato dal Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, dalla definitiva realizzazione dell’intervento in oggetto, non deriveranno maggiori oneri a carico del Comune di Montegiorgio in aggiunta a quelli già normalmente ed appositamente previsti in bilancio;

6)	DI DARE ATTO  che al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Montegiorgio, cui è attribuita la responsabilità del procedimento conseguente l'adozione del presente atto, provvederà, nei limiti delle proprie competenze e funzioni, ad adottare quanto necessario per conferire concreta esecuzione al provvedimento in oggetto;

7)	DI DICHIARARE la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in relazione ai tempi stretti dettati dalla Regione Marche: punto 4.D.D. Serv. I.T.E. n. 33/ITE del 10.03.2016 “……DI STABILIRE il termine di quattro mesi dalla notifica del presente atto per la presentazione della progettazione appaltabile relativa agli interventi di cui all’allegato “4””.

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

LA GIUNTA COMUNALE
Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio  evidenziati;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;
 Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico – Sezione LL.PP.-Patrimonio  per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile e  dell'art. 147 bis dello stesso  Decreto Legislativo n. 267/2000;
 Con votazione palese unanime;
DELIBERA

1) DI RICHIAMARE ed APPROVARE la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii..

2) DI APPROVARE, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e per quanto in premessa esposto e motivato, la perizia per l’utilizzo delle economie così come accertate dallo stato finale dei lavori di dell’"Intervento di ripristino scarpata strada comunale San Giuseppe/Pianarelle (D.D. ITE n. 194/ITE/2016)", (C.U.P.: E87H16000780002 – C.I.G.: Z291BB0AEE), così come accertate nello stato finale dei lavori principali redatto e firmato dalle parti in data 24.03.2017, costituita dai seguenti elaborati:
•	Relazione tecnica e quadro tecnico economico
•	Elenco prezzi
•	Computo metrico estimativo
•	Elaborato grafico
•	Documentazione fotografica
•	Atto di sottomissione
che prevede la esecuzione delle categorie di ulteriori lavori connessi, funzionali e migliorativi dell’intervento approvato.

3) DI DARE ATTO che la peizia per l’utilizzo delle economie dei lavori di "Intervento di ripristino scarpata strada comunale San Giuseppe/Pianarelle (D.D. ITE n. 194/ITE/2016)", (C.U.P.: E87H16000780002 – C.I.G.: Z291BB0AEE) prevede il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
Importo lavori		11.893,62	
A detrarre incidenza sicurezza		380,00	
Importo soggetto a ribasso		11.513,62	
A detrarre il ribasso d’asta del 27,50%		3.166,24	
Sommando l’indicenza della sicurezza		380,00	
Importo netto		8.727,38	
			
Somme a disposizione:		
	
I.V.A. (10 %)		872,74	
Incentivazione (2 %)		237,87	
Economie		107,28	
Totale somme a disposizione		1.217,89	
Totale di progetto		9.945,27	

4) DI DARE ATTO che il finanziamento della perizia in oggetto, per l’importo complessivo di euro 9.945,27 rientra all’interno delle economie dell’intervento originario approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 14.07.2016, previsto al Cap. 948/E/C corr. al Cap. 2842/U/C del bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016/2018 approvato con atto del C.C. n. 14 del 30.04.2016.

5) DI DARE ATTO che, come confermato dal Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, dalla definitiva realizzazione dell’intervento in oggetto, non deriveranno maggiori oneri a carico del Comune di Montegiorgio in aggiunta a quelli già normalmente ed appositamente previsti in bilancio.

6) DI DARE ATTO  che al Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Montegiorgio, cui è attribuita la responsabilità del procedimento conseguente l'adozione del presente atto, provvederà, nei limiti delle proprie competenze e funzioni, ad adottare quanto necessario per conferire concreta esecuzione al provvedimento in oggetto.

 Inoltre;
LA GIUNTA COMUNALE
In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste, in relazione ai tempi stretti dettati dalla Regione Marche: punto 4.D.D. Serv. I.T.E. n. 33/ITE del 10.03.2016 “……DI STABILIRE il termine di quattro mesi dalla notifica del presente atto per la presentazione della progettazione appaltabile relativa agli interventi di cui all’allegato “4””;

Con separata, palese ed unanime votazione;
DELIBERA
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n^ 267/2000.

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime PARERE Favorevole in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 18-04-2017
Il Responsabile del Servizio Interessato
             F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)
________________________________________________________________________________________________
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE Favorevole in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 18-04-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
             F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
 (Firma all'originale)
________________________________________________________________________________________________

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità tecnica e si attestano la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 18-04-2017
Il Responsabile del Servizio Interessato
             F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
 (Firma all'originale)
________________________________________________________________________________________________
Si rilascia e si esprime parere Favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 18-04-2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
             F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
 (Firma all'originale)
_______________________________________________________________________________________________

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE	Il PRESIDENTE
	
F.to Nando Dott. Tozzi	F.to ARMANDO BENEDETTI

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
In data 30-05-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
	 F.to Dott. Tozzi Nando
_______________________

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n^ 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 27-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
	 F.to Dott. Tozzi Nando
_______________________

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69)  dal 30-05-2017 al 14-06-2017 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li 	 	IL SEGRETARIO COMUNALE
		 F.to Dott. Tozzi Nando
		............................

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, lì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
         Dott. Tozzi Nando