Reg. Generale N. 852

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 267 del 30-12-2016

 
OGGETTO:SISMA 2016/2017. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA OTTOBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE "CECI" . RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA BAGLIONI COSTRUZIONI SRL DI MONTEGIORGIO.. 

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di dicembre nei propri uffici.

 
 
In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(C.I.G.: ZB11BDF95E)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.-PATRIMONIO

Visto il Decreto Sindacale n.09 del 30.09.2016  con il quale al sottoscritto geom. Giorgio Benni è stata attribuita la Responsabilità del Servizio LL.PP.-Patrimonio fino alla data del 31.12.2016;

PREMESSO CHE

-con verbale di somma urgenza redatto in data 10.11.2016 sono stati avviati i lavori per il ripristino delle condizioni di agibilità dell’immobile sito in Via Mazzini, di proprietà comunale destinato a scuola elementare “L. CECI”. L’immobile è distinto al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 30 con la particella n. 244 sub 3-4-5-6, il quale a causa delle scosse sismiche del 26 e 30 ottobre 2016 e dopo verifiche, in data 03.11.2016, da parte del personale tecnico del Comune di Montegiorgio ed in data 06.11.2016 da parte del personale della Protezione Civile è stato nuovamente dichiarato Agibile con Provvedimenti con scheda AeDS del 06.11.2016;

-la procedura di somma urgenza prevista dall’art.lo 163 del D.Lgs 50/2016  è stata attivata a seguito della necessità di garantire, non solo la ripresa dell’attività didattica nei luoghi deputati a tal fine ma anche e soprattutto per la salvaguardia della pubblica incolumità, con la esecuzioni dei lavori di rimozione e conseguente ripristino delle parti danneggiate dal terremoto.

-per il completamento dei lavori di ripresa delle lesioni è stato previsto un tempo massimo di giorni 13 e per le opere pittoriche ulteriori 15 giorni di lavoro;

PREMESSO QUANTO SOPRA 

VISTO che con verbale di somma urgenza del 10.11.2016 a cui è stato allegato un computo metrico per la quantificazione degli interventi necessari, si è provveduto ad affidare i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile adibito a scuola primaria “L.Ceci” in Via Mazzini, alla ditta BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l. di Montegiorgio (P.IVA 01879930442) (CIG. ) che si è dichiarata disposta ad eseguire con urgenza e tempestività le opere richieste per un importo complessivo compresa IVA di €. 35.000,00 come risulta dal seguente Q,T.E.

VOCI ELEMENTARI	QUANTITÀ’	IMPORTI UNITARI	IMPORTO VOCE
€.	
A)	ORE  LAVORATIVE COMPRENSIVE DI UTENSILI DA LAVORO, QUALI SCALE, TRABATTELLI, PUNTELLI, LEGNAME  ED ATTREZZATURA VARIA.  	GIORNATE 90 X 8/ORE =  ORE 720	€.25,00/ORA	18.000,00	
B)	RIPRESA PITTORICA DI ZOCCOLATURA CON PITTURA IN SMALTO SINTETICO PIGMETATO IN TINTA UNICA A DUE STRATI DATI A PENNELLO ESEGUITA A QUALSIASI ALTEZZA SU PARETI E SOFFITTI PREVIA PREPARZIONE DEL SUPPORTO MEDIANTE SPAZZOLATURA CON RASCHIETTO COMPRESO MATERIALE DATO IN OPERA, FISSAGIO ED OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D’ARTE. 
	ML. 600 * 1,50=
MQ. 900,00	€./MQ. 10,00	     9.000,00	
C)	MATERIALE NECESSARIO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI QUALI, RESINE PER RINFORZO PARETI, MALTE, RETE IN MATERIALE PLASTICO PER RINFORZO INTONACI,  MATTONI PER RIPRESE CUCI E SCUCI .    	VARIE	IMPORTO STIMATO 	    4.000,00	
IMPORTO TOTALE			31.000,00	
D)	IVA AL 10% Punto A e B 			2.700,00	
E)	IVA AL 22% Punto C			880,00	
F)	IMPREVISTI			420,00	
G)	ONERI SICUREZZA RICOMPRESI NELLA VOCE A e B) 			650,00	
TOTALE VOCI A+B+C+D+E+F			€. 35.000,00	

VISTA la determinazione n° 214 REG. GEN. 706 del 10.11.2016 con la quale è stato approvato l’affidamento dei lavori di somma urgenza per la riparazione dei danni causati dall’evento sismico del 26/30 ottobre..2016 alla ditta Baglioni Costruzioni srl di Montegiorgio ai sensi dell’art.lo 163 del D.lgs 50/2016 con la quale si da atto inoltre :

1)	DI AFFIDARE alla ditta “BAGLIONI COSTRUZIONI SRL” con sede in Montegiorgio P.IVA 01879930442 dotata di idonea attrezzatura, competenze professionali e disposta ad eseguire immediatamente i lavori  di ripristino dei danni derivanti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, nella scuola elementare “L.Ceci” sita nel Centro Storico di Montegiorgio in Via Mazzini CIG. ZB11BDF95E;

2)	DI STABILIRE in €. 35.000,00 di cui €. 31.000,00  per l’esecuzione di opere e acquisto di materiale, €. 650,00 per oneri della sicurezza,  €. 3.580,00  per IVA e  €. 420,00 per imprevisti la somma necessaria per l’esecuzione delle opere necessarie per il ripristino delle condizioni del’immobile ante sisma del  26 e 30 ottobre 2016;

3)	DI DARE DATO ATTO che,  l’importo complessivo da corrispondere alla ditta “BAGLIONI COSTRUZIONI SRL” con sede in Montegiorgio P.IVA 01879930442 sarà quello risultante dal computo finale dei lavori in cui sono ricomprese la realizzazione delle opere e l’acquisto del materiale utilizzato;

4)	DI STABILIRE che la durata complessiva dei lavori edili è stata prevista dal 10.11.2016 al 22.11.2016  salvo imprevisti durante l’esecuzione dei lavori, per opere di riparazione delle lesioni presenti nei vari piani del plesso scolastico per complessivi 13 giorni. Mentre le opere pittoriche di ripristino della zoccolatura esistente sono stati previsti quindici giorni (15gg) dalla data di asciugatura delle pareti interessante dagli interventi di ripristino delle lesioni.

5)	DI DARE ATTO ALTRESI’ che gli attuali stanziamenti di bilancio presentano la capienza necessaria per garantire l’impegno di spesa e la conseguente liquidazione dei lavori come sopra affidati da imputarsi al capitolo 5131 appositatamente costituito con variazione di bilancio n. 5 approvata con atto di giunta comunale del 03.11.2016;

VISTO che i lavori sono iniziati in data 10.11.2016 ;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori, redatto e firmato dalle parti in data 22.11.2016;

VISTO che la ditta BAGLIONI COSTRUZIONI srl di Montegiorgio, grazie alla disponibilità del personale messo a disposizione dalla stessa, è riuscita ad eseguire sia le opere di ripristino delle lesioni che quelle di tinteggiatura entro la data del 22.11.2016 con grande vantaggio sui tempi previsti e con costi inferiori a quelli preventivati;  

VISTO che dalla documentazione contabile finale delle ore effettuate e dei materiali forniti per i lavori relativi al “….. ripristino dei danni derivanti dal sisma del 26/30 ottobre.2016, nella scuola elementare “L.Ceci” sita nel Centro Storico di Montegiorgio in Via Mazzini” (C.I.G.: ZB11BDF95E), eseguiti dalla ditta BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in MONTEGIORGIO (FM) – C.DA SANTA LUCIA  (P.IVA 01879930442	 ) composta dalla seguente documentazione:
o	Verbale somma urgenza del 10.11.2016
o	Computo metrico estimativo;
o	Determina affidamento lavori n. 214/2016;
o	Resoconto ore lavorative, misurazione tinteggiature, acquisto materiale;
o	Verbale di ultimazione dei lavori, firmato dalle parti in data 23.11.2016;
o	Documentazione fotografica

ACCERTATO che dalle risultante delle contabilità finale  dei lavori di ripristino dei danni derivanti dal sisma del 26/30.ottobre.2016, nella scuola elementare “L.Ceci” sita nel Centro Storico di Montegiorgio in Via Mazzini” (C.I.G.: ZB11BDF95E ), la ditta BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in MONTEGIORGIO (FM) – C.DA SANTA LUCIA  (P.IVA 01879930442	 )  ha eseguito lavori per un importo di €. 28.720,89 compresa IVA;

VISTO il quadro di raffronto sotto riportato:

VOCI ELEMENTARI	QUANTITÀ’ DI PROGETTO	QUANTITA’ CONTABILIZZATE	IMPORTI UNITARI D PROGETTO	IMPORTO VOCE PROGETTO
€.	IMPORTO VOCE CONTABILIZZATA
€.	
DIFFERENZA IN +/-	
A)	ORE  LAVORATIVE COMPRENSIVE DI UTENSILI DA LAVORO, QUALI SCALE, TRABATTELLI, PUNTELLI, LEGNAME  ED ATTREZZATURA VARIA 	
GIORNATE 90 X 8/ORE = 720 ORE	  
TOTALE ORE LAVORATE
640 	
       €.25,00/ORA	
€. 18.000,00	
€. , 16.000,00	
-	 €. 2.000,00	
B)	RIPRESA PITTORICA DI ZOCCULATURA PERIMETRALE 	
Mq. 900,00	
Mq. 917,23	
      €. 10,00 MQ
      	
€. 9.000,00
	
€. 9.172,30

               + €. 172,30	
C)	MATERIALE NECESSARIO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI QUALI, RESINE PER RINFORZO PARETI, MALTE RETE IN MATERIALE PLASTICO PER RINFORZO INTONACI,  MATTONI PER RIPRESE SCUCI E CUCI.    	
VARIE	
	
IMPORTO STIMATO 	
€. 4.000,00	
€. 845,38	
-	€. 3.154,62	
IMPORTO TOTALE				€.  31.000,00	€. 26.017,68	-	€. 4.982,32	
D)	IVA AL 10%  PUNTO (A E B)				              €.   2.700,0	€. 2.517,23	-	€. 182,77	
E)	IVA AL 22% PUNTO C)				€. 880,00	€. 185,98	-	€. 694,02	
F)	IMPREVISTI				€. 420,00	€. 0,00	-	€. 420,00	
G)	ONERI SICUREZZA COMPRESI IMPORTI LAVORI				€.  650,00	€. 650,00		
TOTALE VOCI A+B+C				€. 35.000,00	€- 28.720,89	-	€. 6.279,11	

DATO ATTO che dalla contabilità finale si rileva una economia pari ad €. 6.279,11 IVA compresa  rispetto agli importi previsti nel computo metrico allegato al verbale di somma urgenza del 10.11.2016;

VISTO il verbale di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Responsabile del Responsabile del Servizio LL.PP.-PATRIMONIO nonché Responsabile Unico dei Lavori dal quale si rileva la perfetta realizzazione delle opere di messa in sicurezza del plesso scolastico sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio LL.PP.-Patrimonio e dall’ing. Giovanni Capecci tecnico incaricato delle verifiche statiche degli immobili pubblici;

DATO ATTO CHE
-sulla base dell’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 art.li 46-47 e 48 non risultano cessioni di credito da parte dell’impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
-la ditta risulta in regola con i versamenti presso gli Enti di competenza (DURC)

RITENUTO pertanto di poter dare corso all’approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione resi dal Responsabile del Servizio LL.PP.-Patrimonio e regolarmente sottoscritta dalla ditta esecutrice dei lavori di somma urgenza presso la scuola primaria “L.Ceci” di Montegiorgio e relativa alla riparazione dei danni del sisma del 26/30 ottobre 2016

VISTI ed esaminati gli atti di contabilità finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e ritenuto di poter procedere all’approvazione degli stessi, liquidando il credito di €. 28.720,89 compresa IVA di cui €.25.172,30  per lavori ed €.2.517,23 per IVA al 10% - Per fornitura materiale €. 845,38 ed €. 185,98 per IVA al 22%, alla ditta BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in MONTEGIORGIO (FM) – C.DA SANTA LUCIA  (P.IVA 01879930442); 

VISTA  la Legge 13 Agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 Novembre 2010 n. 187 convertito in Legge 17 Dicembre 2010, n. 217, che prevedono la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali;

CONSIDERATO che, ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, i lavori di somma urgenza relativi all’esecuzione dei lavori di riparazione e messa in sicurezza del plesso scolastico “L:CECI” è identificato con il seguente CIG ZB11BDF95E;

VISTO l’articolo 1, comma 629, lettera b, della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) che ha introdotto l’articolo 17-ter del DPR n. 633/72;

VISTO il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i  ad oggetto: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i. ed in particolare all’art.lo 7 lettera C del comma 1 riguardante le opere pubbliche dei Comuni;

 VISTO il D.P.R. 207/2010 ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2005 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2005/17/CE e 2004/18/CE",  per quanto ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs n° 50/2016 ad oggetto: " Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)" 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, (approvato con deliberazione consiliare n°45 del 22/12/2006) per quanto applicabile;

ACCERTATO che durante la esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

RILEVATO che durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;

DATO ATTO che per l’esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su area di proprietà del Comune di Montegiorgio per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

ACCERTATO che i lavori sono stati diretti dal Servizio LL.PP.-PATRIMONIO del Comune di Montegiorgio, unitamente al consulente incaricato, ing. Giovanni Capecci, con determine del Responsabile del Servizio LL.PP.-Patrimonio del 02.09.2016 n. 162 e  del 28.10.2016 n. 200;

CONSIDERATO che trattasi di  edificio di proprietà del Comune di Montegiorgio ,catastalmente individuato al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 30 con le particelle 244 sub 3-4-5-6 ;
 
ACCERTATO che gli attuali stanziamenti di bilancio presentano la capienza necessaria per garantire l’impegno di spesa e la conseguente liquidazione dei lavori per complessivi 28.720,89 compresa IVA  da imputarsi al capitolo cap. 5131 del bilancio corrente come di seguito riportato:

CIG.	DITTA	LAVORO	IMPORTO
€	IVA 
	IMPORTO IVA €. 	TOTALE
€	
ZB11BDF95E	BAGLIONI COSTRUZIONI SRL DI MONTEGIORGIO C.DA SANTA LUCIA 	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO SICUREZZA SCUOLA “L.CECI” OTTOBRE 2016: 					
							
		LAVORI	25.172,30	10%	2.517,23	  27.689,53	
		ACQUISTO DI MATERIAE	845,38	22%	185,98	   1.031,36	
				TOTALE		28.720,89	

DI PROCEDERE, alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente ed alla trasmissione agli organi competenti  per i controlli di loro spettanza;

DATO ATTO:

-	che in merito al procedimento in parola, non vi è conflitto di interesse fra il sottoscritto ed il destinatario finale del medesimo;
-	che il provvedimento verrà contestualmente inoltrato all’Ufficio competente per la dovuta pubblicazione nell’apposita sezione del Sito Istituzionale (Albo Pretorio on line);
-	che dal presente provvedimento scaturiscono oneri per il bilancio corrente.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del  30.04.2016  con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione variato  da ultimo con delibera di C.C. n. 23 del 30.07.2016 ;

VISTA la deliberazione del 03.11.2016 relativa alla quinta variazione di bilancio dell’anno 2016, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati previsti gli importi necessari per opere di somma urgenza necessarie a far fronte alla attuale situazione derivante dal sisma che ha colpito il Comune di Montegiorgio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

DI APPROVARE per i motivi espressi in premessa la contabilità finale dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del plesso scolastico della scuola primaria “L. CECI” in Via Mazzini in Montegiorgio, sisma del 26/30 . ottobre.2016,  secondo gli elaborati tecnici redatti dal Responsabile del Servizio LL.PP.-Patrimonio del Comune di Montegiorgio geom. Giorgio Benni;

DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto dal Responsabile del Servizio LL.PP.-Patrimonio del Comune di Montegiorgio geom. Giorgio Benni dal quale risulta che in base ai riscontri contabili effettuati, i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che l’importo finale dei lavori ammonta a :

CIG.	DITTA	LAVORO	IMPORTO
€	IVA 
	IMPORTO IVA €. 	TOTALE
€	
ZB11BDF95E	BAGLIONI COSTRUZIONI SRL DI MONTEGIORGIO C.DA SANTA LUCIA 	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO SICUREZZA SCUOLA “L.CECI” OTTOBRE 2016: 					
							
		LAVORI	25.172,30	10%	2.517,23	  27.689,53	
		ACQUISTO DI MATERIAE	845,38	22%	185,98	   1.031,36	
				TOTALE		28.720,89	

DI DARE ATTO che rispetto a quanto preventivato nel computo metrico allegato al verbale di somma urgenza del 10.11..2016 risultano economie per €. 6.279,11 compresa IVA  rispetto agli importi previsti nel computo metrico allegato al verbale di somma urgenza del 10.11.2016;

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta  BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in MONTEGIORGIO (FM) – C.DA SANTA LUCIA  (P.IVA 01879930442) il credito di €. 26.017,68  relativo alla quota per lavori ed acquisto di materiale.

PAGARE, ai sensi dell’art.lo 1 comma 629, lettera b) della L.190/2014, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le previsto dall’art.lo 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.01.2015, la somma di €. 2.703,21.

DI AUTORIZZARE l'ufficio Ragioneria alla liquidazione dell'ammontare delle somme relative ai lavori, acquisto di materiale e l'IVA solo dopo la presentazione da parte della ditta  BAGLIONI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in MONTEGIORGIO (FM) – C.DA SANTA LUCIA  (P.IVA 01879930442) della fattura relativa.

DI DARE ATTO ALTRESI’ che gli attuali stanziamenti di bilancio presentano la capienza necessaria al capitolo 5131 del bilancio corrente che presenta adeguata disponibilità  per garantire la liquidazione degli importi contabilizzati;

DI PROCEDERE,  alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente ed alla trasmissione agli organi competenti  per i controlli di loro spettanza.

DI INOLTRARE, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

DI DARE ATTO che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. 

     

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
							 	 F.to Geom. Benni Giorgio

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE	 di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, lì 30-12-2016
Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. Giorgio Benni
(Firma all'originale)
_______________________________________________________________________________________________

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Giorgio Benni
 (Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

In data 28-06-2017                                                                                               Il Segretario Comunale
                                                                                                                     F.to Dott. Luigi Simonelli 

Si attesta che copia della presente determinazione è stata  pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web  istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 28-06-2017 		al 13-07-2017	   per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li 	Il Segretario Comunale
                                                                                                                      F.to Dott. Luigi Simonelli 

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li, 	
     Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. Giorgio Benni