COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 153                DEL  02-10-2018

Oggetto:	L.  61/98 ART. 3 - P.R.I.P. MEVALE  LAVORI DI CON=
		SOLIDAMENTO DELL'AREA DI SEDIME DELLABITATO DI ME=
		VALE, II STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTI=
		VA E DI VARIANTE N. 1.

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  due del mese di ottobre alle ore 11:15, nella sala delle adunanze del Comune suddeto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l’altro dell’oggetto suindicato alla presenza dei Signori: 

   PAZZAGLINI GIULIANO	SINDACO	A	
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	VICESINDACO	P	
SERFAUSTINI PATRIZIA	ASSESSORE	P	

Assegnati n.    3           In carica n. 3

Presenti   n.    2         Assenti   n.    1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante  (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il  SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di VICESINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

  Immediatamente eseguibile  	N	
  Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N	

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 158 DELL’ANNO 20-09-2018 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1,  DEL T.U. n.267/2000. 

PARERE:   in ordine alla COPERTURA FINANZIARIA

Data:           				        Il Responsabile del servizio
					 	 F.to Remigi Valentina

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data:           				        Il Responsabile del servizio
                                                       		 F.to Remigi Valentina

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data:           				        Il Responsabile del servizio
						 F.to FARRONI CRISTIANO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:
- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

RICHIAMATA la delibera n.3 del 04/02/2005 con cui il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica per la ricostruzione del Nucleo Storico di Mevale  unitamente agli altri atti connessi;

RICHIAMATA, altresì, la D.G.R.  n. 310 con cui la Giunta Regionale  ha approvato il piano finanziario annesso al suddetto Piano di Recupero di Mevale per una spesa complessiva  stimata in €.12.110.323,15 e che all’interno  della somma indicata è previsto l’importo di  € 2.700.000,00 per lavori di Consolidamento dell’area di sedime dell’abitato;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio  n. 206 del 02/08/2005  con la quale viene conferito  agli Ing. Stefano Leonori e Geol. Fabrizio Pontoni dello Studio Tecnico Associato Geoequipe di Tolentino, l’incarico di progettazione, direzione dei lavori e contabilità, relativi ai lavori di cui sopra;

ATTESO che ai fini della cantierabilità dell’opera si è proceduto all’acquisizione della totalità delle aree interessate all’intervento;

VISTO l’art.14	comma 3 delle Legge n.61/98, il quale consente, in deroga agli art. 90 e seguenti del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., di articolare la progettazione delle opere pubbliche in quello di livello definitivo ed esecutivo;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 93 del 22/08/2007 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di l “L.61/98 art.3- P.R.I.P. Mevale - Consolidamento dell’area di sedime dell’abitato di Mevale” con la previsione di due stralci funzionali di cui il primo di € 2.406.000,00 ed il secondo di € 294.000,00;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 96 del 25/08/2007 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “L.61/98 art.3- P.R.I.P. Mevale - Consolidamento dell’area di sedime dell’abitato di Mevale – 1^ stralcio” e dato atto che detti lavori si sono conclusi in data 23/04/2009;

VISTO che con Delibera della Giunta Comunale n. 100 del 16/07/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “L.61/98 art.3 - P.R.I.P. Mevale - Consolidamento dell’area di sedime dell’abitato di Mevale – 2^ stralcio”, redatto dagli Ing. Stefano Leonori e Geol. Fabrizio Pontoni dello Studio Tecnico Associato Geoequipe di Tolentino per un importo complessivo di €. 294.000,00, di cui €. 220.124,77 per lavori;

VISTO che con Determina Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 26 del 12.03.2014 detti lavori sono stati appaltati alla ditta Fiorelli Costruzioni s.r.l. con sede in Loc. Molini di Croce n.12 Visso (MC), che ha offerto un ribasso di 33,00% sull'importo a base d'asta, con la seguente determinazione dell'importo contrattuale, per lavori € 144.496,89, più gli oneri per la sicurezza per € 4.457,77, per un importo contrattuale complessivo di € 148.954,66, come risulta dal verbale di gara del  29/01/2014;

VISTO che con contratto di appalto rep. 496 del 20.05.2015, è stata affidata l’esecuzione dei lavori di che trattasi all’Impresa Edile Fiorelli Costruzioni s.r.l. con sede in Visso (MC) in Loc. Molini di Croce n. 12, per un importo contrattuale di € 148.954,66 al netto del ribasso d’asta del 33,00%;

VISTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 01.07.2015;

CONSIDERATO CHE durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare delle modifiche e delle integrazioni al progetto originario come previsto dall’art. 132 comma 1 punti b), c), d) e comma 3 ultimo capoverso del d.lgs. 163/2006 (che ha sostituito il comma 3, articolo 25 della legge n. 109/94) con le modifiche previste dall'articolo 14 comma 5 della legge n. 61/98;

DATO ATTO che le variazioni apportate al progetto approvato sono quelle dettagliatamente descritte nella relazione tecnica di variante che comportano un aumento contrattuale da €. 148.954,66 ad €. 161.612,89 con un incremento di €. 12.658,23 dell’importo contrattuale originario, pari al 8,50 %;

DATO ATTO che a causa dei lavori suppletivi sarà necessario concedere una proroga di 40gg. sui tempi contrattuali di esecuzione dei lavori;

VISTI i seguenti elaborati della prima perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei lavori Ing. Stefano Leonori:
1.	V1.1 - "Relazione tecnica, Documentazione fotografica, Nuovo computo metrico estimativo, Quadro di raffronto lavori, Elenco nuovi prezzi, Analisi nuovi prezzi";
2.	V1.2 - "Relazione di calcolo, Relazione sui materiali, Relazione geotecnica e sulle fondazioni";
3.	V1.3 - Planimetria generale interventi  2° stralcio;
4.	V1.4.1 - Cinta A: Tratto A36-A39 - Planimetria, sviluppo e sezioni;
5.	V1.4.2 - Cinta A: Tratto A36-A38 - Carpenterie e armature;
6.	V1.5.1 - Cinta B: Tratto B4-B6 - Carpenterie e armature;
7.	V1.5.2 - Cinta B: Tratto B12-B16 - Carpenterie e armature;
8.	V1.5.3 - Cinta B: Tratto B17-B21 - Carpenterie e armature;
9.	V1.5.4 - Cinta B: Tratto B21-B25 - Carpenterie e armature;
10.	V1.6.1 - Cinta D: Tratto D19-D20 - Carpenterie e armature scala;
11.	V1.6.2 - Cinta D: Tratto D21-D28 - Carpenterie e armature;
12.	V1.7.1 - Cinta E: Tratto E9-E11 - Planimetria, sviluppo e sezioni Carpenterie e armature;
13.	V1.8.1 - Cinta A: Tratto F1-F10-F9-F8 - Planimetria, sviluppo e sezioni;
14.	V1.8.2 - Cinta A: Tratto F1-F10-F9-F8 - Carpenterie e armature.
			
DATO ATTO che la perizia suppletiva e di variante presenta il seguente Quadro Tecnico Economico di raffronto di Variante:

DATO ATTO che la perizia suppletiva e di variante non comporta maggiori spese rispetto all’importo complessivo del progetto approvato e l’importo contrattuale subisce un aumento di €.  12.658,23 oltre I.V.A.;

VISTO l’esito della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 21.08.2018 protocollo della Regione Marche n. 0053584 del 21.08.2018, assunto al protocollo comunale n. 8544 del 27.08.2018;

VISTA l’attestazione di conformità della Variante ai criteri del piano e delle condizioni di ammissibilità al contributo della Regione Marche USR Sisma 2016 prot. 0058838 del 19.09.2018;

VISTO lo schema di atto di sottomissione allegato A della presente deliberazione;

VISTO il CUP E64B13000150002;

VISTO il Codice identificativo gara (C.I.G.) 5312251035;

VISTI il d.lgs 163/2006 e il DPR 207/2010;

VISTA la Legge n. 61/98;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della variante in questione;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

1. LA PREMESSA in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. APPROVARE la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori “Programma di recupero del nucleo storico di Mevale (L.61/98): interventi di consolidamento dell’area di sedime dell’abitato - II^ stralcio”, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Stefano Leonori di Tolentino, composta dagli elaborati indicati in premessa e che presenta il Quadro Tecnico Economico indicato in premessa;

3. APPROVARE l’atto di sottomissione allegato A della presente, dando atto che l’importo contrattuale aumenta di €. 12.658,23 oltre I.V.A.;

4. DARE ATTO che la copertura finanziaria derivante dall’adozione del presente atto, è assicurata con i fondi di cui all’art. 3 della L. 61/98, di cui al Decreto del Dirigente della P.F.  Beni Culturali e Programmi di Recupero della Regione Marche n. 42/TBC-07 del 05/09/2007 di € 2.700.000,00 comprensivo dell’acconto di € 135.000,00 già anticipato con Decreto del Dirigente C.P.R.B.C. della Regione Marche n. 44/CPR del 13/04/2005, appositamente accantonati al cap. 2906/4 (cod.bil. 08.01-2.02.01.09.000) del bilancio 2016 - Imp. 533/2013.

ALLEGATO A

REP. N. _________							DEL _____________
ATTO DI SOTTOMISSIONE
SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE SOLO IN CASO D’USO

L. 61/98 ART. 3 - P.R.I.P. MEVALE – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELL’AREA DI SEDIME DELL’ABITATO DI MEVALE, II STRALCIO.
CIG 5312251035								CUP E64B13000150002
L’anno duemiladiciotto addì _______ del mese di __________, presso la Sede Municipale, i Sigg.:
1) Ing. Cristiano Farroni, nato a Camerino il 03.12.1974, C.F. FRR CST 74T03 B474J, in qualità di Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Protezione Civile del Comune di Visso, C.F. 81000730432, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo, in forza del decreto sindacale n. 2 del 03.03.2015 e di quanto stabilito dall’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
2) Sig. Giovanni Fiorelli  nato a Foligno (PG) il 05/06/1975 e residente a Visso (MC) in Loc. Molini, C.F. FRLGNN75H05D653Z, che interviene nel presente atto in qualità di Titolare e Legale Rappresentante dell’Impresa Edile Fiorelli Costruzioni s.r.l. con sede in Visso (MC) in Loc. Molini di Croce n. 12 e numero di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Macerata n. 01541320436 che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamato per brevità “Appaltatore”.
PREMESSO
- che con contratto stipulato in data venti (20) maggio (05) 2015 (Rep.496) dell'importo di €. 148.954,66 al netto del ribasso d'asta del 33,00%, l'Impresa FIORELLI COSTRUZIONI S.R.L. ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui al titolo;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori diversi rispetto a quelli previsti inizialmente nel progetto principale;	
- che é stata redatta perizia di variante in data 28 febbraio 2018 dell'importo di €. 161.612,89 per lavori al netto del ribasso d'asta del 33,00%, sulla base dei prezzi del Capitolato Speciale di Appalto, facente parte del suddetto contratto e dei nuovi prezzi di cui al presente verbale; 
- rilevato che il maggiore importo netto dei lavori della suddetta perizia in data 28/02/2018 è di €. 12.658,23, risultante come segue:
Importo totale netto lavori di perizia ......................................€.	161.612,89	
Deducesi importo netto lavori di contratto .............................€.	148.954,66
Maggiore importo netto lavori di perizia ed importo
netto atto di sottomissione .....................................................€.	   12.658,23

TUTTO CIO' PREMESSO
i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Il Sig. Giovanni Fiorelli in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa FIORELLI COSTRUZIONI S.R.L. assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i nuovi lavori secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.
Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto in data 20/05/2015 Rep.496 ed agli stessi prezzi unitari netti in esso elencati oltre a quelli concordati nel presente verbale e che sono soggetti anch’essi al ribasso d’asta del 33,00%.
Art. 2 - L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a €. 161.612,89 (centosessantunomilaseicentododici euro e ottantanove centesimi) al netto del ribasso anzidetto, per cui risultano  €. 12.658,23 (dodicimilaseicentocinquantotto euro e ventitre centesimi) per maggiori lavori rispetto al citato contratto.
Art. 3 - Per effetto dell’esecuzione dei lavori in variante di che trattasi, il termine per l’ultimazione dei lavori fissato dall’art. 14 del capitolato speciale di appalto in giorni 210 (duecentodieci) è prorogato di giorni 40 (quaranta);
Art. 4 - Il Sig. Giovanni Fiorelli in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa FIORELLI COSTRUZIONI S.R.L. assume l'impegno di accettare i seguenti nuovi prezzi (NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6), sulla base dei prezzi elementari riportati nel contratto principale e concordati con la direzione dei lavori ai sensi dell’art. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e assoggettati al ribasso d'asta del 33,00 % e precisamente:
NP1	Pali trivellati fino m 20,00 (Rif. P.R.2012 01.20.001.002).
Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata.
Con diametro del palo cm 40. 
al metro lineare	Euro  41,59  (quarantuno euro e cinquantanove centesimi)
NP2	Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata (Rif. P.R.2012 11.03.001).
	Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi sparati o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno computati a parte.
	Maggiorazione del 25% per tagli fuori squadro su tutte le lamiere.
	al chilogrammo		Euro  3,30  (tre euro e trenta centesimi)
NP3	Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie (Rif. P.R.2012 11.01.005.001).
	Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
	Con profilati a freddo (compresi pressopiegati).
	al chilogrammo	Euro  2,98 (due euro e novantotto centesimi)
NP4	Parapetto provvisorio (Rif. P.R.2012 26.02.03.01.001), da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere .
	Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio
	al metro lineare	Euro  9,08 (nove euro e otto centesimi)
NP5	Parapetto provvisorio (Rif. P.R.2012 26.02.03.01.002), da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere .
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	al metro lineare	Euro  2,22 (due euro e ventidue centesimi)
NP6	Fornitura e posa in opera di parapetto da montare sulle teste dei muri di sostegno e/o bordo solette, costituito da aste metalliche zincate ancorate alla base con tasselli chimici o inghisate nel calcestruzzo, montate ad interasse non superiore a ml 1,80, dotato di tavola fermapiede e di due correnti in legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Sul parapetto dovrà essere fissata anche una rete di plastica di colore arancione per migliorarne la visibilità. Tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.
	al metro lineare	Euro  28,30  (ventotto euro e trenta centesimi)
Art. 4)-  Per effetto dei lavori suppletivi e delle diverse tipologie di lavoro relativi alla perizia di variante, il termine per l’ultimazione dei lavori, fissato in giorni 210 dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, viene prorogato di gg. 40 (quaranta) salvo sospensioni. 
Art. 5)-  Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A.. In caso di registrazione tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
Art. 6)-  In caso di controversie il presente atto è sin d’ora impegnativo per l’Assuntore, mentre lo sarà per l’Amministrazione solo dopo intervenuta approvazione di Legge.
           Letto, approvato e sottoscritto.
               La Ditta						   Il Responsabile del Servizio
..............................................     				....................................................

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

IL PRESIDENTE				IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI                       F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi  la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n. 267/2000) tramite elenco n. 1801 
del 25-02-2019

Li  25-02-2019               Reg. n.
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
      F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  25-02-2019 al 12-03-2019, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
Li,  13-03-2019
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
     						      F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-03-2019
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Li,  09-03-2019
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE      
      F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Li, 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
 	Galassi D.ssa Gabriella Maria