COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  178 DEL  24-10-18

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

ESAME  ED  APPROVAZIONE  PERIZIA DI VARIANTE OPERE
DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'AREA DEL CENTRO 
DI  RACCOLTA  DEL  COMUNE DI CASTELRAIMONDO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUSO INTERCOMUNALE"

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese
di ottobre alle ore 18:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

======================================================================

MARINELLI RENZO	SINDACO	P	
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P	
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	A	
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P	
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	P	

======================================================================

Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   4  Assenti n.   1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

PREMESSO CHE:
•	Con Decreto del Dirigente della P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale n. 145/CRB del 26/11/2014  con la quale, in riferimento alla D.G.R. n. 1085/2014, veniva  data la possibilità di accedere a finanziamenti  per la realizzazione di Centri del Riuso in varie aree della Regione Marche;
•	Il Comune di Castelraimondo con nota del 16 novembre 2015 aveva comunicato l’interesse a realizzare un centro di riuso interconnesso con il centro di raccolta differenziata ubicato in località Ele da porre a servizio anche  del comune di Camerino  e di altri Comuni appartenenti all’Unione Montana  Alte Valli del Potenza e dell’Esino di San Severino Marche;
•	L’assemblea Territoriale di Ambito dell’aTO3 Macerata, in data 21.12.2015 approvava con delibera n. 2 il cofinanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di centri di raccolta differenziata e centri per il riuso ad opera dei comuni o associazioni di Comuni.
•	Il Comune di Castelraimondo, quale capofila veniva inserito in graduatoria in relazione al progetto di centro per il riuso a servizio di vari comuni per l’importo complessivo di € 120.000,00;
•	Il costo dell’Intervento è stato quantificato in € 120.000,00 con una quota di accollo a carico dei Comuni pari al 20% del costo complessivo pari ad € 24.000,00;
•	Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 34 del 16/03/2016 è stata approvata la convenzione tra Comune di Castelraimondo, Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino ed il comune di Camerino per la realizzazione  di un centro per il riuso interconnesso con il centro di raccolta ubicato in località Ele di Castelraimondo;
•	Con Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino n. 24 del 25/02/2016 detto Ente ha approvato la suddetta convenzione;
•	Con Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Camerino n. 62 del 10/05/2016 detto Ente ha approvato la suddetta convenzione;
•	Che la suddetta convenzione prevede che:
	il Comune di Castelraimondo e Camerino cofinanzieranno il progetto con una somma di € 4.000,00 ciascuno e l’Unione Montana con € 16.000,00;
	il COSMARI effettuerà la progettazione e la Direzione lavori del centro del riuso;
•	Con Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Castelraimondo n. 176 del 20/10/2016 è stato approvato il progetto esecutivo di "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL’AREA DEL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI CASTELRAIMONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUSO INTERCOMUNALE", predisposto dal COSMARI, finanziato per € 96.000,00 con i fondi regionali di cui alle premesse e per il restante importo di € 24.000,00 con fondi propri delle Amministrazioni Comunali di Castelraimondo, Camerino e dell’Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino, per un importo totale di € 120.000,00, di cui € 78.790,06 per lavori, compresi € 3.237,93 per gli oneri di sicurezza, ed € 41.209,94 per somme a disposizione dell'Amm.ne Appaltante;
•	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 265 del 12/11/2016 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva e sono stati affidati i lavori all’Impresa NEFER S.R.L., con sede in Pievetorina (MC), Via P. Mattarella, n. 10, per un importo totale di € 56.218,86, di cui € 3.237,93 per gli oneri afferenti la sicurezza nel cantiere, oltre all'IVA, con un ribasso pari al 29,875%.
•	Con Determinazione del Settore Tecnico n. 309 del 09/10/2018 i lavori di realizzazione degli impianti elettrico e fotovoltaico, complementari alle opere di "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL’AREA DEL CENTRO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI CASTELRAIMONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUSO INTERCOMUNALE", sono stati affidati alla ditta NEFER S.R.L., ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 c. 2 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 14 del vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 24 del 27/07/2018, per un importo di contratto pari a € 15.219,82, oltre all'IVA, per un totale complessivo di € 16.741,80 – C.I.G. ZA7253B7FB;

CONSIDERATO CHE:
•	Durante lo svolgimento dei lavori, consegnati sotto le riserve di legge in data 22/11/2016, si è evidenziata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste in progetto e finalizzate al buon funzionamento e migliore utilizzo dell’opera: 
-	Spostamento del portone di ingresso sul prospetto principale;
-	Ampliamento dei servizi igienici sfruttando lo spazio del sottoscala;
-	Sostituzione dei pannelli di copertura in policarbonato con cupole nervate in doppia lastra di policarbonato coibentata opacizzata e con migliori caratteristiche termiche e di resistenza al fuoco;
•	Si è reso necessario concordare con l’Impresa n. 14 nuovi prezzi, tutti desunti dal prezzario della Regione Marche in vigore al momento dell’offerta, concordati con il Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 163 del Regolamento Generale dei LL.PP. di cui al DPR n. 207/2010 ed assoggettati al ribasso d’asta del 7,847%, puntualmente riportati nell’elenco nuovi prezzi di variante;
•	Sono state inoltre previste somme per lavori da affidarsi in economia da parte dell’Amministrazione, relativamente alle seguenti opere complementari, tutte finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua complessiva funzionalità: 
-	opere inerenti la realizzazione di un muro di contenimento della strada vicinale ubicata nel alto posteriore del fabbricato, così da migliorarne la funzionalità e la fruibilità degli spazi perinenziali;
-	sono state conseguentemente adeguate le somme relative alle imposte ed agli incentivi di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016.
•	si è pertanto resa necessaria la redazione di una perizia di variante, onde impegnare le risorse necessarie per eseguire maggiori e diversi lavori.

PRESO ATTO CHE la presente variante rientra nella tipologia del disposto del:
-	 D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lettera b) “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: (…) b) per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi”
-	D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 12 “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”

CONSIDERATO CHE a seguito delle variazioni introdotte l’importo netto contrattuale passa da € 56.218,86 ad € 66.912,44 con un incremento pari a circa il 19,02 % (diciannove virgola due %);

VISTI gli elaborati tecnici di variante, redatti dall’Ing. Fabio Conti, che si sostanziano in:
•	Relazione tecnica di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo di perizia di variante;
•	Elenco prezzi unitari di variante;
•	Q.T.E. di perizia di variante e raffronto Q.T.E. progetto/variante; 
•	Atto di sottomissione;
•	Tav. 6.1V: Planimetria generale stato modificato;
•	Tav. 6.2V: Piante e sezioni capannone industriale;
•	Tav. 6.3V: Prospetti;
qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

PRESO ATTO CHE il Quadro Tecnico economico di Perizia di variante prevede:
 	LAVORI	Variante	
A	IMPORTO DEI LAVORI	 	
1	Importo a base di gara	92 430,62	
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2 095,47	
3	Importo dei lavori	94 526,09	
 	 	 	
4	ribasso d' asta NEFER S.r.l.	29,875  	
5	importo del ribasso	27 613,65	
6	importo del contratto	66 912,44	
 	 	 	
B	SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI	 	
1	Impianto elettrico	15 219,82	
2	Impianto fotovoltaico 2,4 Kw		
3	Imprevisti	13 290,21	
4	Somme a disposizione		
5	Totale	28 510,03	
 	 	 	
C	SOMME A DISPOSIZIONE PRESTAZIONI	 	
1/a	Progettazione, Direzione dei lavori, Contabilità, coordinamento sicurezza	9 050,22	
1/b	Incentivi R.U.P. art. 113 D.Lgs. 50/2016	987,77	
2	Collaudo	600,00	
3	Cassa previdenziale 4%	386,01	
4	Relazione Geologica	1 000,00	
5	Prove sui materiali	300,00	
6	Totale	12 324,00	
 	 	 	
D	Totale somme a disposizione Amministrazione	40 834,03	
 	 	 	
E	IVA	 	
1	Iva 22% su prestazioni	2 711,28	
2	Iva 10% su lavori	9 542,25	
3	Importo Totale IVA	12 253,53	
		 	
F	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	120 000,00	

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i nonché il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;

PROPONE

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare gli elaborati tecnici di variante, redatti dall’Ing. Fabio Conti, che si sostanziano in:
•	Relazione tecnica di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo di perizia di variante;
•	Elenco prezzi unitari di variante;
•	Q.T.E. di perizia di variante e raffronto Q.T.E. progetto/variante; 
•	Atto di sottomissione;
•	Tav. 6.1V: Planimetria generale stato modificato;
•	Tav. 6.2V: Piante e sezioni capannone industriale;
•	Tav. 6.3V: Prospetti;
qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico, che prevede un importo totale di Euro 120.000,00, come appresso distinto: 
 	LAVORI	Variante	
A	IMPORTO DEI LAVORI	 	
1	Importo a base di gara	92 430,62	
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2 095,47	
3	Importo dei lavori	94 526,09	
 	 	 	
4	ribasso d' asta NEFER S.r.l.	29,875  	
5	importo del ribasso	27 613,65	
6	importo del contratto	66 912,44	
 	 	 	
B	SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI	 	
1	Impianto elettrico	15 219,82	
2	Impianto fotovoltaico 2,4 Kw		
3	Imprevisti	13 290,21	
4	Somme a disposizione		
5	Totale	28 510,03	
 	 	 	
C	SOMME A DISPOSIZIONE PRESTAZIONI	 	
1/a	Progettazione, Direzione dei lavori, Contabilità, coordinamento sicurezza	9 050,22	
1/b	Incentivi R.U.P. art. 113 D.Lgs. 50/2016	987,77	
2	Collaudo	600,00	
3	Cassa previdenziale 4%	386,01	
4	Relazione Geologica	1 000,00	
5	Prove sui materiali	300,00	
6	Totale	12 324,00	
 	 	 	
D	Totale somme a disposizione Amministrazione	40 834,03	
 	 	 	
E	IVA	 	
1	Iva 22% su prestazioni	2 711,28	
2	Iva 10% su lavori	9 542,25	
3	Importo Totale IVA	12 253,53	
		 	
F	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	120 000,00	

4) Di dare atto che l'importo complessivo del progetto ammonta ad Euro 120.000,00 e pertanto la presente variante trova copertura nella somma già stanziata.

5) Di approvare l’Atto di sottomissione.

6) Di demandare al Responsabile del Procedimento l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente deliberazione.

7) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, li 24/10/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
		Ing. Gian Mario Brancaleoni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

E S P R I M E
sotto la propria responsabilità:
- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile,  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, lì 24/10/2018

                        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
                                     Dott.ssa Paola Cingolani

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti,  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49  del  D.Lgs. 267/00,  sulla  citata  proposta:
- dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto  riguarda  la regolarita' tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità contabile;
All'unanimita` dei voti espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare gli elaborati tecnici di variante, redatti dall’Ing. Fabio Conti, che si sostanziano in:
•	Relazione tecnica di perizia di variante;
•	Computo metrico estimativo di perizia di variante;
•	Elenco prezzi unitari di variante;
•	Q.T.E. di perizia di variante e raffronto Q.T.E. progetto/variante; 
•	Atto di sottomissione;
•	Tav. 6.1V: Planimetria generale stato modificato;
•	Tav. 6.2V: Piante e sezioni capannone industriale;
•	Tav. 6.3V: Prospetti;
qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico, che prevede un importo totale di Euro 120.000,00, come appresso distinto: 
 	LAVORI	Variante	
A	IMPORTO DEI LAVORI	 	
1	Importo a base di gara	92 430,62	
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2 095,47	
3	Importo dei lavori	94 526,09	
 	 	 	
4	ribasso d' asta NEFER S.r.l.	29,875  	
5	importo del ribasso	27 613,65	
6	importo del contratto	66 912,44	
 	 	 	
B	SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI	 	
1	Impianto elettrico	15 219,82	
2	Impianto fotovoltaico 2,4 Kw		
3	Imprevisti	13 290,21	
4	Somme a disposizione		
5	Totale	28 510,03	
 	 	 	
C	SOMME A DISPOSIZIONE PRESTAZIONI	 	
1/a	Progettazione, Direzione dei lavori, Contabilità, coordinamento sicurezza	9 050,22	
1/b	Incentivi R.U.P. art. 113 D.Lgs. 50/2016	987,77	
2	Collaudo	600,00	
3	Cassa previdenziale 4%	386,01	
4	Relazione Geologica	1 000,00	
5	Prove sui materiali	300,00	
6	Totale	12 324,00	
 	 	 	
D	Totale somme a disposizione Amministrazione	40 834,03	
 	 	 	
E	IVA	 	
1	Iva 22% su prestazioni	2 711,28	
2	Iva 10% su lavori	9 542,25	
3	Importo Totale IVA	12 253,53	
		 	
F	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	120 000,00	

4) Di dare atto che l'importo complessivo del progetto ammonta ad Euro 120.000,00 e pertanto la presente variante trova copertura nella somma già stanziata.

5) Di approvare l’Atto di sottomissione.

6) Di demandare al Responsabile del Procedimento l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente deliberazione.

7) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000  e s.m.i.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO                          IL SEGRETARIO 
F.to MARINELLI RENZO   F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale.
Li, 29-10-18                                    Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-
gittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li  29-10-18             Prot. N.             Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione         f.to  BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to  GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA'   
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.
( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000; 
( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;  
Li,                                           Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA
----------------------------------------------------------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati vizi di legittimità
dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134,
comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          perché confermata dal Consiglio,con atto n.      .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.
Li                                            Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO
----------------------------------------------------------------------
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 29-10-18 al 13-11-18 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                   Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO